гражданское дело № 2-398/2025

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

город Абаза 21 августа 2025 года

Абазинский районный суд Республики Хакасия в составе председательствующего – судьи Абумова В.Ю. при секретаре судебного заседания Мазановой А.С. с участием представителя процессуального истца ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Таштыпского района Республики Хакасия, действующего в интересах неопределенного круга лиц, к администрации города Абазы об обязании совершить определенные действия,

УСТАНОВИЛ:

прокурор указал, что в рамках прокурорского надзора за исполнением законов в жилищно-коммунальной сфере, установлено, что ООО «Абаза-Энерго» постановлением администрации г. Абазы от 03.08.2021 № 364 определена гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования г. Абазы.

Постановлением администрации г. Абазы № 47 от 27.01.2022 единой теплоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения правобережной части города Абазы определено ООО «Абаза-Энерго». 

Тепло- и водоснабжение осуществляется посредством использования муниципальной собственности города, а именно тепло- и водосетей. 

Договором аренды от 04.07.2022 № 15-2022/7020501005207 отдельные объекты системы теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в аренду ООО «Абаза-Энерго». 

Договором аренды, заключенным между Отделом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абазы и ООО «Абаза-Энерго» от 26.09.2023 № 51-2023, водопроводные сети переданы в аренду последнему. 

Согласно договорам аренды арендатор (ООО «Абаза-Энерго») в пределах средств, установленных в тарифе на соответствующий период регулирования, обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт. В то же время в тарифе средства на осуществление капитального ремонта не предусмотрены. 

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества. 

Таким образом, администрация г. Абазы несет бремя за надлежащее содержание имущества, находящегося в ее собственности, а также обязанности по осуществлению капитального ремонта этого имущества.

Согласно акту № 1 от 02.10.2024 качественных и количественных характеристик дефектов по объекту «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения муниципального образования город Абаза», утвержденного главой г. Абазы:

- на ул. Ленина, д. 1В (46 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 2-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Ленина, д. 24 (252,7 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 8-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Ленина, д. 20 (128 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за периодического затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 4-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Ленина, д. 26-28 (125 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная язвенная коррозия, нарушение целостности 4-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Ленина в районе д/с «Аленка» (229,6 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 23-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- от ул. Рудная, д. 69 до ул. Мира, д. 21 (160 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за постоянного затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 6-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Рудная, д. 59-69 (268,3 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за постоянного затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 9-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Фестивальная (106 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за периодического затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 36-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- от ул. Рыночная до ул. Фестивальная (86 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 9-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Набережная, д. 8А (36 м. сетей теплоснабжения) на трубах локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 2-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Осипенко, д. 1А (175,6 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за периодического затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 4-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Пушкина (79,5 м. сетей теплоснабжения) на трубах локальная наружная коррозия, нарушение целостности 8-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. ТЭЦ д. 4-6 (190,5 м. сетей теплоснабжения) на трубах локальная наружная коррозия, нарушение целостности 19-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Больничная, д. 9А (86 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 5-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Больничная, д. 14-16 (107 м. сетей теплоснабжения) нарушение целостности 9-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Гагарина, д. 5 (148 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 9-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Герцена, д. 2-4 (103 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается коррозия из-за периодического затопления сточными водами до контакта с теплоизоляционной конструкцией, локальная внутренняя коррозия, нарушение целостности 3-х плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Рыночная, д. 10 (12 м. сетей теплоснабжения) нарушение целостности 1-ой плиты перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на ул. Кулакова, д. 83А (61 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается сплошная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 5-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- на пр. 2-ой Парковый (202 м. сетей теплоснабжения) на трубах наблюдается локальная наружная коррозия из-за длительной утечки сетевой воды из поврежденного участка, наблюдается локальная внутренняя язвенная коррозия, нарушение целостности 7-и плит перекрытия канала в виде сколов, трещин, раковин, рыхлой структуры, оголения арматуры;

- от ул. Рудная, д. 69 до ул. Мира, д. 21 (160 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Рудная, д. 59-69 (268,3 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Фестивальная (106 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Осипенко, д. 1А (175,6 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Пушкина (79,5 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Больничная, д. 9А (86 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Больничная, д. 14-16 (107 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Гагарина, д. 5 (148 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Герцена, д. 2-4 (103 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на ул. Рыночная, д. 10 (12 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы;

- на пр. 2-ой Парковый (202 м. сетей холодного водоснабжения) необходима замена стальных труб на полиэтиленовые трубы.

Выявленные при проверке дефекты возможно устранить лишь при капитальном ремонте либо из замене. 

Вместе с тем, администрацией г. Абазы до настоящего времени меры к замене указанного участка теплотрассы не приняты. Указанные причины в виде отсутствия денежных средств не снимают обязанности по исполнению возложенных на администрацию г. Абазы обязанностей по содержанию коммунальной инфраструктуры. 

Изложенное свидетельствует о том, что администрация г. Абазы, являясь собственником сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, своевременные и действенные меры, направленные на проведение капитального ремонта сетей и, как следствие, бесперебойную поставку тепловой энергии, а также горячего водоснабжения, с учетом существенного износа сетей, не приняла.

Несвоевременное устранение повреждений способствует возникновению риска прекращения тепло- и водоснабжения близлежащих домов, а также объектов социальной инфраструктуры, таких как образовательных, лечебных, культурных учреждений, расположенных в районах указанных участков сетей.

Кроме того, возникает риск неполучения паспорта готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Ввиду того, что данные участки сети обеспечивают теплоснабжением и водоснабжением население г. Абазы, проживающее вблизи указанных улиц, а также образовательные, лечебные, культурные учреждения, непроведение мероприятий по устранению дефектов и повреждений нарушает права неопределенного круга лиц на получение качественной коммунальной услуги, создает угрозу жизни, здоровью и имуществу граждан.

Просит обязать ответчика в срок до 30.06.2026 провести капитальный ремонт или замену сетей водоснабжения и теплоснабжения в г. Абазе по улицам:

- от ул. Рудная, д. 69 до ул. Мира, д. 21 (160 м. сетей теплоснабжения и 160 м. водоснабжения);

- на ул. Рудная, д. 59-69 (268,3 м. сетей теплоснабжения и 268,3 м. водоснабжения);

- на ул. Фестивальная (106 м. сетей теплоснабжения и 106 м. водоснабжения);

- на ул. Осипенко, д. 1А (175,6 м. сетей теплоснабжения и 175,6 м. водоснабжения;

- на ул. Пушкина (79,5 м. сетей теплоснабжения и 79,5 м. сетей водоснабжения);

- на ул. Больничная, д. 9А (86 м. сетей теплоснабжения и 86 м. водоснабжения);

- на ул. Больничная, д. 14-16 (107 м. сетей теплоснабжения и 107 м. водоснабжения);

- на ул. Гагарина, д. 5 (148 м. сетей теплоснабжения и 148 м. водоснабжения);

- на ул. Герцена, д. 2-4 (103 м. сетей теплоснабжения и 103 м. водоснабжения);

- на ул. Рыночная, д. 10 (12 м. сетей теплоснабжения и 12 м. водоснабжения);

- на пр. 2-ой Парковый (202 м. сетей теплоснабжения и 202 м. водоснабжения),

а также в тот же срок обязать ответчика провести капитальный ремонт или замену сетей теплоснабжения в г. Абазе по улицам: 

- на ул. Ленина, д. 1В (46 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 24 (257,7 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 20 (128 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 26-28 (125 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина в районе д/с «Аленка» (229,6 м. сетей теплоснабжения);

- от ул. Рыночная до ул. Фестивальная (86 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Набережная, д. 8А (36 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. ТЭЦ д. 4-6 (190,5 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Кулакова, д. 83А (61 м. сетей теплоснабжения).

В судебном заседании представитель истца заявленные требования поддержал. 

Представители ответчика, третьего лица, надлежаще уведомленные о месте и времени судебного заседания, в суд не явились, представитель ответчика по доверенности ФИО2 в письменном ходатайстве просила рассмотреть дело в ее отсутствие, учесть, что в рамках соглашения от 24.07.2025 из республиканского бюджета Хакасии в 2025-2027 гг. бюджету МО г. Абаза будут предоставлены субсидии на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. 

На основании ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено при имеющейся явке.

Исследовав дело, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к следующему.

В силу Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения в границах городского поселения относятся тепло, водоснабжение населения, водоотведение.

Согласно ч. 1 ст. 51 указанного Закона, органы местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органом местного самоуправления.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон № 416) к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся организация водоснабжения населения, в т.ч. принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств. 

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, обязаны обеспечивать горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение, осуществлять иную регулируемую деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения путем эксплуатации централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, централизованных систем водоотведения или отдельных объектов таких систем в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона (ч. 1 ст. 8 Закона № 416).

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Закона № 416 собственники и иные законные владельцы централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, нецентрализованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и их отдельных объектов, организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

В силу ст. 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Закон № 190) к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относятся организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей на территориях поселений, в т.ч. принятие мер по организации обеспечения теплоснабжения потребителей в случае неисполнения теплоснабжающими организациями или теплосетевыми организациями своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств.

Согласно п. 8 ст. 20 Закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» теплоснабжающие и тепловые организации обязаны обеспечить надежное теплоснабжение потребителей.

Пунктом 16.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115 (далее – Приказ № 115), определено, что основными задачами является разработка мероприятий по восстановлению работоспособности поврежденного оборудования, предупреждению подобных нарушений в его работе, повышению ответственности эксплуатационного персонала и другого персонала организаций, на которых произошло нарушение, а также персонала других организаций, отвечающих за обеспечение бесперебойного и надежного теплоснабжения.

Постановлением Главы города Абазы от 03.08.2021 № 364 ООО «Абаза-Энерго» признано гарантирующей организацией в сфере холодного водоснабжения и водоотведения левобережной и правобережной части территории муниципального образования г. Абаза.

Постановлением и.о. Главы города Абазы № 47 от 27.01.2022 ООО «Абаза-Энерго» определено единой теплоснабжающей организацией в сфере теплоснабжения правобережной части города Абазы. 

ООО «Абаза-Энерго» теплоснабжение и водоснабжение осуществляет посредством использования муниципальной собственности города – тепло- и водосетей.

Договором аренды от 04.07.2022 № 15-2022/7020501005207, заключенным между Отделом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза и ООО «Абаза-Энерго», отдельные объекты системы теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности, переданы в аренду ООО «Абаза-Энерго». 

Договором аренды от 26.09.2023 № 51-2023/7020501005284, заключенным между Отделом по управлению муниципальным имуществом муниципального образования г. Абаза и ООО «Абаза-Энерго», отдельные объекты водопроводных сетей переданы в аренду последнему. 

Согласно договорам аренды арендатор в пределах средств, установленных в тарифе на соответствующий период регулирования, обязан поддерживать имущество в исправном состоянии, своевременно производить за свой счет текущий и капитальный ремонт. 

В то же время в тарифе средства на осуществление капитального ремонта не предусмотрены.

В соответствии со ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества.

Таким образом, администрация г. Абазы несет бремя за надлежащее содержание имущества, находящегося в ее собственности, а также обязанности по осуществлению капитального ремонта этого имущества.

Согласно акту № 1 от 02.10.2024 качественных и количественных характеристик дефектов по объекту «Капитальный ремонт сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения муниципального образования город Абаза», утвержденного Главой г. Абазы, в ходе комиссионного осмотра установлены дефекты сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения МО г. Абаза левобережной части города, перечисленные в исковом заявлении прокурора.

По соглашению о предоставлении в 2025-2027 годах субсидий из республиканского бюджета Республики Хакасии бюджету муниципального образования город Абаза Республики Хакасия на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры № 95702000-1-2025-011 от 24.07.2025, Администрации городского округа города Абазы Республики Хакасия в 2025-2027 гг. будут предоставлены субсидии в соответствии с лимитами бюджетных обязательств в целях достижения результатов федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» и результатов регионального проекта Республики Хакасия «Модернизация коммунальной инфраструктуры» в рамках государственной программы Республики Хакасия «Развитие коммунальной инфраструктуры Республики Хакасия и обеспечение качественных жилищно-коммунальных услуг», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 30.10.2017 № 556. 

Общий объем бюджетных ассигнований, в целях которых предоставляется субсидия, составляет: в 2025 году – 12 864 080 рублей, в 2026 году – 22 466 390 рублей, в 2027 году – 0 рублей (п. 2.1 Соглашения). 

Поскольку в судебном заседании установлен факт наличия существенных дефектов городских сетей тепло- и водоснабжения, именно на ответчика возложена обязанность по проведению капитального ремонта сетей, требования, предъявленные прокурором к администрации города Абазы об обязании произвести капитальный ремонт или замену аварийных сетей, являются обоснованными, подлежащими удовлетворению в части проведения капитального ремонта сетей, поскольку непроведение таких мероприятий нарушает права неопределенного круга лиц на получение качественных коммунальных услуг, создает угрозу жизни, здоровью, имуществу граждан. 

С учетом большого количества аварийных сетей, а также того, что процесс капитального ремонта является трудоемким и финансово затратным, требующим планирования расходов и включению их в бюджет муниципального образования, принимая во внимание позицию представителя истца, не возражавшего против увеличения срока по устранению нарушений и исполнения решения суда, суд считает необходимым установить срок исполнения обязанности для ответчика по капитальному ремонту дефектов сетей до 31.07.2027.

При возникновении препятствий для исполнения решения в такой срок ответчик не лишен возможности обращения в суд за отсрочкой исполнения решения.

Руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковые требования прокурора Таштыпского района Республики Хакасия удовлетворить частично.

Обязать Администрацию г. Абазы в срок до 31.07.2027 провести капитальный ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения в г. Абазе по улицам:

- от ул. Рудная, д. 69 до ул. Мира, д. 21 (160 м. сетей теплоснабжения и 160 м. водоснабжения);

- на ул. Рудная, д. 59-69 (268,3 м. сетей теплоснабжения и 268,3 м. водоснабжения);

- на ул. Фестивальная (106 м. сетей теплоснабжения и 106 м. водоснабжения);

- на ул. Осипенко, д. 1А (175,6 м. сетей теплоснабжения и 175,6 м. водоснабжения;

- на ул. Пушкина (79,5 м. сетей теплоснабжения и 79,5 м. сетей водоснабжения);

- на ул. Больничная, д. 9А (86 м. сетей теплоснабжения и 86 м. водоснабжения);

- на ул. Больничная, д. 14-16 (107 м. сетей теплоснабжения и 107 м. водоснабжения);

- на ул. Гагарина, д. 5 (148 м. сетей теплоснабжения и 148 м. водоснабжения);

- на ул. Герцена, д. 2-4 (103 м. сетей теплоснабжения и 103 м. водоснабжения);

- на ул. Рыночная, д. 10 (12 м. сетей теплоснабжения и 12 м. водоснабжения);

- на пр. 2-ой Парковый (202 м. сетей теплоснабжения и 202 м. водоснабжения).

Обязать Администрацию г. Абазы в срок до 31.07.2027 провести капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Абазе по улицам: 

- на ул. Ленина, д. 1В (46 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 24 (257,7 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 20 (128 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина, д. 26-28 (125 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Ленина в районе д/с «Аленка» (229,6 м. сетей теплоснабжения);

- от ул. Рыночная до ул. Фестивальная (86 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Набережная, д. 8А (36 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. ТЭЦ д. 4-6 (190,5 м. сетей теплоснабжения);

- на ул. Кулакова, д. 83А (61 м. сетей теплоснабжения).

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме путем подачи апелляционных представления, жалобы через Абазинский районный суд.

Мотивированное решение принято 4 сентября 2025 года. 

Председательствующий В.Ю. Абумов