Дело № 2-1080/2017 10 июля 2017 года

ЗАОЧНОЕ 

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

г.Кировск Ленинградская область 

Кировский городской суд Ленинградской области 

в составе председательствующего судьи Пупыкиной Е.Б., 

при секретаре судебного заседания Вихровой Е.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору и техническое условия,

установил:

ПАО «Ленэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1, ссылаясь на то, что 12.03.2013 между ним (сетевая организация) и ответчиком заключен договор об осуществлении технологического присоединения жилого дома по адресу: 

<

адрес> по которому сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика в срок 6 месяцев со дня заключения договора, а ФИО1 обязался исполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка, указанные в технических условиях, после чего уведомить сетевую организацию, принять участие в осмотре присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организации. В соответствии с техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора технологического присоединения, ответчик обязан смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения, смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии, предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. Дополнительным соглашением от 27.12.2016 срок действия договора продлен до 31.03.2017. Со стороны сетевой организации все необходимые мероприятия выполнены, о чем неоднократно сообщалось ответчику. Ответчик, не отказываясь в одностороннем порядке от исполнения договора, свои обязательства не исполняет. Ссылаясь на ст. 12 ГК РФ, полагая, что в силу заключенного между ним и ответчиком договора, имеет право требовать исполнения обязательств, предусмотренных п. 8 договора – по надлежащему исполнению технических условий и уведомления об этом, просит обязать ФИО1 в срок 1 месяц со дня вынесения решения исполнить обязательства, предусмотренные п. 8 договора № № от 12.03.2013 и технические условия, являющиеся приложением к нему, а именно: 

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

- смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. 

Взыскать с ФИО1 судебные расходы по уплате госпошлины 6000 руб. (л.д. 2-5).

Представитель истца в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен, просил рассматривать дело в свое отсутствие.

Ответчик в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен по месту регистрации, на основании ст. 118 ГПК РФ судебное извещение считается ему доставленным, что позволяет суду в соответствии с п. 4 ст. 167 и ст. 233 ГПК РФ рассмотреть дело в его отсутствие в порядке заочного производства. 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующему. 

В соответствии с положениями статей 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

Согласно п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством РФ, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 п. 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации.

В соответствии с пунктами 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения, сетевая организация обязана заключить договор технологического присоединения с физическими лицами, обратившимися с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или ином предусмотренном законом основании, и мощность которых составляет до 15 кВт.

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Как следует из материалов дела и установлено судом, между истцом ПАО «Ленэнерго» (сетевая организация) и ФИО1 (заявитель) заключен договор №№ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с которым сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, вводное энергопринимающее устройство, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики) с учетом характеристик:

- максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, 

-категория надёжности 3;

-класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение 0,4 кВт;

-максимальная мощность ранее присоединённых энергопринимающих сетей 3,5 кВт, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора; технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес> (л.д. 7-11).

Согласно пункту 10 указанного договора, размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Приказом Комитета по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области от 25.02.2011 № 22-п и составляет 550 рублей.

Пунктом 5 указанного договора определен шестимесячный срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению с момента заключения настоящего договора.

В соответствии с пунктами 10.1, 10.2 технических условий, являющихся приложением № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения, сетевая организация осуществляет на Л-1 от ТП-3717 от РУ-0,4кВ до оп. № 3 и в пролетах опор № 3-27, 27-29, 29-31, 31-33 замену существующего провода А-50 на провод СИП 4 4х70+1х25 кв.мм обще протяженностью 255 м. На -1 от ТП-3717 замену существующих опор № 1-3, 27, 29, 31, 33 на новые железобетонные опоры СВ-95 в количестве 7 шт.

В силу пунктов 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 технических условий ответчик обязуется:

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

- смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами (л.д. 12-13).

Дополнительным соглашением № 1 от 29.02.2016, заключенным между сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, срок действия договора продлен до 31.12.2016 (л.д. 14).

15 декабря 2016 года ответчику было направлено уведомление об исполнении технических условий со стороны сетевой организации (л.д. 17).

Дополнительным соглашением от 27.12.2016 стороны договорились о продлении срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению до 31.03.2017 и подтвердили выполнение со стороны сетевой организации мероприятий, предусмотренных техническими условиями (л.д. 15). 

05 апреля 2017 года ПАО «Ленэнерго» направило досудебную претензию ФИО1 о необходимости выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и уведомить сетевую организацию об их выполнении (л.д. 18-19). Однако данная претензия осталась без ответа. 

Согласно п. 85 Правил технологического присоединения для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов:

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации;

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний;

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

В соответствии с абз. 8 ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации одним из способов защиты нарушенного права является присуждения к исполнению обязанности в натуре. Указанный способ защиты нарушенного права подлежит применению в том случае, когда должник обязан выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося обязательства. При этом ответчик на момент предъявления соответствующего требования должен иметь реальную возможность для его исполнения.

В ходе судебного разбирательства ответчиком доказательств, свидетельствующих о выполнении им технических условий, либо объективной невозможности исполнить обязательство, возложенное на него в силу договора, представлено не было, в связи с чем суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом требований.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая вышеприведенную норму права, суд устанавливает срок для исполнения решения суда – месяц со дня вступления решения суда в законную силу.

В связи с принятием судом решения об удовлетворении заявленных требований, в силу ст. 98 ГПК РФ, ходатайство истца о взыскании с ответчика судебных расходов на уплату государственной пошлины в размере 6000 руб. 00 коп. подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования ПАО «Ленэнерго» к ФИО1 об обязании исполнить обязательства по договору и техническое условия удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательства, предусмотренные п. 8 договора от 12.03.2013№ № технологического присоединения электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, и технические условия, являющиеся приложением к нему, а именно: 

- смонтировать энергопринимающее устройство на границе земельного участка не далее 25 м от точки присоединения,

-смонтировать устройство релейной защиты и устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности на границе земельного участка, 

-разработать и предоставить схему электроснабжения объекта с указанием точек поставки и точек учета электрической энергии,

- предъявить к осмотру присоединяемые энергопринимающие устройства в соответствии с действующими нормативными документами. 

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Ленэнерго» государственную пошлину в размере в размере 6 000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Ответчик вправе подать в Кировский городской суд Ленинградской области заявление об отмене заочного решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано также в апелляционном порядке в Ленинградский областной суд в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.Б. Пупыкина