Дело №2-1833/17

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

27 марта 2017 года г. Калининград

Ленинградский районный суд г. Калининграда в составе: 

председательствующего судьи Дорошенко О.Л.

при секретаре Коноплевой Е.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Акционерному обществу «Янтарьэнерго» об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании морального вреда, неустойки, штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд исковым заявлением к Открытому акционерному обществу «Янтарьэнерго» с требованием об обязании исполнить обязательства по договору, взыскании морального вреда, неустойки, штрафа, указав, что между истцом и ОАО «Янтарьэнерго» ДД.ММ.ГГГГ. был заключен договор № технологического присоединения к электрическим сетям (далее - Договор) и выданы технические условия № от ДД.ММ.ГГГГ в соответствии с которыми должно быть произведено присоединение к электрическим сетям.

Размер оплаты за указанное присоединение в соответствии с Договором составляет 

<

данные изъяты>.

Ответчик в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ принял на себя обязательство осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объекта недвижимости заявителя), однако несмотря на многочисленные претензии и уведомление, дважды направленное в адрес ответчика ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ, о выполнении с его стороны технических условий, до настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены. В связи с чем, истцом были направлены претензии с требованиями об исполнении ответчиком обязательств по Договору, в ответ на которые истец получал пояснения, что Договор не выполняется со стороны истца. Истец считает, что строительство дома на земельном участке не представляется возможным по причине отсутствия промышленного электричества, необходимого для выполнения строительных работ.

В связи с нарушением ответчиком прав истца, как потребителя, ониспытал сильнейший эмоциональный стресс, последствием которого стали сильные переживания, бессонные ночи, повышенная раздражительность, постоянная головная боль, повышение артериального давления, частые кровотечения из носа. Врачами констатирован диагноз «невроз», ранее симптомы этого заболевания у него не наблюдались. Таким образом, незаконными действиями ответчика ему причинен моральный вред, денежную компенсацию которого он оценивает в 

<

данные изъяты> рублей, полагая, что данная сумма является разумной и справедливой с учетом всех фактических обстоятельств, нравственных и физических страданий, а также степени вины ответчика.

Кроме того, в связи с нарушением сроков исполнения обязательств, ответчик обязан уплатить истцу неустойку по договору, которую истец рассчитал по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ, что составило 

<

данные изъяты> исходя из расчета: 

<

данные изъяты> дней просрочки.

На основании изложенного и руководствуясь Законом Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), истец просил суд:

1. Обязать в кратчайший срок открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Янтарьэнерго" исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

2. Взыскать ОАО "Янтарьэнерго" неустойку по договору от ДД.ММ.ГГГГ № (расчет по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ) в размере 

<

данные изъяты> руб.,

3.Взыскать ОАО "Янтарьэнерго" компенсацию морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб.,

4.Взыскать ОАО "Янтарьэнерго" штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя (заявителя), а также сумму уплаченной государственной пошлины за обращение в суд.

Истец и представитель третьего лица ООО «Госстройинвест» в судебное заседание не явились, извещены надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, истец просил рассматривать дело в свое отсутствие, представитель третьего лица сведений об уважительных причинах неявки суду не сообщил. 

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 возражала в удовлетворении исковых требований, указав, что обязательства, предусмотренные договором технологического присоединения, ОАО Янтарьэнерго выполнены. Ответчик готов выполнить условия договора и осуществить технологическое присоединение энергопринимающего устройство истца, однако до настоящего времени ФИО1 не представлено документов, подтверждающих выполнение им технических условий и наличие возможности технологического присоединения. Направленное им по адресу электронной почты уведомление о выполнении ТУ электронно-цифровой подписью не подписано; документов, подтверждающих монтаж электросети от точки присоединения до ВРУ или КЛ согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями не приложено.

Выслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. 

В п. 1 ст.307 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ) предусмотрено, что в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

Согласно пункту 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 указанных Правил сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств.... срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать: шесть месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВт включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Согласно пункту 18 Правил мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией; проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий; осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора при участии сетевой организации и собственника таких устройств. 

Пунктом 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 861) предусмотрено, что для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с приложением следующих документов: а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной); в) документы, содержащие информацию о результатах проведения пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений (электроустановки).

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заказчика к электрическим сетям возможно только после выполнения заказчиком своих обязательств по договору и техническим условиям.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ОАО «Янтарьэнерго» ( именуемое сетевая организация) и ФИО1 (именуемый заявитель) был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №. Неотъемлемой частью данного договора являются технические условия №.

Согласно пункту 2 Договора технологическое присоединение необходимо для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №.

В п. 3 Договора предусмотрено, что точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям, располагается на расстоянии 25 метров от границы участка заявителя, на котором будет располагаться присоединяемый объект заявителя.

Согласно пункту 5 Договора срок выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения договора.

Однако, пункт 8 Договора предусматривает исполнение обязанностей заявителем, необходимых для осуществления технологического присоединения, в том числе:

- по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- уведомление сетевой организации о выполнении технических условий;

- принятие сетевой организацией участия в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя.

При этом, пункт 11 Технических условий № предусматривает конкретные обязанности на стороне ФИО1, необходимые для осуществления технологического присоединения, а именно:

- обязанность произвести монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности; работы выполнить в соответствии с разработанным проектом; на вводном устройстве установить автоматический выключатель с номинальным током теплового расцепителя в соответствии с расчетной мощностью;

- обязанность установить приборы учета для расчетов за электроэнергию в соответствии с требованиями ПУЭ, устройство, обеспечивающее контроль величины максимальной мощности.

В связи с принятием Закона N 99-ФЗ от 05.05.2014г., ОАО «Янтарьэнерго» с ноября 2014г. стало именоваться акционерным обществом (АО) «Янтарьэнерго».

Таким образом, из вышеуказанных доказательств следует, что выполнение сетевой организацией АО «Янтарьэнерго» своих обязательств по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям возможно только при условии выполнения заявителем обязательств, предусмотренных п.8 Договора и п.11 Технических условий.

Причем из буквального содержания технических условий следует, что действия заявителя, указанные в п.11 Технических условий должны предшествовать непосредственному технологическому присоединению его энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Письмом от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 уведомлен АО Янтарьэнерго о готовности ответчика осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств истца.

Однако достоверных и допустимых доказательств выполнения истцом Технологических условий для присоединения к электрическим сетям в границах участка, монтаж электросети от точки присоединения (через ЩВУ) до ВРУ 0,4 кВ объекта СИП или КЛ соответствующей пропускной способности, а также документов, свидетельствующих о наличии самого объекта технологического присоединения - жилого дома по адресу 

<

адрес>, к.н. № с наличием в нем энергопринимающих устройств и приборов учета электроэнергии в соответствии с требованиями ст. 56 ГПК РФ не представлено.

Направление ФИО1 в адрес ответчика формы уведомления о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ без приложения необходимых документов не свидетельствуют о выполнении истцом условий договора и Правил.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии готовности энергопринимающих устройств истца к технологическому присоединению к электрическим сетям АО «Янтарьэнерго».

Следовательно, в удовлетворении требований истца об обязании ответчика в кратчайший срок исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям надлежит отказать

Учитывая, что судом отказано в удовлетворении основного требования истца об обязании ответчика в кратчайший срок исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, следовательно в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки по договору от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 

<

данные изъяты> руб., компенсации морального вреда в размере 

<

данные изъяты> руб. и штрафа в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, - надлежит отказать по тем же основаниям, а также в связи с отсутствием допущенных ответчиком нарушений прав истца, как потребителя, на основании заключенного с ним Договора. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к Акционерному обществу «Янтарьэнерго» об обязании в кратчайший срок исполнить обязательства по договору от ДД.ММ.ГГГГ № об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа - отказать.

Решение может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Калининградский областной суд через Ленинградский районный суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья: Дорошенко О.Л.