Дело № 2-1551/2024

16RS0050-01-2023-013035-57

2.211

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

09 февраля 2024 года

Приволжский районный суд города Казани Республики Татарстан

в составе председательствующего судьи И.А. Яруллина,

при секретаре судебного заседания А.Х. Арслановой,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Россети Московский регион» к ФИО1 о взыскании задолженности по техническим условиям (договорам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Московский регион» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании задолженности по техническим условиям (договорам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в обоснование указав, что между истцом и ответчиков заключены технические условия об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил. Согласно пункту 10 сетевая организация выполняет мероприятия за счет средств платежей за технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя и осуществляет технологическое присоединение комплекса оборудования заявителя, а именно строящихся жилых домов в количестве 18 штук, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения строящихся жилых домов в количестве 18 штук, расположенных по адресу: 

<

адрес> В соответствии с пунктом 14 технических условий, размер платы за технологическое присоединение к каждому договору, определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 ноября 2022 года № 215-Р и составляет 53 076,64 рублей, в том числе НДС (20%) 8 846,11 рублей. Согласно пункту 104 правил технологического присоединения датой заключения договора считается дата внесения денежных средств заявителя. ФИО1 внесены денежные средства по 1 этапу всех 18 договоров. Согласно выписке из ЕГР данные земельные участка являются собственностью ответчика. По итогам исполнения своей обязанностей по договору сетевой организацией составлено: уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подтверждающее выполнение со стороны истца мероприятий по технологическому присоединению; акты допусков приборов учета в эксплуатацию (прямого включения), подтверждающие, что приборы учета проверены и введены в эксплуатацию. Факт выполнения сетевой организацией своих обязанностей по техническим условиям подтверждается фотофиксацией выполненных работ. По состоянию на дату подачи искового заявления, ответчик не перечислил денежные средства в размере 45 115,14 рублей, предусмотренные в качестве платы по 2, 3 и 4 этапам по каждому договору в общем размере 812 072,52 рубля. ДД.ММ.ГГГГ в адрес ответчика истцом направлена претензия о погашении задолженности по 18 договорам (техническим условиям), однако ответа на нее не поступило. На основании изложенного, просили взыскать с ответчика задолженность по договорам (техническим условиям) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в размере 812 072,52 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 321 рублей.

Представитель истца ПАО «Россети Московский регион» в судебное заседание не явился, о времени месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом. До судебного заседания поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствие их представителя, указав, что против рассмотрения дела в порядке заочного производства не возражают.

Ответчик Э.В. ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен. Согласно уведомлению почтового отделения следует, что адресат за получением заказного письма согласно извещению о получении корреспонденции, не явился. Суд расценивает действия ответчика как отказ от принятия судебного извещения, и считает его извещенным о времени и месте рассмотрения дела.

Дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Порядок, технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определены Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

Пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 предусмотрено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

В свою очередь, заказчик вносит сетевой организации плату по договору об осуществлении технологического присоединения с возможным условием об оплате выполнения отдельных мероприятий по технологическому присоединению, а также разрабатывает проектную документацию в границах своего земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, и выполняет технические условия, касающиеся обязательств заказчика (пункт 1 статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» и пункты 8, 17 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861).

Согласно пункту 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 16.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Согласно пункту 16.3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, стороны выполняют мероприятия по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств.

Таким образом, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

С учетом изложенного на сетевой организации в силу закона лежит обязанность по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения.

Из материалов гражданского дела усматривается, что между ПАО «Россети Московский Регион» и ФИО1 в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 262 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» заключены технические условия об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям:

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

-ДД.ММ.ГГГГ № №

В соответствии с пунктом 10.2.1 технических условий, сетевая организация осуществляет мероприятия, выполняемые ПАО «Россети Московский Регион» по установке комплекса оборудования, обеспечивающего возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности, а именно строящихся жилых домов.

Согласно пункту 13 технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению со стороны заявителя и сетевой организации 30 рабочих дней со дня заключения договора об осуществления технологического присоединения к электрическим сетям.

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с Распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 ноября 2022 года № 215-Р и составляет 53 076,64 рублей, в том числе НДС (20%) 8 8461,11 рублей. (пункт 14 технических условий).

В соответствии с пунктом 14.1 технических условий, внесение платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств, осуществляется заявителем в следующем порядке: 15 процентов платы за технологическое присоединение в размере 7 916,50 рублей вносят в течение 5 рабочих дней со дня выставления сетевой организацией счета; 30 процентов платы за технологическое присоединение в размере 15 299,99 рублей вносятся в течение 20 дней со дня выставления сетевой организацией счета; 35 процентов платы за технологическое присоединение в размере 18 576,82 рублей вносятся в течение 40 дней со дня выставления сетевой организацией счета; 20 процентов платы за технологическое присоединение в размере 10 615,33 рублей вносятся в течение 10 дней со дня размещения в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Согласно пункту 18 технических условий, результатом исполнения обязательств ПАО «Россети Московский регион» по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя, является обеспечение ПАО «Россети Московский регион» возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договоров, обеспечивающих продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке. Исполнение ПАО «Россети Московский регион» указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения обязательств заявителем (за исключением обязательств по оплате счета).

В соответствии с пунктом 104 Постановления Правительства Российской Федерации от 10 марта 2020 года № 262 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам заключения договоров энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) до завершения процедуры технологического присоединения и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

Судом установлено, что ФИО1 была произведена оплата за технологическое присоединение по каждому заключенному договору в общем размере 53 076,64 рублей.

Уведомлениями об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, актами допуска прибора (ов) учета в эксплуатацию (прямого включения), а также фотоматериалами, представленными истцов материалы дела, подтверждается факт оказания ПАО «Россети Московский регион» услуг по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (принимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договорам об осуществлении технологического присоединения.

Между тем, сведений об оплате ответчиком денежных средств в размере 45 115,14 рублей, предусмотренных в качестве платы по 2, 3 и 4 этапам каждого договора об осуществлении технологического присоединения, в материалы дела не представлено.

ДД.ММ.ГГГГ истцом в адрес ответчика направлена претензия по 18 договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в которой просил перечислить сумму задолженности по 18 договорам об осуществлении технологического присоединения в размере 812 072,52 рублей.

Однако требования истца оставлены без удовлетворения.

Согласно части 1 статьи 56 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

При таких условиях, учитывая, что ответчик не исполнил обязательства по заключенным договорам об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в полном объеме, суд приходит к выводу об обоснованности заявленного истцом требования о взыскании с ответчика Э.В. ФИО1 в пользу ПАО «Россети Московский регион» задолженности по договорам (техническим условиям) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в размере 812 072,52 рублей, из расчета: 45 115,14 рублей (сумма задолженности по каждому договору) Х 18 (количество заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения).

В соответствии с частью 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. 

Таким образом, с ответчика Э.В. ФИО1 в пользу ПАО «Россети Московский регион» подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 321 рублей.

Руководствуясь статьями 194, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования публичного акционерного общества «Россети Московский регион» к ФИО1 о взыскании задолженности по техническим условиям (договорам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт №) в пользу публичного акционерного общества «Россети Московский регион» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) задолженность по техническим условиям (договорам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям в размере 812 072,52 рубля, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 11 321 рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Приволжского

районного суда города Казани И.А. Яруллин