Дело № 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ДД.ММ.ГГГГ г.Нижний Новгород

Приокский районный суд г.Нижнего Новгорода в составе председательствующего судьи Бадояна С.А., при секретаре Аникиной Я.О., с участием истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Г о признании недействительным условия договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, компенсации морального вреда, штрафа, 

УСТАНОВИЛ

ФИО1 обратилась в Приокский районный суд г. Н.Новгорода с исковым заявлением, содержащим требования к Г признать недействительным пункт 18 договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ, взыскать с Г неустойку (пени) за нарушение установленных сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения в размере 62 390,54 руб.; компенсацию моральной вреда в размере 15 000 рублей; штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В обоснование иска указано, что ДД.ММ.ГГГГ между Публичным акционерным обществом «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Исполнитель) и ФИО1 (Заявитель) был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения №. Согласно условиям вышеназванного договора (п. 1) исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю, заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

адрес>, и оплатить услуги. В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 10 договора размер платы составляет 62390,54 руб. и внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: а) 50% платы, что составляет 31195,27 руб., в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора - были оплачены заявителем ДД.ММ.ГГГГ (счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ); б) 50% платы, что составляет 31195,27 руб., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении - были оплачены заявителем ДД.ММ.ГГГГ (счет на оплату № от ДД.ММ.ГГГГ), несмотря на то, что акт о подключении (технологическом присоединении) был подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ спустя месяц после исполнения заявителем своих обязательств по договору.

В связи с тем, что сроки исполнения договора нарушались исполнителем, по телефону информация предоставлялась противоречивая, ДД.ММ.ГГГГ истцом было направлено сообщение на адрес электронной почты, указанный на официальном сайте Г 

<

данные изъяты> «Контакты Г, Управление по работе с клиентами - service@oblgaz.nnov.ru, с просьбой сообщить информацию о ходе выполнения мероприятий по подключению (техническому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с пунктом 8 договора № от ДД.ММ.ГГГГ Ответ на данное сообщение исполнитель до настоящего времени не направил.

Таким образом, Публичное акционерное общество «Газпром газораспределение Нижний Новгород» нарушило сроки исполнения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № О-6-0028Л от ДД.ММ.ГГГГ на 96 дней (в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ).

Пунктом 18 договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № O-6-0028Л от 16.02.2018г. установлено, что в случае нарушения сроков исполнения обязательств, сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения обязательств уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки ЦБ РФ, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по настоящему договору за каждый день просрочки.

Согласно ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей признаются недействительными.

По мнению истца, размер неустойки (пени) за нарушение установленных сроков выполнения работ (оказания услуг) по договору о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ должен быть рассчитан в соответствии со ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» и в пределах цены договора составит 62 390,54 руб.

Ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» предусматривает компенсацию потребителю морального вреда за нарушение его прав, который в данном случае состоит в нравственных страданиях, выразившихся в испытании истцом негативных эмоций: чувства разочарования, обиды и унижения, вызванных необходимостью тратить свое время на неоднократные обращения по телефону к различным должностным лицам Г, необходимостью напоминать о сроках исполнения договора, постоянными переживаниями по поводу отсутствия газоснабжения до наступления холодного периода времени года в жилом доме, расположенном по адресу 

<

адрес>, Лысковский р-он, 

<

адрес>А, в котором проживает отец истца - ФИО3, являющийся инвалидом, а также необходимостью покупки дров для отопления дома до его газификации сверх запланированного периода. Истец полагает, что с учетом обстоятельств конкретного дела, разумной компенсацией причиненного ей морального вреда будет являться денежная сумма в размере 15000 рублей.

В судебном заседании истец ФИО1 требования поддержала.

Представитель ответчика ФИО2, действующая по доверенности, против удовлетворения исковых требований возражала по основаниям, изложенным в письменном отзыве, в частности, ссылаясь на те обстоятельства, что датой заключения договора является ДД.ММ.ГГГГ, когда в Г был возвращен экземпляр договора, подписанный ФИО1 Соответственно срок выполнения мероприятий по подключению 9 месяцев истек ДД.ММ.ГГГГ. Между тем, выполнить мероприятий по фактическому подключению (включая врезку и пуск газа) объекта капитального строительства ФИО1 не представилось возможным по причине не осуществления истцом своих обязательств по готовности сети газораспределения в границах земельного участка в срок, предусмотренный договором, и отсутствия акта о готовности сети газораспределения. Из имеющихся у ответчика документов следует, что ФИО1 мероприятия по созданию сети газораспределения в границах земельного участка выполнено только ДД.ММ.ГГГГ, что подтверждается актом приемки законченного строительством объекта. Акт о готовности сети газопотребления и газоиспользующего оборудования между ответчиком и истцом был подписан только ДД.ММ.ГГГГ. ДД.ММ.ГГГГ подписан акт о подключении (технологическом присоединении). В связи с тем, что ФИО1 свои обязательства, предусмотренные пунктом 7 договора о подключении, выполнены только ДД.ММ.ГГГГ, ранее указанной даты ответчик не мог осуществить мероприятия по пуску газа на газоиспользующее оборудование истца. Таким образом, выполнение ответчиком строительства сети газораспределения ДД.ММ.ГГГГ никаким образом не повлияло на момент выполнения фактического подключения (пуск газа). Поскольку предусмотренная договором неустойка за нарушение срока исполнения обязательства в размере 0,014 ключевой ставки Банка России соответствует пункту 83 Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденным постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, данное условие не может быть признано недействительным.

Привлеченное к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, С явку представителя в суд не обеспечило, о времени и месте рассмотрения дела извещено в установленном порядке, в связи с чем по правилам ст. 167 ГПК РФ дело рассмотрено судом в отсутствие третьего лица.

Заслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. №1314 утверждены Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее «Правила технологического присоединения»), которые определяют порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства (далее - объект капитального строительства).

В указанных Правилах технологического присоединения используются следующие понятия (пункт 2): "подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения" - совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения; "заявитель" - юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения - юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности; "исполнитель" - газораспределительная организация, владеющая на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства или сети газораспределения заявителей, а в случае, если подключение возможно к существующим сетям газораспределения или газопотребления основных абонентов при выполнении условий пункта 34 настоящих Правил, - газораспределительная организация, с сетями которой технологически связаны сети газораспределения или газопотребления, к которым планируется подключение объектов капитального строительства заявителей, в том числе через сети других основных абонентов.

Согласно пункту 3 Правил технологического присоединения подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в следующем порядке: а) направление заявителем исполнителю запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее соответственно - технические условия, запрос о предоставлении технических условий) или заявки о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - заявка о подключении (технологическом присоединении) по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713 "Об утверждении типовых форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713); б) выдача технических условий в случае направления заявителем запроса о предоставлении технических условий; в) заключение договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее - договор о подключении) с приложением технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору о подключении, по типовым формам, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N 713; г) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; д) составление акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению); е) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон (далее - акт о подключении (технологическом присоединении), по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2017 г. N713.

В соответствии с пунктом 59 Правил технологического присоединения подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении.

В силу пункта 60 Правил технологического присоединения по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Согласно пункту 81 Правил технологического присоединения договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

В соответствии с пунктом 83 Правил технологического присоединения договор о подключении содержит следующие существенные условия: а) перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий. В случае если сеть газораспределения проходит в границах земельного участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства, и отсутствует необходимость строительства исполнителем сети газораспределения до границ земельного участка заявителя, в перечень мероприятий включаются только мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, мероприятия по мониторингу исполнителем выполнения заявителем технических условий и фактическому присоединению; б) срок осуществления мероприятий по подключению; в) порядок разграничения балансовой принадлежности сети газораспределения, сети газопотребления и эксплуатационной ответственности сторон; г) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; д) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; е) стоимость разработки исполнителем проектной документации и проведения ее экспертизы (в случае, когда плата за технологическое присоединение определяется по индивидуальному проекту); ж) положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; з) технические условия, включающие в том числе информацию, указанную в пункте 75 настоящих Правил; и) дополнительное соглашение о размере платы за подключение, в том числе обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки; к) право заявителя в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора о подключении при нарушении исполнителем сроков исполнения обязательств, указанных в договоре о подключении; л) обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения; н) порядок осуществления исполнителем мониторинга исполнения заявителем технических условий при строительстве газопроводов от газоиспользующего оборудования до точек подключения и порядок выдачи исполнителем необходимых рекомендаций в связи с осуществлением такого мониторинга.

Судом установлено, что между Публичным акционерным обществом «Газпром газораспределение Нижний Новгород» (Исполнитель) и ФИО1 (Заявитель) был заключен договор о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения №.

Согласно пункту 1 указанного договора исполнитель принимает на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства - индивидуальный жилой дом к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а заявитель принимает на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка: 

<

адрес> в соответствии с условиями договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Договор датирован ДД.ММ.ГГГГ, однако, с учетом отметки о принятии подписанного заявителем экземпляра договора ДД.ММ.ГГГГ, датой заключения договора согласно пункту 81 Правил технологического присоединения следует считать ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно пункту 10 договора размер платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства составляет 62390,54 руб., внесение платы осуществляется заявителем в следующем порядке: а) 50% платы, что составляет 31195,27 руб., в течение 11 рабочих дней со дня заключения договора; б) 50% платы, что составляет 31195,27 руб., в течение 11 рабочих дней со дня подписания акта о подключении.

Заявителем ФИО1 стоимость услуги по технологическому присоединению была оплачена в полном объеме, в том числе половина стоимости оплачена ДД.ММ.ГГГГ, вторая половина - ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с п. 3 договора срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 9 месяцев со дня заключения договора, то есть до ДД.ММ.ГГГГ.

Как следует из подпункта «в» пункта 98 Правил технологического присоединения, исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "б" настоящего пункта), если эта обязанность в соответствии с договором о подключении возложена на исполнителя.

Заключенным сторонами договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сетям газораспределения № предусмотрено аналогичное правило о том, что исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором дня подключения, но не ранее подписания акта о готовности сетей (абз. 6 пункта 5).

Согласно пункту 7 заключенного сторонами договора на заявителя возложена обязанность осуществить мероприятия по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) в пределах границ принадлежащего ему земельного участка (абз 2); обеспечить создание сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке от точки (точек) подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (абз. 6); уведомить исполнителя о выполнении технических условий после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями (абз. 8); обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 21 дня до дня подключения (абз. 9); подписать акт о готовности сетей в день его составления исполнителем (абз. 11).

Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (подземный, надземный газопровод давлением до 0,3МПа от точки присоединения к распределительному газопроводу до объекта заявителя) был подписан приемочной комиссией ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии со строительным паспортом внутридомового газооборудования, смонтированного С на объекте заявителя ФИО1 по адресу 

<

адрес> строительство внутридомового газооборудования, включая газопровод, производилось в период с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ.

Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) подписан ФИО1 и Г ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с данным актом исполнителю представлены проектная документация объекта капитального строительства и сеть газопотребления, построенная на территории земельного участка заявителя по адресу 

<

адрес>А, а также газоиспользующее оборудование. Стороны подтвердили выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ в соответствии с проектом заявителя, а также готовность сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению (технологическому присоединению).

ДД.ММ.ГГГГ подписан акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы - газоснабжение индивидуального жилого дома № по 

<

адрес>, согласно которому приемочная комиссия в составе заказчика ФИО1, представителя эксплуатационной организации Г, представителя проектной организации Т и представителя генерального подрядчика С определила соответствие выполненных строительно-монтажных работ проекту и требованиям СП 62.13330.2011, объект принят заказчиком.

ДД.ММ.ГГГГ сторонами договора подписан акт о подключении (технологическом присоединении), согласно которому ответчик исполнил обязательства по подключению объекта истца к газораспределительной сети.

В соответствии с положениями статьи 328 Гражданского кодекса РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств.

В случае непредоставления обязанной стороной предусмотренного договором исполнения обязательства либо при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что такое исполнение не будет произведено в установленный срок, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения этого обязательства и потребовать возмещения убытков.

Если предусмотренное договором исполнение обязательства произведено не в полном объеме, сторона, на которой лежит встречное исполнение, вправе приостановить исполнение своего обязательства или отказаться от исполнения в части, соответствующей непредоставленному исполнению.

Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Правила, предусмотренные пунктами 2 и 3 настоящей статьи, применяются, если законом или договором не предусмотрено иное.

Исходя из указанных положений закона, условий заключенного сторонами договора, исполнитель не может считаться просрочившим исполнение обязательства по технологическому присоединению объекта капитального строительства заявителя, пока последним не исполнено встречное обязательство по созданию сети газопотребления на принадлежащем ему земельном участке от точки подключения (технологического присоединения) до газоиспользующего оборудования (абз. 6 пункта 7 договора технологического присоединения).

Таким образом, с учетом истекшего с момента заключения договора срока на технологическое присоединение - 9 месяцев и датой создания сети газопотребления на земельном участке заявителя - ДД.ММ.ГГГГ, период просрочки выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения №О-6-0028Л от ДД.ММ.ГГГГ составил с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ - 7 дней.

Согласно п. 18 договора № от ДД.ММ.ГГГГ в случае нарушения одной из сторон сроков исполнения своих обязательств по договору такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления срока исполнения уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования (ключевой ставки) Банка России, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы по договору за каждый день просрочки.

Данное условие договора соответствует п. "и" ч. 83 Правил технологического присоединения, в соответствии с которым договор о подключении должен содержать обязанность каждой стороны при нарушении ею сроков исполнения обязательств уплатить другой стороне в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Банка России, установленной на день заключения договора о подключении, и платы за технологическое присоединение по договору о подключении за каждый день просрочки, если договором о подключении не предусмотрен больший размер неустойки.

Согласно преамбуле Закона РФ "О защите прав потребителей" настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих прав.

В силу статьи 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.

Согласно ч. 5 ст. 28 Закона РФ "О защите прав потребителей" неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы взыскивается за каждый день просрочки вплоть до окончания выполнения работы, ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы не определена договором.

Из разъяснений, изложенных в абзаце первом пункта 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" следует, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами РФ, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Применяя приведенные нормы права, учитывая специфику заключенного договора и нормативные акты, которые регулируют возникшие отношения, взыскание неустойки должно производиться на основании специального нормативно-правового акта - подпункта "и" пункта 83 Правил от 30.12.2013 N 1314 и условия пункта 18 договора, который не противоречит нормативному регулированию, и, следовательно, не подлежит признанию недействительным, как того требует истец.

Ключевая ставка Банка России на день заключения договора (ДД.ММ.ГГГГ) составляла 7,5% годовых, следовательно, неустойка за нарушение ответчиком срока выполнения работ по договору составила 62390,54 x 0,014 x 7,5% / 100% x 7 дней = 458 руб. 57 коп.

В статье 15 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" указано, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Как разъяснено в пункте 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей" при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

По настоящему делу установлен факт нарушения прав потребителя, поскольку ответчиком было допущено нарушение сроков исполнения обязательств, вследствие чего имеются правовые основания для взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.

Принимая во внимание степень и характер нравственных страданий истца, фактические обстоятельства дела, учитывая требования разумности и справедливости, суд считает, что денежная компенсация морального вреда, причиненного истцу, должна составлять 1 000 рублей.

Согласно ч. 6 ст. 13 Закона РФ "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

С учетом взысканных сумм с исполнителя за неудовлетворение требований потребителя в добровольном порядке подлежит взысканию штраф в размере 729 руб. 28 коп.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса РФ, п. 4 ч. 2 ст. 333.36 Налогового кодекса РФ истец освобожден от уплаты государственной пошлины, которая подлежит взысканию с ответчика, не освобожденного от ее уплаты, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. Согласно п. 1 и 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса РФ размер государственной пошлины составляет 700 рублей и подлежит взысканию с ответчика в бюджет г. Нижнего Новгорода.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с Г в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока выполнения работ по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № от ДД.ММ.ГГГГ за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 458 руб. 57 коп., компенсацию морального вреда в размере 1 000 руб., штраф за нарушение порядка добровольного удовлетворения требований потребителя в размере 729 руб. 28 коп.

В остальной части в удовлетворении исковых требований ФИО1 к Г о признании недействительным условия договора о подключении объекта капитального строительства к сети газораспределения, взыскании неустойки за нарушение срока выполнения работ, компенсации морального вреда отказать.

Взыскать с Г в бюджет города Нижнего Новгорода госпошлину в размере 700 руб.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд через Приокский районный суд г.Н.Новгорода в течение месяца с даты принятия решения суда в окончательной форме.

Судья С.А. Бадоян

В окончательной форме решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.