№ 2-5765/2019

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06 августа 2019 года город Петрозаводск

Петрозаводский городской суд Республики Карелия в составе председательствующего судьи Поляковой В.В., при секретаре Исраэлян Ю.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» об обязании совершить действия, 

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском по тем основаниям, что она является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, категория земель: земли населенных пунктов. На земельном участке возведен жилой дом. 14.11.2018 года между истцом и ПАО «МРСК Северо-Запада» в лице филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства №, по условиям которого ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца на данном земельном участке, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был установлен 6 месяцев со дня заключения договора. Истцом обязательства по внесению платы за технологическое присоединение по договору выполнены в полном объеме, однако со стороны ответчика в установленные сроки обязательства по технологическому присоединению не исполнены. На основании изложенного, истец просит обязать ответчика осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно договору об осуществлении технологического присоединения к энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства № от 14.11.2018 в срок до 01.09.2019 года. 

В судебном заседании истец не участвовала, о дне рассмотрения извещена, просила рассмотреть дело в свое отсутствие.

Представитель ответчика в судебном заседании исковые требования не признала по основаниям, изложенным в письменном отзыве, пояснила, что работы по присоединению энергопринимаюих устройств на земельном участке истца будут проводиться в конце 4-го квартала 2019 года в соответствии с инвестиционной программой.

Суд, заслушав представителя ответчика, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенному по адресу: 

<

адрес>, категория земель: земли населенных пунктов. На земельном участке возведен жилой дом. 14.11.2018 года между истцом и ПАО «МРСК Северо-Запада» в лице филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» заключен договор об осуществлении технологического присоединения к энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства №, по условиям которого ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца на данном земельном участке, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был установлен 6 месяцев со дня заключения договора. Истцом обязательства по внесению платы за технологическое присоединение по договору выполнены в полном объеме, однако со стороны ответчика в установленные сроки обязательства по технологическому присоединению не исполнены.

Процедура заключения и исполнения договора технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям определена Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (далее - Правила).

В соответствии с п.3 Правил, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил (в т.ч. заявителем - физическим лицом в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно), обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

П.6 Правил установлено, что технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. 

Процедура технологического присоединения определена в п.7 Правил и включает в себя, помимо прочего, после заключения соответствующего договора, выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности, составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п.16.3 Правил, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12(1), 14 и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

П.6 договора предусмотрена обязанность сетевой организации: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя (п.6.1), в течение 10 рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (п.6.2), не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в п.6.2 договора, с соблюдением срока, установленного п.5 договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям … (п.6.3).

П.5 договора от 14.11.2018 года установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 6 месяцев со дня заключения договора, т.е. до 14.05.2019 года.

В соответствии со ст.ст.309, 310 Гражданского кодекса РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ч.1 ст.314 Гражданского кодекса РФ, если обязательство предусматривает период, в течение которого оно должно быть исполнено, обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

Ответчиком в установленные сроки обязательства по технологическому присоединению, указанные в п.6 договора, а также в п.18 Правил не исполнены, что ответчиком признано при рассмотрении дела, тем самым права истца на осуществление технологического присоединения по заключенному с ответчиком договору последним нарушены.

В силу ст.12 Гражданского кодекса РФ, защита гражданских прав осуществляется, в том числе, путем присуждения к исполнению обязанности в натуре.

При указанных обстоятельствах требование истца об обязании ответчика осуществить предусмотренные договором обязательства по технологическому присоединению являются законными и обоснованными. Доводы стороны ответчика о невозможности выполнения обязательств по договору вразрез с инвестиционной программой, не могут быть учтены, отсутствие достаточного финансирования не является основанием для возможности отказа истцу в иске.

В соответствии со ст.206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может установить в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом конкретных обстоятельств дела, суд считает необходимым установить срок выполнения указанных действий ответчиком - в течение 1 месяца со дня вступления решения суда в законную силу 

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика в бюджет Петрозаводского городского округа подлежит взысканию госпошлина в сумме 300 руб. 00 коп.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 12, 56, 194–198 ГПК РФ, суд

решил:

Иск удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»в лице филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: 

<

адрес>, согласно договору об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства ПАО «МРСК Северо-Запада» № от 14.11.2018 года в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в лице филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» в бюджет Петрозаводского городского округа подлежит взысканию госпошлина в сумме 300 руб. 00 коп.

Решение суда может быть обжаловано сторонами в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Карелия через Петрозаводский городской суд Республики Карелия в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения.

Судья В.В. Полякова

Мотивированное решение изготовлено 07.08.2019 года