56RS0009-01-2021-001952-12

дело №2-2132/2021

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

12 июля 2021 года г.Оренбург

Дзержинский районный суд г.Оренбурга в составе судьи Шиляевой С.Г., при секретаре Урясовой Н.Ю., 

с участием: истца ФИО1, третьего лица ФИО2

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 об уменьшении стоимости выполненных работ, взыскании денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, 

установил:

ФИО1 обратилась в суд с вышеуказанным иском, ссылаясь на то, что 23 января 2021 г. между ней и ИП ФИО3 заключен договор подряда на выполнение работ по ремонту ванной и туалетной комнат, общей площадью 

<

данные изъяты> кв.м. в квартире 

<

...>, которая принадлежит ее супругу ФИО2 Общая стоимость выполняемых работ составила 122442 руб. 20 коп. Работы должны быть выполнены в 3 этапа в период с 01 февраля 2021 г. по 03 марта 2021 г. За первый этап работ 01 февраля 2021 г. ею оплачена сумма в размере 55972 руб. 20 коп., за второй этап -18 марта 2021 г. – сумма в размере 50220 руб. Ответчиком в нарушение условий договора не выполнены работы на перовом и третьем этапе на сумму 11450 руб. По согласованию между ней и ответчиком, материалы для выполнения отделочных работ по договору подряда приобретались последним, а она в свою очередь, перечисляла денежные средства за приобретенные материалы на счет, открытый на имя ответчика. Так, 01 февраля 2021 г. в счет приобретения материалов ею перечислена ответчику сумма в размере 63667 руб. 66 коп., из которой товар - на сумму 4145 руб. 85 коп. фактически ей не был передан ответчиком. Также ею 01 февраля 2021 г. в счет приобретения материалов была перечислена ответчику сумма в размере 39585 руб. 90 коп., из которой фактически товар на сумму в размере 19239 руб. 36 коп. передан не был. 17 марта ею была перечислена ответчику сумма в размере 9600 руб. в счет приобретения электротоваров. Вместе с тем, фактически ответчиком были приобретены электротовары в меньшем объеме на сумму 5003 руб. 83 коп. В связи с не проведением работ по договору подряда от 23 января 2021 г. просит уменьшить цену за выполненные работы на 11450 руб., а также взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока выполнения работ в размере 92387 руб. 21 коп., стоимость не поставленных на объект материалов 27981 руб. 38 коп., компенсацию морального вреда 50000 руб., транспортные расходы от 

<

...> до 

<

...> и обратно в размере 2004 руб. 75 коп. 

К участию в деле в качестве третьего лица привлечен ФИО2

В судебное заседание ответчик – ИП ФИО3 надлежаще извещенный о месте и времени слушания дела, не явился. Сведениями об уважительности причин неявки суд не располагает. 

В судебном заседании истец ФИО1 поддержала заявленные исковые требования по изложенным в иске основаниям, просила суд их удовлетворить.

Третье лицо ФИО2 в судебном заседании в удовлетворении исковых требований не возражал.

Выслушав пояснения истца, третьего лица, исследовав материалы дела, оценив совокупность представленных доказательств, суд приходит к следующему.

Согласно ст.421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. 

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст.422 Гражданского кодекса РФ).

В соответствии со ст.432 Гражданского кодекса РФ договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

В соответствии с п.1 ст.730 Гражданского кодекса РФ по договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворить бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. 

Пунктом 3 ст.730 Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

В силу ст.737 Гражданского кодекса РФ, в случае обнаружения недостатков во время приемки результата работы или после его приемки в течение гарантийного срока, а если он не установлен, - разумного срока, но не позднее двух лет (для недвижимого имущества - пяти лет) со дня приемки результата работы, заказчик вправе по своему выбору осуществить одно из предусмотренных в статье 723 настоящего Кодекса прав либо потребовать безвозмездного повторного выполнения работы или возмещения понесенных им расходов на исправление недостатков своими средствами или третьими лицами.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (статья 397).

На основании ст.739 Гражданского кодекса РФ, в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 настоящего Кодекса.

В силу ст.708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Согласно ст.27 закон «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. 

В соответствии со ст.28 закона «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). 

Квартира 

<

...> принадлежит на праве собственности ФИО2 на основании договора купли-продажи от 02 декабря 2020 г.

Как следует из материалов дела и установлено в судебном заседании, 23 января 2021 г. между заказчиком ФИО1 и подрядчиком – ИП ФИО3 заключен договор подряда 

<

Номер обезличен> по условиям которого подрядчик обязуется выполнить работы в соответствии со сметой, являющейся приложением №1 к договору, а заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их стоимость.

Согласно условиям п.1.3 договора подряда отделочные работы выполняются в ванной комнате и туалете в квартире 

<

...>. 

Приложением №1 к договору подряда определен перечень работ, подлежащих выполнению подрядчиком на общую сумму 122442 руб. 20 коп.

Приложением №3 к договору подряда установлено, что подрядчик осуществляет работы в три этапа: первый этап – с 01 февраля по 10 февраля 2021 г. на сумму 55972 руб. 20 коп., второй этап – с 11 февраля по 28 февраля 2021 г. на сумму 50220 руб., третий этап – с 01 по 03 марта 2021 г. на сумму 16250 руб.

Подрядчик приступает к выполнению работ в течение 5 рабочих дней с момента подписания договора и оплаты первого этапа работ, указанных в приложении №3 к договору (п.1.2 договора подряда).

Согласно п.3.2.1 договора заказчик обязуется оплатить работы согласно приложению №3 к договору подряда в течение 1 рабочего дня с момента подписания договора.

Общий срок работ не может превышать 40 рабочих дней, если заказчик не будет препятствовать этим срокам (п.1.2.1 договора подряда).

Стоимость работ определяется на основании сметы, являющейся приложением №1 к договору и составляет 122442 руб. 20 коп. (п.2.1 договора).

Окончательная сумма, подлежащая уплате за выполненные работы, определяется на основании акта о приемке результата работ, в котором указана стоимость дополнительно выполненных подрядчиком и согласованных заказчиком работ (п.2.3 договора подряда).

Оплата заказчиком выставленных счетов в полном размере означает согласие с ценой. В случае если фактический объем работ выполнен в меньшем размере, чем согласовано, то цена должна быть соответственно снижена (п.2.4, 2.5 договора подряда).

Пунктом 3.2.2 договора подряда предусмотрено, что заказчик обязуется своевременно предоставить подрядчику необходимые и согласованные с подрядчиком материалы для производства работ.

В соответствии с п.3.2.4 договора подряда, заказчик обязуется не позднее третьего дня с момента извещения его подрядчиком о готовности работ к сдаче, принять результат работ, оформляя приемку и подписанием акта сдачи-приемки выполненных работ, для чего явиться на объект, где проводились работы. В случае неявки заказчика для приемки результатов работ и подписания соответствующего акта в течение срока, предусмотренного настоящим пунктом, направления человека, не наделенного полномочиями, либо неосновательного отказа заказчика от подписания акта без оформления письменной мотивировки отказа, результаты работ считаются принятыми без каких либо замечаний.

В судебном заседании установлено, что в рамках заключенного 23 января 2021 г. договора подряда по согласованию между ней и ответчиком материалы для выполнения отделочных работ в ванной комнате и туалете квартиры 

<

...> приобретались ИП ФИО3 Она, в свою очередь, перечисляла денежные средства за приобретенные материалы на счет, открытый на имя ответчика.

В судебном заседании установлено и следует из материалов дела, что ФИО1 23 января 2021 г. осуществила оплату денежных средств в размере 55972 руб. 20 коп. за первый этап работ, 18 марта 2021 г. – оплату денежных средств в размере 50220 руб. за второй этап работы, что подтверждается чеками по операции от 23 января 2021 г. и 18 марта 2021 г.

Также 01 февраля 2021 г. истцом перечислена ответчику сумма в размере 63667 руб. 66 коп. за приобретение следующих материалов: зеркало шкаф 

<

данные изъяты> – 1 шт.; тумба раковину 

<

данные изъяты> – 1 шт.; тумба – раковина 

<

данные изъяты> – 1 шт.; унитаз подвесной 

<

данные изъяты> – 1 шт.; плитка керамическая 

<

данные изъяты>– 1 шт.; плитка керамическая 

<

данные изъяты> – 1 шт.; бордюр керамический 

<

данные изъяты>– 1 шт.; декор керамический 

<

данные изъяты>– 1 шт.; плитка керамическая 

<

данные изъяты> – 1 шт.; декор керамический 

<

данные изъяты> – 1 шт.; бордюр керамический 

<

данные изъяты>– 1 шт.; электроводонагреватель 

<

данные изъяты>– 1 шт.; зеркало 

<

данные изъяты> – 1 шт.; шторка в ванну 

<

данные изъяты> – 1 шт.; ванна акриловая 

<

данные изъяты> – 1 шт.; комплект монтажный для ванны 

<

данные изъяты>– 1 шт.; экран для ванны 

<

данные изъяты>– 1 шт.; корпус предфильтра 

<

данные изъяты> для холодной воды – 1 шт.; корпус предфильтра 

<

данные изъяты> для горячей воды – 1 шт.

Факт перечисления истцом денежных средств подтверждается чеком по операции от 01 февраля 2021 г.

Вместе с тем из перечисленных выше материалов, экран для ванны 

<

данные изъяты>– 1 шт. на общую сумму в размере 4145 руб. 85 коп. фактически истцу не передан ответчиком.

Также 01 февраля 2021 г. на основании счета 

<

данные изъяты> 

<

Номер обезличен> от 01 февраля 2021 г. истцом перечислена ответчику сумма в размере 39585 руб. 90 коп., что подтверждается чеком по операции от 01 февраля 2021 г. за приобретение следующих материалов: 

<

данные изъяты> Клей для плитки, керамогранита и камня (25 кг) 

<

данные изъяты> - 40 шт.; 

<

данные изъяты> Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм. –3 шт.; 

<

данные изъяты> Гидроизоляционная масса (20 кг) 

<

данные изъяты> –5 шт.; смесь цементно-песчаная 

<

данные изъяты> (30 кг) –10 шт.; комплект зажим и клин СВП (по 250 шт.) –2 уп.; 

<

данные изъяты> Грунтовка Бетонконтакт морозоустойкая (15 кг) 

<

данные изъяты> –2 шт.; 

<

данные изъяты> Валик полиамид ворс 10-11 мм с бюгелем 230 мм (50)– 2 шт.; 

<

данные изъяты> Ванночка для краски 330Х350 ММ (60) –2 шт.; Профиль потолочный направляющий ППН 28Х27 3 м. (0,6 мм) – 5 шт.; профиль потолочный ПП 60Х27 3 м. (0,6 мм) – 5 шт.; СВФС Саморез ШСГМ 3,5Х25 (200 шт.) м.к. – 1 шт.; СВФС Саморез ШСММ прессшайба 4,2Х13 (200 шт.) м.к – 1 шт.; СВФС Дюбель-гвоздь 6К40 (200 шт.) – 1 шт.; 

<

данные изъяты> Пена профессиональная (750 мл.) – 3 шт.; 

<

данные изъяты> Диск алмазный турбо Стандарт 125 мм. – 1 шт.; 

<

данные изъяты> Герметик Момент ГЕРМЕНТ Силиконовый Универсальный (280 мл.) картридж белый 

<

данные изъяты> – 2 шт.; 

<

данные изъяты> Монтажный клей Момент Монтаж Суперсильный Плюс (400 гр.) картридж 

<

данные изъяты> – 2 шт.; 

<

данные изъяты> Губка шлифовальная 4- сторонняя Р220 100Х70Х25 (25/250) – 2 шт.; мешок для строит. Мусора полипропиленовый тканный 50Х90 (зеленый) (уп. 10 шт.) – 1 уп.; 

<

данные изъяты> Малярная лента 0,050Х50м. белая – 2 шт.; 

<

данные изъяты> Запасные лезвия 18 мм (10 шт.) (20/300) – 2 шт.; 

<

данные изъяты> Нож строительный усиленный 18 ММ (24/288) – 1 шт.; 

<

данные изъяты> Грунтовка глубокого проникновения морозостойкая (10л) 

<

данные изъяты> – 4 шт.; 

<

данные изъяты> БУР 6Х150/210 мм. (1шт.) (25/100) – 2 шт.; 

<

данные изъяты> БУР 8Х150/210 мм. (1шт.) (25/100) – 2 шт.; 

<

данные изъяты> БУР 10Х150/210 мм. (1шт.) (25/100) – 2 шт.

Факт перечисления истцом денежных средств подтверждается чеком по операции от 01 февраля 2021 г.

Вместе с тем, из перечисленных в счете от 01 февраля 2021 г. материалов, истцу не переданы ответчиком следующие материалы: клей для плитки, керамогранита и камня (25 кг) 

<

данные изъяты> - 20 шт. вместо 40 шт. на сумму 9200 руб. 40 коп.; 

<

данные изъяты> Гипсокартон влагостойкий 2500х1200х12,5мм. –1 шт. из 3 шт. на сумму 379 руб. 02 коп.; 

<

данные изъяты> Гидроизоляционная масса (20 кг) 

<

данные изъяты> –5 шт. на сумму 5225 руб. 10 коп.; 

<

данные изъяты> Грунтовка Бетонконтакт морозоустойкая (15 кг) 

<

данные изъяты> –1 шт. вместо 2 шт. на сумму 1027 руб. 98 коп.; 

<

данные изъяты> Пена профессиональная (750 мл.) – 3 шт. на сумму 1210 руб. 86 коп.; 

<

данные изъяты> Грунтовка глубокого проникновения морозостойкая (10л) 

<

данные изъяты> – 3 шт. вместо 4 шт., на сумму 2196 руб., всего на сумму 19239 руб. 36 коп.

17 марта ФИО1 была перечислена ответчику сумма в размере 9600 руб. за приобретение следующих товаров: кабель силовой – 90м.; труба гофрированная – 100 м.; коробка установочная для сплошных стен – 2 шт.; коробка установочная ГИПРОК– 3 шт.; коробка распределительная - 2 шт., держатель с защелкой для труб – 100 шт. на общую сумму в размере 9600 руб. 

Факт перечисления истцом денежных средств подтверждается чеком по операции от 17 марта 2021 г.

Вместе с тем, фактически ответчиком был приобретен указанный товар в меньшем объеме: 

<

данные изъяты> на общую сумму 5003 руб. 83 коп.

Таким образом, истцом 01 февраля 2021 г. и 17 марта 2021 г. в счет оплаты за отделочные материалы, излишне перечислены ответчику денежные средства в размере 27981 руб. 38 коп. за вышеуказанный товар, который фактически не был передан ответчиком истцу.

Доказательств иного материалы дела не содержат, не представлены они и ответчиком в ходе судебного следствия по делу. 

В связи с чем, ФИО1 имеет право требовать возврата уплаченной ответчику за фактически не переданные ей материалы, суммы в размере 27981 руб. 38 коп. Поэтому с ИП ФИО3 в пользу ФИО1 подлежат взысканию денежные средства в размере 27981 руб. 38 коп.

Из приложения №3 к договору подряда от 23 января 2021 г. следует, что на первом этапе в период с 01 по 10 февраля 2021 г. подрядчик обязан выполнить, в том числе, следующие работы в ванной комнате: штрабление стен под трубы – 8 пог. м. на сумму 2400 руб., монтаж скрытого люка (отдел с кранами, в комплекте) – 1 шт. на сумму 1800 руб.; в туалетной комнате: монтаж скрытого люка (отдел с кранами, в комплекте) – 1 шт. на сумму 750 руб., всего на общую сумму 4950 руб.

На третьем этапе в период с 01 по 03 марта 2021 г. подрядчик обязан выполнить, в том числе, в ванной комнате: устройство вытяжки - 1 шт. на сумму 1500 руб.; установку гидравлического полотенцесушителя с перепайкой труб и установкой кранов – 1 шт. на сумму 3500 руб.; в туалетной комнате: устройство вытяжки - 1 шт. на сумму 1500 руб., всего на общую сумму 6500 руб.

В нарушение условий договора подряда от 23 января 2021 г., ответчиком указанные работы на первом и третьем этапе на общую сумму в размере 11450 руб. в установленный договором подряда срок не выполнены. Доказательств иного материалы дела не содержат. Как и не представлены доказательств того, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В связи с чем, истец имеет право потребовать с ответчика возврата уплаченной по договору суммы. Поэтому с ИП ФИО3 в пользу ФИО1 подлежит взысканию уплаченная по договору подряда от 23 января 2021 г. денежная сумма в размере 11450 руб. 

Разрешая требования истца о взыскании неустойки за нарушение сроков удовлетворения требований потребителя о возврате денежных средств, суд приходит к следующему. 

На основании ст.31 закона «О защите прав потребителя» требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования.

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона (п.3 ст.31 закона «О защите прав потребителей».

На основании п.5 ст.28 закона «О защите прав потребителей» В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Договором подряда от 23 января 2021 г. установлено, что подрядчик осуществляет работы в три этапа: первый этап – с 01 февраля по 10 февраля 2021 г., второй этап – с 11 февраля по 28 февраля 2021 г., третий этап – с 01 по 03 марта 2021 г. 

За нарушение сроков удовлетворения требований потребителя, истец имеет право требовать взыскания неустойки в размере 3% от цены товара.

Истцом заявлен период взыскания неустойки с 02 марта по 02 апреля 2021 г.

За период с 02 марта по 02 апреля 2021 г. размер неустойки составит 92387 руб. 21 коп. (106192 руб. 20 коп. х3%х 29 дн.=92387 руб. 21 коп.).

Поэтому неустойка в размере 92387 руб. 21 коп. подлежит взысканию с ИП ФИО3 в пользу истца.

В соответствии со ст.15 закона «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» установлено, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Поскольку судом установлен факт нарушения прав потребителя, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца о взыскании денежной компенсации морального вреда. 

Что касается размера компенсации морального вреда, то суд взыскивает с ИП ФИО3 в пользу ФИО1 2000 руб., руководствуясь при этом характером нравственных и физических страданий истца, принципом разумности и справедливости. 

Согласно ч.6 ст.13 закона «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку судом требования ФИО1 удовлетворены, и установлен факт неудовлетворения ответчиком требований потребителя в добровольном порядке, то с ИП ФИО3 подлежит взысканию штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, в размере 66909 руб. 29 коп.

В соответствии со ст.98 Гражданского процессуального кодекса РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы пропорционально размеру удовлетворенной судом исковых требований.

Разрешая требования истца о взыскании транспортных расходов, суд приходит к выводу, что ответчиком не предоставлено допустимых и достаточных доказательств в подтверждение несения им указанных расходов в размере 2004 руб. 75 коп. 

При таких обстоятельствах суд отказывает в удовлетворении требований истца о взыскании с ответчика транспортных расходов в указанном размере.

Поскольку при подаче иска истец освобожден от уплаты государственной пошлины, в соответствии со ст.103 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд взыскивает с ответчика ИП ФИО3 государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «город Оренбург» в размере 3836 руб. 37 коп.

Руководствуясь ст.ст.103,194-199, 235-237 Гражданского процессуального кодекса РФ, суд

решил:

исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 в пользу ФИО1 денежные средства, уплаченные по договору подряда от 23 января 2021 г., в размере 39431 руб. 38 коп., неустойку за нарушение сроков выполнения работ 92387 руб. 21 коп., компенсацию морального вреда 2000 руб., штраф 66909 руб. 29 коп.

Взыскать с индивидуального предпринимателя ФИО3 государственную пошлину в доход бюджета муниципального образования «город Оренбург» в размере 3836 руб. 37 коп. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья: 

Мотивированное решение составлено 19 июля 2021 года.