Дело № 2-3438/2019 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

15 мая 2019 года г. Одинцово 

Одинцовский городской суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Кетовой Л.С.

при секретаре Барбулеве И.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ПАО «МРСК Центра» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «МРСК Центра» обратилось в суд с иском к ФИО1, просит расторгнуть договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от 29.04.2011 г., заключенный с ФИО1; взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» понесенные в связи с исполнением договора № от 29.04.2011 г. затраты в размере 332 808,49 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 528 руб.

Свои исковые требования истец мотивировал тем, что между ФИО1 и ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») был заключен договор № от 29.04.2011 г. об осуществлении технолоического присоединения. В соответствии с разделом 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика – базы отдыха охотников и рыболовов, расположенной по адресу: АДРЕС Д оговором предусмотрены обязательства, как со стороны истца, так и со стороны ответчика. По указанному договору сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях (п.6 договора). ФИО1 в свою очередь обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства ответчика, указанные в технических условиях (п.8 договора). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению согласно п.5 договора составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В целях исполнения договора Сетевая организация разработала технические условия № от 04.04.2011 г. для присоединения к электрическим сетям, которые определяют объем мероприятий, необходимых для выполнения сторонами договора для технологического присоединения к электрическим сетям (Приложение №1 к договору). Размер платы по договору определяется в соответствии с Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 14.02.2011 г. №5 составляет 1 003 000 руб. (п.10 договора). ФИО1 обязуется произвести оплату в порядке, предусмотренном п.11 договора. Оплата была произведена частично в размере 451 350 руб. 25.07.2011 г. В соответствии с п. 10Технолоических условий сетевая организация обязуется осуществить следующие мероприятия: в 5-10 м от места отпайки предусмотреть установку опоры с разъединителем-предохранителем типа ПРВТ-10; присоединение ТП 10/0,4 КВ осуществить отпайкой ВЛ-10 КВ на ж/б опора от опоры №№ ВЛ-10 КВ № «Прилуки»; на границе земельного участка запроектировать новую ТП 10/0,4 КВ. Трансформатор применить герметичного типа, мощность определить проектом согласно заявленной мощности. Предусмотреть установку автоматических выключателей на отходящие линии 0,4 КВ. В целях исполнения договора технологического присоединения ПАО «МРСК Центра» заключило договор подряда с ООО «Таврида Электрик МСК» № от 30.03.2012 г. В соответствии с условиями указанного договора ООО «Таврида Электрик МСК» обязуется по заданию ПАО «МРСК Центра» выполнить следующий комплекс работ: проектирование и реконструкцию ВЛ 10 КВ №№ «Прилуки» ПС 110/10 КВ со строительством ответвления ВЛ/КЛ 10 КВ, установкой ПРВТ-10КВ и ТП 466 для осуществления технологического присоединения ответчика в соответствии с техническим заданием № (приложение №1.7 к договору подряда). Договорные обязательства подрядчиком выполнены в полном объеме, между сторонами подписаны Акты приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме №КС-14. Стоимость работ по договору подряда (применительно к выполнению мероприятий по договору № от 29.04.2011 г.) составила 654 989,09 руб. (772 887,12 руб. с НДС), со стороны ПАО «МРСК Центра» оплачена в полном объеме, что подтверждается соответствующим платежным поручением. Однако со стороны ответчика до настоящего времени не выполнены мероприятия по технологическому присоединению, не произведена полная оплата по договору ТП. ПАО «МРСК Центра» в адрес ответчика направило уведомление от 25.07.2013 г. о выполнении филиалом ПАО «МРСК Центра – «Ярэнерго» своей части мероприятий по технологическому присоединению и готовности осуществить фактическое присоединение, а также о необходимости выполнения ФИО1 мероприятий в рамках договора ТП. Фактическое присоединение к сети невозможно сделать до выполнения ответчиком ФИО1 своей части мероприятий, указанных в п.11 технических условий к договору. В соответствии с аб. 2 п.8 договора, ответчик обязуется после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ земельного участка ответчика, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. Вместе с тем, каких-либо уведомлений о выполнении мероприятий технических условий со стороны ответчика в сетевую организацию не поступило. Сроки выполнения мероприятий по технологическому присоединению в настоящий момент истекли (п.5 договора). Кроме того, истек срок действия технических условий (п.4 договора). Невыполнение ответчиком своих обязательств по договору, в том числе невыполнение мероприятий по технологическому присоединению, приводит к тому, что ПАО «МРСК Центра» не может завершить процедуру технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. В адрес ответчика было направлено письмо от 06.04.2018 г., которое содержало предложение расторгнуть договор в случае отсутствия необходимости технологического присоединения. К указанному письму был приложен проект соглашения о расторжении договора. Однако на предложение расторгнуть договор каких-либо ответов от ФИО1 не поступало. В связи с выполнением мероприятий, необходимых для технологического присоединения, сетевой организацией были произведены расходы, которые включают в себя: подготовка и выдача заявителю технических условий 9 522 руб., расходы на выполнение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ – 654 989,09 руб. (без учета НДС), 784 158,49 руб. (с учетом НДС). Общая сумма расходов сетевой организации, которые она понесла в связи с исполнением договора в интересах ответчика, с учетом произведенного ФИО1 платежа, составила 332 808,49 руб.

Истец: представитель ПАО «МРСК Центра» в судебное заседание не явился, в письменном заявлении просил о рассмотрении дела в его отсутствие, исковые требования поддержал.

Ответчик: ФИО1 в судебное заседание не явился, извещался судом о месте и времени судебного заседания надлежащим образом.

Суд, счел возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, участвующих в деле, надлежащим образом извещенных о дате, времени и месте и судебного заседания.

Изучив материалы дела, суд пришел к следующему.

29.04.2011 г. между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») (МРСК) и ФИО1 (заявитель) заключен договор № (ф-2) об осуществлении технологического присоединения, в соответствии с которым сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя – базы отдыха охотников и рыболовов, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) таким лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопримающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств кВт; категория надежности третья; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение кВ; ранее присоединенная в точке присоединения, указанной в п.3 настоящего договора, мощность кВт. Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение соответствии с условиями настоящего договора (л.д.10-14).

В целях исполнения указанного договора, Сетевая организация разработала технические условия № от 04.04.2011 г., которые определяют объем мероприятий, необходимых для выполнения сторонами договора для технологического присоединения к электрическим сетям (л.д.15-17).

Согласно п.2 договора технологического присоединения, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения базы отдыха охотников и рыболовов, расположенных (которые будут располагаться) по адресу: АДРЕС

Согласно п.3 договора технологического присоединения, точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не более 25 м от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Согласно п.4 договора технологического присоединения, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.5 договора технологического присоединения, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Согласно п.6 договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

Согласно п.8 договора технологического присоединения, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; надлежащим образом исполнять обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

Согласно п.10 договора технологического присоединения, стоимость услуг по технологическому присоединению, выполняемому МРСК по настоящему договору, в соответствии с Приказом Департамента топлива, энергетики и регулирования тарифов ЯО от 14.02.2011 г. №8 в редакции, действующей на момент заключения настоящего договора, составляет 1 003 000 руб., в том числе НДС 153 000 руб.

Согласно п.11 договора технологического присоединения, внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: 15% от стоимости указанной в п.10 настоящего договора в течение 15 дней с даты заключения договора; 30% от стоимости указанной в п.10 настоящего договора в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 45% от стоимости указанной в п.10 настоящего договора за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем технических условий, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии (мощности), а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 10% от стоимости указанной в п.10 настоящего договора вносятся в течение 15 дней с даты фактического присоединения.

25.07.2011 г. ФИО1 произвел частичную оплату по договору № от 29.04.2011 г. в размере 451 350 руб. (л.д.138-141).

30.03.2012 г. между ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» (Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго») (заказчик) и ООО «Таврида Электрик МСК» (подрядчик) заключен договор №, в соответствии с которым подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить комплекс работ, в том числе проектирование и реконструкцию ВЛ 10 кв №№ «Прилуки» ПС 110/10 кВ со строительством ответвления ВЛ\КЛ 10 кВ, установкой ПРВТ-10 Кв и ТП 466 для осуществления технологического присоединения заявителя в соответствии с техническим заданием № и сдать результаты работ заказчику (л.д.25-93).

Стоимость работ по договору подряда по выполнению мероприятий по договору № от 29.04.2011 г. составила 772 887,12 руб. (л.д.94-95).

Филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» оплатило ООО «Таврида Электрик МСК» стоимость работ по договору № от 29.04.2011 г. в размере 772 887,12 руб. в полном объеме.

25.07.2013 г. ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в адрес ФИО1 направлено уведомление о выполнении ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» мероприятий по технологическому присоединению по договору №ф-1), в котором указано, что для осуществления технологического присоединения ФИО1 необходимо выполнить мероприятия предусмотренные договором и техническими условиями к договору, а также уведомить филиал ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» о выполнении мероприятий по договору для завершения процедуры технологического присоединения и оформления необходимых документов (л.д.18-19).

Согласно п.16 (6) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №861, утвержденных Постановлением Правительства РФ, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих обстоятельств:

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения технических условий;

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения технических условий;

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения проверки выполнения технических условий;

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы за технологическое присоединение.

Согласно п.16 (5) Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям от 27.12.2004 г. №861, утвержденных Постановлением Правительства РФ, нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

06.04.2018 г. ОАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» в адрес ФИО1 направлено уведомление о невыполнении в срок мероприятий по договору ТП от 29.04.2011 г. № (ф-2), в котором ПАО «МРСК Центра» - «Ярэнерго» указывает, что во избежание принуждения в судебном порядке к исполнению обязательств по договору рекомендует ФИО1 в течение 20 дней с даты получения уведомления: - в случае выполнения мероприятий по договору для завершения процедуры технологического присоединения и оформления необходимых документов, предусмотренных «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. №861, письменно уведомить Филиал о выполнении мероприятий; - в случае отсутствия необходимости технологического присоединения подписать соглашение о расторжении и акт об оказании услуг, направив письменные документы в Филиал. Также к указанному уведомлению приложен перечень выполненных работ по договору от 29.04.2011 г. № (ф-2) с указанием их стоимости (л.д.20-24).

Согласно ст.450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

Суд приходит к выводу, что со стороны ответчика существенно нарушены условия договора, в связи с чем, договор № от 29.04.2011 г. подлежит расторжению.

Согласно п. 1 ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

ПАО «МРСК Центра» при исполнении договора понесены расходы на общую сумму без учета НДС - 784 158,49 руб. 

В связи с тем, что ответчиком уплачена сумма в размере 451 350 руб., сумма подлежащая взысканию сумма составляет 332 808,49 руб. (784 158,49 руб. -451 350 руб.= 332 808,49 руб.).

Суд согласен с предоставленным стороной истца расчетом взыскиваемой суммы, доказательств обратного суду предоставлено не было.

В силу ст. 98 ГПУК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 528 руб. 

На основании изложенного, оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что исковые требования основаны на законе и подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 12, 194–198, 199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «МРСК Центра» к ФИО1 о расторжении договора, взыскании денежных средств - удовлетворить.

Расторгнуть договор № от 29.04.2011 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, заключенный между ПАО «МРСК Центра» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «МРСК Центра» затраты, понесенные в связи с исполнением договора № от 29.04.2011 г., в размере 332 808,49 руб., расходы по оплате государственной пошлины в размере 12 528 руб., а всего взыскать 345 336 руб. 49 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский областной суд через Одинцовский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Федеральный судья: Л.С. Кетова