Дело №

УИД: №

Р Е Ш Е Н И Е

И М Е Н Е М Р О С С И Й С К О Й Ф Е Д Е Р А Ц И И

20 июля 2023 год 

<

адрес> 

Киевский районный суд 

<

адрес> Республики Крым в составе:

председательствующего – судьи Охоты Я.В., 

при секретаре - ФИО4, 

с участием:

представителя истца – ФИО6,

представителя ответчика – ФИО5,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ГУП РК «Крымэнерго», третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора – ГАУ «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», об обязательстве осуществить определенные действия, взыскании неустойки, –

У С Т А Н О В И Л :

Истец обратилась в суд с иском к ответчику, и, уточнив требования, просил: обязать ГУП РК «Крымэнерго» в течение 90 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательство по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ осуществить технологическое присоединение электроустановки земельного участка для туристического обслуживания по адресу: Республики Крым, 

<

адрес>, 31 кадастровый №, мощностью 149 кВт, в соответствии с техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ; взыскать с ГУП РК «Крымэнерго» в пользу истца денежные средства на случай неисполнения судебного акта в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная с 31 календарного дня после даты вступления решения суда в законную силу. 

Исковые требования мотивированы тем, что между сторонами был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, согласно условиям которого, ответчик обязался выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца к своим электрическим сетям. Истцом выполнены предусмотренные договором № от ДД.ММ.ГГГГ взятые на себя обязательства, а именно: осуществлена плата в соответствии условиям п. 11 Договора, разработана и согласована проектная документация, направлено уведомление о выполнении технических условий. Между тем, до настоящего времени, технологическое присоединение объекта недвижимости к электрическим сетям по указанному договору ГУП РК «Крымэнерго» не осуществлено. 

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержал, просил иск удовлетворить. 

Представитель ответчика в судебном заседании против удовлетворения уточненных исковых требований не возражала.

Третье лицо о дате, времени и месту судебного разбирательства извещено надлежаще, представителя для участия в судебном заседании не направило.

Выслушав участников процесса, исследовав все представленные доказательства в их совокупности, суд пришел к следующим выводам.

В силу части 1 статьи 3 ГПК РФ, заинтересованное лицо вправе в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве, обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 заключен Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям электроустановки земельного участка для туристического обслуживания по адресу: Республики Крым, 

<

адрес>, 31, кадастровый №.

Согласно договору, ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: электроустановки указанного земельного участка для туристического обслуживания.

ДД.ММ.ГГГГ, между ГУП РК «Крымэнерго» и ФИО2 (первоначальный заявитель), ФИО1 (новый заявитель), заключено соглашение № о передаче прав и обязанностей по договору осуществления технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, согласно условиям которого, в связи с переходом права собственности на земельный участок по адресу: 

<

адрес>, кадастровый №, первоначальный заявитель, с согласия сетевой организации, передает новому заявителю, в новый заявитель принимает права и обязанности первоначального заявителя по договору № от ДД.ММ.ГГГГ и техническим условиям № от ДД.ММ.ГГГГ по указанному объекту недвижимости в полном объеме и на условиях, существующих на момент заключения сторонами данного соглашения.

Право собственности истца на спорный объект недвижимости подтверждается выпиской из ЕГРН от ДД.ММ.ГГГГ, предоставленной суду в ответ на запрос Государственным комитетом по государственной регистрации и кадастру Республики Крым (л.д.87).

Согласно содержащейся в материалах дела квитанции (л.д. 21), истец оплатил, на счет ответчика стоимость технологического присоединения в размере 25935, 85 руб., согласно условиям договора.

Так, в соответствии со ст. 26 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. 

Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 861 утверждены, в том числе, Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее Правила N 861).

Пунктом 3 Правил N 861 установлено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Согласно п. 6 Правил N 861 технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

В силу подп. "в" п. 7 Правил N 861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

В соответствии с подп. "б" п. 16 Правил N 861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12 (1), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

В договоре и указанными нормативными актами определен порядок действий сетевой организации по осуществлению технологического присоединения, включающий в себя помимо прочего, подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование; разработку сетевой организацией проектной документации; выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств.

По договору об осуществлении технологического присоединения к электрической сети одна сторона (сетевая организация) обязуется в установленный действующими правилами порядке присоединить по заявке другой стороны (абонента) принадлежащие ему ЭПУ к электрической сети сетевой организации, а абонент обязуется оплатить мероприятия по технологическому присоединению.

Предметом договора об осуществлении технологического присоединения выступают мероприятия по технологическому присоединению, представляющие собой систему действий, осуществляемых сторонами при участии уполномоченного органа государственной власти.

Мероприятия по технологическому присоединению относятся к существенным условиям договора технологического присоединения и включают в себя, в том числе подготовку сетевой организацией технических условий, фактические действия по присоединению и обеспечению работы ЭПУ в электрической сети.

По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон и акт об осуществлении технологического присоединения (пункт 19 Правил N 861).

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов.

Так, в соответствии с п. 4 Договора №, технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в Приложении N 1.

На основании п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет один год со дня заключения договора.

Пунктами 6.1, 6.2, 6.3,6.4 Договора установлено, что сетевая организация обязуется:

- надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

-принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

- не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

Пунктами 8.1, 8.2 Договора установлено, что заявитель обязуется:

- надлежащим образом и своевременно исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

- после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной).

Согласно п. 10 Технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ от № определены обязанности сетевой организации.

Пунктом 11 указанным Технических условий определены обязанности истца для осуществления технологического присоединения, которые им выполнены в полном объеме, что подтверждается направленным уведомлением истца № о выполнении технических условий для присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ от № (л.д.23-24).

Между тем, в ответ на указанное уведомление Феодосийский РЭС сообщил, что дальнейшее присоединение к электрическим сетям ГУП РК «Крымэнерго» невозможно до выполнения сетевой организацией требований п. 10 Технических условий.

Пунктом 13 установлено, что срок действия настоящих технических условий составляет два года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

На момент обращения в суд с исковым заявлением, а также в период рассмотрения дела судом, ответчиком не исполнены взятые им по договору обязательства, технологическое присоединение не произведено. 

В силу статьи 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В процессе рассмотрения дела стороной ответчика не опровергался факт исполнения истцом договора. При этом, ГУП РК «Крымэнерго» документально не подтвердило наличие обстоятельств, не позволивших выполнить условия Договора.

В соответствии со ст.309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

В соответствии со ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами. 

В силу того, что отношения, возникающие между потребителем электрической энергии и сетевой организацией при осуществлении ею технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя-физического лица, являются предметом правового регулирования Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей», то в силу пункта 1 статьи 28 указанного закона, если исполнитель нарушил сроки выполнения работы - сроки начала и (или) окончания выполнения работы и (или) промежуточные сроки выполнения работы или во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В силу статьи 12 ГК РФ, к способам защиты гражданских прав, в числе прочего, отнесено присуждение к исполнению обязанности в натуре. 

Ввиду изложенного, суд считает обоснованными и подлежащими удовлетворению требования истца о возложении обязанности на ГУП РК «Крымэнерго» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истца. При этом, учитывая доводы ответчика, суд полагает возможным возложить на ГУП РК «Крымэнерго» обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям истца в течение 90 календарных дней со дня вступления решения суда в силу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства. 

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). 

Как разъяснено в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" (далее - Постановление №), удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

Согласно пункту 31 Постановления № суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре. Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения (пункт 32 Постановления №). 

В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (пункт 32 Постановления N 7).

Таким образом, суд полагает разумным, справедливым и целесообразным взыскать с ответчика в пользу истца за неисполнения судебного акта судебную неустойку, в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда – с момента истечения установленного для исполнения решения суда двухмесячного срока и по день фактического исполнения обязательства.

В соответствии с требованиями ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход государства подлежат взысканию расходы по оплате госпошлины в размере 600 рублей.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 194-198, 321 ГПК РФ, –

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО1 – удовлетворить.

Обязать Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Крымэнерго» в течение 90 календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу исполнить обязательство по Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ осуществить технологическое присоединение электроустановки земельного участка для туристического обслуживания по адресу: Республики Крым, 

<

адрес>, 31 кадастровый №, мощностью 149 кВт, в соответствии с техническими условиями № от ДД.ММ.ГГГГ и условиями договора.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в пользу ФИО1 за неисполнение решения суда неустойку в размере 100 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда - с момента истечения установленного для исполнения решения суда срока в части осуществления технологического присоединения и по день фактического исполнения обязательства.

Взыскать с Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымэнерго» в доход государства государственную пошлину в размере 600 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Верховный Суд Республики Крым через Киевский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья: Я.В. Охота

Решение в окончательной форме принято ДД.ММ.ГГГГ.

Судья: Я.В. Охота