РЕШЕНИЕ

ИменемРоссийскойФедерации

20.06.2018гКрасногорскийгородскойсудМосковскойобластивсоставе:

председательствующегосудьиКаверинойО.В.

присекретареЕгоровойЮ.А.

рассмотреввоткрытомсудебномзаседанииделоискуДомановаМаксимаВикторовичакООО«Хайгейт»озащитеправпотребителя

УСТАНОВИЛ:

ДомановМ.В.предъявилкООО«Хайгейт»искозащитеправпотребителя.Вобоснованиетребованийуказывает,что23.10.2015гзаключилсООО«Хайгейт»договор№ДУ-11-141участиявдолевомстроительстве,поусловиямкоторогоответчикобязалсянепозднее29.09.2017г.передатьемуобъектдолевогостроительства,-квартирупостроительномуадресу:Московскаяобласть,Красногорскийрайон,вблизиг.Красногорска,наземельномучасткескадастровымномером50:11:0040203:48,

<

адрес>,квартирасусловнымномером141,однакосрокиисполненияобязательстваответчикомнарушены,квартирапередана.только10.02.2018г.

Неустойказапериодс30.09.2017гпо10.02.2018г.составит298426руб50коп.

Указаннуюсумму,атакже25000рубвсчеткомпенсацииморальноговредаиштрафвсоответствиисп.6ст.13ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»проситвзыскатьсответчика.

Представительответчикавсудебноезаседаниенеявился,просилрассмотретьделовегоотсутствие,снизитьнеустойку,применивположенияст.333ГКРФ.

Выслушавобъясненияучаствующихвделелиц,изучивматериалыдела,исследовавиоценивдоказательствавсовокупности,судсчитаетисковыетребованияподлежащимичастичномуудовлетворению.

Всоответствиисост.6ЗаконаРФот30.12.2004г.N214-ФЗ"Обучастиивдолевомстроительствемногоквартирныхдомовииныхобъектовнедвижимости"вслучаенарушенияпредусмотренногодоговоромсрокапередачиобъектадолевогостроительствазастройщикуплачиваетдольщикунеустойкувразмере1/300ставкирефинансированияЦБРФ,действующейнаденьисполненияобязательства,отценыдоговоразакаждыйденьпросрочки.Еслиучастникомдолевогостроительстваявляетсягражданин,такаянеустойкауплачиваетсязастройщикомвдвойномразмере.

Судомустановлено,что23.10.2015гмеждусторонамизаключендоговор№ДУ-11-141участиявдолевомстроительстве,поусловиямкоторогоответчикобязалсянепозднее29.09.2017г.передатьистцуобъектдолевогостроительства,-квартирупостроительномуадресу:Московскаяобласть,Красногорскийрайон,вблизиг.Красногорска,наземельномучасткескадастровымномером50:11:0040203:48,

<

адрес>квартирасусловнымномером141,однакосрокиисполненияобязательстваответчикомнарушены,квартирапереданаистцутолько10.02.2018г.

Неустойказапериодс30.09.2017гпо10.02.2018г.составит298426руб50коп.

Всоответствиисост.333ГКРФсудсчитаетвозможнымснизитьразмернеустойкидо145000руб.

Приэтомсудучитываетнебольшойпериодпросрочкисоразмерностьвзыскиваемойнеустойкипоследствиямнарушенияобязательств,необходимостисоблюдениябалансаинтересовсторон.

Всилуст.15ЗаконаРФ«Озащитеправпотребителей»всчеткомпенсацииморальноговредавпользуистцаследуетвзыскать5000руб,атакжештраф,предусмотренныйп.6ст.13тогожеЗакона.

Вудовлетворенииостальнойчаститребованийследуетотказать.

Руководствуясьст.ст.193-198ГПКРФ,суд

РЕШИЛ:

Исковыетребованияудовлетворитьчастично.

ВзыскатьсООО«Хайгейт»впользуДомановаМаксимаВикторовичанеустойкузапериодс30.09.2017гпо10.02.2018г145000руб,компенсациюморальноговреда5000руб,штраф75000руб,авсего225000руб.

Вудовлетворенииостальнойчаститребованийотказать.

РешениеможетбытьобжаловановМосковскийобластнойсудвтечениеодногомесяцасмоментапринятиясудомрешениявокончательнойформе.

Судья:О.В.Каверина