К делу №2-4950/2019

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

(заочное)

20 мая 2019 года Первомайский районный суд г. Краснодара в составе

председательствующей Берулько Е.Г. 

при секретаре Алексеевой Л.В. 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Кубаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки, 

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Кубаньэнерго» обратилось в суд с иском к ФИО1 о расторжении договора, взыскании неустойки и судебных расходов.

В обоснование требований указано, что между ПАО «Кубаньэнерго» и ФИО1 06.04.2017г. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: электроустановки земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>

Согласно условиям договора и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 06.04.2017, являющимся приложением к договору, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя.

Согласно пунктам 4, 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, срок действия технических условий - 2 года со дня заключения договора.

В соответствии с разделом II Договора ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединениюв пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика. После выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ его участка ответчик обязуется уведомить истца о выполнении со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств истцом; после осуществления истцом фактического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, а так же выполнить иные обязательства.

Во исполнение принятых обязательств по договору исполнитель выдал заявителю Технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго", которыми предусматривалось выполнение мероприятий, как Исполнителем, так и Заказчиком.

В настоящее время ПАО «Кубаньэнерго» реализовало все мероприятия, предусмотренные техническими условиями, и произвело резервирование мощности для целей указанного технологического присоединения.

Об указанных действиях ответчика уведомили 04.12.2018г. письмом, в котором также содержится просьба сообщить о сроках присоединения объекта к электрическим сетям сетевой организации.

До настоящего времени сетевая организация не получила от ответчика уведомления о выполнении технических условий. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. Длительное неисполнение ответчиком обязательств по Договору является существенным нарушением Договора. 

При указанных обстоятельствах у истца отсутствует возможность распорядиться зарезервированной за ответчиком мощностью в интересах иных заявителей и, соответственно, он вынужден создавать новые объекты (подстанции, кабельные и воздушные линии и пр.) для других заявителей.

Однако неисполнение обязательства со стороны ответчика влечет ущерб, а так же упущенную выгоду для истца, на что последнийрассчитывал при заключении договора.

Сторона договора, нарушавшая срок осуществление мероприятийтехнологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,014 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договоруза каждый день просрочки.

Направленная в адрес ответчика ФИО1 претензия об исполнении обязательств по договору оставлена без ответа, данное обстоятельство послужило поводом обращения в суд с настоящим исковым заявлением.

В связи с чем просит расторгнуть договор от 06.04.2017г. №, взыскать с ФИО1 неустойку в размере 4427,50 рублей, а также судебные расходы связанные с уплатой госпошлины в размере 6400 рублей.

В судебном заседании представитель ПАО «Кубаньэнерго», действующий на основании доверенности – ФИО2, поддержал исковые требования, по основаниям, изложенным в исковом заявлении. Считал требования законными и обоснованными, просил удовлетворить их в полном объеме. 

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явился, уведомлялся надлежащим образом, о причинах неявки суду дополнительно не сообщал. 

Как установлено в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О сроках рассмотрения судами РФ уголовных, гражданских дел или дел об административных правонарушениях» от 27.12.07 г. №52 в соответствии с п.1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся в силу ч.4 ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ, каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона. С учетом требований данной нормы, а также положений п.п. «с» п.3 ст.14 Международного пакта о гражданских и политических правах уголовные и гражданские дела, а также дела об административных правонарушениях должны рассматриваться без неоправданной задержки в строгом соответствии с правилами судопроизводства, важной составляющей которых являются сроки рассмотрения дел. В данном случае, учитывая вышеназванные обстоятельства, суд не находит оснований для отложения судебного разбирательства и считает возможным рассмотреть его по имеющимся в деле материалам.

Суд, выслушав представителя истца, исследовав материалы дела, пришел к следующему.

Согласно ст. 420, 421, 423, 432, 425 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Граждане и юридические лица свободны в заключения договора. Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. 

Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его заключения.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом и в срок, предусмотренный договором. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается (ст.310 ГК РФ). 

Как установлено судом и следует из материалов дела, между ПАО «Кубаньэнерго» и ФИО1 06.04.2017г. заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям объекта: электроустановки земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: 

<

адрес>.

Согласно п.6 Договора и техническим условиям для присоединения к электрическим сетям от 06.04.2017, являющимся приложением к договору, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя.

Правоотношения из договора регулируются общими нормами обязательственного права (раздел III Гражданского кодекса Российской Федерации), Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861.

Перечень мероприятий по технологическому присоединению, осуществление которых входит в обязанности каждой из сторон, определен в согласованных в качестве приложения к договору технических условиях, являющихся его неотъемлемой частью.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определяет временной период, в пределах которого каждая из сторон договора- как заявитель, так и сетевая организация - обязаны выполнить соответствующие мероприятия, обусловливающие возможность осуществления технологического присоединения, то есть данный срок является сроком исполнения обязанности.

Срок действия технических условий определяет временной период, в пределах которого заявитель вправе осуществить технологическое присоединение к сети сетевой организации, то есть данный срок отражает время существования соответствующего права заявителя.

Согласно пунктам 4, 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, срок действия технических условий - 2 года со дня заключения договора.

В соответствии с разделом II Договора ответчик обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединениюв пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства ответчика. 

После выполнения ответчиком мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ его участка ответчик обязуется уведомить истца о выполнении со своей стороны мероприятий, предусмотренных техническими условиями, принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств истцом; после осуществления истцом фактического присоединения энергопринимающих устройств ответчика к электрическим сетям подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей, акт разграничения эксплуатационной ответственности, акт об осуществлении технологического присоединения, а так же выполнить иные обязательства.

Во исполнение принятых обязательств по договору исполнитель выдал заявителю Технические условия для присоединения к электрическим сетям ПАО "Кубаньэнерго", которыми предусматривалось выполнение мероприятий, как Исполнителем, так и Заказчиком.

В настоящее время ПАО «Кубаньэнерго» реализовало все мероприятия, предусмотренные техническими условиями, являющимися неотъемлемой частью договора со своей стороны и произвело резервирование мощности для целей указанного технологического присоединения. 

Об указанных действиях ответчика уведомили 04.12.2018г. письмом, в котором также содержится просьба сообщить о сроках присоединения объекта к электрическим сетям сетевой организации.

До настоящего времени сетевая организация не получила от ответчика уведомления о выполнении технических условий. Таким образом, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению истек. Длительное неисполнение ответчиком обязательств по Договору является существенным нарушением Договора. 

Согласно ст. 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Если иное не предусмотрено договором подряда, подрядчик при наличии обстоятельств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 782 ГК РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Целью заключения договора являлось присоединение электроустановок ответчика для дальнейшего электроснабжения принадлежащего ему объекта, в результате которого истец выполняет предусмотренную уставом деятельность и получает денежные средства, которые в дальнейшем расходуютсясодержание электросетевого комплекса истца.

При указанных обстоятельствах у истца отсутствует возможность распорядиться зарезервированной за ответчиком мощностью в интересах иных заявителей и, соответственно, он вынужден создавать новые объекты (подстанции, кабельные и воздушные линии и пр.) для других заявителей.

Однако неисполнение обязательства со стороны ответчика влечет ущерб, а так же упущенную выгоду для истца, на что последнийрассчитывал при заключении договора.

В соответствии со ст. 450 ГК РФ изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими законами или договором.

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда только: 1) при существенном нарушении договора другой стороной; 2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или договором.

Согласно ст. 452 ГК РФ существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Соглашение об изменении или о расторжении договора совершается в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или обычаев не вытекает иное.

Требование об изменении или о расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа другой стороны на предложение изменить или расторгнуть договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом либо договором, а при его отсутствии - в тридцатидневный срок.

При заключении договора, стороны исходили из взаимного интереса истца и ответчика. Однако неисполнение обязательства со стороны ответчикавлечет ущерб, а так же упущенную выгоду для истца, на что последнийрассчитывал при заключении Договора.

В силу пункта 8 Договора, заявитель обязуется надлежащим образом исполнить обязательства, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению.

В соответствии с условиями договора, сторона договора, нарушавшая срок осуществление мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,014 процента от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки.

Направленная в адрес ответчика претензия ответчиком оставлена без ответа.

При таких обстоятельствах, исследовав представленные доказательства по делу, суд считает, что заявленные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора подлежат удовлетворению.

Разрешая исковые требования в части взыскания неустойки, суд, проверил представленный истцом расчет, согласно которому, размер неустойки составляет 4 427,50 рублей, из расчета: 550 руб. – общая цена договора, 25.06.2018г. срок обязательств по договору, 03.12.2018г. дата расчета неустойки, процент неустойки 5%, 161 день просрочки. Проверяя данный расчет, суд считает его математически верным.

При таких обстоятельствах, исследовав представленные доказательства по делу, суд считает, что заявленные исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки являются законными и обоснованными, так как истцом исполнена обязанность по доказыванию обстоятельств неисполнения ответчиком своих обязательств.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса.

Согласно ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

Требования истца о взыскании с ответчика суммы уплаченной государственной пошлины также подлежат удовлетворению в размере 6400 рублей в соответствии с положениями ст. 98 ГПК РФ. 

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Как указано в п.5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2003 г. № 23 «О судебном решении» заявленные требования рассматриваются и разрешаются по основаниям, указанным истцом, а также по обстоятельствам, вынесенным судом на обсуждение в соответствии с ч.2 ст. 56 ГПК РФ.

Согласно ч.2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Суд оценивает доказательства, согласно ст. 67 ГПК РФ, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ПАО «Кубаньэнерго» к ФИО1 о расторжении договора и взыскании неустойки удовлетворить.

Расторгнуть договор №, заключенный между ПАО «Кубаньэнерго» и ФИО1.

Взыскать с ФИО1 в пользу ПАО «Кубаньэнерго» неустойку в размере 4 427,50 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 6400 рублей.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд через районный суд в течение 30-ти дней со дня изготовления решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы, ответчик также вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения, если такое заявление подано - решение может быть обжаловано в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья-

Решение изготовлено 20 мая 2019г.