Дело № 2-3353/17

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 декабря 2017 года Рубцовский городской суд Алтайского края в составе:

Председательствующего Хоченовой Е.В.,

при секретаре Кашлевой А.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 к ООО «УК «Парус», Администрации города Рубцовска о возложении обязанности произвести текущий ремонт подъезда, 

УСТАНОВИЛ:

Алтайская краевая общественная организация «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» обратилась в суд в интересах ФИО1 с требованиями к ООО «УК «Парус», Администрации г. Рубцовска, в которых просила обязать ответчика – ООО «УК «Парус» произвести текущий ремонт подъезда жилого дома по ... в ... в течение трех месяцев со дня вынесения решения суда; взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 1000 рублей. В обоснование требований указано, что истец – ФИО1 является нанимателем ... в .... Ответчик – ООО «УК «Парус» является управляющей компанией обслуживающей жилой дом, Администрация ... является наймодателем и собственником жилого .... В нарушении закона управляющая компания в течение семи лет с момента начала обслуживания жилого дома ни разу не произвела ремонт подъездов жилого дома. Указанными действиями ответчика истцу причинен моральный вред. 

В судебном заседании истец – ФИО1 отсутствовала, извещена надлежащим образом. Представила заявление о рассмотрении дела в свое отсутствие, указала, что исковые требования поддерживает в полном объеме, просила решение принять с учетом экспертного заключения. 

Представитель Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен судом в установленном законом порядке.

Представители ответчиков – ООО «УК «Парус», Администрации г. Рубцовска в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены судом в установленном законом порядке.

Представитель третьего лица – Государственной жилищной инспекции Алтайского края в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен в установленном законом порядке. 

На основании ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствии не явившихся лиц, извещенных надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к следующим выводам.

В силу п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме.

Согласно ч.ч. 2, 3 названной нормы при управлении многоквартирным домом управляющей организацией, она несет ответственность перед собственниками помещений в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных Правительством Российской Федерации правил содержания общего имущества в многоквартирном доме.

В соответствии со ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору управления многоквартирным домом одна сторона (управляющая организация) по заданию другой стороны (собственников помещений в многоквартирном доме, органов управления товарищества собственников жилья, органов управления жилищного кооператива или органов управления иного специализированного потребительского кооператива, лица, указанного в п. 6 ч. 2 ст. 153 настоящего Кодекса, либо в случае, предусмотренном ч. 14 ст. 161 настоящего Кодекса, застройщика) в течение согласованного срока за плату обязуется выполнять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом, оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме, предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений в таком доме и пользующимся помещениями в этом доме лицам, осуществлять иную направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.

Порядок содержания общего имущества в многоквартирном доме регламентируется соответствующими Правилами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491 и Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном дома, и порядке их содержания и выполнения, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

В силу п. 10 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме общее имущество должно содержаться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании, защите прав потребителей) в состоянии, обеспечивающем, в том числе: соблюдение характеристик надежности и безопасности многоквартирного дома; безопасность для жизни и здоровья граждан, сохранность имущества физических или юридических лиц, государственного, муниципального и иного имущества.

На основании п. 16 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме надлежащее содержание общего имущества обеспечивается собственниками помещений путем заключения договора управления многоквартирным домом с управляющей организацией.

При этом, в силу п. 2 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, в состав общего имущества включаются: помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные, чердаки, технические этажи (включая построенные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и площадки для автомобильного транспорта, мастерские, технические чердаки) и технические подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме оборудование (включая котельные, бойлерные, элеваторные узлы и другое инженерное оборудование); крыши; ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома (включая фундаменты, несущие стены, плиты перекрытий, балконные и иные плиты, несущие колонны и иные ограждающие несущие конструкции); ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения (включая окна и двери помещений общего пользования, перила, парапеты и иные ограждающие ненесущие конструкции); механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры); иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

Судом установлено, что истец ФИО1 является нанимателем ... многоквартирном жилом ... в ..., жилое помещение принадлежит на праве собственности МО «...» ..., что подтверждается материалами дела, в том числе, выпиской из поквартирной карточки.

Компанией, осуществляющей управление многоквартирным жилым домом по ... в ..., является ООО «УК «Парус», что не оспаривалось сторонами. 

Приступая к управлению домом, управляющая компания взяла на себя обязанность за плату оказывать услуги и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту указанного жилого дома. Доказательств, что в указанный период управляющей организацией производился текущий ремонт подъездов (лестниц, лестничных клеток) многоквартирного дома по ... в ... ответчиком не представлено. 

В ходе рассмотрения дела, судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы для определения технического состояния подъезда , вида работ, которые необходимо выполнить. 

Согласно заключению эксперта № 1074/17 от 10.11.2017 в ходе проведения экспертного осмотра технического состояния подъезда № 1 многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: ..., выявлены повреждения штукатурки, побелки, окраски стен и лестничных маршей, перильного ограждения, дверных и оконных блоков элементов системы отопления.

Анализом данных, полученных в ходе проведения экспертного осмотра и данных, содержащихся в нормативно-технической документации, установлено, что техническое состояние подъезда жилого многоквартирного дома по ... в ... неудовлетворительное (не соответствует требованиям МДК 2.03.2003 «Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда»). Для устранения повреждений, выявленных в помещении исследуемого подъезда, требуется проведение работ, относящихся к текущему ремонту. 

Суд принимает во внимание, что экспертиза проведена в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями, эксперт предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

Ответчик ходатайств о проведении повторной либо дополнительной экспертизы не заявлял, доказательств в обоснование возражений в суд не представил.

Поскольку услуги и работы по обслуживанию мест общего пользования, являющиеся предметом данного иска, отнесены к услугам по содержанию общего имущества многоквартирного дома, то плата за данные услуги должна производиться за счет средств, вносимых собственниками (нанимателями) в счет платы на содержание и текущий ремонт общего имущества многоквартирного дома. 

Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором (пункт 42 Правил содержания общего имущества). 

При таких обстоятельствах, суд находит исковые требования ФИО1 об обязании произвести текущий ремонт подъезда в ... подлежащими удовлетворению. 

Учитывая, что необходимые к проведению работы относятся к текущему ремонту, а ООО «УК «Парус» в рамках заключенного договора управления многоквартирным жилым домом взяло на себя обязательство по управлению вышеуказанным жилым домом, соответственно именно ООО «УК «Парус» будет являться надлежащим ответчиком по настоящему спору. 

Поскольку какие-либо договорные отношения между истцом и Администрацией ... в части оказания услуг по управлению жилым домом и его содержанию, в смысле определенном положениями Жилищного кодекса Российской Федерации отсутствуют, в удовлетворении требований к данному ответчику суд полагает необходимым отказать. 

В силу ч.2 ст.206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд полагает необходимым установить срок для выполнения ремонтных работ в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу.

В соответствии со ст. 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

В статье 15 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» закреплено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Учитывая обстоятельства дела, представленные доказательства характера и степени причиненных истцу нравственных страданий, обстоятельств причинения вреда, степень вины нарушителя, с учетом требований разумности и справедливости, определяя размер компенсации морального вреда, суд полагает возможным взыскать с ООО «УК «Парус» в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 200 рублей. Оснований для взыскания компенсации морального вреда в ином размере, в том числе, в размере, указанном истцом, - 1000 руб. суд, в отсутствие достаточных доказательств, не усматривает.

Согласно пункту 6 статьи 13 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и разъяснений содержащихся в п.п. 46, 47 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду. 

Обстоятельств, позволяющих освободить ответчика от оплаты штрафа, по вышеуказанным основаниям, в материалах дела не имеется. Таким образом, удовлетворение исковых требований истца в части компенсации морального вреда, безусловно, влечет наложение на ответчика штрафа за неудовлетворение в добровольном порядке требований потребителя. Размер штрафа, исходя из присужденной судом денежной суммы, составляет 100 руб., который подлежит взысканию с ответчика в пользу истца, а также в пользу АКОО «АЗПП «Сутяжник» в размере по 50% в пользу каждого. 

В соответствии с частью 1 статьи 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с учетом статей 333.19, 333.20 Налогового кодекса Российской Федерации, с ответчика в доход бюджета муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края подлежит взысканию государственная пошлина за подачу иска в сумме 300 рублей.

Согласно ст. 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам; расходы на оплату услуг представителей; другие признанные судом необходимыми расходы.

В ходе рассмотрения по делу судом было назначено проведение судебной строительно-технической экспертизы, производство которой поручено ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы», с возложением оплаты на ФИО1

Экспертное заключение составлено и направлено в суд. Однако, оплата за производство экспертизы произведена не была. Стоимость экспертизы согласно представленного в материалы дела расчета составляет 12600 руб.

На основании ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, с ответчика ООО «УК «Парус» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» подлежат взысканию расходы по оплате за производство экспертизы.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парус» произвести текущий ремонт подъезда жилого ... в ... края, в течение трех месяцев с момента вступления решения в законную силу, выполнив следующие ремонтно-строительные работы.

Входной тамбур:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхности дощатой перегородки, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхностей деревянных дверных блоков, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток (с заменой поврежденных плиток), с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска металлического дверного блока, установленного в наружной стене, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление поврежденного утеплителя трубы отопления, с предварительной разборкой существующего утеплителя.

Площадка и лестничный марш между тамбуром и площадкой 1-го этажа:

Заделка выбоин, сколов и локальных разрушений бетона отдельных ступеней плотным цементным раствором с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Побелка верхней части стен, с предварительной подготовкой поверхности; 

Окраска масляными составами поверхности дощатой перегородки, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхности деревянного дверного блока, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление поверхности пола из керамических плиток (с заменой поврежденных плиток), с предварительной подготовкой поверхности.

Площадка 1-го этажа:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток (с заменой поврежденных плиток), с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление цементного плинтуса на разрушенных участках;

Окраска плинтусов масляными составами, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхности стальных дверных блоков блок-секций, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между площадкой 1-го этажа и промежуточной площадкой (1-2):

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности.

Промежуточная площадка (1-2):

Разборка кирпичной кладки заложенного верхнего проема;

Установка оконного блока с открывающейся створкой;

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен (с откосами) и окраска масляными составами нижней части стен (с откосами), с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление цементного плинтуса на разрушенных участках;

Окраска плинтусов масляными составами, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между промежуточной площадкой (1-2) и площадкой 2-го этажа:

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности.

Площадка 2-го этажа:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхности стальных дверных блоков блок-секций, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между площадкой 2-го этажа и промежуточной площадкой (2-3):

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Побелка нижней поверхности лестничного марша, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности.

Промежуточная площадка (2-3):

Побелка верхней части стен, заложенного участка оконного проема и откосов, окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Замена заполнения оконных створок из сотового поликарбоната на цельное остекление;

Окраска масляными составами деревянного заполнения оконного проема, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами плинтусов по периметру, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами поверхности трубы отопления, с предварительной подготовкой поверхности. 

Лестничный марш между промежуточной площадкой (2-3) и площадкой 3-го этажа:

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности.

Площадка 3-го этажа:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление цементного плинтуса на разрушенных участках;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами стальных дверных блоков, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между площадкой 3-го этажа и промежуточной площадкой (3-4):

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, с предварительной подготовкой поверхности.

Промежуточная площадка (3-4):

Побелка заложенного участка оконного проема и откосов, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Замена заполнения оконных створок из сотового поликарбоната на цельное остекление;

Окраска масляными составами деревянного заполнения оконного проема, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между промежуточной площадкой (3-4) и площадкой 4-го этажа:

Окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, с предварительной подготовкой поверхности.

Площадка 4-го этажа:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола и керамических плиток (с заменой поврежденных плиток) с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление цементного плинтуса на разрушенных участках;

Окраска плинтусов масляными составами, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами стальных и деревянных дверных блоков, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между площадкой 4-го этажа и промежуточной площадкой (4-5):

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, с предварительной подготовкой поверхности.

Промежуточная площадка (4-5):

Побелка верхней части стен (с оконными откосами) и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление цементного плинтуса на разрушенных участках;

Окраска плинтусов масляными составами, с предварительной подготовкой поверхности;

Замена заполнения оконных створок из сотового поликарбоната на цельное остекление;

Окраска масляными составами деревянного заполнения оконного проема, с предварительной подготовкой поверхности.

Лестничный марш между промежуточной площадкой (4-5) и площадкой 5-го этажа:

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами ходовой поверхности лестничного марша (по боковым сторонам) и боковой поверхности марша с подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения с предварительной подготовкой поверхности.

Площадка 5-го этажа:

Подготовка основания стен с расчисткой отстающих отделочных слоев и восстановление штукатурного слоя на поврежденных участках;

Побелка верхней части стен и окраска масляными составами нижней части стен, с предварительной подготовкой поверхности;

Восстановление покрытия пола из керамических плиток (с заменой поврежденных плиток), с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска плинтусов масляными составами, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянного поручня, металлических элементов перильного ограждения, с предварительной подготовкой поверхности;

Окраска масляными составами деревянных дверных блоков, с предварительной подготовкой поверхности.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парус» в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в сумме 200 рублей, штраф в сумме 50 рублей, всего 250 рублей

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парус» в пользу Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» штраф в размере 50 рублей. 

В удовлетворении остальной части исковых требований Алтайской краевой общественной организации «Агентство по защите прав потребителей «Сутяжник» в интересах ФИО1 в ООО Управляющая компания «Парус» и в полном объеме к Администрации г. Рубцовска Алтайского края отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Парус» в доход бюджета муниципального образования «Город Рубцовск» Алтайского края государственную пошлину в сумме 300 руб.

Взыскать с ООО «Управляющая компания «Парус» в пользу ООО «Лаборатория судебной строительно-технической экспертизы» 12600 рублей за проведение экспертизы.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд в течение месяца со дня вынесения решения суда в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Рубцовский городской суд Алтайского края.

Председательствующий Е.В. Хоченова