Дело № 2-1772/2024

91RS0006-01-2024-001916-34

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2024 года г. Бахчисарай

Бахчисарайский районный суд Республики Крым в составе: председательствующего судьи Атаманюка Г.С., при секретаре судебного заседания Калиевской С.А., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго", Государственному унитарному предприятию Республики Крым "Крымэнерго" в лице структурного подразделения Бахчисарайский РЭС, о понуждении к исполнению договора, 

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратилась в суд с иском к ГУП РК «Крымэнерго» о возложении обязанности по выполнению условий договора, а именно, о разработке проектной документации согласно техническим условиям, установке оборудования и осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям земельного участка, расположенного на территории Верхореченского сельского совета, 

<

адрес>, кадастровый №.

Исковые требования мотивированы тем, что 19 апреля 2022 года по её заявке ответчиком были разработаны технические условия для присоединения к электрическим сетям земельного участка. Услуги по разработке технических условий ею были оплачены в полном объеме. Однако, ответчик до настоящего времени не выполнил работы по технологическому присоединению земельного участка. 

Определением суда ль 22 июля 2024 года к участию в деле в качестве ответчика привлечены Бахчисарайские РЭС ГУП РК «Крымэнерго». 

Истец в судебное заседание не явилась, направила суду ходатайство о рассмотрении дела в её отсутствие.

Ответчики, извещённые надлежащим образом в суд не явились, о причинах неявки не известили, ходатайств об отложении рассмотрения дела не заявляли.

При таких обстоятельствах суд, в соответствии с требованиями ст. 167 ГПК РФ, считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц. 

Исследовав материалы дела и представленные доказательства, суд приходит к выводу об удовлетворении исковых требований по следующим основаниям.

Установлено, что 22 апреля 2022 года между ФИО1 и ГУП РК "Крымэнерго" был заключен договор № 356124 об осуществлении технологического присоединения электроустановки истца к электрическим сетям в соответствии с техническими условиями для присоединения к электрическим сетям № 003/000-743-22 от 19 апреля 2022 года. 

В соответствии с п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен в Правилах технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила). 

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора, не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Неисполнение сетевой организацией Договора об осуществлении технологического присоединения в связи с нарушением предельных сроков технологического присоединения, установленных в подпункте "б" пункта 16 Правил для соответствующих категорий заявителей, является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике».

Согласно п. 1 Договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения ВЛЗ-б кВ, КТП, ВА, измерительный комплекс, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик, указанных в договоре, а заявитель обязуется оплатить услуги по технологическому присоединению в соответствии с условиями настоящего договора.Согласно п. 4 Договора точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается не далее 25 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

Согласно п. 5 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора об осуществлении технологического присоединения. Срок действия технических условий составляет 2 года со дня заключения договора.

Согласно п. 7 Договора сетевая организация обязуется: - надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств; - обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности; - разместить в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию; - составить в электронной форме и разместить в личном кабинете потребителя акт о выполнении технических условий, содержащий перечень мероприятий, реализованных в соответствии с техническими условиями, и акт об осуществлении технологического присоединения; - уведомить заявителя о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 12 Договора внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем путем оплаты счета в течение 5 рабочих дней со дня его выставления сетевой организацией.

Истец ФИО1 произвела оплату услуг по договору за технологическое присоединение, произвела мероприятия по обеспечению технологического подключения энергоустановки на её земельном участке к электрическим сетям. 

Таким образом, истцом обязательства по Договору выполнены своевременно и в полном объеме. 

Однако, ответчиком не выполнены свои обязательства по технологическому присоединению, чем ущемляются законные права и интересы ФИО1

Согласно п. 6 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 12 месяцев со дня заключения настоящего договора, то есть конечным сроком присоединения к электрическим сетям является 22 апреля 2023 года.

Согласно ст. 307 ГК РФ, в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как-то передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договора, вследствие причинения вреда и иных оснований, указанных в настоящем Кодексе.

В соответствии с п. 1 ст. 779 ГК РФ, по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст. ст. 309-310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований. В соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

ГУП РК «Крымэнерго» обязательства по Договору до настоящего времени не исполнены. Данных об обратном суду не представлено.

При таких обстоятельствах суд считает, что восстановление нарушенных прав истца возможно путём удовлетворения исковых требований в части возложения на ответчика обязанности в течение трех месяцев со дня вступления в силу данного решения осуществить технологическое присоединение земельного участка ФИО1 к электрическим сетям.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать ГУП РК «Крымэнерго» в срок не позднее трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить мероприятия по договору по технологическому присоединению энергопринимающих устройств и электроснабжение электроустановки на земельном участке ФИО1 на территории 

<

адрес> Республики Крым, кадастровый № в соответствии с техническими условиями от 19 апреля 2022 года. 

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Республики Крым через Бахчисарайский районный суд Республики Крым в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме принято 27 сентября 2024 года.

Судья Г.С. Атаманюк