Дело № 2-4807/2033

УИД 50RS0052-01-2023-004396-89

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13 июля 2023 года г. Щелково Московской области

Щелковский городской суд Московской области в составе: Председательствующего судьи Павловой С.А.,

при секретаре судебного заседания Павловой О.Е.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Акционерного Общества «Московская областная энергосетевая компания» к ФИО1 о взыскании неустойки, об обязании исполнить обязательство,

УСТАНОВИЛ:

АО «Мособлэнерго» обратилось в Щелковский городской суд с иском к ФИО1 о взыскании неустойки, об обязании исполнить обязательство.

В обоснование иска указал, что Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго», Сетевая организация, Истец) является сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на территории городского округа Щелково Московской области.

АО «Мособлэнерго» (далее - Сетевая организация) и ФИО1 (далее - Заявитель) заключили Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. №/ЩЛ (далее - Договор).

В соответствии с п. 1, 8 Договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. № /ЩЛ (Приложение к Договору, далее - Технические условия) Сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя («жилой дом на земельном участке» №, расположенные (которые будут располагаться) по адресу 

<

адрес> №), а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, и оплатить выполнение Сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, в которых предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

Подпунктом «а» пункта 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту -- Правила технологического присоединения) установлено, что вместе с уведомлением о выполнении технических условий заявитель представляет в сетевую организацию копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

По факту получения сетевой организацией уведомления о выполнении заявителем технических условий проводится проверка выполнения заявителем технических условий с подписанием акта о выполнении технических условий, после -его осуществляются мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя и сетевой организации, построенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению в работу.

Сетевой организацией в полном объеме были выполнены условия Договора.

На момент подачи искового заявления уведомления о выполнении технических условий от Заявителя в Сетевую организацию не поступало.

Своим бездействием Ответчик нарушает права Истца.

В результате несвоевременного выполнения Ответчиком мероприятий по технологическому присоединению Истец несет следующие негативные последствия:

необоснованно "резервируется" мощность и используются ресурсы сетевой организации (отсутствие свободных сетевых мощностей по причине их резервирования по договорам технологического присоединения), сроки выполнения мероприятий по которым истекли по вине заявителей);

нарушается программа (последовательной) реконструкции;

истец не имеет возможности приступить к оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием указанной в технических условиях точки присоединения и соответственно получать плату за оказание услуг по передаче электрической энергии;

истец не имеет возможности компенсировать затраты, в соответствии с законодательством не учитываемые при установлении платы за технологическое присоединение, при формировании тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии в тот период, в котором эти затраты фактически понесены;

АО «Мособлэнерго» лишается возможности получить часть платы за технологическое присоединение, срок внесения которой исчисляется с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Так, просрочка заявителя по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 118 дней - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Пунктом 17 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, г предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Таким образом, сумма неустойки по договору составляет 10 037 рублей 50 копеек (550 рублей х 365 дней х 5%).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Заявителя была направлена претензия, исх. N 1339/23- ЮО, с требованиями в течение 30 календарных дней с даты направления настоящей претензии выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 8 Договора, а также пунктом 11 Технических условий, и перечислить неустойку.

Претензия была направлена в адрес Ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому и почтовому адресу.

На основании изложенного, истец просит суд:

Обязать ФИО1 в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с Договором Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. №/ЩЛ:

Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии

с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

Разработку проектной документации в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X ""Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии"". Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше Рекомендуется установка приборов учета класса точности 1.0 и выше:

с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней; с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, coscp) по каждой фазе;

с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (№) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока)."

Средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным целям и программному обеспечению.

Существующее ответвление к вводу вывести из схемы электроснабжения.

Уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №/ЩЛ.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленную пунктом 17 Договора от 09.12.2019г. №/ЩЛ в размере 10 037 рублей 50 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 402 рубля.

В судебном заседании представитель истца ФИО2, действующий на основании доверенности, требования, по основаниям, изложенным в исковом заявлении поддержал в полном объеме, просил иск удовлетворить. 

В судебном заседании ответчик ФИО3 против удовлетворения иска не возражал.

Выслушав стороны, исследовав материалы дела, оценив в совокупности представленные письменные доказательства по правилам ст. 67 ГПК РФ, суд приходит к следующему.

Согласно пункту 1 статьи 308.3, статье 396 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре.

Статья 12 ГК РФ предусматривает такой способ защиты гражданских прав, как присуждение к исполнению обязанности в натуре, что означает понуждение должника выполнить определенные действия, которые он должен совершить в силу связывающего стороны обязательства.

Из материалов дела следует, что Акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (АО «Мособлэнерго», Сетевая организация, Истец) является сетевой организацией, осуществляющей технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей на территории городского округа Щелково Московской области.

АО «Мособлэнерго» (далее - Сетевая организация) и ФИО1 (далее - Заявитель) заключили Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. №/ЩЛ (далее - Договор).

В соответствии с п. 1, 8 Договора и Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. № /ЩЛ (Приложение к Договору, далее - Технические условия) Сетевая организация обязуется выполнить мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Заявителя («жилой дом на земельном участке» №, расположенные (которые будут располагаться) по адресу 

<

адрес>, №), а Заявитель обязуется выполнить мероприятия, предусмотренные Техническими условиями, и оплатить выполнение Сетевой организации мероприятий по технологическому присоединению.

После выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, заявитель обязан уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, в которых предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае, если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий.

Подпунктом «а» пункта 85 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861 (далее по тексту -- Правила технологического присоединения) установлено, что вместе с уведомлением о выполнении технических условий заявитель представляет в сетевую организацию копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование подлежит обязательной сертификации и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации.

По факту получения сетевой организацией уведомления о выполнении заявителем технических условий проводится проверка выполнения заявителем технических условий с подписанием акта о выполнении технических условий, после -его осуществляются мероприятия по вводу объектов электроэнергетики заявителя и сетевой организации, построенных в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению в работу.

Сетевой организацией в полном объеме были выполнены условия Договора.

Так, в результате несвоевременного выполнения Ответчиком мероприятий по технологическому присоединению Истец несет следующие негативные последствия:

необоснованно "резервируется" мощность и используются ресурсы сетевой организации (отсутствие свободных сетевых мощностей по причине их резервирования по договорам технологического присоединения), сроки выполнения мероприятий по которым истекли по вине заявителей);

нарушается программа (последовательной) реконструкции;

истец не имеет возможности приступить к оказанию услуг по передаче электрической энергии с использованием указанной в технических условиях точки присоединения и соответственно получать плату за оказание услуг по передаче электрической энергии;

истец не имеет возможности компенсировать затраты, в соответствии с законодательством не учитываемые при установлении платы за технологическое присоединение, при формировании тарифа на оказание услуг по передаче электрической энергии в тот период, в котором эти затраты фактически понесены;

АО «Мособлэнерго» лишается возможности получить часть платы за технологическое присоединение, срок внесения которой исчисляется с даты подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

Должник в соответствии со статьями 309-310 ГК РФ не вправе произвольно отказаться от надлежащего исполнения обязательства.

Согласно подпункту а (2) пункта 25 Правил N861, обязанности определяются следующим образом:

мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем,

мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются сетевой организацией.

В подпунктах «в» и «г» пункта 18 Правил № указано, что мероприятия по теологическому присоединению включают в себя:

разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

выполнение заявителем технических условий.

В силу указанных норм Истец вправе требовать от Ответчика исполнить надлежащим образом условия Договора в части выполнения возложенных на него. сговором мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства Ответчика, а также требовать от Ответчика:

уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, в которых предусмотрены технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств;

подписать и вернуть в адрес АО «Мособлэнерго» экземпляр акта об осуществлении технологического присоединения.

Существенным условием договора в соответствии с пунктом 1 статьи 432 ГК РФ, пунктом 1 статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» делегировавшим Правительству Российской Федерации определение существенных условий договора) и подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения, в числе прочего являются положения об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором и Правилами технологического присоединения.

Согласно статьям 12, 329, 330 ГК РФ, неустойка является одним из способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил N2861 предусмотрено обязательное включение в договор об осуществлении технологического присоединения существенного условия об ответственности сторон (включая Заявителя) за несоблюдение установленных договором и Правилами № сроков исполнения своих обязательств, в том числе обязанность при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить другой стороне договора неустойку.

Такое условие о неустойке указано в пункте 17 Договора, что является взаимно стимулирующей мерой к совместному достижению цели обязательства и обеспечению предусмотренных Договором сроков его исполнения.

Пунктом 16.6 Правил № специально оговорено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению считается нарушенным заявителем, если заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении им мероприятий, предусмотренных техническими условиями.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о нарушении существенных условий Договора ответчиком, в связи с чем, полагает правомерным исковые требования истца и приходит к выводу о возложении на ответчика обязанности в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с Договором Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. №/ЩЛ:

Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии

с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

Разработку проектной документации в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X ""Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии"". Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше Рекомендуется установка приборов учета класса точности 1.0 и выше:

с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней; с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, coscp) по каждой фазе;

с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи №) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока)."

Средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным целям и программному обеспечению.

Существующее ответвление к вводу вывести из схемы электроснабжения.

Уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №/ЩЛ.

Так, просрочка заявителя по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ составляет 1 118 дней - с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

В соответствии с пунктом 10 Договора размер платы за технологическое присоединение составляет 550 (пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

Пунктом 17 Договора установлено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, г предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки за год просрочки.

Таким образом, сумма неустойки по договору составляет 10 037 рублей 50 копеек (550 рублей х 365 дней х 5%).

ДД.ММ.ГГГГ в адрес Заявителя была направлена претензия, исх. N 1339/23- ЮО, с требованиями в течение 30 календарных дней с даты направления настоящей претензии выполнить мероприятия, предусмотренные пунктом 8 Договора, а также пунктом 11 Технических условий, и перечислить неустойку.

Претензия была направлена в адрес Ответчика заказным письмом с уведомлением о вручении по юридическому и почтовому адресу.

Представленный расчет судом проверен, принят, ответчиком не оспорен, контррасчетом не опровергнут.

Таким образом, суд находит правомерными исковые требования о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленную пунктом 17 Договора от 09.12.2019г. №/ЩЛ в размере 10 037 рублей 50 копеек.

Одновременно с заявленными исковыми требованиями, истец просит взыскать с ответчика судебные расходы, понесенные по делу. 

В силу ч. 1 ст. 88 ГПК РФ, судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 ГПК РФ.

С учетом признания судом обоснованности предъявленных исковых требований, суд полагает верным взыскать с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины в полном размере – 6402,00 рубля, как подтвержденные документально.

При таких обстоятельствах, исковые требования Акционерного Общества «Московская областная энергосетевая компания» к ФИО1 о взыскании неустойки, об обязании исполнить обязательство признаются судом законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198, 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Акционерного Общества «Московская областная энергосетевая компания» к ФИО1 о взыскании неустойки, об обязании исполнить обязательство - удовлетворить.

Обязать ФИО1 в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу решения суда выполнить мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с Договором (Договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.12.2019г. №/ЩЛ):

Смонтировать ВРУ объекта в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и заявленной категорией надежности электроснабжения.

От точки присоединения до ВРУ объекта смонтировать ЛЭП в соответствии с максимальной мощностью, уровнем напряжения и категорией надежности электроснабжения.

Разработку проектной документации в границах земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным настоящими техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.

Предусмотреть установку устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности.

Для повышения электро- и пожаробезопасности объекта рекомендуется на вводе установить устройство защитного отключения (УЗО) с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Для обеспечения надежной работы электрооборудования Заявителя, при присоединении от ВЛ, рекомендуется на вводе в помещение предусмотреть защиту от повышенных и импульсных напряжений с учетом требований главы 7.1 Правил устройства электроустановок.

Учет электрической энергии выполнить в соответствии с требованиями раздела X "Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии". Для учета электрической энергии установить электросчетчик класса точности 2.0 и выше Рекомендуется установка приборов учета класса точности 1.0 и выше:

с возможностью вести архивы тарифицированной учтенной активной и реактивной электроэнергии на начало суток с глубиной не менее 30 дней, на начало месяца с глубиной не менее 12 месяцев и от сброса;

с возможностью хранить профиль мощности с периодом интегрирования 30 мин и глубиной хранения не менее 90 дней; с возможностью измерять мгновенные значения параметров сети (I, U, Р, coscp) по каждой фазе;

с возможностью измерять и фиксировать в журнале событий показатели качества электрической энергии.

имеющих два независимых равноприоритетных интерфейса связи (RS-485/CAN/PLC) для удаленного сбора данных и один оптический интерфейс для чтения информации непосредственно с прибора учета при помощи ноутбука или аналогичного устройства.

На момент ввода в эксплуатацию на устанавливаемом электросчетчике должна быть пломба поверки с давностью, не превышающей срок, установленный эксплуатационной документацией.

Трансформаторы тока и напряжения для подключения электросчетчика применить класса точности 0,5 и выше. Типы устанавливаемых трансформаторов тока и напряжения должны соответствовать действительным параметрам схемы электроснабжения. Устанавливаемые трансформаторы тока и напряжения должны иметь действующие свидетельства о поверке (оттиски поверительных клейм). В измерительных цепях должна предусматриваться установка испытательной коробки (блока).

Средства и системы учета электрической энергии должны быть защищены от несанкционированного доступа к измерительным целям и программному обеспечению.

Существующее ответвление к вводу вывести из схемы электроснабжения.

Уведомить АО «Мособлэнерго» о выполнении технических условий от ДД.ММ.ГГГГ №/ЩЛ.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» неустойку за нарушение срока выполнения мероприятий по технологическому присоединению, установленную пунктом 17 Договора от 09.12.2019г. №/ЩЛ в размере 10 037 рублей 50 копеек.

Взыскать с ФИО1 в пользу Акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания» расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6 402 рубля.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Щелковский городской суд Московской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Судья С.А. Павлова