УИД № 19RS0001-02-2026-000061-80

Дело 2-1209/2026

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

12 марта 2026 года г. Абакан Республика Хакасия

Абаканский городской суд Республики Хакасия в составе:

председательствующего Яшиной Н.А.

при секретаре Отдельных Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1-ооловны к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об осуществлении технологического присоединения, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

ФИО5 обратилась в Абаканский городской суд Республики Хакасия с исковым заявлением к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее – ПАО «Россети Сибирь», Сетевая организация) о понуждении к исполнению обязательств по договору, взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Свои требования мотивировала тем, что является собственником жилого помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>. 15 ноября 2024 года между истцом и ответчиком был заключён Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор о ТП), по условиям которого Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по вышеуказанному адресу. Согласно условиям договора, срок выполнения мероприятий составляет 6 месяцев со дня заключения договора, между тем, до настоящего времени присоединение к электрическим сетям не осуществлено, несмотря на то, что оплата по договору в размере 35 122 рублей 67 копеек была произведена истцом 15 ноября 2024 года. В связи с вышеизложенными событиями, истцом в адрес ответчика было направлено письменное обращение об исполнении мероприятий по указанному Договору о ТП. Указывает на то, что жилой дом, расположенный по адресу: 

<

адрес>, был ею построен за счёт ипотечных средств, с условиями постановки на учёт жилого помещения в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в срок 1 год. Кредитный договор был заключён 14 июня 2024 года, в соответствии с требованиями банка, дом должен быть введён в эксплуатацию не позднее 14 июня 2025 года, но в виду отсутствия электричества закончить строительство дома не представилось возможным. Ссылается на то, что в связи с указанными событиями сильно переживает, что не может длительное время заехать в дом, переживания в свою очередь повлияли на состояние её здоровья, у неё стали выпадать волосы, не спит по ночам, бессонница на фоне переживаний о доме, из-за того, что не высыпается, днём непродуктивна, сложно сосредоточиться на работе, на основании чего руководство неоднократно делало её замечания. Также указывает на то, что её неудобно проживать вместе с родителями, поскольку у неё многодетная семья, а площадь квартиры составляет 30 кв. м. на 5 человек. Если бы было электричество, то она бы закончила работы по внутренней отделке и ремонту, кроме того, по проекту в доме предусмотрен электрокотёл, в связи с чем, жить в доме в настоящее время невозможно, в связи с чем, оценивает моральный вред причинённый неправомерными действиями ответчика в размере 1 000 000 рублей. Со ссылками на нормы действующего законодательства просит обязать ответчика ПАО «Россети Сибирь» исполнить обязательства по Договору № от 15.11.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, взыскать в свою пользу неустойку за нарушение условий договора за период с 16.05.2025 г. по 24.12.2025 г. в размере 19 580 рублей 89 копеек, с 12.12.2025 г. по день вступления решения суда по настоящему делу в законную силу, взыскать в счёт компенсации морального вреда 1 000 000 рублей.

В судебное заседание истец ФИО6 не явилась, будучи надлежащим образом извещённой о дате, времени и месте рассмотрения дела, в материалы дела представила письменное заявление с ходатайством о рассмотрении дела в её отсутствие.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» – ФИО3, действующая на основании доверенности в судебное заседание не явилась, будучи надлежащим образом извещённой о дате, времени и месте рассмотрения дела, в материалы дела представила письменный отзыв на исковое заявление, в котором указала, что 15.11.2024 г. между истцом и ответчиком был заключён вышеуказанный Договор о ТП, срок исполнения по которому установлен – 6 месяцев с его заключения. Указывает на то, что в рамках данного договора сетевая организация должна выполнить следующие мероприятия: выполнить монтаж комплекса коммерческого учёта электрической энергии; выполнить усиление существующей ВЛ 0,4 кВ ф.3 от ТП 01-15-36 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании; выполнить усиление существующей ЛЭП – 0,4 кВ ф.1 от ТП 27-05-19 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании; выполнить усиление существующей ТП 27-05-19 для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании; выполнить усиление существующей сети 10-0,4 кВ для присоединения планируемой нагрузки заявителя. Параметры определить при проектировании. Ссылается на то, что указанный Договор о ТП находится на исполнении, так Обществом были частично выполнены мероприятия по технологическому присоединению, а именно: разработаны технические условия, разработан проект. Указывает, что установленные договором мероприятия не выполнены в срок по объективным причинам, в связи с тяжёлым финансовым положением Общества, отсутствием доходов по статье технологического присоединения на территории Республики Хакасия, а также отсутствие обеспечения инвестиционной программой всего объёма договоров технологического присоединения на территории Республики Хакасия, нарушений сроков поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) и оборудования. На основании чего, полагает разумным и просит установить срок для исполнения обязательств по договору – три месяца с момента вступления решения суда в законную силу. Также просила снизить размер договорной неустойки с учётом положений статьи 333 ГПК РФ и произвести её расчёт от 0,1% от стоимости договора, возражала против взыскания компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, в виду того, что стороной истца не было представлено доказательств характера причинённых потребителю нравственных или физических страданий, полагала возможным, снизить размер компенсации морального вреда до 1 000 рублей.

Суд, руководствуясь частями 3, 5 статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) рассмотрел настоящее гражданское дело в отсутствие не явившихся участников процесса.

Изучив материалы дела, оценив представленные в совокупности по делу доказательства, отзыв на исковое заявление, определив обстоятельства, имеющие юридическое значение для разрешения спора по существу, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также – технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

По договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов, электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Постановлением Правительства РФ № 861 от 27.12.2004 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее – Правила технологического присоединения).

Согласно пункту 7 указанных Правил устанавливается следующая процедура технологического присоединения: а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее – заявитель), которое имеет намерение осуществить технологическое присоединение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 настоящих Правил, б) заключение договора; в) выполнение сторонами договора мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором; г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя; д) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности; е) составление акта об осуществлении технологического присоединения.

Согласно пункту 8 Правил технологического присоединения для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств по индивидуальному проекту.

В силу пункта 2 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, «сетевые организации» – организации, владеющие на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такие организации оказывают услуги по передаче электрической энергии и осуществляют в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, а также осуществляющие право заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих другим собственникам и иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть.

В соответствии с пунктом 2 Правил технологического присоединения, действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

Пунктом 16 Правил технологического присоединения определено, что договор должен содержать следующие существенные условия: а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению; б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется, со дня заключения договора и не может превышать, в том числе 6 месяцев – для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности; в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки; обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абз. 3 настоящего подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в случае, предусмотренном п. 16(5) настоящих Правил; г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон; д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики (при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, установленных разделом III настоящих Правил); е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение.

Как следует из пункта 14 Правил технологического присоединения к числу заявителей, для которых срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать, в том числе 6 месяцев, относятся физические лица, подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

В соответствии с пунктом 16.1 Правил технологического присоединения заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Как установлено судом и следует из материалов дела, истец ФИО7, с 17 июня 2024 года, является собственником земельного участка с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается представленной в материалы дела по запросу суда выпиской из ФППК «Роскадастра» по Республике Хакасия от 15.01.2026 г.

15 ноября 2024 года между ПАО «Россети Сибирь» (Сетевая организация) и ФИО8 был заключён Договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в соответствии с условиями которого Сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств заявителя «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом / садовый/дачный дом)», в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств – 15 кВт, категория надёжности – третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение – 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. Заявитель в свою очередь обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора (пункт 1 Договора о ТП).

Согласно пункту 2 Договора о ТП, технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом / садовый/дачный дом)», расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

В соответствии с пунктом 3 Договора о ТП, точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии не далее 15 метров во внешнюю стороны от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

Пунктами 4, 5 Договора о ТП, предусмотрено, что технические условия являются неотъемлемой частью договора. Срок действия технических условий, составляет 2 года со дня заключения настоящего договора. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора.

Согласно пункту 10 раздела III Договора о ТП, размер платы за технологическое присоединение составляет 35 122 рубля 67 копеек.

Договор считается заключённым со дня оплаты заявителем счёта на оплату технологическое присоединения по договору (пункт 21 раздела VII Договора о ТП)).

Таким образом, договор, заключенный между Сетевой организацией и ФИО9, соответствует приведенным правовым нормам, не оспорен и является действующим.

В соответствии с положениями статьи 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ, либо односторонне изменение обязательства не допускается (статья 310 ГК РФ).

15 ноября 2024 г. истец ФИО10 произвела оплату по вышеуказанному договору в размере 35 122 рублей 67 копеек, что подтверждается представленным в материалы дела чеком по операции ПАО «Сбербанк России» от 15.11.2024 г. (л.д. 19).

Ответчик же договорные обязательства до настоящего времени не выполнил, при этом доказательств, которые свидетельствовали бы об отсутствии вины ответчика в ненадлежащем исполнении обязательств по договору, в нарушение положений статьи 56 ГПК РФ не представлено.

С учетом изложенного, суд полагает правомерным обязать ответчика исполнить условия Договора № от 15.11.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Разрешая вопрос о сроках исполнения вышеуказанной обязанности, суд, руководствуясь положениями статьи 204 ГПК РФ, учитывая всё установленные обстоятельства по делу (в частности значительное нарушение ответчиком срока исполнения обязательств по договору), полагает разумным назначить срок исполнения условий вышеуказанного договора, заключённого с истцом, в течение одного месяца с момента вступления решения в законную силу, полагая такой срок разумным и достаточным при установленных обстоятельствах.

При этом суд не находит состоятельными доводы стороны ответчика о тяжелом финансовом положении, отсутствии доходов по статье технологического присоединения на территории Республики Хакасии, недостаточности финансирования инвестиционной программы, поскольку указанные обстоятельства не свидетельствуют о факте отсутствия технической возможности осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств истца, и не могут быть положены в основу нарушения прав потребителя.

Согласно статье 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в частности, ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Как следует из пункта 16 Правил, договор о технологическом присоединении должен содержать, в частности, положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств (пункт «в»).

Соответствующее положение внесено сторонами в пункт 17 заключенного ими договора, согласно которому сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за каждый день просрочки.

Так, стороной истца заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки за нарушение условий договора с 16 мая 2025 года по 24 декабря 2025 года (дата подачи иска в суд) в размере 19 580 рублей 89 копеек, исходя из расчёта 0,25% от 35 122 рублей 75 копеек за каждый день просрочки (223 дня), а также с 25 декабря 2025 года по дату вступления решения суда по настоящему делу в законную силу.

Также стороной ответчика, были заявлены доводы о необходимости соответствии с положениями статьи 333 ГК РФ снижения размера неустойки до 0,1% за каждый день просрочки, а также ограничения размера неустойки размером платы по Договору о ТП в соответствии пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей».

Разрешая указанное требование и оценивая доводы стороны ответчика, суд приходит к следующему.

В пункте 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», разъяснено, что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил установлено, что договор технологического присоединения в качестве существенного условия в обязательном порядке должен содержать положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе: обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором, если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Принимая во внимание вышеизложенное, суд находит доводы стороны ответчика, основанными на ошибочном толковании норм материального права, поскольку при наличии специальных норм, регулирующих правоотношения, указанные в подпункте «в» пункта 16 Правил, при расчёте неустойки (пени) нормы Закона «О защите прав потребителей» к указанным правоотношениям применению не подлежат.

Таким образом, учитывая вышеприведенные правовые нормы, заявленные истцом исковые требования, отзыв ответчика, суд полагает правомерным взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за период с 16 мая 2025 года по 24 декабря 2025 года в заявленном размере, а также с 25.12.2025 г. по дату вступления решения суда по настоящему гражданскому делу в законную силу, исходя из расчёта 0,25% от 35 122 рублей 75 копеек за каждый день просрочки, оснований для снижения размера неустойки в соответствии с положениями статьи 333 ГПК РФ, а также ограничения размера неустойки в соответствии с пунктом 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей», суд не усматривает.

Вышеуказанный договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям заключен для удовлетворения бытовых нужд истца, то есть, в потребительских целях, следовательно, на правоотношения сторон распространяется действие Закона РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».

В соответствии со статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (уполномоченной организацией) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

Принимая во внимание, что в ходе судебного разбирательства подтвердился факт нарушения прав потребителя, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда.

В обоснование размера компенсации морального вреда в размере 1 000 000 рублей, истец указывает на то, что жилой дом, расположенный на вышеуказанном земельном участке, был построен за счёт ипотечных средств, в подтверждение чего представила в материалы дела Индивидуальные условия Кредитного договора № № от 14.06.2024 г., заключённого между Банком ВТБ (ПАО) и ФИО11 Указывает на то, что в связи с неправомерными действиями ответчика, она ограничена в своих правах на использование жилого дома, поскольку по проекту в доме предусмотрен электрокотёл, в связи с чем, жить в доме в настоящее время невозможно, также невозможно произвести ремонтные работы, что в свою очередь повлекло значительное ухудшение состояния здоровья истца (бессонница, выпадение волос и так далее).

Учитывая установленные по делу обстоятельства, период нарушения прав истца, оценивая доводы стороны истца в указанной части, суд не находит оснований для взыскания компенсации морального вреда в заявленном размере, в связи с чем, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд считает правомерным взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей за неисполнение условий договора.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку требования потребителя не были удовлетворены в добровольном порядке, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 8 290 рублей 44 копеек (16 580 рублей 88 копеек ? 2).

Поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации, истец освобожден от уплаты государственной пошлины, государственная пошлина в соответствии с частью 1 статьи 103 ГПК РФ, в силу которой, государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, с ПАО «Россети Сибирь» в доход местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 7 000 рублей.

Руководствуясь статьями 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: 

<

адрес> (кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с условиями Договора № от 15.11.2024 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО12, уроженки 

<

адрес> (паспорт серии 

<

данные изъяты>) неустойку за нарушение условий Договора № от 15.11.2024 г. за период с 16.05.2025 г. по 24.12.2025 г. в размере 15 580 рублей 89 копеек, с 25.12.2025 г. по день вступления решения суда в законную силу, исходя из расчёта 0,25% от 35 122 рублей 67 копеек за каждый день, а также взыскать компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей, штраф в размере 8 290 рублей 44 копеек.

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета госпошлину в размере 7 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хакасия в течение месяца со дня составления мотивированного решения суда, путем подачи апелляционной жалобы через Абаканский городской суд.

Судья Н.А. Яшина

Мотивированное решение составлено 24.03.2026

Судья Н.А. Яшина