Дело №

55RS0№-94

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кировский районный суд 

<

адрес> в составе председательствующего судьи Вихман Е.В., 

помощника судьи ФИО4,

при секретаре ФИО5,

рассмотрев 16 октября 2024 года в открытом судебном заседании в городе Омске 

гражданское дело по иску ФИО1 к ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» о защите прав потребителя,

с участием

истца ФИО1,

представителя ответчика ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» по доверенности ФИО2,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» о защите прав потребителя, в обоснование требований указав, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.5500.6086.23. В соответствии с условиями заключенного договора стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, необходимых для электроснабжения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Надеждинское сельское поселение, 

<

адрес>, в течение шести месяцев со дня заключения данного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Истцом ответчику в соответствии с условиями указанного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям оплачено 63 840 рублей. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком не выполнены мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям, в то же время, ответчиком составлены акт проверки и допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от 10.07.2024 №, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ №. Истцом ответчику направлено уведомление о неисполнении обязательств по обеспечению технологического присоединения к электрическим сетям. ДД.ММ.ГГГГ ответчиком исполнены обязательства по технологическому присоединению к электрическим сетям.

В связи с изложенным, истец просил возложить на ответчика обязанность по завершению технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Россия, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 55:20:131101:3138, Российская Федерация, 

<

адрес>, Надеждинское сельское поселение, 

<

адрес> (адрес еще не присвоен), северный угол пересечения 

<

адрес> берег, к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, направив истцу надлежащим образом оформленное уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, а так же акт проверки и ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии в срок не позднее десяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, взыскать с ответчика в пользу истца неустойку за нарушение срока исполнения обязательства, установленную пунктом 5 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № «О защите прав потребителей» (далее – Закон о защите прав потребителей) за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 63 840 рублей, компенсацию морального вреда 250 000 рублей, штраф, судебную неустойку за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по данному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по истечении десяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в сумме 1 915,20 рублей за каждый календарный день просрочки.

Истец ФИО1 требования поддержал по изложенным в исковом заявлении основаниям.

Представитель ответчика по доверенности ФИО2 просила отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку допущенные в указанных актах описки в настоящее время исправлены, истец осуществляет потребление электроэнергии с ДД.ММ.ГГГГ, сумма неустойки подлежит определению исходя из установленных отраслевыми нормативными актами размеров, в случае удовлетворения исковых требований просила снизить размер неустойки и компенсации морального вреда.

В соответствии со статьей 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) суд счел возможным рассмотреть дело при данной явке по представленным доказательствам в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела, оценив совокупность представленных доказательств с позиции относимости, достоверности и достаточности, суд приходит к следующему выводу.

Пунктом 1 статьи 420 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В силу пунктов 1, 4 статьи 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора.

Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422).

Согласно пункту 2 статьи 307, статье 309 ГК РФ обязательства, в том числе возникающие из договоров, должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

В силу пункта 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами или иными правовыми актами.

Пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предусмотрено, что технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № (далее – Правила), технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям сетевой организации осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее – Договор), заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные Правилами. Заключение Договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения Договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению Договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением.

При этом, в силу подпунктов «б», «в» пункта 16 Правил Договор должен содержать существенные условия в виде срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать шести месяцев для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а так же в виде положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных Договором и Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе, обязанность сторон Договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного Договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне Договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Пунктом 19 Правил предусмотрено, что в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже, сетевая организация в течение одного рабочего дня после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями составляет уведомление об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям по форме, предусмотренной приложением №(1) к Правилам, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и размещает его на своем официальном сайте (в том числе посредством переадресации на официальный сайт, обеспечивающий возможность направлять заявку и прилагаемые документы) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или едином портале.

Пунктами 108, 109 Правил определено, что если в соответствии с законодательством Российской Федерации установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности), возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, заявитель обязан на безвозмездной основе обеспечить предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам.

Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) – 13(5) и 14 Правил, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 Правил.

Указанные в настоящем пункте обязательства сетевой организации отражаются в технических условиях.

Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности).

Учитывая изложенные положения законодательства, услуга по обеспечению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям считается оказанной с момента направления уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям.

Согласно статье 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями части 3 статьи 123 Конституции Российской Федерации и статьи 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Из материалов дела следует, что ДД.ММ.ГГГГ между сторонами заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №.5500.6086.23, в соответствии с условиями которого стороны приняли на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца, необходимых для электроснабжения дома, расположенного по адресу: 

<

адрес>, Надеждинское сельское поселение, 

<

адрес>, в течение шести месяцев со дня заключения данного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Истцом ответчику в соответствии с условиями указанного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям оплачено 63 840 рублей.

Таким образом, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца должны были быть завершены не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из разъяснений, изложенных в пункте 1 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» (далее – Постановление Пленума №), при рассмотрении гражданских дел судам следует учитывать, что отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой – организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми ГК РФ, Законом о защите прав потребителей, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Поскольку целью технологического присоединения энергопринимающих устройств истца являлось удовлетворение личных, семейных, бытовых нужд гражданина, то на возникшие между сторонами правоотношения распространяется законодательство о защите прав потребителей.

Ответчиком составлены акт проверки и допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ №, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 16.07.2024 №.

В то же время, фактически мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца исполнены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № направлено ответчиком истцу ДД.ММ.ГГГГ, а акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ № направлен истцом ответчику ДД.ММ.ГГГГ с указанием на недействительность акта допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от ДД.ММ.ГГГГ №.

Поскольку фактически мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца исполнены ответчиком ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № направлено ответчиком истцу ДД.ММ.ГГГГ, а акт допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от 24.07.2024 № направлен истцом ответчику ДД.ММ.ГГГГ с указанием на недействительность акта допуска (ввода) в эксплуатацию прибора учета электроэнергии от 10.07.2024 №, не подлежит удовлетворению требование истца о возложении на ответчика обязанности по завершению технологического присоединения энергопринимающих устройств малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом/садовый/дачный дом), расположенной (которая будет располагаться) по адресу: Россия, 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка 55:20:131101:3138, Российская Федерация, 

<

адрес>, Надеждинское сельское поселение, 

<

адрес> (адрес еще не присвоен), северный угол пересечения 

<

адрес> берег, к электрическим сетям в соответствии с условиями указанного договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, путем направления истцу надлежащим образом оформленного уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, а так же акта проверки и ввода в эксплуатацию прибора учета электроэнергии в срок не позднее десяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу, а так же требование о взыскании с ответчика в пользу истца судебной неустойки за неисполнение решения суда в части осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств по данному договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по истечении десяти календарных дней с момента вступления решения суда в законную силу и до фактического исполнения в сумме 1 915,20 рублей за каждый календарный день просрочки.

Согласно положениям статьи 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения продавцом прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Исходя из разъяснений, изложенных в пунктах 2, 45 Постановления Пленума №, если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве, договор страхования, как личного, так и имущественного, договор банковского вклада, договор перевозки, договор энергоснабжения), то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

Учитывая обстоятельства дела, степень и характер перенесенных истцом нравственных страданий, связанных с нарушением ответчиком его прав, с учетом требований разумности и справедливости, суд считает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 15 000 рублей.

Поскольку Правилами установлен размер неустойки за нарушение обязательств сторонами Договора, сумма неустойки определяется в размере 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Обязательства по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца подлежали исполнению ответчиком не позднее ДД.ММ.ГГГГ, уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от ДД.ММ.ГГГГ № направлено ответчиком истцу ДД.ММ.ГГГГ.

Доказательства направления ответчиком истцу уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 24.07.2024 № ранее ДД.ММ.ГГГГ не представлены.

В силу изложенных положений законодательства услуга по обеспечению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям считается оказанной с момента направления уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям ДД.ММ.ГГГГ.

В то же время, фактическое потребление электроэнергии истцом осуществляется с ДД.ММ.ГГГГ, в связи с чем неустойка подлежит начислению за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ.

Согласно положениям части 3 статьи 196 ГПК РФ о принятии судом решения по заявленным истцом требованиям подлежит взысканию с ответчика в пользу истца неустойка за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 586 рублей (63 840 Х 0,25 % Х 35 дней).

Пунктом 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей предусмотрено, что при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В соответствии с пунктом 46 Постановления Пленума №, при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона о защите прав потребителей).

Само по себе наличие судебного спора указывает на несоблюдение ответчиком добровольного порядка удовлетворения требований истца, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в сумме 10 293 рубля (50 % от (15 000 + 5 586)).

В соответствии со статьей 103 ГПК РФ, статьей 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» подлежит взысканию в доход местного бюджета государственная пошлина за подачу искового заявления, от уплаты которой истец освобождена в силу закона в сумме 490,35 рублей, в том числе за требования имущественного характера, исходя из цены иска 63 840 рублей, пропорционально размеру удовлетворенных судом требований 190,35 рублей ((5 586 Х 100 % / 63 840) от 2 115), а так же за требование неимущественного характера, подлежащее оценке, 300 рублей.

Руководствуясь статьями 194 – 199 ГПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (паспорт серии 52 18 №) удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт серии 52 18 №) неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в сумме 5 586 рублей, компенсацию морального вреда 15 000 рублей, штраф 10 293 рубля.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета 

<

адрес> государственную пошлину в сумме 3 433,96 рубля.

Решение может быть обжаловано в Омский областной суд путем подачи апелляционной жалобы через Кировский районный суд 

<

адрес> в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Е.В. Вихман

Мотивированное решение составлено ДД.ММ.ГГГГ

Копия вернаРешение (определение) не вступил (о) в законную силу «____» _________________ 20 г.УИД 55RS0№-94Подлинный документ подшит в материалах дела 2-6058/2024 ~ М-4672/2024хранящегося в Кировском районном суде 

<

адрес>Судья __________________________Вихман Е.В. подписьСекретарь_______________________ подпись