Дело №2-1263/2025

УИД 44RS0028-01-2025-001621-71

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

19 сентября 2025 года г. Кострома

Костромской районный суд Костромской области в составе

председательствующего судьи Дерябиной Е.С.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Юрченко Е.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАЛИЧ ПАРК» о взыскании задолженности по договору подряда, компенсации морального вреда, штрафа, процентов за пользование чужими денежными средствами,

у с т а н о в и л:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАЛИЧ ПАРК» (далее также - ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК») о взыскании задолженности по договору подряда от 17 сентября 2024 года № в размере 670 417,06 руб., компенсации морального вреда в размере 100 000 руб., штрафа в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, процентов за пользование чужими денежными средствами по день вынесения судебного решения исходя из ключевой ставки Банка России.

Требования мотивированы тем, что 17 сентября 2024 года между ним (заказчик) и ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» (подрядчик) заключен договор подряда №, согласно которому подрядчик обязался изготовить с использованием своих материалов и установить на земельном участке с кадастровым номером №, расположенном по адресу: (адрес), индивидуальный жилой дом в срок, не превышающий 12 месяцев с момента подписания настоящего договора подряда, стоимость работ определена в размере 6 442 016,96 руб. Он (ФИО1) выполнил свои обязательства по оплате стоимости работ, что подтверждается актом приема-передачи денежных средств от 17 сентября 2024 года на сумму 1 765 000 руб., актом приема-передачи денежных средств от 11 октября 2024 года на сумму 1 500 000 руб., актом приема-передачи денежных средств от 25 октября 2024 года на сумму 500 000 руб. На основании извещения от 21 ноября 2024 года № строительство объекта было приостановлено на 7 рабочих дней, на основании извещения от 30 декабря 2024 года № - на срок до 28 февраля 2025 года. Вместе с тем условия договора подряда от 17 сентября 2024 года № ООО «СЗ «ГАЛИЧ-ПАРК» были нарушены, а именно на объекте производились работы неизвестными людьми без заключения договора субподряда, контроль за качеством выполнения работ и их проверка на соответствие требованиям проектной документации со стороны подрядчика не осуществлялись, сохранность объекта и материалов, а также порядок на строительной площадке не обеспечивались, консервация объекта не произведена. Кроме того, закупленный подрядчиком газобетонный стеновой блок имеет нарушение геометрии, доставлен к месту проведения работ сырым, значительная часть блоков при разгрузке получила повреждения в виде трещин и сколов, контроль поставки и разгрузки строительных материалов со стороны подрядчика не осуществлялся, стоимость и количество строительных материалов в смете по отдельным позициям завышены, а некоторые строительные материалы, указанные в смете, не применялись при проведении работ, что свидетельствует об умышленном обмане заказчика. 18 февраля 2025 года им в адрес ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» направлена претензия о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №, в которой он требовал произвести перерасчет сметы, оставив в ней только фактически затраченные на строительство материалы по их реальной стоимости на момент приобретения, выплатить заказчику денежные средства пропорционально выполненным работам, включая сметную прибыль, направить в его адрес (по электронной почте) дополнительное соглашение о расторжении договора подряда. 17 марта 2025 между ним и ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» заключено дополнительное соглашение № о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №, в соответствии с которым ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» обязуется вернуть ему уплаченную по договору сумму в размере 670 417,06 руб. в несколько этапов: 223 472 руб. - до 21 марта 2025 года, 223 472 руб. - до 21 апреля 2025 года, 223 473,06 руб. - до 21 мая 2025 года, однако до настоящего времени ни один из этапов не выполнен.

Истец ФИО1, извещенный о времени и месте судебного заседания надлежащим образом, в судебное заседание не явился, ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие. Ранее в судебных заседаниях ФИО1 заявленные исковые требования поддержал в полном объеме по основаниям и доводам, изложенным в исковом заявлении, указав, что 17 сентября 2024 года между ним и ответчиком заключен договор подряда на общую сумму 6 442 016 руб., всего подрядчику им было перечислено 3 765 000 руб. 17 марта 2025 года в связи с ненадлежащим исполнением условий договора подряда между ним и ООО «СЗ «ГАЛИЧ-ПАРК» подписано дополнительное соглашение о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №, согласно которому ООО «СЗ «ГАЛИЧ-ПАРК» обязалось вернуть ему 670 417,06 руб. в 3 этапа, однако ни одно из платежных обязательств до настоящего времени не исполнено.

Представитель ответчика ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного разбирательства извещен надлежащим образом, об уважительности причин неявки суду не сообщил, о рассмотрении дела в свое отсутствие не просил.

На основании статьи 233 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее также - ГПК РФ) с согласия истца дело рассмотрено в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее также - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно пункту 1 статьи 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются.

В силу пункта 1 статьи 401 ГК РФ лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины.

Статьей 702 ГК РФ предусмотрено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1). К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2).

Пунктом 1 статьи 708 ГК РФ предусмотрено, что в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

В соответствии со статьей 709 ГК РФ в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения (пункт 1). Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение (пункт 2). Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (пункт 3).

Согласно статье 715 ГК РФ, если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков (пункт 2). Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков (пункт 3).

В силу пункта 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

Статьей 740 ГК РФ предусмотрено, что по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1). Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2).

Согласно статье 746 ГК РФ оплата выполненных подрядчиком работ производится заказчиком в размере, предусмотренном сметой, в сроки и в порядке, которые установлены законом или договором строительного подряда (пункт 1). Договором строительного подряда может быть предусмотрена оплата работ единовременно и в полном объеме после приемки объекта заказчиком (пункт 2).

Пунктом 4 статьи 753 ГК РФ предусмотрено, что сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В соответствии со статьей 27 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами (пункт 1). Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги) (пункт 2). В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания услуг). По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (пункт 3).

Согласно пункту 1 статьи 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей», если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Пунктом 6 этой же статьи предусмотрено, что требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

В силу пункта 1 статьи 29 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Судом установлено и из материалов дела следует, что 17 сентября 2024 года между ФИО1 (заказчик) и ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» (подрядчик) заключен договор подряда №, согласно которому подрядчик обязуется в установленные настоящим договором сроки в соответствии с представленной в его распоряжение проектной и рабочей документацией выполнить по заданию заказчика комплекс работ по строительству индивидуального жилого дома общей площадью 114 кв.м с террасой и крыльцом по адресу: (адрес), в кадастровом квартале №, на земельном участке с кадастровым номером №, а заказчики - создать необходимые для выполнения работ условия, принять результат выполненных работ и уплатить подрядчику обусловленную настоящим договором цену (пункт 1.1).

Комплекс работ по настоящему договору состоит из выполнения ряда мероприятий, перечисленных в смете (пункт 1.3).

Сроки выполнения соответствующих работ согласовываются сторонами в настоящем договоре и приложениях к нему, но не могут превышать 12 месяцев с момента подписания настоящего договора (пункт 1.4).

Подрядчик обязан приступить к выполнению работ не позднее срока, указанного в пункте 1.4 настоящего договора при условии соблюдения заказчиком требований пункта 2.3.12 настоящего договора; производить работы в соответствии с технической документацией, которая включает в себя проект, смету и согласованный сторонами перечень подлежащих выполнению работ, руководствуясь при этом строительными нормами и правилами с учетом требований правил техники безопасности; возвести собственными силами и средствами на стройплощадке все временные сооружения, необходимые для выполнения работ по настоящему договору; в течение срока действия настоящего договора обеспечивать соблюдение требований проектной и рабочей документации, технических регламентов, обеспечивать безопасность работ для третьих лиц и окружающее среды, выполнять требования безопасности труда, обеспечивать выполнение на строительной площадке и на объекте противопожарных мероприятий; нести ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной и рабочей документации, в том числе за ненадлежащее выполнение работ субподрядчиками; самостоятельно обеспечивать выполнение работ необходимыми материалами и оборудованием; обеспечить сохранность объекта, на котором производятся работы, и материалов от хищения, порчи, повреждений, уничтожений до подписания заказчиком акта, оформляющего сдачу-приемку соответствующих работ, в том числе по этапам; извещать заказчика о завершении каждого этапа работ любым доступным способом; обеспечивать порядок на строительной площадке в течение срока действия настоящего договора (пункт 2.1).

Подрядчик может приостановить выполнение работ при неблагоприятных погодных условиях, не обеспечивающих качество и технологию выполнения работ, а также способных повлиять на безопасность производимых работ. Приостановка работ в связи с неблагоприятными погодными условиями сопровождается уведомлением заказчика. При этом срок завершения работ подрядчиком сохраняется согласно пункту 1.4. настоящего договора и не превышает 12 месяцев с момента подписания настоящего договора (пункт 3.1).

Каждый этап выполненных подрядчиком работ оформляется подписанием сторонами отдельного акта сдачи-приемки работ. Указанный акт является безусловным подтверждением принятия заказчиком соответствующих работ (пункт 3.6).

Все акты сдачи-приемки подписываются исключительно по месту проведения строительных работ (пункт 3.7).

Соответствие результата выполненных работ требованиям договора проверяется заказчиком при приятии результата работ от подрядчика (пункт 3.9).

Цена договора, то есть сумма, подлежащая уплате заказчиком подрядчику за выполнение работ по настоящему договору, составляет 6 442 016,96 руб. Оплата осуществляется заказчиком в несколько этапов (пункт 4.1):

- 1 этап: аванс в размере 30% от общей стоимости договора, которые заказчик оплачивает в течении 10 рабочих дней с даты заключения настоящего договора, что подтверждается платежным документом;

- 2 этап: аванс в размере 30% от общей стоимости договора, которые заказчик оплачивает в течении 10 рабочих дней с даты подписания акта о выполненных работах по возведению фундамента, что подтверждается платежным документом;

- 3 этап: аванс в размере 30% от общей стоимости договора, которые заказчик оплачивает в течение 10 рабочих дней с даты подписания акта о выполненных работах по возведению наружных стен, что подтверждается платежным документом;

- 4 этап: окончательный расчет на основании актов о выполненных работах.

Согласно актам приема-передачи денежных средств от 17 сентября 2024 года, от 11 октября 2024 года, от 25 октября 2024 года ФИО1 ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» в качестве аванса по договору подряда от 17 сентября 2024 года № переданы наличные денежные средства в сумме 1 765 000 руб., 1 500 000 руб. и 500 000 руб. соответственно.

При этом согласно извещению ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» от 21 ноября 2024 года № строительно-монтажные работы в рамках исполнения договора подряда от 17 сентября 2024 года № были приостановлены на срок 7 рабочих дней, в соответствии с извещением от 30 декабря 2024 года № - на срок до 28 февраля 2025 года с обеспечением консервации объекта в целях защиты материалов в течение 10 дней с момента данного уведомления.

18 февраля 2025 года ФИО1 в адрес ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» направлена претензия о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №, в котором он ссылался на аналогичные приведенным в исковом заявлении обстоятельства, свидетельствующие о нарушении условий вышеназванного договора подряда, а также требовал произвести перерасчет сметы, оставив в ней только фактически затраченные на строительство материалы по их реальной стоимости на момент приобретения, выплатить заказчику денежные средства пропорционально выполненным работам, включая сметную прибыль, направить в его адрес дополнительное соглашение о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №.

17 марта 2025 года между ФИО1 (заказчик) и ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» (подрядчик) заключено дополнительное соглашение № о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года №, в соответствии с которым стороны пришли к соглашению о расторжении договора подряда с даты подписания настоящего соглашения (пункт 1); на дату расторжения договора подряда подрядчиком были фактически выполнены работы/оказаны услуги на общую сумму 3 094 582,94 руб., а заказчиком приняты выполненные работы/оказанные услуги и оплачены в размере 3 765 000 руб. (пункт 2); ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» обязуется вернуть заказчику 670 417,06 руб. в связи с расторжением договора подряда и переплатой по нему за вычетом несделанных объемов в несколько этапов: транш 223 472 руб. - до 21 марта 2025 года, транш 223 472 руб. - до 21 апреля 2025 года, транш 223 473,06 руб. - до 21 мая 2025 года (пункт 4); обязательство сторон по договору прекращаются с даты подписания настоящего дополнительного соглашения, а также являются завершенными после возврата остатка денежных средств от подрядчика заказчику в размере 670 417,06 руб. (пункт 6).

Учитывая, что обязательства, вытекающие из договора подряда от 17 сентября 2024 года №, ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» в полном объеме не исполнены, денежные средства на основании дополнительного соглашения № о расторжении договора подряда от 17 сентября 2024 года № не возвращены, суд приходит к выводу о том, что требования ФИО1 о взыскании с ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» денежных средств в размере 670 417,06 руб. обоснованы и подлежат удовлетворению.

Согласно пункту 1 статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Принимая во внимание, что сведений о возврате денежных средств по дополнительному соглашению от 17 марта 2025 года № к договору подряда от 17 сентября 2024 года № суду со стороны ответчика не представлено, с ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» в пользу ФИО1 подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 марта 2025 года по 19 сентября 2025 года в размере 54 533,29руб. исходя из следующего расчета:

Задолженность, руб.

Период просрочки

Ставка

Дней в году

Проценты, руб.

c

по

дни

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[1]x[4]x[5]/[6]

223 472

21.03.2025

21.04.2025

32

21%

365

4 114,33

446 944

22.04.2025

21.05.2025

30

21%

365

7 714,38

670 416

22.05.2025

08.06.2025

18

21%

365

6 942,94

670 416

09.06.2025

27.07.2025

49

20%

365

18 000,21

670 416

28.07.2025

14.09.2025

49

18%

365

16 200,19

670 416

15.09.2025

19.09.2025

5

17%

365

1 561,24

В соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В силу статьи 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме (пункт 1). Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (пункт 2).

Исходя из того, что факт нарушения ответчиком прав истца нашел свое подтверждение в ходе рассмотрения дела, а в силу закона нарушение прав потребителя уже предполагает наличие морального вреда, учитывая также конкретные обстоятельства дела применительно к оценочным критериям, указанным в законе, суд находит возможным и достаточным взыскание в пользу истца компенсации морального вреда в размере 20 000 руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года №2300-1 «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Поскольку ООО «СЗ «ГАЛИЧ ПАРК» в добровольном порядке не удовлетворил требования потребителя, имеются основания для взыскания в пользу ФИО1 штрафа в размере 372 475,18 руб. ((670 417,06 + 54 533,29 + 20 000) х 50%).

В силу статьи 103 ГПК РФ, статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец в силу требований закона при подаче иска был освобожден, размер которой составляет 19 499 руб.

Руководствуясь статьями 194, 198, 199, 235 ГПК РФ, суд

р е ш и л:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАЛИЧ ПАРК» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО1, ДДММГГГГ года рождения (паспорт №), задолженность по договору подряда от 17 сентября 2024 года № в размере 670 417,06 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 21 марта 2025 года по 19 сентября 2025 года в размере 54 533,29рублей, компенсацию морального вреда в размере 20 000 рублей, штраф в размере 372 475,18 рублей, а всего 1 117 425,53 рублей.

Взыскать с ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ГАЛИЧ ПАРК» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета Костромского муниципального района Костромской области государственную пошлину в размере 19 499 рублей.

В удовлетворении требований о взыскании компенсации морального вреда в большем размере отказать.

Разъяснить ответчику, что он вправе в течение семи дней с момента получения копии заочного решения подать в Костромской районный суд Костромской области заявление об отмене решения, в котором должны быть указаны обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения суда.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья Е.С. Дерябина

Мотивированное решение изготовлено 03 октября 2025 года