дело № 2-426/2023

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 мая 2023 года с. Караидель

Караидельский межрайонный суд Республики Башкортостан в составе председательствующего судьи Фахретдиновой Е.Н., при секретаре судебного заседания Усмановой Г.Р., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Стройальянс» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Стройальянс» обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО1, в котором просит взыскать с ответчика сумму неосновательно полученных денежных средств в размере 3 485 879, 52 руб.

В обоснование требований указано, что ДД.ММ.ГГГГ общество с ограниченной ответственностью «Стройальянс» (ООО «Стройальянс»), ИП ФИО1 , свидетельство о постановке на учет № от ДД.ММ.ГГГГ, заключили настоящий договор о нижеследующем: подрядчик поручает, а субподрядчик в соответствии с условиями настоящего договора принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту РВС ТПП «Покачевнефтегаз» в объеме и в сроки, указанные в «Графике производства работ». Субподрядчик обязуется выполнить работы по договору своими силами и средствами, в соответствии с условиями договора, технической документации, включая возможные работы, не упомянутые в договоре, но необходимые для строительства объекта и нормальной его эксплуатации, в том числе в размере до 10% от стоимости работ по договору. Сумма настоящего договора составляет 2 941 430 руб. Организация применяет УСН и не является плательщиком НДС на основании пункта 2 статьи 346.11 ПК РФ. Оплата за фактически выполненные работы производится подрядчиком в течение 90 календарных дней, следующих за датой получения оригинала на счет фактуры оплату выполненных работ за вычетом суммы аванса, согласованной сторонами к погашению в отчетном периоде при наличии следующих надлежащим образом оформленных документов: 1) акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2); 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); 3) счета фактуры. Сроки предоставления: акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 – до 29 числа отчетного месяца; 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 –до 30 числа отчетного месяца. Подрядчик оплачивает субподрядчику работы, принятые к оплате заказчиком. Субподрядчик обязан направить подрядчику оригинал счета-фактуры не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем. Формы КС-2, КС-3 принимаются подрядчиком при оформленной и подписанной службой технадзора заказчика исполнительной документации выполненный объем работ. Формы КС-2 должны быть подтверждены актами на скрытые работы, подписанными технадзором заказчика, датой фактического исполнения обязательств субподряда является дата подписания сторонами указанных в настоящем пункте первичных учетных документов. Оплата за выполнение работы может производиться простыми векселями ПАО Сбербанка РФ. 

Опережение исполнения графика производства работ не влечет за собой безусловную обязанность подрядчика оплачивать выполненные работы. Подрядчик не несет никаких обязательств по оплате каких-либо дополнительных работ, если субподрядчик приступает к их выполнению предварительного письменного согласия подрядчика. Счета–фактуры, представленные субподрядчиком, должны соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ. В случае нарушения субподрядчиком установленных правил оформления предоставленных первичных документов (счетов-фактур, актов о приемке выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3) и документации, либо установленных сроков предоставления указанных документов, подрядчик вправе приостановить исполнение своего обязательства по оплате выполненных работ до момента предоставления надлежащим образом оформленных первичных документов. При начислении неустойки за несвоевременную оплату не производится.

В срок до 13 числа месяца, следующего за отчетным, стороны производят сверку взаимных расчетов, результаты которых оформляются в виде двустороннего акта. Стороны не могут отражать в учете за отчетный месяц предметы неурегулированных разногласий в целях недопущения расхождений во взаиморасчётах. Датой платежа по настоящему договору является дата отметки банка на платежном документе стороны, осуществляющей платеж. Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета подрядчика. При этом стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами. Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в настоящем договоре в разделе «Место нахождения, реквизиты, подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон. 25.1. Все споры и разногласия по настоящему договору рассматриваются сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. Ответ на предъявленную претензию должен быть направлен не позднее 10 календарных дней с момента ее получения. 25.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа –Югры. 

В связи с технической ошибкой, бухгалтером ООО «Стройальянс» составлен график платежей согласно графику производства работ и поступления платежей по другим контрактам, допущенной истцом, ответчику было перечислено платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 21 600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 236 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 125 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 200 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 250 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 86 850 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 518 414,52 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 108 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 400 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000 руб.

В адрес ответчика ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия о возврате денежных средств, перечисленных в качестве аванса по договору № ПКЧ_1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 485 879, 52 руб., в связи с неисполнением договорных обязательств. 

Ответчик оставил претензию без ответа и добровольно указанную сумму не возвратил.

Таким образом, ответчик без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрел денежные средства истца в размере 3 485 879,52 руб.

Представитель ООО «Стройальянс», надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явился, в заявлении ходатайствовал о рассмотрении дела в его отсутствие.

Ответчик ФИО1 в судебное заседание не явилась, о дате, времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, о причинах неявки не сообщила и не просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Согласно ст. 233 ГПК РФ в случае неявки в судебное заседание ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его отсутствии, дело может быть рассмотрено в порядке заочного производства.

С учетом права истца на рассмотрение его дела в сроки, предусмотренные процессуальным законодательством, и не допущения нарушения этого права, суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства. Судом вынесено определение о рассмотрении дела по существу в отсутствии ответчика с вынесением заочного решения.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «Стройальянс» (подрядчик) и ИП ФИО1 (субподрядчик) заключен договор на выполнение субподрядных работ, по условиям которого подрядчик поручает, а субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по капитальному ремонту РВС ТПП «Покачевнефтегаз» в объеме и в сроки, указанные в Графике производства работ (Приложение № к договору). Субподрядчик принимает на себя обязательства выполнить все обусловленные договором работы из собственных материалов, в том числе с использованием материалов поставки подрядчика с заключением отдельного договора поставки.

Согласно п. 3.1 договора составляет 2 941 430 руб.

В пункте 4.1 договора предусмотрено, что оплата за фактические выполненные работы производится подрядчиком в течение 90 календарных дней, следующих за датой получения оригинала счет фактуры на оплату выполненных работ за вычетом суммы аванса, согласованной сторонами к погашению в отчетном периоде при наличии следующих надлежащим образом оформленных документов:

1) акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2); 

2) справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3); 

3) счета фактуры.

Сроки предоставления: акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 – до 29 числа отчетного месяца; 2) справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 –до 30 числа отчетного месяца. 

Подрядчик оплачивает субподрядчику работы, принятые к оплате заказчиком. Субподрядчик обязан направить подрядчику оригинал счета-фактуры не позднее пятого числа, следующего за отчетным месяцем. Формы КС-2, КС-3 принимаются подрядчиком при оформленной и подписанной службой технадзора заказчика исполнительной документации выполненный объем работ. Формы КС-2 должны быть подтверждены актами на скрытые работы, подписанными Технадзором заказчика.

Датой фактического исполнения обязательств субподряда является дата подписания сторонами указанных в настоящем пункте первичных учетных документов. 

Оплата за выполнение работы может производиться простыми векселями ПАО Сбербанка РФ. 

ООО «Стройальянс» ответчику ИП ФИО2 ошибочно было перечислено платежными поручениями: № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 21 600 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 236 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 125 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 200 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 250 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 50 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 100 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 86 850 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 250 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 518 414,52 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 540 015 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 108 000 руб., № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 400 000 руб.; № от ДД.ММ.ГГГГ сумма 300 000 руб.

В адрес ответчика ИП ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ была направлена претензия о возврате денежных средств перечисленных в качестве аванса по договору № ПКЧ_1 от ДД.ММ.ГГГГ в размере 3 485 879, 52 руб., в связи с неисполнением договорных обязательств. 

Ответчик оставил претензию без ответа и добровольно указанную сумму не возвратил.

В соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами и сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Согласно пункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации не подлежат возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.

При таких обстоятельствах, ИП ФИО1 без установленных правовых оснований приобрела за счет истца денежные средства в размере 3 485 879,52 руб., что является неосновательным обогащением и в силу статьи 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежат возврату ООО «Стройальянс».

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 98, 194-198, 233-235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

исковое заявление публичного акционерного общества «Стройальянс» к ФИО1 о взыскании неосновательного обогащения и процентов за пользование чужими денежными средствами – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 , ИНН № в пользу ПАО «Стройальянс», № неосновательное обогащение в размере 3 485 879, 52 рублей.

Ответчик вправе подать в Караидельский межрайонный суд Республики Башкортостан заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Башкортостан через Караидельский межрайонный суд Республики Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий судья Е.Н. Фахретдинова