24RS0№-48

Дело №

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

07 августа 2025 года 

<

адрес> края,

<

адрес>Б

Ачинский городской суд 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Попова А.В.,

с участием истца ФИО1, 

при секретаре Локтишевой М.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к публичному акционерному обществу «Россети Сибири» о защите прав потребителя,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибири» о защите прав потребителя, возложении на ответчика обязанности приступить к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, мотивируя требования тем, что в соответствии с заключенным сторонами договором от ДД.ММ.ГГГГ ответчик обязался осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств истца, при этом обязанность по предварительной оплате работ в размере 60% истцом выполнена (л.д.2).

В судебном заседании истец исковые требования поддержал в полном объеме, пояснил, что данный земельный участок ему предоставлен в аренду для ведения животноводства, на нем расположен временный ангар для хранения зерна и содержания животных, электричество необходимо для его эксплуатации. Предусмотренные договором платежи за технологическое присоединение он внес в установленные договором сроки, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению был продлен по соглашению сторон до конца первого квартала 2025 года, однако до настоящего времени работы ответчиком так и не выполнены, просит обязать ответчика исполнить условия договора, произвести мероприятия по технологическому присоединению в соответствии с выданными ему техническими условиями присоединения. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибири» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом (л.д.31,32), возражений и ходатайств не представил, в связи с чем дело рассмотрено в отсутствие представителя ответчика в порядке заочного производства.

Выслушав истца, исследовав материалы дела, суд считает исковые требования подлежащими частичному удовлетворению в следующем размере и по следующим основаниям.

В соответствии со ст.ст. 21, 26 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правительство РФ утверждает правила заключения и исполнения публичных договоров на оптовом и розничных рынках. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Порядок технологического присоединения установлен «Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № (далее по тексту - Правила №).

Пунктом 6 Правил № предусмотрено, что Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

Процедура технологического присоединения включает в себя, в частности, выполнение сторонами договора предусмотренных договором мероприятий по технологическому присоединению (подп. «в» п. 7 Правил №).

В силу подп. «а», «б» п. 16 Правил № перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, являются существенными условиями договора технологического присоединения.

Таким образом, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан, помимо прочего, внести плату за технологическое присоединение.

Из характера обязательств сетевой организации и заявителя следует, что к правоотношениям по технологическому присоединению применимы как нормы главы 39 ГК РФ, так и общие положения об обязательствах и о договоре.

По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик - оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Как установлено судом, ПАО «Россети Сибири» является территориальной сетевой организацией в области электроэнергетики. По сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, основным видом экономической деятельности ПАО «Россети Сибири» (ИНН 

<

***>) является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (л.д.21-25).

На основании договора аренды находящегося в госдарственной собственности земельного участка № от ДД.ММ.ГГГГ заключенного администраций 

<

адрес> с ФИО1 последнему предоставлен в аренду земельный участок с кадастровым номером №, общей площадью 41998 кв.м из земель категории земель населенных пунктов, с разрешенным видом использования – животноводство, расположенный по адресу: 

<

адрес>, сроком на 15 лет по ДД.ММ.ГГГГ. По сведениям ЕРГН государственная регистрации договора произведена ДД.ММ.ГГГГ (л.д.9-12,19-20).

ДД.ММ.ГГГГ между ПАО «Россети Сибири» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с которым было осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя – «Нежилая застройка (хозяйственная постройка, нежилое здание)», расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, с максимальной мощностью присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, ранее присоединенные энергопринимающие устройства отсутствуют (л.д.3-5,36-38).

Пунктом 10 указанного договора стороны определили размер платы за технологическое присоединение в сумме 63 840 руб., порядок внесения которой определен п. 11 указанного договора: 10% платы за технолгическое присоединение в размере 6 384 руб. подлежали внесению в течение 15 календарных дней с даты заключения договора; 30% платы в размере 19 152 руб. – в течение 60 календарных дней со дня заключения договора; 20% платы в размере 12 768 руб. – в течение 180 календарных дней со дня заключения договора; 30% платы в размере 19 152 руб. – в течение 15 календарных дней со дня фактического присоединения; 10% платы в размере 6 384 руб. – в течение 10 календарных дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. Датой исполнения обязательств заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора).

Согласно п. 5 договора стороны согласовали срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению в течение 1 года со дня заключения договора. Согласно п. 4 договора его неотъемлемой частью являются технические условия, приведенный в приложении к договору, срок действия выданных ФИО1 технических условий № для присоединения к электрическим сетям составляет 3 года со дня заключения договора.

Как следует из пояснений истца срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по соглашению сторон был продлен до ДД.ММ.ГГГГ.

Во исполнение условий договора об оплате ФИО1 внесены на счет сетевой организации следующие платежи за технологическое присоединение: ДД.ММ.ГГГГ в сумме 6 300 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 84 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 19 152 руб.; ДД.ММ.ГГГГ – 12 768 руб. (л.д.6-8,13).

В свою очередь сетевой организацией мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств заявителя в установленные сроки не выполнены, в связи с чем требование ответчика о возложении на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение в соответствии с выданными истцу техническими условиями № для присоединения к электрическим сетям, срок действия которых на день вынесения решения суда не истек, суд считает необходимым удовлетворить, установив в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено, с учетом требований разумности – в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Кроме того, в соответствии со ст. 103 ГПК РФ с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой освобожден истец при обращении в суд с настоящим иском, в сумме 3 000 руб.

Излишне уплаченная ФИО1 государственная пошлина в сумме 3 000 руб. согласно чеку об операции от ДД.ММ.ГГГГ (л.д.15), от уплаты которой истец был освобожден при подаче иска о защите прав потребителя, подлежит возврату истцу налоговым органом в порядке, установленном п. 3 ст. 333.40 Налогового кодекса РФ.

Руководствуясь ст.ст. 194-199, 235, 237 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить.

Обязать публичное акционерное общество «Россети Сибири» (ИНН №) осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №, в соответствии с выданными ФИО1 (СНИЛС №) техническими условиями № для присоединения к электрическим сетям, в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу

Взыскать с публичного акционерного общества «Россети Сибири» (ИНН №) в доход бюджета муниципального образования 

<

адрес> края государственную пошлину в размере 3 000 (три тысячи) рублей.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.В. Попов 

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Решение не вступило в законную силу.

Судья А.В. Попов