дело №2-840/2025

УИД 30RS0001-01-2025-000145-72

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

14 марта 2025г. г. Астрахань

Кировский районный суд г. Астрахани в составе:

председательствующего судьи Айназаровой С.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Лапенко А.М.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в здании Кировского районного суда г.Астрахани, расположенном по адресу: 

<

...>, гражданское дело №2-840/2025 по исковому заявлению ФИО2 к ПАО «Россети Юг», филиалу ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании судебной неустойки, 

у с т а н о в и л :

истец обратился в суд с иском о понуждении к исполнению договора, указав в обоснование своих требований, что 18 апреля 2024г. между ФИО2 и ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора ФИО2 приняла на себя обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, а ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца – земельного участка №, с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в т.ч. по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 6 кВт, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение - 0,4 кВ. В установленные законодательством сроки все мероприятия, предусмотренные Правилами выполнены, а именно 18 апреля 2024 г. внесена на счет ПАО «Россети Юг» плата за технологическое присоединение в размере, предусмотренном договором - 39612 руб. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет не более 6 месяцев со дня заключения договора. Однако, в согласованные сторонами сроки выполнения работ, ответчик не исполнил принятые обязательства, дополнительных соглашений с истцом не заключалось. ФИО2 многократно пыталась урегулировать возникший спор в целях досудебного и добровольного урегулирования, с просьбой исполнить обязательства по заключенному договору, однако принятые на себя обязательства до настоящего времени не исполнены. В связи с чем ФИО2 просила обязать ответчика в течение одного месяца с даты вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, согласно договора от 18 апреля 2024 г. №, а также взыскать с ответчика в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 10000 руб.; неустойку за нарушение сроков подключения, исходя из суммы 99,03 руб. за каждый день просрочки с 19 октября 2024 г. до момента вынесения решения судом; штраф за нарушение прав потребителей в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя (моральный вред, неустойка); установить судебную неустойку в порядке статьи 308.3 ГК РФ в отношении ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Юг» филиал «Астраханьэнерго» в пользу истца в размере 2000 руб. В последующем истец уточнил исковые требования и просил обязать ответчика в течение одного месяца с даты вступления решения в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя по адресу: 

<

адрес>, с кадастровым номером №, согласно договора от 18 апреля 2024 г. №; а также установить судебную неустойку в порядке статьи 308.3 ГК РФ в отношении ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Юг» филиал «Астраханьэнерго» в пользу истца в размере 2000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта, началом для начисления судебной неустойки определить первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре. От иных требований истец отказался. 

В судебном заседании представитель истца ФИО2 – ФИО3 уточненный иск поддержал в полном объеме, просил удовлетворить; от части исковых требований отказался. 

Представитель ответчика филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» ФИО4 в удовлетворении уточненного иска просила отказать; по заявлению об отказе от иска в части на усмотрение суда. 

Истец ФИО2 в судебное заседание не явилась, о времени и месте рассмотрения дела извещена надлежащим образом, просила дело рассмотреть в ее отсутствие.

Представители третьих лиц СНТ «Речник», службы по тарифам Астраханской области в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, ходатайств не заявлено. 

В соответствии с требованиями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц, надлежащим образом извещенных о времени и месте рассмотрения дела. 

Выслушав представителя истца ФИО2 – ФИО3, представителя ответчика филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» ФИО4, исследовав материалы гражданского дела, суд приходит к следующему выводу.

Определением Кировского районного суда г. Астрахани от 14 марта 2025г. от истца принят отказ от иска в части взыскания с ПАО «Россети Юг», ПАО «Россети Юг» филиал «Астраханьэнерго» в пользу истца: компенсации морального вреда в размере 10000 руб.; неустойки за нарушение сроков подключения ЭПУ заявителя, согласно пункту 17 договора, исходя из суммы 99,03 руб. за каждый день просрочки с 19 октября 2024 г. до момента вынесения решения судом; штрафа за нарушение прав потребителей в размере 50% от суммы, присужденной в пользу потребителя (моральный вред, неустойка), производство в данной части прекращено. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 401 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным следствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В силу статьи 26 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным. Технологическое присоединение осуществляется в сроки, определяемые в порядке, установленном Правительством Российской Федерации или уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти.

Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. №861 (далее Правила №861) в соответствии со статьями 21 и 26 Федерального закона от 26 марта 2003г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике» и устанавливают порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в т.ч. индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3 Правил №861 сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им данных правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 названных правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению (абзац 2 пункта 3 Правил присоединения №861).

К заявителям, на которых распространяется действие абзаца 2 пункта 3 Правил присоединения №861, относятся, в частности, физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику (пункт 14).

Из Правил присоединения №861 следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая усиление существующей электрической сети в связи с присоединением новых мощностей строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии).

В силу пункта 16.3 Правил присоединения №861 обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в т.ч. в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Подпунктом «г» пункта 25 (1) Правил присоединения №861 установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 данных правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Судом установлено, что ФИО2 является собственником земельного участка, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, что подтверждается выпиской из ЕГРН. 

18 апреля 2024г. между ФИО2 и ПАО «Россети Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» заключен договор № об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. По условиям договора Н.Р. принял на себя обязательство оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора, а ответчик принял на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств истца - земельного участка, с кадастровым номером №, расположенным по адресу: 

<

адрес>, в т.ч. по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств: 6 кВт; категория надежности электроснабжения: 6 кВт по третьей категории; дополнительная мощность (без учета существующей (ранее присоединенной) мощности) энергопринимающих устройств: 6 кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения: 6 кВт по третьей категории; существующая (ранее присоединенная) мощность энергопринимающих устройств: 0 (ноль) кВт, в т.ч. по категориям надежности электроснабжения: 0 кВт; класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ. 

Факт заключения указанного договора сторонами не оспаривается.

По условиям договора, истец как заявитель обязуется оплатить все расходы на технологическое присоединение.

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям.

Пунктом 5 договора № установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Ответчиком выставлен счет на оплату за услугу по технологическому присоединению к электрической сети в размере 39612 руб., которые были уплачены ФИО2, что подтверждается чеком на оплату от 18 апреля 2024г. 

Технические условия от 18 апреля 2024г. были получены в установленном порядке, по которым была определена точка присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке присоединения, а также граница балансовой принадлежности.

В установленные законодательством сроки ФИО2 все мероприятия, предусмотренные Правилами выполнила, а именно 18 апреля 2024 г. внесла на счет ПАО «Россети Юг» плату за технологическое присоединение в размере, предусмотренном договором - 39612 руб. 

В связи с нарушением сроков технологического присоединения 18 октября 2024г. ФИО2 направлено обращение в ПАО «Россети Юг».

21 октября 2024 г. ПАО «Россети Юг» сообщили ФИО2, что в рамках заключенного договора необходимо выполнить мероприятия капитального характера: строительство воздушной линии электропередач 6/0,4 кВ ориентировочной протяженностью более 1,8 км, и осуществить установку трансформаторной подстанции. Ориентировочный срок завершения строительно-монтажных работ до 31 октября 2025г.

Из Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. №49 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и толковании договора» следует, что условия публичного договора, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 426 ГК РФ, а также действующим в момент заключения публичного договора обязательным правилам, утвержденным Правительством Российской Федерации или уполномоченными им федеральными органами исполнительной власти, являются ничтожными в части, ухудшающей положение потребителей (пункты 4, 5 статьи 426 ГК РФ).

Согласно подпункту «б» пункта 16 Правил №861 срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 Правил, в случае технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности, а также указан минимальный срок, установленный для мероприятий по технологическому присоединению (за исключением временного технологического присоединения) - 6 месяцев.

Императивное требование пункта 16 Правил №861 не позволяет сетевой организации устанавливать иные сроки. 

Судом установлено, что от земельного участка истца на удалении менее 300 метров имеется ВЛ-0,4 кВ от КТП-18,110,17 ВЛ-13,16 РП-9 ф.12,35 ПС Фунтово, состоящая на балансе ПАО «Россети Юг». 

Данные обстоятельства также установлены и техническим предложением (ВТП) по электроснабжению земельного участка №, по адресу: 

<

адрес> от 16 февраля 2023г., из которого следует, что расстояние от объектов ЭСХ до границы земельного участка заявителя: по прямой – № км; по строительной длине – № км. Согласно примечанию технического предложения: длина существующей линии от ТП-1764 L = № м; расстояние от границы СНТ «Речник» до сетей филиала – № км.

Из заключения кадастрового инженера ФИО1, производившего замер расстояния от границ земельного участка № с кадастровым номером №, расположенного по адресу: 

<

адрес> до зоны с особыми условиями использования территории (далее ЗОУИТ) с реестровым номером № и №, следует, что границы земельного участка с кадастровым номером № установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Согласно сведениям ЕГРН ЗОУИТ с реестровым номером № является зоной публичного сервитута для размещения объекта ВЛ-0,4 кВ от КТП-18, 110, 17 ВЛ-13, 16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. Согласно сведениям ЕГРН ЗОУИТ с реестровым номером № является охранной зоной объекта воздушной линии электропередачи ВЛ-0,4 кВ от КТП-18, 110, 17 ВЛ-13, 16 РП-9 ф.12, 35 ПС Фунтово. Кадастровым инженером установлено, что минимальное расстояние от границ земельного участка с кадастровым номером № до границ ЗОУИТ с реестровыми номерами № и № составляет не менее № м.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу, что срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению должен составлять не более 6 месяцев со дня заключения договора, в связи с чем ПАО «Россети Юг» нарушило предельный срок технологического присоединения, что является нарушением статьи 26 Федерального закона «Об электроэнергетике» и пункта 16 Правил №, поскольку срок договора истек ДД.ММ.ГГГГ

Договором установлена обязанность сетевой организации надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в т.ч. по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка на котором расположены присоединяемые устройства заявителя.

Сроки осуществления мероприятий по технологическому присоединению являются предельными сроками технологического присоединения, не исключают возможности технологического присоединения в более ранние сроки, оговоренные сторонами при заключении договора (правовая позиция, выраженная в решении Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. №АКПИ13-1057).

В силу пункта 7(1) Правил №861 в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 настоящих Правил, положения разделов I, II и IX настоящих Правил применяются, если разделом X настоящих Правил не установлено иное.

Пунктом 103 Правил №861 установлено, что договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2)- 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя. Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме. Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

Согласно абзацу 2 пункта 108 Правил №861 результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям, а также фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии (мощности) и (или) выдачу в электрические сети производимой на объектах микрогенерации электрической энергии в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, договора купли-продажи электрической энергии, произведенной на объектах микрогенерации. Исполнение сетевой организацией указанных обязательств осуществляется вне зависимости от исполнения заявителем его обязательств по осуществлению мероприятий по технологическому присоединению.

При этом договором № от 18 апреля 2024г. установлено, что в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий. 

Из пункта 108 Правил №861 и договора № от 18 апреля 2024г. следует, что заявитель не обязан выполнять технические условия до момента фактического присоединения, после выполнения мероприятий сетевой организацией и обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления; сетевая обязана осуществить данные мероприятия в срок, предусмотренных договором, который не может противоречить пункту 16 Правил №861 и превышать 6 месяцев.

В связи с указанными обстоятельствами суд полагает требования истца в части возложения на ответчика обязанности осуществить технологическое присоединение законными и обоснованными. Суд также считает срок, указанный истцом, в течение которого должны быть исполнены обязательства - один месяц, разумным.

При этом доказательств невозможности проведения работ по договору в согласованный сторонами срок, а также наличия объективных препятствий проведения работ в установленные в договоре сроки представителем ответчика не представлено, как и не представлено каких-либо документов, подтверждающих исполнение условий договора и взятых на себя обязательств.

Что касается требований о взыскании денежных средств в сумме 2000 руб. за каждый день неисполнения судебного акта, то в соответствии с пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в т.ч. предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя.

Определяя размер присуждения денежных средств на случай неисполнения судебного акта, суд учитывает степень затруднительности исполнения судебного акта, возможности ответчика по добровольному исполнению судебного акта, его имущественное положение, в частности размер его финансового оборота, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Денежные средства, присуждаемые истцу на случай неисполнения судебного акта, определяются в твердой денежной сумме, взыскиваемой единовременно, либо денежной сумме, начисляемой периодически; возможно также установление прогрессивной шкалы (например, за первую неделю неисполнения одна сумма, за вторую - сумма в большем размере и т.д.).

Учитывая все обстоятельства дела, суд полагает возможным установить взыскание денежных средств в случае неисполнения судебного акта в сумме 2000 руб. за каждый день неисполнения.

В соответствии с частью 1 статьи 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. 

Согласно статье 17 Закона о защите прав потребителя и пункта 4 части 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи освобождаются истцы - по искам, связанным с нарушением прав потребителей. 

Суд, учитывая объем заявленных по данному гражданскому делу требований, исходя из положений пунктов 1 и 3 части 1 статьи 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации, считает обоснованным взыскать с ответчика в доход местного бюджета сумму государственной пошлины за требования неимущественного характера (обязании исполнения обязательств по договору на технологическое присоединение к электрическим сетям) в сумме 3000 руб. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

р е ш и л :

исковое заявление ФИО2 к ПАО «Россети Юг», филиалу ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании судебной неустойки, удовлетворить. 

Обязать ПАО «Россети-Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в течение одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда, в соответствии с договором от 18 апреля 2024г. №, осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер: №.

В случае неисполнения судебного акта об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО2 по истечении одного месяца с даты вступления в законную силу решения суда взыскивать с ПАО «Россети-Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» в пользу ФИО2 по 2000 руб. за каждый день просрочки исполнения судебного акта; началом для начисления судебной неустойки определить первый день, следующий за последним днем установленным решением суда для исполнения обязательства в натуре.

Взыскать с ПАО «Россети-Юг» в лице филиала ПАО «Россети Юг» - «Астраханьэнерго» государственную пошлину в доход бюджета в размере 3000 руб. 

Решение суда может быть обжаловано в Астраханский областной суд через Кировский районный суд г. Астрахани в течение одного месяца со дня составления мотивированного решения.

Мотивированный текст решения суда изготовлен 27 марта 2025г. 

Судья С.Ю. Айназарова