Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

16 января 2025 года г. Иркутск

Свердловский районный суд г. Иркутска в составе председательствующего судьи Ильиной В.А., при секретаре Дьячуке И.А., с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ФИО2, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело УИД № 38RS0036-01-2024-007802-56 (производство № 2-200/2025 (2-5063/2024;) по иску ФИО3 ФИО10 к Акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

В Свердловский районный суд г. Иркутска обратилась ФИО3, в лице представителя ФИО1, с уточненным исковым заявлением в порядке ст.39 ГПК РФ к АО «Иркутская электросетевая компания» (далее АО «ИЭСК») об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, взыскании компенсации морального вреда, неустойки, штрафа. В обоснование заявленных требований истец указала, что для подведения электроснабжения к жилому дому по адресу: 

<

адрес обезличен>, между ФИО4 и ответчиком 

<

Дата обезличена> заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

Номер обезличен>-ВЭС, в соответствии с условиями которого, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих объектов электросетевого хозяйства, с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя составляет 15 кВт; категория надежности: III (третья); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ., а заявитель обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора. Стоимость технологического присоединения в сумме 32 403,60 рублей оплачена заявителем 

<

Дата обезличена> в полном объеме. После выполнения технических условий заявитель уведомил об этом ответчика 

<

Дата обезличена>. В свою очередь, до настоящего времени обязательства, предусмотренные договором 

<

Номер обезличен>-ВЭС, ответчиком не исполнены.

<

Дата обезличена> истец приобрел в собственность у третьего лица ФИО4 земельный участок по адресу: 

<

адрес обезличен>. 

<

Дата обезличена> истец зарегистрировал право собственности на жилой дом. Тогда же истец и третье лицо ФИО4 заключили договор уступки права требования, по которому все права по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена> перешли к ФИО3 

<

Дата обезличена> истец письменно уведомил ответчика о переходе прав по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена>, а также направил заявление о переоформлении технических условий на нового собственника. Однако до настоящего времени технические условия, оформленные в порядке п. 67 правил 

<

Номер обезличен> истцу не выданы. 

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена> истек 

<

Дата обезличена>, в связи с чем, истцом в адрес ответчика 

<

Дата обезличена> направлена досудебная претензия, на которую письменно 

<

Дата обезличена> ответчик сообщил, что в настоящее время ведутся работы по созданию технической возможности переключения в системе электроснабжения, о сроках подключения будет сообщено дополнительно. 

На основании изложенного, ФИО3 просит суд обязать АО «Иркутская электросетевая компания» исполнить обязательства по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена>, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес обезличен>Б, со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с АО «Иркутская электросетевая компания» неустойку за неисполнение обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена> за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> в размере 40 338 рублей, а также неустойку до момента фактического исполнения обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена> из расчета 0,25 % от общего размера платы за каждый день просрочки, компенсацию морального вреда в сумме 10 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, судебную неустойку за неисполнение решения суда в размере 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.

Истец ФИО3 в судебное заседание не явилась, о времени и месте которого извещена надлежащим образом, просила о рассмотрении дела без ее участия. 

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности от 

<

Дата обезличена>, исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в иске, просила их удовлетворить, повторив доводы искового заявления. 

В судебном заседании представитель ответчика ФИО2, действующий по доверенности №юр-63 от 

<

Дата обезличена>, исковые требования истца не признал, указав, что 

<

Дата обезличена> произошло фактическое подключение энергопринимающих устройств по адресу: 

<

адрес обезличен>, данное обстоятельство подтверждается уведомлением о фактическом подключении. 

Третье лицо ФИО4, в судебное заседание не явилась, извещена о дате, времени и месте судебного заседания надлежащим образом, уважительных причин своей неявки суду не представила.

В соответствии с ч.ч.3,5 ст.167 ГПК РФ суд полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие лиц, участвующих в деле. 

Выслушав стороны, огласив исковое заявление, изучив материалы гражданского дела, исследовав представленные доказательства, оценивая их в совокупности и каждое в отдельности, суд приходит к следующему. 

Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, основным видом деятельности АО «ИЭСК» является передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям.

В соответствии со статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, из действий граждан и юридических лиц которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Пунктом 1 статьи 420 ГК РФ предусмотрено, что договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

Граждане свободны в заключении договора (пункт 1 статьи 421 ГК РФ).

Согласно пункту 4 названной нормы условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 ГК РФ).

Статьей 432 ГК РФ предусмотрено, что договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Согласно статьям 309 и 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу положений статьи 328 ГК РФ встречным признается исполнение обязательства одной из сторон, которое обусловлено исполнением другой стороной своих обязательств. Ни одна из сторон обязательства, по условиям которого предусмотрено встречное исполнение, не вправе требовать по суду исполнения, не предоставив причитающегося с нее по обязательству другой стороне.

Юридически значимыми являются обстоятельства того, какой из сторон должно быть осуществлено первоначальное, а какой последующее исполнение, а также обстоятельства установления невозможности исполнения одного требования в отсутствие исполнения другого.

Если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств (пункт 3 статьи 401 ГК РФ).

В силу статьи 26 Федерального закона от 

<

Дата обезличена> № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее также - технологическое присоединение), осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом.

Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> (далее - Правила 

<

Номер обезличен>) урегулирован порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей, в том числе выполнение мероприятий по технологическому присоединению, распределению обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (выполнению каждой из сторон мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения, при этом урегулирование отношений с иными лицами осуществляется сетевой организацией).

Пунктом 3 Правил предусмотрено, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению. К числу указанных лиц в соответствии с п. 14 Правил относятся физические подавшие заявку в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт. включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

Согласно пункту 4 Правил, любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 Правил).

Из Правил присоединения следует, что на сетевую организацию возлагается не только обязанность по осуществлению собственно мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям, но и целого ряда подготовительных мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, включая строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличения сечения проводов, кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии и т.п.

При этом из подпункта «б» пункта 25 и подпункта «б» пункта 25 (1) Правил присоединения следует, что сетевая организация обязана осуществить эти подготовительные мероприятия за свой счет в отношении любых заявителей.

Сопоставление перечня содержащихся в подпункте «б» пункта 25 и подпункта «б» пункта 25(1) Правил присоединения мероприятий с пунктом 28 тех же правил, определяющим критерии наличия технической возможности технологического присоединения, позволят сделать вывод о том, что эти мероприятия, по существу, направлены на обеспечение технической возможности технологического присоединения.

Таким образом, в силу приведенных положений Закона об электроэнергетике и Правил присоединения обеспечение технических условий технологического присоединения в отношении любого обратившегося к сетевой организации заявителя является неотъемлемой частью обязанностей сетевой организации по соответствующему публичному договору.

С учетом изложенного на сетевой организации лежит обязанность не только по совершению мероприятий по технологическому присоединению в рамках договора присоединения, но и совершению действий по обеспечению технических условий технологического присоединения, в том числе по урегулированию отношений с любыми третьими лицами по вопросу исполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Судом установлено, согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 

<

Дата обезличена> жилой дом с кадастровым номером 

<

Номер обезличен> на земельном участке с кадастровым номером 

<

Номер обезличен>, расположенный по адресу: 

<

адрес обезличен>, был приобретен истцом ФИО3 у третьего лица ФИО4 на основании договора купли-продажи земельного участка от 

<

Дата обезличена>, в связи с чем, земельный участок с 

<

Дата обезличена>, жилой дом с 

<

Дата обезличена> принадлежит на праве собственности ФИО3

Ранее 

<

Дата обезличена> между первоначальным собственником ФИО4 (заявитель) и ОАО «ИЭСК» (сетевая организация) заключен договор 

<

Номер обезличен>-ВЭСоб осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. Согласно пункту 1 договора, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя хозяйственной постройки, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства к присоединению энергопринимающих устройств (включая их проектирование, строительство, реконструкцию), урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет 15 кВт; категория надежности: III (третья); класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

В соответствии с пунктом 2 договора, технологическое присоединение необходимо для энергоснабжения бытовых устройств и иного оборудования хозяйственной постройки, расположенных на земельном участке по адресу:

<

адрес обезличен>Б. 

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям и располагается на расстоянии 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются присоединяемые объекты заявителя (пункт 3). Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении. Срок действия технических условий составляет 5 лет со дня заключения настоящего договора (пункт 4). Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора (пункт 5). 

В силу пункта 6.1 договора, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях. 

Заявитель обязуется, в том числе надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на него мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях (пункт 8.1 договора).

Пунктом 10 договора предусмотрено, что размер платы за технологическое присоединение составляет 32 403,60 руб.

Факт оплаты заявителем технологического присоединения в размере 32 403,60 руб., подтверждается платежным поручением 

<

Номер обезличен> от 

<

Дата обезличена>, что ответчиком в ходе судебного разбирательства не оспаривалось. 

Технические условия для присоединения к электрическим сетям от 

<

Дата обезличена> выданы заявителю ФИО4, 

<

Дата обезличена> что не оспаривалось ответчиком в ходе рассмотрения дела, заявитель обратился в АО «ИЭСК» с уведомлением о выполнении технических условий по договору. 

Далее 

<

Дата обезличена> между третьим лицом ФИО4 (Цедент) и истцом ФИО3 (Цессионарий) заключен договор уступки права серия 38 ДУ 

<

Номер обезличен>, предметом которого являлись права по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям энергопринимающих устройств. Согласно которому ФИО4 уступает ФИО3 в полном объеме свои права по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС об осуществлении технологического присоединения. 

Факт заключения договора уступки прав от 

<

Дата обезличена> не оспаривался в ходе судебного заседания. Договор купли-продажи и договор цессии заключены в установленном законом порядке, ни кем не оспорены и недействительными не признавались.

В соответствии с пунктом 1 статьи 382 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) право (требование), принадлежащее на основании обязательства кредитору, может быть передано им другому лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к другому лицу на основании закона.

В силу пункта 2 статьи 382 ГК РФ для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором.

Согласно пункту 1 статьи 388 ГК РФ уступка требования кредитором (цедентом) другому лицу (цессионарию) допускается, если она не противоречит закону.

Пунктом 2 статьи 390 ГК РФ предусмотрено, что при уступке цедентом должны быть соблюдены соответствующие условия, в том числе, уступаемое требование должно существовать в момент уступки, если только это требование не является будущим требованием.

Из разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, изложенных в пункте 10 постановления от 

<

Дата обезличена> N 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» следует, что при оценке того, имеет ли личность кредитора в обязательстве существенное значение для должника, для целей применения пункта 2 статьи 388 ГК РФ необходимо исходить из существа обязательства.

Если стороны установили в договоре, что личность кредитора имеет существенное значение для должника, однако это не вытекает из существа возникшего на основании этого договора обязательства, то подобные условия следует квалифицировать как запрет на уступку прав по договору без согласия должника (пункт 2 статьи 382 ГК РФ).

<

Дата обезличена> истец ФИО3 уведомила ответчика о переходе прав по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС об осуществлении технологического присоединения, а также направила заявление о переоформлении документов о технологическом присоединении. 

<

Дата обезличена> между АО «ИЭСК» и истцом ФИО3 заключено соглашение о переходе прав и обязанностей по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена>, в связи с чем, на основании письменного заявления заявителя права и обязанности заявителя по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС об осуществлении технологического присоединения от 

<

Дата обезличена>, заключенному с ФИО4 переходят к ФИО3. 

В связи с тем, что ответчиком не исполнены обязательства по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС, истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия от 

<

Дата обезличена>.

Возражая против удовлетворения заявленных требований, ответчиком представлена информация об исполнении по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС об осуществлении технологического присоединения 

<

Дата обезличена> по заявке на увеличение мощности до 15 кВт. по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС, с учетом того что первоначально 

<

Дата обезличена>, было составлено уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от 

<

Дата обезличена>, согласно которому сетевая организация оказала ФИО4 услугу по технологическому присоединению в соответствии с мероприятиями по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена>, выдача повторного акта не требуется. 

<

Дата обезличена> АО «ИЭСК» составлен акт допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии 

<

Номер обезличен>-ВЭС, согласно которому введен в эксплуатацию ПУ РиМ 489.26, максимальной мощностью 8 кВт, уровень напряжения 0,4 кВ.. В последующем 

<

Дата обезличена> ответчик уведомил заявителя об обеспечении возможности присоединения к электрическим сетям. 

<

Дата обезличена> ответчиком осуществлено увеличение мощности до 15 кВт. в соответствии с договором 

<

Номер обезличен>-ВЭС. 

В соответствии с п. 93 Постановления Правительства РФ от 

<

Дата обезличена> N 861 (ред. от 

<

Дата обезличена>) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам коммерческого оператора оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", составление повторного в случае увеличения мощности энергопринимающих устройств, не предусмотрено. 

Факт исполнения АО «ИЭСК» технологического присоединения по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС установлен на день вынесения решения, вместе с тем, суд полагает, что данный довод не может являться уважительной причиной неисполнения договора технического присоединения в срок установленный данным договором, поскольку АО «ИЭСК» является профессиональным участником рынка электроэнергии, заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору и самостоятельно согласовала технические условия, в том числе сетевая организация могла удостовериться в наличии возможности исполнения условий в части реконструкции объектов электросетевого хозяйства. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

В пункте 3 статьи 401 ГК РФ указано, что, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В пункте 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> (ред. от 

<

Дата обезличена>) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» разъяснено, что в силу пункта 3 статьи 401 ГК РФ для признания обстоятельства непреодолимой силой необходимо, чтобы оно носило чрезвычайный, непредотвратимый при данных условиях и внешний по отношению к деятельности должника характер.

Требование чрезвычайности подразумевает исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого не является обычным в конкретных условиях.

Если иное не предусмотрено законом, обстоятельство признается непредотвратимым, если любой участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства или его последствий, т.е. одной из характеристик обстоятельств непреодолимой силы (наряду с чрезвычайностью и непредотвратимостью) является ее относительный характер.

Не могут быть признаны непреодолимой силой обстоятельства, наступление которых зависело от воли или действий стороны обязательства, например, отсутствие у должника необходимых денежных средств, нарушение обязательств его контрагентами, неправомерные действия его представителей. 

Обязанность доказывать наличие обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, лежит именно на ответчике, между тем, ответчиком не приведено доказательств наличия у него исключительных обстоятельств, которые явились причиной надлежащего исполнения обязательств по договору.

Подпунктом «г» пункта 25 (1) названных выше Правил установлено, что в технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктом 14 Правил, должно быть указано распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией).

Заключая договор технологического присоединения, сетевая организация обладала сведениями, необходимыми для реализации обязанностей по данному договору, и самостоятельно согласовала технические условия. Обязанность по выполнению технических мероприятий за пределами участка потребителя по условиям договора, а также на основании Правил 

<

Номер обезличен> лежала на сетевой организации.

Давая оценку представленным доказательствам в их совокупной и взаимной связи, руководствуясь вышеизложенными нормами права, регулирующими спорные правоотношения, суд, исходит из того, что ответчиком обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в установленный договором срок не исполнены, доказательств наличия обстоятельств, освобождающих ответчика от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства перед истцом, им не представлено. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для возложения обязанности на ответчика по исполнению договора присоединения к электрическим сетям 

<

Номер обезличен>-ВЭСот 

<

Дата обезличена>, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: 

<

адрес обезличен>Б.

В силу положения, закрепленного статьей 210 ГПК Российской Федерации и имеющего общий характер, решение суда приводится в исполнение после вступления его в законную силу. 

Частями 2, 3 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации предусмотрено, что при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может указать, что, если ответчик не исполнит решение в течение установленного срока, истец вправе совершить эти действия за счет ответчика с взысканием с него необходимых расходов.

В случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (часть 2 статьи 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). При установлении указанного срока суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая установленные по делу обстоятельства, суд приходит к выводу о возложении на ответчика выполнить обязательства со дня вступления в законную силу решения суда по настоящему делу.

При этом срок, в течении которого ответчику надлежит выполнить соответствующие действия, является, по мнению суда разумным и достаточным для исполнения судебного решения с учетом характера и объема работ, которые необходимо выполнить. 

Установление судом того факта, что в процессе рассмотрения дела, до вынесения судом решения ответчик исполнил обязательства по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭСот 

<

Дата обезличена> об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств жилого дома истца, не свидетельствует о необоснованности иска, а может служить основанием для указания суда о том, что решение суда в этой части не подлежит исполнению.

Рассматривая требования о взыскании неустойки, суд приходит к следующему. 

Пунктом 17 договора от 

<

Дата обезличена> предусмотрено, что сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 % от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящем абзацем порядке за год просрочки. 

Истцом представлен расчет неустойки в размере 40 338 рублей за период с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> (490 дней). 

Проверяя расчет неустойки, представленный истцом, учитывая, что ответчиком обязательства исполнены 

<

Дата обезличена>, суд считает необходимым произвести перерасчет в количестве дней с 

<

Дата обезличена> по 

<

Дата обезличена> (32 403,60 руб. х 0,25% х 490) = 39 694,41 руб.

Согласно пункту 4 статьи 13 Закона Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> «О защите прав потребителей» изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным законом.

Как разъяснено в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при разрешении требований потребителей необходимо учитывать, что бремя доказывания обстоятельств, освобождающих от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательства, в том числе и за причинение вреда, лежит на продавце (изготовителе, исполнителе, уполномоченной организации илиуполномоченном индивидуальном предпринимателе, импортере) (пункт 28).

Основанием для уменьшения размера неустойки, подлежащей взысканию с исполнителя в пользу потребителя, являются лишь исключительные случаи несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательств.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения размера неустойки предоставлено суду в целях устранения явной ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств независимо от того, является неустойка законной или договорной.

Тем самым, взыскание неустойки не должно иметь целью обогащения одного из контрагентов вследствие допущенного нарушения обязательства другой стороной.

Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, то есть, по существу, - на реализацию требования статья 17 (часть 3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

При этом, наличие оснований для снижения и определение критериев соразмерности определяются судом в каждом конкретном случае самостоятельно, исходя из установленных по делу обстоятельств.

Каких-либо обстоятельств, позволяющих ответчика освободить от ответственности в виде выплаты неустойки, АО «ИЭСК» в ходе судебного разбирательства не заявлено, в связи с чем, суд находит требования ФИО3 о взыскании неустойки за неисполнение обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС в размере 39 694,41 руб., законными и обоснованными. В части взыскания неустойки в большем размере до момента фактического исполнения обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС из расчета 0,25 % от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, судом отклоняются ввиду исполнения ответчиком обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС на момент вынесения решения. 

Статьей 15 Федерального закона от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> «О защите прав потребителей» предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В соответствии со статьей 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

При определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред.

Согласно положениям статье 1101 ГК РФ компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание, что АО «ИЭСК» нарушило права истца как потребителя, не исполнив надлежащим образом свои обязательства по договору об осуществлении технологического присоединения в установленный срок, суд с учетом требований разумности и справедливости полагает возможным взыскать с ответчика в пользу истца в счет компенсации морального вреда 5 000 рублей.

В силу пункта 6 статьи 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

В силу разъяснения, содержащегося в пункте 46 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

<

Дата обезличена> 

<

Номер обезличен> «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлено ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

В связи с чем, учитывая, что требования ФИО3 удовлетворены, суд приходит к выводу, что с ответчика подлежит взысканию штраф в размере 22 347,20 рублей (5 000 рублей компенсация морального вреда + 39 694,41 рублей сумма взысканной неустойки) х 50%). 

Также стороной истца заявлено о взыскании с ответчика в порядке пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ денежной суммы в размере 300 рублей за каждый день неисполнения решения суда со дня, следующего за днем вступления решения суда в законную силу.

По смыслу статей 308.3 и 330 ГК РФ судебная неустойка направлена на стимулирование должника к надлежащему исполнению обязательства под угрозой наступления неблагоприятных материальных последствий. В данном случае следует учитывать обеспечительную функцию неустойки как инструмент правового воздействия на участников гражданского оборота.

Учитывая исполнение ответчиком обязательств по договору 

<

Номер обезличен>-ВЭС от 

<

Дата обезличена>, оснований для взыскания неустойки в соответствии со ст.308.3 ГК РФ не имеется.

Суд, учитывая, что истец в соответствии с подпунктом 4 пункта 2 статьи 333.36 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - НК РФ) освобожден от оплаты государственной пошлины при обращении в суд с иском, связанным с нарушением прав потребителя, приходит к выводу, что в соответствии с требованиями части 1 статьи 103 ГПК РФ, пункта 6 статьи 52, подпункта 1, 3 пункта 1 статьи 333.19 НК РФ, статей 61.1, 61.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сумма государственной пошлины, подлежащая взысканию с ответчика в бюджет муниципального образования города Иркутска составляет 7 000 рублей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194- 199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ФИО3 ФИО11 кАкционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» об исполнении обязательств по договору технологического присоединения, взыскании неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, удовлетворить частично.

Возложить на Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.02.2023г. 

<

Номер обезличен>, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, по адресу: 

<

адрес обезличен> со дня вступления решения суда в законную силу. 

Взыскать с Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>) в пользу ФИО3 ФИО12 (ИНН 

<

Номер обезличен>)неустойку в размере 40 338 рублей, компенсацию морального вреда в размере 5 000 рублей, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя в размере 22 669 рублей, всего взыскать – 68 007 рублей (Шестьдесят восемь тысяч семь рублей). 

В удовлетворении исковых требований ФИО3 ФИО13 к Акционерному обществу «Иркутская электросетевая компания» о взыскании неустойки, в большем размере, отказать.

Взыскать с Акционерного общества «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>) в доход бюджета муниципального образования город Иркутск государственную пошлину в размере 7 000 рублей.

Решение в части возложения на Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (ИНН 

<

***>) обязанность исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 09.02.2023г. № 642/23 – ВЭС, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, по адресу: 

<

адрес обезличен>, со дня вступления решения суда в законную силу, не подлежит исполнению в связи фактическим исполнением на день вынесения решения суда. 

Решение может быть обжаловано в Иркутский областной суд через Свердловский районный суд города Иркутска в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Судья: В.А. Ильина

В окончательной форме решение изготовлено 29.01.2025 года.