Гражданское дело № 2-343/2023

УИД 80RS0002-01-2023-000781-30

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

п. Могойтуй 19 октября 2023 года 

Могойтуйский районный суд Забайкальского края в составе 

председательствующего судьи Ситко Т.И., единолично,

при секретаре Шойдоновой Е.Б.,

с участием истца ФИО1,

представителя Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ФИО2,

представителя ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в интересах ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь», филиалу ПАО «Россети Сибирь» Читаэнерго о понуждении осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

У С Т А Н О В И Л:

Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю обратилось в суд с указанным исковым заявлением в защиту прав потребителя ФИО1 на основании её письменного заявления от 07.09.2023 г., обосновав его следующим. 06.08.2019 г. потребителем ФИО1 подана заявка на подключение. 06.08.2019 г. заключен договор № 20.7500.2310.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, срок исполнения согласно договору 15.01.2020 г.. 

09.08.2019 г. потребитель произвел оплату по договору в размере 17 935 руб. Предельным сроком для осуществления технологического присоединения являлось 15.01.2020 г. 

Обстоятельства, освобождающие ПАО «Россети Сибирь» от своевременного исполнения обязательств, и от ответственности за их нарушение отсутствуют. 

ПАО «Россети Сибирь» обязательства, принятые на себя по договору в добровольном порядке не выполняет, между тем, в настоящее время сохраняется потребность потребителя в технологическом подключении энергопринимающих устройств. 

Согласно п. 20 договора, сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. 

По состоянию на 11.09.2023 г. период просрочки с 15.01.2020 г. по 11.09.2023 г. составляет 1324 дня. Формула 17 935 х 1324 х 0,25 = 59 365 руб.

Просит обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения «Объект сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: 

<

данные изъяты> в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.7500.2310.19 в течение 7 дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ПАО «Россети Сибирь» в пользу ФИО1 сумму неустойки, рассчитанную на день вынесения решения суда, компенсацию морального вреда в размере 100 000 руб., за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требования о возмещении реального ущерба штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Не согласившись с требованиями истца, ответчиком направлен отзыв на исковое заявление, в котором указал, что между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения №20.7500.2310.19 от 06.08.2019. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта для производства сельскохозяйственной продукции, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

данные изъяты>. Согласно п. 6 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения договора, то есть до 06.08.2020. В соответствии с п. 5 Договора технические условия являются неотъемлемой частью договора и приведены в приложении. 

Техническими условиями предусмотрено, что сетевая организация обязана: 

-выполнить проектную документацию в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительством РФ от 16.02.2008 № 87 и согласовать со всеми заинтересованными организациями в соответствии с действующим законодательством. 

-строительство ЛЭП-10кВ от ближайшей опоры ВЛ 10 кВ ф. 2 Жарань до места установки новой ТП- 10/0,4кВ. Протяженность и характеристики ЛЭП-10кВ уточнить проектом. 

-установка новой ТП-10/0,4кВ. Место установки, тип, мощность силового трансформатора уточнить проектом. 

-строительство ЛЭП-0,4кВ от РУ-0,4кВ новой ТП-10/0,4кВ до границы земельного участка Заявителя. Протяженность и характеристики ЛЭП-0,4кВ уточнить проектом. 

Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28.12.2018 № 761-НПА и составляет 17 934,30 руб. 

Начиная с 2019 года, в том числе, с принятием государственных программ, направленных на упрощение предоставления земельных участков гражданам, развитие территорий, сельского хозяйства и т.д. по филиалу «Читаэнерго» возникли трудности с исполнением мероприятий по технологическому присоединению, где требуются затраты на строительство объектов электросетевого хозяйства. 

Источником финансирования строительства объектов энергетики являются выпадающие доходы, на основании Федерального закона РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Правил. Затраты сетевой организации на строительство электросетевых объектов, необходимых для присоединения, включаются в тариф на передачу электрической энергии. 

Пунктом 81 Основ ценообразования рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии территориальных сетевых организаций ограничен предельными (минимальными и максимальными) уровнями цен (тарифов), утверждаемых ФАС России и прогнозом социально-экономического развития, предусматривающий максимальный рост тарифа по категории потребителей «прочие» – 3%, по категории потребителей «население и приравненные к нему категории» – 5%. 

В условиях, когда максимально допустимый рост тарифов на услуги сетевых организаций ограничен, компенсация выпадающих доходов, возникающих в связи с технологическим присоединением, в требуемом объеме не производится. 

В соответствии со ст. 423 ГК РФ, Правилами технологического присоединения, Федеральным законом РФ «Об электроэнергетике», договоры об оказании услуг технологического присоединения носят возмездный характер. 

В целом в Российской Федерации сложилась ситуация, когда одновременно, в целях развития территорий, расширены положения о льготном технологическом присоединении и введены в работу различные программы по упрощенному предоставлению земельных участков гражданам и юридическим лицам. При этом продолжает действовать законодательное ограничение роста тарифов на передачу электрической энергии, которые по-прежнему являются источником финансирования технологического присоединения льготных категорий заявителей. Объем льготного технологического присоединения начиная с 2019 года резко возрос и на сегодняшний день положения о возмездном характере договоров фактически равны нулю. 

ПАО «Россети Сибирь» приняты все возможные, зависящие от Общества меры, направленные на исполнение обязательств Общества по договорам технологического присоединения, в том числе по изысканию источников финансирования. 

Для разрешения вопроса, ПАО «Россети Сибирь» обратилось к Правительству Забайкальского края, в Региональную службу по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. 

Правительством Забайкальского края в ФАС России и Министерство энергетики РФ, в связи с невозможностью роста тарифа более обозначенных выше пределов, направлены письма с просьбой рассмотреть вопрос о внесении изменений в действующее законодательство определяющее тариф на передачу электрической энергии как источник финансирования строительства объектов электроэнергетики в целях технологического присоединения. 

Для исполнения обязательств по технологическому присоединению Общество направляет все возможные денежные средства. Все средства инвестиционной программы филиала направляются на реализацию договоров технологического присоединения, что негативно влияет на возможность снижения процента износа электросетевого хозяйства, посредством которого осуществляется передача электрической энергии. 

В целях исполнения обязательств по технологическому присоединению Общество вынуждено привлекать кредитные средства, что происходит при наличии значительного объема дебиторской задолженности по основному виду деятельности филиала – передаче электрической энергии. По состоянию на 01.08.2022 кредитный портфель ПАО «Россети Сибирь» по филиалу «Читаэнерго» составляет 3 639 млн. руб., что подтверждается справкой о движении кредитов и оплате процентов. В 2022 году ПАО «Россети Сибирь» не имеет возможности привлекать кредитные средства, поскольку не имеет денежных ресурсов для погашения процентов. 

Финансирование инвестиционной программы в 2021 году составило 223,558 млн. руб. фактическое исполнение 270,480 млн. руб., в части льготного технологического присоединения финансирование составило 194,04 млн. руб., фактическое исполнение 215,28 млн. руб. К концу 2022 года при плане 247,8 млн. руб. истрачено средств инвестиционной программы филиала «Читаэнерго» на льготное технологическое присоединение до 15 кВт - 213,7 млн. руб., на льготное технологическое присоединение до 150 кВт = 44,6 млн. руб., всего 258,3 млн. руб. 

Указанные данные подтверждаются отчетами о реализации инвестиционной программы ПАО «Россети Сибирь» за 2021, 2022 год, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 24.11.2022 № 27@. Данные отчеты публикуются официально и находится в открытом доступе на сайте Министерства энергетики РФ. 

На 01.07.2022 размер дебиторской задолженности составил 3 799 810 420,66 руб. Объем заемных средств составляет 3 639 млн. руб., кредиторская задолженность на 01.07.2022 составляет 2,116 млн. руб. 

Таким образом, несмотря на привлечение кредитных средств, использование материалов прошлых лет, сохранился дефицит источников финансирования в части реализации льготного технологического присоединения. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств ФИО1 осложнено обстоятельствами, не зависящими от сетевой организации, в связи с которыми у ПАО «Россети Сибирь» отсутствует возможность выполнить мероприятия, определенные Договором, для осуществления технологического присоединения. 

В случае, удовлетворения исковых требований истца об обязании ПАО «Россети Сибирь» исполнить договор в течение 7 дней с даты вступления решения в силу, ПАО «Россети Сибирь» отмечает, что в срок, заявленный истцом, с учетом обстоятельств, указанных выше, Общество не сможет исполнить решение. В связи с чем, Общество будет вынуждено обращаться в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения судебного акта. 

В связи с изложенным, просит, в случае принятия решения об удовлетворении исковых требования, установить разумный срок, в течение которого оно может быть исполнено не менее одного года, с момента вступления решения суда в силу. 

Указывает, что в соответствии с п. 17 Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки. 

Таким образом, период просрочки ограничен одним календарным годом, размер неустойки не может быть начислен более чем за год и не может превышать сумму 16 365,05 руб. (365 дней х 17 934,30 руб. х 0,25%). 

Так, в соответствии с основными понятиями, используемыми в настоящем Законе, потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

По Договору технологическое присоединение технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта для производства сельскохозяйственной продукции, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

данные изъяты> 

Земельный участок истца, на котором он должен создать энергопринимающие устройства для технологического присоединения, площадью относится к землям сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования: для сельскохозяйственного производства (выписка из Единого государственного реестра недвижимости). 

Таким образом, назначение энергопринимающих устройств, присоединение которых подлежит осуществлению в порядке исполнения договора ответчиком, явно не связано с использованием устройств для личных, семейных, домашних и иных нужд, а предназначено для осуществления приносящей доходы деятельность. 

То обстоятельство, что в настоящее время истец субъектом предпринимательства не является, не имеет значения для существа спора. 

Данный договор заключен истцом-гражданином, однако предмет договора свидетельствуют о коммерческом правоотношении. 

На основании вышеизложенного, просит суд отказать в удовлетворении исковых требований в части взыскания компенсации морального вреда и штрафа в соответствии с Законом РФ от 7.02.1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".

В судебном заседании представитель Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю ФИО2 заявленные требования поддержала по основаниям, указанным в исковом заявлении.

Истец ФИО1 исковые требования поддержала, просила удовлетворить.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» ФИО3 доводы, изложенные в отзыве, поддержала, просит в случае удовлетворения иска предоставить срок для исполнения обязательств в течение года со дня вступления решения суда в законную силу.

Выслушав стороны, изучив материалы гражданского дела, исследовав и оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, установив юридически значимые обстоятельства по делу, суд приходит к следующему.

Как установлено судом и следует из материалов дела 06 августа 2019 г. ФИО1 подала в АО «Читаэнергосбыт» заявку на новое технологическое присоединение энергопринимающих устройств. 06 августа 2019 г. между ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ПАО «МРСК Сибири») и ФИО1 заключен договор № 20.7500.2310.19 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям /л.д. 12-13/. /л.д. 2-4/. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения объекта сельскохозяйственного производства, расположенного (который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка №.

Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (п. 5).

Сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя (п. 6).

Согласно п. 10 договора размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с приказом Региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края от 28.12.2020 № 761-НПА и составляет 17 934,30 руб., в том числе НДС 20% в сумме 2 989,05 руб.

Согласно представленному чеку-ордеру истцом ФИО1 внесена плата за технологическое присоединение 09.08.2019 г. в размере 17 935 руб. /л.д. 17/.

Положениями Гражданского кодекса РФ предусмотрено, что по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779).

Общие положения о подряде (ст. 702 - 729) и положения о бытовом подряде (ст. 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит ст. 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг (ст. 783).

В соответствии с п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Возникший между сторонами спор подпадает под регулирование специальных норм, закрепляющих правила подключения к системам энергоснабжения, таких как ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», и Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, от 27 декабря 2004 г. №861.

В силу п. 1 ст. 26 Федерального закона от 26 марта 2003 г. №35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

На основании п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им настоящих Правил и наличии технической возможности технологического присоединения. Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14, 34 указанных Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с п. 4 Правил № 861 любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с указанными Правилами.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами.

Согласно подпункту "в" пункта 7 Правил №861 стороны по договору на осуществление технологического присоединения обязаны выполнить установленные в договоре мероприятия.

Разделом X Правил технологического присоединения (пункты 103 - 112) урегулированы особенности технологического присоединения заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13.2 - 13.5 и 14 настоящих Правил. Пунктом 103 Правил технологического присоединения предусмотрено, что договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, заключается путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. При этом в силу пункта 104 наличие заключенного заявителями, указанными в пунктах 12 (1) и 14 настоящих Правил, договора подтверждается документом об оплате такими заявителями счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных настоящими Правилами, со дня оплаты заявителем счета, предусмотренного пунктом 103 настоящих Правил.

В силу ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (пункты 1, 4).

В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами императивным нормам, действующим в момент его заключения.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных названным Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (п. 1 ст. 310 ГК РФ).

В соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной специальными законами.

Согласно ч. 1 ст. 27 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. №2300-1 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами.

Исходя из условий договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 06 августа 2019 г., срок исполнения обязательств сетевой организации составляет 1 год со дня заключения настоящего договора (пункт 5 договора) и истек 07 августа 2020 г.

При таких обстоятельствах, поскольку ответчиком не осуществлено технологическое присоединение принадлежащего истцу объекта в соответствии с договором, при отсутствии доказательств, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым невозможно отнести отсутствие у ответчика необходимых денежных средств, суд приходит к убеждению о нарушении прав истца, как потребителя, и считает необходимым возложить на ПАО «Россети Сибирь» обязанность по осуществлению технологического присоединения.

При расчете неустойки к правоотношениям между сторонами подлежат применению нормы, регулирующие данные правоотношения, указанные в пп. "в" п. 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.

В соответствии с пунктом 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, договор должен содержать существенные условия, к числу которых отнесены положения об ответственности сторон за несоблюдение установленных договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том числе (подпункт "в"): обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренного договором (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, указанными в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже), уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки, при этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

В соответствии с положениями п. 17 договора, сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Неустойка подлежит взысканию в размере 16 365 рублей 05 копеек, исходя из следующего расчета 0,25 % х 17 934,30 х 365 дней, что не превышает предельный размер неустойки, установленный п. 17 договора.

В соответствии с п. 1 ст. 151 Гражданского кодекса РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статьей 15 Закона РФ «О защите прав потребителей» установлено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

В п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» содержится разъяснение о том, что при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом в каждом конкретном случае с учетом характера причиненных потребителю нравственных и физических страданий исходя из принципа разумности и справедливости. 

Доводы ответчика относительно невозможности взыскания компенсации морального вреда опровергаются установленным фактом нарушения ответчиком прав истца как потребителя, что является достаточным основанием для удовлетворения требования.

При установлении нарушения со стороны ответчика ненадлежащего исполнения заключенного между сторонами договора, исходя из объема нарушений и его длительности, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика компенсации морального вреда с учетом принципа разумности и справедливости в размере 10 000 руб.

На основании п. 6 ст. 13 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» в пользу истца с ответчика подлежит взысканию штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере 13 182 руб. 53 коп. = (16 365,05 +10 000):2.

В соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

С учетом длительности неисполнения обязательств по договору суд полагает необходимым установить срок для исполнения решения суда два месяца с момента вступления решения суда в законную силу.

На основании ст. 103 ГПК РФ с ответчика в местный бюджет подлежит взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным требованиям.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ суд,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в интересах ФИО1 удовлетворить частично.

Обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств для электроснабжения «Объект сельскохозяйственного производства», расположенного по адресу: 

<

адрес>, кадастровый номер земельного участка № в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.7500.2310.19, в течение 2 (двух) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт 

<

данные изъяты> компенсацию морального вреда в размере 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, неустойку в размере 16 365 (шестнадцать тысяч триста шестьдесят пять) рублей 05 копеек, штраф в размере 13 182 (тринадцать тысяч сто восемьдесят два) рублей 53 копеек.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в доход бюджета муниципального района «Могойтуйский район» государственную пошлину в размере 1 386 рублей (одна тысяча триста восемьдесят шесть) 43 копейки.

В остальной части требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Забайкальский краевой суд через Могойтуйский районный суд Забайкальского края в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Решение суда в окончательной форме изготовлено 19 октября 2023 года.

Судья Т.И. Ситко