К делу 2-1006/19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г-к Анапа Краснодарский край 15 мая 2019 года

Судья Анапского городского суда Ковальчук П.М.

при секретаре Овчаренко К.А.

рассмотрев, в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1, к АО «НЭСК-электросети» в лице филиала «Анапаэлектросети» о взыскании договорной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с исковым заявлением, в котором просит взыскать с Акционерного общества «НЭСК-электросети» в лице филиала «Анапаэлектросети» за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № на технологическое присоединение к электрической сети от 19.03.2013 г. договорную неустойку в размере 3 230 036,18 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 350 руб., а всего взыскать 3 254 386 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) руб. 18 коп.

Свои требования мотивирует тем, что 19.03.2013 г. между ОАО «НЭСК-электросети» (в настоящее время АО «НЭК-электросети») и ФИО1, был заключен договор № на технологическое присоединение к электрической сети, в соответствии, с условиями которого ответчик принял на себя обязательства по технологическому присоединению энергопринимающих устройств истца ЭПУ Земельного участка для строительства многоквартирных 12-ти этажных жилых домов (лит.1 и лит.2) со встроенными помещениями, а истец принял обязательства оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, которые являются приложением к договору об осуществлении технологического присоединения, ответчик должен был осуществить: организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции электрических сетей, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя; расчет значения токов «КЗ» для определения установок защиты, внести изменения в параметры установок РЗиА; организационно-технические мероприятия по новому строительству электрических сетей - выполнение проектирования и строительства от существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «НЭСК-электросети» до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, выполняемых за счет тарифа на технологическое присоединение; прокладку КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-7 (АП-20) до РУ-10кВ проектируемой ТП заявителем. Марка АСБ-10, сечение 3x120 мм2. Протяженность 0,55 км; прокладку трех труб Д-225 мм методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 0,05 км.

В соответствии с условиями договора истцом были оплачены расходы на технологическое присоединение: 10% платы за технологическое присоединение - 256 095,98 руб. - 24.08.2013 г. - платежное поручение № 995; 30% платы за технологическое присоединение - 768 287,95 руб. -24.09.2013 г. - платежное поручение № 508; 20% платы за технологическое присоединение - 512 191,96 руб. -24.09.2013 г. - платежное поручение № 509.

По условиям п.4.1. договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства для сетевой организации составляет один год с момента заключения договора, т.е. не позднее 24.03.2014 г.

Справкой филиала АО «НЭСК-электросети» от 17 апреля 2014 г. подтверждено, что истица ФИО1 в полном объеме выполнила требования технических условий № от 19.03.2013 г., а также обязательства по оплате технологического присоединения. Однако ответчиком обязательства по договору были выполнены 27.12.2016 г., что подтверждается актом № 1040 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии и что свидетельствует о ненадлежащем выполнении ответчиком принятых на себя обязательств.

В соответствии с п.6.3. договора, в случае нарушения одной из сторон сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора и размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Согласно вышеуказанного, сумма неустойки по договору составляет 3 230036,18 рублей (0,014 х ставка рефинансирования на день заключения договора - 8,25% общий размер платы за технологическое присоединение -2 560 959,82 руб. х количество дней просрочки - 1 092 дня. Начиная с 01.04.2014 г. по 26.12.2016 г. =3 230 036,18 руб.).

В целях досудебного урегулирования спора ответчику была направлена претензия, ответа на которую не последовало, в связи, с чем истец вынужден обращаться с настоящим исковым заявлением в суд. Поскольку местом исполнения договора является г. Анапа, настоящее исковое заявление в соответствии с п. 9 ст. 29 ГПК РФ подается по выбору истца в Анапский городской суд. 

В судебном заседании представитель ФИО1 по доверенности ФИО2 исковые требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель АО «НЭСК-электросети» в лице филиала «Анапаэлектросеть» по доверенности ФИО3 в судебном заседании просила в удовлетворении заявленных требований отказать.

Выслушав участников процесса, изучив представленные материалы, суд приходит к выводу о том, что исковые требования подлежат удовлетворению. Свои выводы суд мотивирует тем, что как установлено в судебном заседании, между ОАО «НЭСК-электросети» и ФИО1 заключен договор № на технологическое присоединение к электрической сети от 19.03.2013 года.

Согласно условиям договора, истец принял на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ответчика (ЭПУ) земельного участка для строительства многоквартирных 12-ти этажных жилых домов (лит.1 и лит.2) по адресу: 

<

адрес> со встроенными помещениями, а ответчик обязался оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

Пунктом п. 5.1. договора, предусмотрен размер платы за технологическое присоединение, которая составляет 2 560 959,82 рублей и определена в соответствии с Приказом РЭК-ДЦиТ Краснодарского края 3/2013-э от 22.01.2013 года.

По условиям п. 5.2. договора предусмотрены сроки оплаты за технологическое присоединение: 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 256 095,98 р., уплачиваются заявителем, то есть, истцом, в течение 15 дней со дня заключения договора; 30% платы за технологическое присоединение, которая составляет 768 287,95 р., уплачиваются истцом в течение 60 дней со дня заключения договора; 20% платы за технологическое присоединение, что составляет 512 191,96 р., уплачиваются в течение 180 дней со дня заключения договора; 30% платы за технологическое присоединение, что составляет 768 287,95 р., уплачиваются заявителем, то есть, ответчиком, в течение 15 дней со дня подписания сторонами акта о выполнении заявителем ТУ, акта об осмотре приборов учета и согласовании расчетной схемы учета электрической энергии, а также акта о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей и акта о разграничении эксплуатационной ответственности сторон; 10% платы за технологическое присоединение, что составляет 256 095,98 р., в течение 15 дней со дня фактического присоединения.

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

Согласно п. 6 Правил, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные настоящими Правилами. 

Согласно техническим условиям для присоединения к электрическим сетям, которые являются приложением к договору об осуществлении технологического присоединения, ответчик должен был осуществить: организационно-технические мероприятия по техническому перевооружению, расширению, реконструкции электрических сетей, необходимых для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя; расчет значения токов «КЗ» для определения установок защиты, внести изменения в параметры установок РЗиА; организационно-технические мероприятия по новому строительству электрических сетей - выполнение проектирования и строительства от существующих объектов электросетевого хозяйства ОАО «НЭСК-электросети» до присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя, выполняемых за счет тарифа на технологическое присоединение; прокладку КЛ-10 кВ от РУ-10кВ РП-7 (АП-20) до РУ-10кВ проектируемой ТП заявителем. Ммарка АСБ-10, сечение 3x120 мм2. Протяженность 0,55 км; прокладку трех труб Д-225 мм методом горизонтально-направленного бурения протяженностью 0,05 км.

В соответствии с условиями договора истцом были оплачены расходы на технологическое присоединение: 10% платы за технологическое присоединение - 256 095,98 руб. - 24.08.2013 г. - платежное поручение № 995; 30% платы за технологическое присоединение - 768 287,95 руб. -24.09.2013 г. - платежное поручение № 508; 20% платы за технологическое присоединение - 512 191,96 руб. -24.09.2013 г. - платежное поручение № 509.

По условиям п.4.1. договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства для сетевой организации составляет один год с момента заключения договора, т.е. не позднее 24.03.2014 г.

Пунктом 4.1. договора установлен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающего устройства для сетевой организации, который составляет 1 (один) год с момента заключения договора. Пунктом 1.4. договора установлен срок действия технических условий, который составляет 2 (два) года со дня заключения договора. В соответствии с п. 1.4. договора истец должен был исполнить свои обязательства и выданные ему ТУ в срок не позднее 19.03.2015 года.

Неотъемлемой частью договора являются технические условия от 19.03.2013 года № 4-31-13-174, которые включают в себя описание мероприятий, выполняемых ответчиком, а также мероприятий, выполняемых истцом.

Справкой филиала АО «НЭСК-электросети» от 17 апреля 2014 г. подтверждено, что истица ФИО1 в полном объеме выполнила требования технических условий № 4031-13-174 от 19.03.2013 г., а также обязательства по оплате технологического присоединения.

Согласно п. 11.2.7. ТУ и п. 85 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий со своей стороны, то есть, подает заявку на проведение осмотра в филиал АО «НЭСК-электросети» «Анапаэлектросеть».

Из письма ОАО «НЭСК-Электросети» от 18.12.2013 года направленного в адрес ответчика ФИО1 следует, что сетевая организация получила уведомление от 03.12.2013 г. о выполнении ТУ, то есть на проведение осмотра электроустановок объекта: Земельный участок для строительства многоквартирных жилых домов (лит. 1 и лит. 2) со встроенными помещениями, расположенного по адресу: г-к Анапа, пер. Алмазный, 9.

В соответствии с п. 87 Правил № 861 сетевая организация после получения уведомления заявителя о выполнении им ТУ, осуществляет осмотр (обследование) электроустановок Заявителя, по результатам которого составляется соответствующий акт. Указанный акт осмотра (обследования) электроустановок является подтверждением выполнения ТУ заявителем в своей части.

В судебном заседании установлено, что ответчиком требования п. 87 Правил № 861 не исполнены, соответствующий акт не составлен, в адрес истца не направлен.

Истец обязательства по договору исполнил в полном объеме, реализовал все мероприятия, предусмотренные ТУ, являющимися неотъемлемой частью договора.

В соответствии с актом № 1040 от 30.12.2016 года приемки законченного строительством объекта приемочной комиссии, предъявленный к приемке объект «Строительство КЛ 10 вВ от РУ-7 до РУ 10 кВ проектируемой ТП заявителем г. Анапа (ТУ № 4-31-13-174)» выполнен в соответствии с проектом, отвечает санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным нормам и правилам и государственным стандартам и вводится в действие. 

В соответствии с п.6.3. договора, в случае нарушения одной из сторон сроков выполнения мероприятий по технологическому присоединению ЭПУ, такая сторона в течение 10 рабочих дней со дня наступления просрочки уплачивает другой стороне неустойку, рассчитанную как произведение 0,014 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ, установленной на дату заключения настоящего договора и размера платы за технологическое присоединение за каждый день просрочки.

Согласно вышеуказанного, сумма неустойки по договору составляет 3 230036,18 рублей (0,014 х ставка рефинансирования на день заключения договора - 8,25% общий размер платы за технологическое присоединение -2 560 959,82 руб. х количество дней просрочки - 1 092 дня. Начиная с 01.04.2014 г. по 26.12.2016 г. = 3 230 036,18 руб.).

В целях досудебного урегулирования спора ответчику была направлена претензия, ответа на которую не последовало, в связи, с чем истец вынужден обращаться с настоящим исковым заявлением в суд. 

В соответствии со ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно ст. 310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается.

Оценивая обоснованность исковых требований, суд приходит к выводу о необходимости взыскания с АО «НЭСК-электросети» в лице филиала «Анапаэлектросети» за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № 4-31-13-174 на технологическое присоединение к электрической сети от 19.03.2013 года договорную неустойку, в виду ненадлежащего исполнения ею обязательств по данному договору. 

В соответствии с ч. 2 ст. 195 ГПК РФ суд основывает решение только на тех доказательствах, которые были исследованы в судебном заседании.

Согласно ст. 67 ГПК РФ суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Никакие доказательства не имеют для суда заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности.

Доводы представителя ответчика о пропуске срока исковой давности суд не может признать обоснованными, так как исковые требования истца заявлены в суд в сроки, установленные главой 12 ГК РФ.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Акционерного общества «НЭСК-электросети» в лице филиала «Анапаэлектросети» в пользу ФИО1, за ненадлежащее исполнение обязательств по договору № на технологическое присоединение к электрической сети от 19.03.2013 г. договорную неустойку в размере 3 230 036,18 руб., судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 24 350 руб., а всего взыскать 3 254 386 (три миллиона двести пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят шесть) руб. 18 коп.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Краснодарский краевой суд через Анапский городской суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Председательствующий П.М. Ковальчук