..............

УИД26RS0..............-97

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

ИФИО1

14 марта 2025 года ..............

Минераловодский городской суд .............. в составе: 

председательствующего судьи Шевченко О.В.,

при секретаре судебного заседания ФИО6,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании задолженности по договору строительного подряда, неустойки и понесенных расходов,

установил:

представитель истца ФИО2- ФИО4, действующий по доверенности, обратился в суд с иском к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании задолженности по договору строительного подряда, неустойки и понесенных расходов.

Из искового заявления следует, что между ИП ФИО3, именуемый на основании Договора «Подрядчик», далее «Ответчик», и ФИО2, именуемый на основании Договора «Заказчик», далее «Истец», заключен Договор строительного подряда № ИП 2803/24 от .............., п. 1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется, в установленный договором срок, построить по заданию заказчика определенный объект либо исполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Подрядчик в соответствии с п. 1.1. Договора обязался выполнить работы и сдать результат работ Заказчику, согласно Спецификации (Приложение ..............). В соответствии со спецификацией Ответчик взял на себя обязательства выполнить монтажные, отделочные и другие сопутствующие работы. В соответствии с п. 3.1 договора, ответчик обязался выполнить работы в период с .............. по .............. С момента заключения Договора к выполнению работ Ответчик не приступил. В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплат подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Из п. 2.1. Договора следует, что стоимость и порядок оплаты работ, выполняемых Подрядчиком но настоящему договору, согласована Сторонами в Спецификации ( Приложение 1) к настоящему договору. 

Из п. 2.2. Договора предусмотрено, что любые изменения общей стоимости работ должны быть согласованы Сторонами письменно, путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.

2.3. Стоимость всех работ с материалами составляет 1 850 000 руб., которая оплачивается в следующем порядке: Стоимость материалов согласно Договору составляет 950.000 руб., из которых оплачивается Заказчиком 450.000 руб. в течение 3(трех) дней со дня заключения Договора. Остальная сумма 400.000 рублей, оплачивается через две недели со дня заключения договора. Если оплата производится безналичным путем, то идет на расчетный счет физического лица. В случае оплаты наличным расчетом оплата подтверждается Подрядчиком письменной распиской в получении денежных средств. День, следующий за днем оплаты считается началом течения срока поставки материалов.

В целях оплаты стоимости услуг, Истец оплатил Ответчику 950 000 рублей. Факт получения ответчиком денежных средств, подтверждается скриншотами переписок с ответчиком, где он подтверждает получение денежных средств. Однако по состоянию на .............., Ответчик не приступил к выполнению работ, что является нарушением п. 3.1. Договора, из которого следует, что Работы, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить в период с .............. по .............. в целях досудебного урегулирования спора, в адрес ответчика было направлено уведомление/ претензия о расторжении договора, которое ответчик проигнорировал. Просит суд взыскать с ответчика в пользу истца задолженность по договору строительного подряда № ИП 2803/24 от .............. в размере 950 000 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 102 786,90 руб. за период с .............. по .............., до полного исполнения решения суда, расходы по оплате услуг представителя в размере 60 000 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 25 528 руб. 

ФИО2, представитель истца ФИО2- ФИО4, будучи надлежащим образом, уведомленными о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, в исковом заявлении просили рассмотреть дело в отсутствии истца, представителя истца.

Ответчик ИП ФИО3, будучи надлежащим образом, уведомленный о времени и месте рассмотрения дела, что подтверждается почтовой корреспонденцией вернувшейся в адрес суда с отметкой об истечении срока хранения, в судебное заседание не явился, о причинах своей неявки суду не сообщил, каких-либо возражений, ходатайств не направлял.

Риск неполучения поступившей корреспонденции несет адресат.

Согласно п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

По смыслу п. 67 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от .............. N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" юридически значимое сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено, но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним. Например, сообщение считается доставленным, если адресат уклонился от получения корреспонденции в отделении связи, в связи с чем, она была возвращена по истечении срока хранения.

Изложенные выше обстоятельства дают суду основания считать ответчика по делу уведомленным надлежащим образом о рассмотрении данного гражданского дела.

Согласно части 4 статьи 167 ГПК ПФ, суд вправе рассмотреть дело в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного заседания, если он не сообщил суду об уважительных причинах неявки и не просил рассмотреть дело в его отсутствие.

В связи с чем, суд считает возможным рассмотреть данное дело в отсутствие ответчика по делу.

Поскольку причины неявки в судебное заседание ответчика суду не известны, суд полагает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства (ст. 233-234 ГПК РФ).

Исследовав материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований по следующим основаниям.

В соответствии с положениями ст.ст. 12, 38 и 56 ГПК РФ гражданское судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, которые пользуются равными процессуальными правами и несут равные процессуальные обязанности. Каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела. Суд оценивает доказательства по внутреннему убеждению, основанному на беспристрастном, всестороннем и полном рассмотрении имеющихся доказательств в их совокупности (ст.ст. 55 и 67 ГПК РФ).

Согласно ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В силу п.п. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности. В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора, добровольно принимают на себя права и обязанности, определенные договором, либо отказываются от его заключения.

Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, если между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение.

Как установлено в судебном заседании и следует из материалов дела, что ИП ФИО3, именуемый на основании Договора «Подрядчик», далее «Ответчик», и ФИО2, именуемый на основании Договора «Заказчик», далее «Истец», заключен Договор строительного подряда № ИП 2803/24 от .............., п. 1 ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется, в установленный договором срок, построить по заданию заказчика определенный объект либо исполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. Подрядчик в соответствии с п. 1.1. Договора обязался выполнить работы и сдать результат работ Заказчику, согласно Спецификации (Приложение ..............). В соответствии со спецификацией Ответчик взял на себя обязательства выполнить монтажные, отделочные и другие сопутствующие работы. В соответствии с п. 3.1 договора, ответчик обязался выполнить работы в период с .............. по .............. С момента заключения Договора к выполнению работ Ответчик не приступил. В соответствии со ст. 717 ГК РФ если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплат подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу. Из п. 2.1. Договора следует, что стоимость и порядок оплаты работ, выполняемых Подрядчиком но настоящему договору, согласована Сторонами в Спецификации ( Приложение 1) к настоящему договору. 

Из п. 2.2. Договора предусмотрено, что любые изменения общей стоимости работ должны быть согласованы Сторонами письменно, путём подписания соответствующего дополнительного соглашения.

2.3. Стоимость всех работ с материалами составляет 1 850 000 руб., которая оплачивается в следующем порядке: Стоимость материалов согласно Договору составляет 950.000 руб., из которых оплачивается Заказчиком 450.000 руб. в течение 3(трех) дней со дня заключения Договора. Остальная сумма 400.000 рублей, оплачивается через две недели со дня заключения договора. Если оплата производится безналичным путем, то идет на расчетный счет физического лица. В случае оплаты наличным расчетом оплата подтверждается Подрядчиком письменной распиской в получении денежных средств. День, следующий за днем оплаты считается началом течения срока поставки материалов.

В целях оплаты стоимости услуг, Истец оплатил Ответчику 950 000 рублей. Факт получения ответчиком денежных средств, подтверждается скриншотами переписок с ответчиком, где он подтверждает получение денежных средств. Однако по состоянию на .............., Ответчик не приступил к выполнению работ, что является нарушением п. 3.1. Договора, из которого следует, что Работы, предусмотренные настоящим Договором, Подрядчик обязуется выполнить в период с .............. по .............. в целях досудебного урегулирования спора, в адрес ответчика было направлено уведомление/ претензия о расторжении договора, которое ответчик проигнорировал. 

В соответствии со ст. 60 ГПК РФ обстоятельства дела, которые в соответствии с законом должны быть подтверждены определенными средствами доказывания, не могут подтверждаться никакими другими доказательствами. 

В соответствии с общими положениями об обязательствах, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (статья 309 ГК РФ), при этом односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных законом (статья 310 ГК РФ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 702 ГК РФ - по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров (пункт 2 статьи 702 ГК РФ).

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункты 1, 2 статьи 740 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что ФИО3 не выполнил взятые на себя обязательства по выполнению монтажных, отделочных и другие сопутствующих работ, определенные договором строительного подряда № ИП 2803/24 от .............., которым срок окончания строительных работ был определен до ...............

Пунктом 1 статьи 754 ГК РФ установлено, что подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах.

Статьей 28, 29 Закона РФ N "О защите прав потребителей" также установлены права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги).

Согласно пункту 1 указанной статьи потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.

Из системного толкования приведенных норм права следует, что в случае выполнения подрядчиком работы с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования, заказчик вправе потребовать от подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок, а в случае, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных ему убытков.

Следовательно, требования истца о взыскании с ответчика выплаченной суммы в размере 950 000 рублей по договору подряда подлежат удовлетворению.

В соответствии со ст. 56 ГК РФ содержание которой следует рассматривать в контексте с положениями ст. 123 (части 3) Конституции РФ и ст. 12 ГК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражении, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требованиями закона, иных правовых актов, обычаями делового оборота.

Исходя из указанных норм закона, у ответчика ФИО3 возникает обязанность возвратить сумму денежных средств в размере 950 000 рублей. Доводы стороны истца основаны на скриншот - переписки и ничем не опровергаются.

Согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от их возврата, иной просрочке в их уплате подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется существующей в месте жительства кредитора учетной ставкой банковского процента на день вынесения решения суда.

Суд считает необходимым удовлетворить требования истца о взыскании процентов на основании ст. ст. 811, 395 Гражданского кодекса РФ и применить ответственность за неисполнение денежного обязательства.

Размер процентов за пользование чужими денежными средствами за период с .............. по .............. составляет 102 786,90 рублей.

Представленный истцом расчет, проверен судом, и признан верным.

Истец просит взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами в размере ключевой ставки Банка России, установленной в соответствующий период времени исходя из суммы задолженности 950 000 рублей в размере 102 786,90 рублей.

В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым удовлетворить требования истца о взыскании с ответчика процентов за пользование чужими денежными средствами в полном объеме.

Разрешая требования истца в части взыскания судебных расходов, суд приходит к следующему выводу.

Истцом заявлены требования о взыскании с истца судебных расходов по оплате юридических услуг по договору ............../ДТ/2024 от .............. в сумме 60 000 рублей. 

В силу части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 данного кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

В соответствии со статьей 88 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В соответствии со ст. 94 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: среди прочих, так же расходы на оплату услуг представителей.

Также в соответствии с ч. 1 ст. 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

Согласно условиям договора об оказании юридической помощи ............../ДТ/2024 от .............. обязуется провести досудебную работу, комплекс мероприятий по подаче и ведению судебного процесса, взысканию денежных средств в отношении должника ФИО3

Согласно платежному поручению .............. от .............., ФИО2 оплатил 60 000 рублей.

Оценив проделанную работу и представленные доказательства понесенных истцом расходов, исходя из конкретных обстоятельств настоящего дела и принимая во внимание характер спора по настоящему делу, учитывая объем и сложность работы, объем составленных процессуальных документов, суд пришел к выводу о том, что расходы по оплате юридических услуг в сумме 60 000 руб., являются обоснованными и разумными, соответствуют стоимости расходов на оплату юридических услуг, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги, а также объему заявленных требований, сложности дела, объему оказанных услуг, времени, необходимого на подготовку им процессуальных документов, продолжительности рассмотрения дела в суде первой инстанции. 

Суд приходит к выводу об удовлетворении требований и взыскания с ответчика расходов на оплату юридических услуг в размере 60 000 руб.

Согласно ч. 1 ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Кроме того, в соответствии с ч. 1 ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, в связи с этим подлежит взысканию с ответчика ФИО3 в пользу ФИО2 судебные расходы, понесенные им по оплате государственной пошлины при подаче настоящего иска в суд в размере 25 528 рублей.

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 194-199, 233-236 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковое заявление ФИО2 к индивидуальному предпринимателю ФИО3 о взыскании задолженности по договору строительного подряда, неустойки и понесенных расходов, удовлетворить.

Взыскать с ФИО3, .............. года рождения (паспорт: ..............), в пользу ФИО2, .............. года рождения (паспорт: ..............), задолженность по договору строительного подряда № .............. от .............. в размере 950 000 рублей. 

Взыскать с ФИО3, .............. года рождения (паспорт: ..............), в пользу ФИО2, .............. года рождения (паспорт: ..............), проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ в размере 102 786,90 руб. за период с .............. по .............., до полного исполнения решения суда. 

Взыскать с ФИО3, .............. года рождения (паспорт: ..............), в пользу ФИО2, .............. года рождения (паспорт: ..............) расходы по оплате услуг представителя в размере 60 000 рублей.

Взыскать с ФИО3, .............. года рождения (паспорт: ..............), в пользу ФИО2, .............. года рождения (паспорт: ..............), судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 25 528 руб.

Ответчик вправе подать в Минераловодский городской суд, заявление об отмене заочного решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в ..............вой суд путем подачи жалобы в Минераловодский городской суд в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Мотивированное решение изготовлено ...............

Судья О.В. Шевченко