Дело № ФИО5

УИД № ФИО8-ФИО9

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

ФИО10 февраля ФИО11 года г. Н. Новгород

Канавинский районный суд г. Н. Новгорода в составе:

председательствующего судьи Грачевой А.Н.,

с участием представителя истца по доверенности ФИО2,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ООО «Строй дом» к ФИО1 о взыскании денежных средств,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Строй дом» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании денежных средств, указав, что ФИО12 между истцом и ответчиком заключен договор строительного подряда №ФИО13ФИО13/НН, в соответствии с условиями которого ООО «Строй дом» принял на себя обязательства по строительству дома, по адресу: (адрес обезличен), р.(адрес обезличен), земельный участок ФИО14, кадастровый номер ФИО15:53:0030902:129 (п. ФИО16 договора). Цена договора определена ФИО17 рублей ФИО18 копеек. Общая цена договора включает в себя стоимость материалов, а также стоимость работ, и определяется следующим образом: стоимость материалов составляет ФИО19% от общей цены договора, а общая стоимость работ составляет ФИО20% от общей цены договора (п. ФИО21 договора). Оплата заказчиком денежных средств по договору осуществляется: первый платеж в размере ФИО22 рублей ФИО23 копеек в течение ФИО24-х календарных дней после подписания договора в качестве аванса; второй платеж в размере ФИО25 рубля ФИО26 копеек за счет кредитных средств в срок не позднее ФИО27 в качестве аванса; третий платеж в размере ФИО28 рублей ФИО29 копеек оплачивается покупателем за счет средств материнского капитала на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-ФИО30 №ФИО31 от ФИО32 на имя ФИО1, в качестве аванса в срок не позднее ФИО33; четвертый платеж ФИО34 рублей ФИО35 копеек в течение ФИО36-х календарных дней после монтажа фундамента в качестве аванса за счет кредитных средств; пятый платеж в размере ФИО37 рубля ФИО38 копеек в срок до ФИО39, либо в течение ФИО40-х календарных дней после приемки результата работы (последнего этапа работ) в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Дополнительным соглашением №ФИО41 от ФИО42 изменены цены договора и порядка оплаты. Дополнительным соглашением №ФИО43.ФИО44 от ФИО45 изменен порядок оплаты. Дополнительным соглашением №ФИО46 от ФИО47 изменен перечень работ, без изменения цены договора. Дополнительным соглашением №ФИО48 от ФИО49 изменен срок и оплата работ. Дополнительным соглашением №ФИО50 от ФИО51 измене перечень работ и стоимость работ. Заказчиком произведены платежи на сумму ФИО52 рублей ФИО53 копеек. Истец свои обязательства по договору выполнил, что подтверждается подписанными актами. Ответчиком не произведена выплата на сумму ФИО54 рублей ФИО55 копеек. Истец направлял в адрес ответчика претензии, которые остались без ответа. На основании изложенного истец просит взыскать с ответчика денежные средства в размере ФИО56 рублей ФИО57 копеек, пени в размере ФИО58 рублей ФИО59 копеек, а также расходы по уплате государственной пошлины.

Представитель истца в судебном заседании исковые требования поддержала в полном объеме.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещался о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщил.

В соответствии с абз. ФИО60 п. ФИО61 ст. ФИО62 ГК РФ, ст. ст. ФИО63, ФИО64 ГПК РФ, суд приходит к выводу о надлежащем извещении ответчика о месте и времени судебного заседания. Оснований для отложения судебного заседания в связи с неявкой ответчика не имеется, и считает возможным, с учетом мнения представителя ответчика, рассмотреть исковое заявление без его участия как предусмотрено положениями ч. ФИО65 ст. ФИО66 ГПК РФ в порядке заочного производства.

Изучив материалы дела в их совокупности, и дав им оценку в соответствии с требованиями, закрепленными в ст. ФИО67 ГПК РФ, по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив юридически значимые обстоятельства, суд приходит к следующему выводу.

Согласно п. ФИО68 ст. ФИО69 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требования об их устранении - п.п. ФИО70 и ФИО71 ст. ФИО72 ГК РФ.

Качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода – п. ФИО73 ст. ФИО74 ГК РФ.

Согласно ст. ФИО75 ГК РФ цена работы в договоре бытового подряда определяется соглашением сторон и не может быть выше устанавливаемой или регулируемой соответствующими государственными органами. Работа оплачивается заказчиком после ее окончательной сдачи подрядчиком. С согласия заказчика работа может быть оплачена им при заключении договора полностью или путем выдачи аванса.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями - ст. ФИО76 ГК РФ.В соответствии с п. ФИО77 ст. ФИО78 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Граждане и юридические лица свободны в заключении договора – п. ФИО79 ст. ФИО80 ГК РФ.

В силу п. ФИО81 ст. ФИО82 ГК РФ условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья ФИО83).

В ходе судебного заседания установлено, что между ООО «Строй дом» (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор строительного подряда №ФИО84ФИО84/НН по строительству дома, расположенного по адресу: (адрес обезличен), р.(адрес обезличен), земельный участок ФИО85, кадастровый номер ФИО86:53:0030902:129 (п. ФИО87 договора).

Цена договора с учетом изменения внесенных дополнительными соглашениями определена – ФИО88 рублей ФИО89 копеек.

Общая цена договора включает в себя стоимость материалов, а также стоимость работ, и определяется следующим образом: стоимость материалов составляет ФИО90% от общей цены договора, а общая стоимость работ составляет ФИО91% от общей цены договора (п. ФИО92 договора).

Согласно п. ФИО93 договора Оплата заказчиком денежных средств по договору осуществляется: первый платеж в размере ФИО94 рублей ФИО95 копеек в течение ФИО96-х календарных дней после подписания договора в качестве аванса; второй платеж в размере ФИО97 рубля ФИО98 копеек за счет кредитных средств в срок не позднее ФИО99 в качестве аванса; третий платеж в размере ФИО100 рублей ФИО101 копеек оплачивается покупателем за счет средств материнского капитала на основании государственного сертификата на материнский (семейный) капитал серия МК-Э-ФИО102 №ФИО103 от ФИО104 на имя ФИО1, в качестве аванса в срок не позднее ФИО105; четвертый платеж ФИО106 рублей ФИО107 копеек в течение ФИО108-х календарных дней после монтажа фундамента в качестве аванса за счет кредитных средств; пятый платеж в размере ФИО109 рубля ФИО110 копеек в срок до ФИО111, либо в течение ФИО112-х календарных дней после приемки результата работы (последнего этапа работ) в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

Дополнительным соглашением №ФИО113 от ФИО114 изменены цены договора и порядка оплаты.

Дополнительным соглашением №ФИО115.ФИО116 от ФИО117 изменен порядок оплаты.

Дополнительным соглашением №ФИО118 от ФИО119 изменен перечень работ, без изменения цены договора.

Дополнительным соглашением №ФИО120 от ФИО121 изменен срок и оплата работ.

Дополнительным соглашением №ФИО122 от ФИО123 измене перечень работ и стоимость работ.

Ответчиком произведены платежи на сумму ФИО124 рублей ФИО125 копеек.

В адрес ответчика истцом направлялись претензии о доплате денежных средств в счет исполнения обязательств, оставленные без ответа.

На момент подачи искового заявления в суд ответчик имеет не исполненное обязательство перед истцом по оплате выполненных работ в размере ФИО126 рублей ФИО127 копеек. Доказательств обратного ответчиком суду не представлено.

С учетом изложенного, суд приходит к выводу о законности заявленных требований истца и взыскании с ответчика денежных средств в размере ФИО128 рублей ФИО129 копеек.

Истцом также заявлены требования о взыскании пени с ответчика в размере ФИО130 рублей ФИО131 копеек за период с ФИО132 по ФИО133.

При разрешении заявленного требования суд исходит из следующего.

Согласно ст. ФИО134 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с п. ФИО135 договора, в случае просрочки оплаты работ, просрочки оплаты очередного платежа заказчик выплачивает подрядчику пеню в размере ФИО136% за каждый день просрочки оплаты, но не более ФИО137% от суммы Договора. Оплата пени не освобождает заказчика от выполнения обязательств по настоящему договору.

Представленный истцом расчет проверен и признается арифметически верным.

Поскольку обязательство ответчика перед истцом не исполнено, требование о взыскании пени в заявленном размере подлежит удовлетворению.

Согласно ч. ФИО138 ст. ФИО139 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи ФИО140 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано.

Истцом при подаче иска понесены расходы по уплате государственной пошлины в размере ФИО141 рубля ФИО142 копеек, которые в соответствии со ст. ФИО143 ГПК РФ, подлежат взысканию с ответчика в пользу истца.

Руководствуясь ст.ст.ФИО144, ФИО145 ГПК Ф, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ООО «Строй дом» к ФИО1 о взыскании денежных средств – удовлетворить.

Взыскать с ФИО1 (паспорт: ФИО146, выдан ФИО147 ГУ МВД России по Нижегородской области, ФИО148) в пользу ООО «Строй дом» (ИНН ФИО149, ОГРН ФИО150) денежные средства в размере ФИО151 рублей ФИО152 копеек, пени в размере ФИО153 рублей ФИО154 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере ФИО155 рубля ФИО156 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Нижегородского областного суда в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья А.Н. Грачева

Мотивированное решение составлено ФИО157 года.