РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

село Дзержинское Красноярского края

12.07.2018г. Дзержинский районный суд Красноярского края в составе председательствующего судьи - Павлюкович Т.П.

При секретаре - Гузовой С.М.

Рассмотрев материалы гражданского дела № 2-214/2018 по иску Министерства лесного хозяйства Красноярского края к ООО» Сибирский лес» об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия,

УСТАНОВИЛ :

Министерство лесного хозяйства Красноярского края обратилось в суд с иском к ООО « Сибирский лес» об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2016года по договору аренды лесного участка от 30.12.2015г. №716-з в следующих объемах: искусственное лесовосстановление ( посадка лесных культур) 12,3 га; естественное лесовосстановление- 42, 9 га; заготовка лесных семян( ель)- 5,9 кг. Обязать ООО «Сибирский лес» до 30.09.2018г. выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2017год по договору аренды лесного участка от 30.12.2015г. № 716-з в следующих объемах: искусственное лесовосстановление-3га; подготовка почвы под искусственное лесовосстановление-3га, в том числе текущего года- 3га; заготовка лесных семян ( ель) -5,9 кг.

Истец указывал, что между министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и ООО « Сибирский лес» заключен договор аренды лесных участков от 30.12.2015г. № 716-з.

По договору аренды арендодатель обязуется предоставить, а арендодатель обязуется принять во временное пользование лесные участки, находящиеся в государственной собственности, определенные пунктом 2 договора аренды.

Арендатору передаются лесные участки в целях использования лесов для заготовки древесины сроком на 49 лет.

В соответствии с подпунктом «н» пункта 12 Арендатор обязан осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесных участках в соответствии с законодательством РФ.

Согласно таблице 22 проекта освоения лесов к договору аренду определены проектируемые способы и объемы лесовосстановление : вырубки - 5, 2 га, лесосеки сплошных рубок предстоящего периода искусственного лесовосстановления-12, 3 га, посадка- 12,3 га, естественное лесовосстановление- 37, 7 га, всего 50 га.

В министерство в срок до 31.12.2016года не была предоставлена информация о лесовосстановительных мероприятиях.

Письмом от 21.07.2016г. министерство лесного хозяйства Красноярского края скорректировало план 2017года по лесовосстановительным мероприятиям.

В ООО « Сибирский лес» не выполнил лесовосстановительные мероприятия за периоды 2016, 2017 годы.

В судебное заседание представитель истца не явился. О слушании дела уведомлен надлежащим образом.

В судебное заседание представитель ответчика не явился, о слушании дела уведомлен надлежащим образом.

В судебное заседание не явился представитель третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора КГБУ «Усольское лесничество », о слушании дела уведомлен надлежащим образом.

Исследовав материалы дела, оценив доводы представителя истца, суд пришел к следующему выводу.

Согласно ч. 9 статьи 29 Лесного кодекса РФ правила заготовки древесины устанавливаются федеральным органом исполнительной власти.

Согласно части 1 статьи 62 Лесного кодекса РФ лесовосстановление осуществляется путем естественного, искусственного или комбинированного восстановления лесов.

Согласно части 2 статьи 62 Лесного кодекса РФ на лесных участках, предоставленных в аренду для заготовки древесины, лесовосстановление осуществляется арендаторами этих лесных участков.

В ходе судебного заседания установлено, что между министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края и ООО « Сибирский лес» заключен договор аренды лесных участков от 30.12.2015г. № 716-з для заготовки древесины.

В соответствии с подпунктом «н» пункта 12 арендатор обязан осуществлять мероприятия по воспроизводству лесов на лесных участках в соответствии с законодательством РФ.

Согласно таблице 22 проекта освоения лесов к договору аренды лесных участков о 30.12.2015г. № 716-з определены проектируемые способы и объемы лесовосстановление : вырубки - 5, 2 га, лесосеки сплошных рубок предстоящего периода искусственного лесовосстановления-12, 3 га, посадка- 12,3 га, естественное лесовосстановление- 37, 7 га, всего 50 га. Рекомендованы способы лесовосстановление : естественное лесовосстановление путем минерализации почвы, искусственное лесовосстановление, для выращивания в питомнике необходимо заготовить 5,9 кг. семян ели в год.

Письмом от 21.07.2016г. Министерство лесного хозяйства Красноярского края предоставило информацию о скорректированном плане 2017года по договору аренды согласно которому лесовосстановительные мероприятия 2017года составляют : искусственное лесовосстановление 3 га; естественное лесовосстановление- 5, 2 га; заготовка семя ели - 5,9 га.

На момент обращения в суд с иском, ответчик заготовил семена ели 5,9 кг, что подтверждается сертификатом качества на приобретенную партию семян-50кг.

До настоящего времени не проведены мероприятия по искусственному лесовосстановление ( посадка лесных культур) 12,3 га, естественное лесовосстановление- 42,9 га; искусственное лесовосстановление- 3га; подготовка почвы под искусственное лесовосстановление- 3га, в том числе текущего года- 3 га.

До начала судебного заседания ответчиком не представлены доказательства о выполнении требований истца в указанной части.

На основании изложенного, суд полагает возможным исковые требования истца удовлетворить частично.

На основании статьи 103 ГПК РФ суд взыскивает с ответчика госпошлину 6000 рублей, от уплаты которой истец был освобожден.

Руководствуясь ст. ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ :

Исковые требования Министерства лесного хозяйства Красноярского края к ООО» Сибирский лес» об обязании выполнить лесовосстановительные мероприятия - удовлетворить частично.

Обязать ООО « Сибирский лес» до 30.09.2018г. выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2016года по договору аренды лесного участка от 30.12.2015г. № 716-з в следующих объемах: искусственное лесовосстановление ( посадка лесных культур)-12,3 га ; естественное лесовосстановление- 42,9 га.

Обязать ООО « Сибирский лес» до 30.09.2018г. выполнить лесовосстановительные мероприятия за период 2017года по договору аренды лесного участка от 30.12.2015г. № 716-з в следующих объемах: искусственное лесовосстановление - 3 га; подготовка почвы под искусственное лесовосстановление- 3га, в том числе текущего года - 3 га.

В удовлетворении иной части исковых требований истцу - отказать.

Взыскать с ООО « Сибирский лес» в доход местного бюджета госпошлину-6000 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в Красноярский краевой суд через Дзержинский районный суд в течение 1 месяца.

Судья Павлюкович Т.П.