№ 2-3083/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

«15» ноября 2017 года г. Оренбург

Промышленный районный суд г. Оренбурга в составе

председательствующего судьи Кащенко О.Н.,

при секретаре Ненашевой С.А., 

с участием представителя истца ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску администрации города Орска Оренбургской области к Управлению федеральной службы судебных приставов по Оренбургской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора,

У С Т А Н О В И Л:

Администрация города Орска Оренбургской области обратилась в суд с иском к УФССП России по Оренбургской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора в размере 50000 руб. по исполнительному производству 

<

данные изъяты>

В своем исковом заявлении истец указал о том, что решением Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области, вступившим в законную силу 08.04.2014, были удовлетворены заявленные к администрации города Орска Оренбургской области, УЖКХ администрации г. Орска требования о возложении обязанности устранить выявленные нарушения законодательства о чрезвычайных ситуациях и гидротехнических сооружениях в отношении гидротехнического сооружения, а именно: 1. направить на регистрацию в Российский регистр гидротехнических сооружений документацию в отношении дамбы для защиты района старого города от затоплений в период весенних паводков, протяженностью 

<

данные изъяты> 2. спроектировать и создать на гидротехническом сооружении – дамбе для защиты района Старого города от затоплений в период весенних паводков, протяженностью 

<

данные изъяты> локальные системы оповещения о чрезвычайных ситуациях, в срок до 01.01.2015; 3. направить декларацию безопасности дамбы для защиты района Старого города от затоплений в период весенних паводков протяженностью 

<

данные изъяты> в УМЧС по Оренбургской области для получения заключения, включающего оценку уровня безопасности отдельных гидротехнических сооружений и комплекса гидротехнических сооружений объекта, а также перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности, в срок до 01.01.2015; 4. застраховать риск гражданской ответственности при эксплуатации гидротехнического сооружения по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения – дамбы для защиты района Старого города от затоплений в период весенних паводков, протяженностью 

<

данные изъяты> произвести очистку от горючих отходов (сухих деревьев, травы) дамбы для защиты района Старого города от затоплений в период весенних паводков, протяженностью 

<

данные изъяты> Судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, установлен срок исполнения судебного решения в течение 5 дней. Исполнить судебное решение в установленный срок возможным не представилось, поскольку процедура его исполнения является длительной. Администрацией г. Орска была спроектирована предупредительная и локальная система оповещения гидротехнического сооружения «г.Орск Оренбургской области. Дамба для защиты района Старый город от затоплений в период весенних паводков» (1-я очередь). Получено заключение 

<

данные изъяты> о готовности филиала 

<

данные изъяты> к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточности мер по защите населения и территорий в случае аварий ГТС. 18.11.2016 получен страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте. Произведена очистка от горючих отходов (сухих деревьев, травы) дамбы для защиты района Старый город от затоплений в период весенних паводков. Администрацией города Орска требования вышеуказанного судебного решения были выполнены. Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Оренбургской области от 14.08.2017 исполнительное производство было окончено. Вина должника в неисполнении судебного решения отсутствует. Вместе с тем, 04.08.2015 судебным приставом-исполнителем было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50000 руб.. Просил суд освободить администрацию города Орска Оренбургской области от взыскания исполнительского сбора по вышеуказанному исполнительному производству.

Представитель истца ФИО1, действующая на основании доверенности от 25.01.2017, в судебном заседании заявленные требования поддержала, просила их удовлетворить.

Представитель ответчика УФССП России по Оренбургской области, надлежаще извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился.

Выслушав объяснения представителя истца и, исследовав материалы дела, суд находит исковые требования администрации г. Орска Оренбургской области подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно частей 1 и 3 статьи 112 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. 

В соответствии с частью 6 статьи 112 указанного Федерального Закона должник вправе в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, обратиться в суд с заявлением об оспаривании постановления судебного пристава-исполнителя о взыскании исполнительского сбора, с иском об отсрочке или о рассрочке его взыскания, об уменьшении его размера или освобождении от взыскания исполнительского сбора. При отсутствии установленных ГК РФ оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора.

Из материалов дела следует, что решением Октябрьского районного суда г. Орска Оренбургской области, вступившим в законную силу 08.04.2014, были удовлетворены заявленные к администрации города Орска Оренбургской области требования о возложении обязанности устранить выявленные нарушения законодательства о чрезвычайных ситуациях и гидротехнических сооружениях в отношении гидротехнического сооружения.

24.06.2015 судебным приставом-исполнителем было возбуждено исполнительное производство, установлен срок добровольного исполнения судебного решения в течение 5 дней.

Постановлением судебного пристава-исполнителя от 04.08.2015 по исполнительному производству № 

<

данные изъяты> был взыскан в размере 50000 руб. исполнительский сбор. 

Материалы дела свидетельствуют о том, что истцом принимались необходимые меры к исполнению вышеуказанного судебного решения, эти меры при той степени заботливости и осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и условиям оборота, были приняты должником в полном объеме. 

Принятие этих мер свидетельствует о невозможности должника по объективным причинам исполнить судебное решение в течение пяти дней.

Постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Оренбургской области от 14.08.2017 исполнительное производство было окончено в связи с выполнением требований исполнительного документа в полном объеме. 

Поскольку истец в установленный законом срок требования исполнительного документа не исполнил по уважительным причинам, суд находит необходимым заявленный им иск удовлетворить. 

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования администрации города Орска Оренбургской области удовлетворить.

Освободить администрацию города Орска Оренбургской области от уплаты исполнительского сбора, взысканного 04.08.2015 в сумме 50000 руб. постановлением судебного пристава-исполнителя МОСП по ИОИП УФССП России по Оренбургской области по исполнительному производству 

<

данные изъяты>

Решение может быть обжаловано в Оренбургский областной суд через Промышленный районный суд г. Оренбурга в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме.

Судья

Решение в окончательной форме изготовлено 20.11.2017