Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

... г.

... районный суд ... области в составе:

Председательствующего судьи Ващенко Е.А.

При секретаре Карбовской Ю.И.

С участием истца ФИО1, представителей ответчика ФИО2, ФИО3,

Рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ФИО1 к ИП ФИО4 о взыскании неустойки,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к ИП ФИО4, в котором просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков начала и окончания работ при выполнении ответчиком договора подряда № ... от ... г. и дополнительных соглашений № ... в размере ... рублей; компенсацию морального вреда ... рублей; штраф в размере ...% от взысканной суммы. Свои требования мотивировал тем, что ... года он заключил Договор подряда №... от ... года по строительству цокольного этажа частного дома и монолитного ленточного фундамента с плитой пола гаража. В процессе выполнения работ были подписаны дополнительные Соглашения №... от ... года, №... от ... года, №... от ... года. Неотъемлемой частью Договора и дополнительных Соглашений №... были приложения: приложение № 1 смета. Смета строительства цокольного этажа частного дома и монолитного ленточного фундамента с плитой пола гаража была разделена на этапы и под этапы работ с указанием стоимости работ каждого этапа и подэтапа работ.

Приложение № ... Изменения к Проекту.

Приложение № ... График производства работ.

График производства работ по устройству фундамента частного дома с гаражом был составлен в соответствии с этапами и подэтапами работ Сметы с указанием конкретных сроков начала и окончания производства работ.

Приложение № ... Ведомость платежей.

Платежи производились раздельно по этапам. Первый платеж в сумме ... (...) рублей был внесен ... года, в день подписания Договора подряда №... от ... года по приходному кассовому ордеру. ... года ИП «ФИО4» обратился к истцу с просьбой вернуть приходный кассовый ордер, а в замен выписала квитанцию №... от ... года. На момент подписания Договора квитанции не были изготовлены и зарегистрированы в налоговом органе. 15 августа 2016 года был произведен второй платеж в сумме ... (...) рублей по квитанции №... от ... года. ... года был произведен третий платеж в сумме ... (...) рубля ... копеек по квитанции №... от ... года. Общая сумма оплаты услуг по Договору подряда №... от ... года составляет ... (...) рубля ... копеек. Все платежи произведены во время, согласно Приложение № ... Ведомость платежей.

При выполнении вышеуказанного Договора ИП «ФИО4» нарушил сроки начала и окончания работ, в связи с чем, должна выплатить неустойку. 

При выполнении 1 этапа Договора ответчиком был нарушен срок окончания работ. 

- пункт графика ... «Устройство фундаментных плит дома (установка опалубки, армирование, бетонирование) окончание работ просрочено на ... день. По графику дата заливки фундамента ... - фактически ... года. Бетон был заказан и доставлен на стройку в соответствии с заявкой прораба ИП «ФИО4» от .... Сумма неустойки (пени), за нарушение срока окончания выполнения работ 1 этапа, пункт графика ..., согласно расчета, составляет ... рублей ... копеек.

При выполнении 2 этапа Договора ИП «ФИО4» был нарушен срок окончания работ.

- пункт Графика ... Договора №... и дополнительного Соглашения №1 от ... к Договору №... от ... года «Устройство монолитных ленточных фундаментов с консолью (установка опалубки, армирование, бетонирование) устройство закладных» окончание работ просрочено на ... дней с ... года (окончание производства работ по Графику Доп. Соглашения №...) по ... года (заливка бетона по факту). Бетон был заказан и доставлен на стройку в соответствии с заявкой ИП «ФИО4» ... года. Сумма неустойки (пени), за нарушение срока окончания выполнения работ 2 этапа, пункт графика ... ... рублей ... копеек.

- пункт Графика ... Договора № ... и дополнительного Соглашения №... от ... года к Договору №... от ... года «Обмазка праймером наружных боковых поверхностей стен и устройство рулонной гидроизоляции в 1слой» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и доп. Соглашения №...) по ... года (подписание дополнительного Соглашения №..., в котором ИП «ФИО4» перенесла начало производства работ по устройству гидроизоляции на ... года, без согласования со мной, в одностороннем порядке и без утверждения Приложения №... «Графика производства работ по устройству фундамента частного дома с гаражом» к дополнительному Соглашению №... от .... к Договору подряда №... от ... года). На момент подписания дополнительного Соглашения №... ... года, начало выполнения работ по устройству гидроизоляции в 1 слой наружных боковых бетонных поверхностей стен подвала не производилось.

Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ 2 этапа, пункт графика ..., согласно расчета, составляет ... рублей.

При выполнении 3 этапа Договора ответчиком были нарушены сроки начала и окончания работ. Начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и доп. Соглашения №1) по ... года (подписание дополнительного соглашения №..., в котором ИП «ФИО4» перенесла начало производства работ по устройству монолитных ленточных фундаментов с консолью (установка опалубки, армирование, бетонирование) устройство закладных) на ... года. На момент подписания дополнительного Соглашения №2 10 октября 2016 года, начало выполнения работ по устройству монолитных ленточных фундаментов с консолью (установка опалубки, армирование, бетонирование) устройство закладных) не производилось. Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ 3 этапа, пункт графика ... составляет ... рублей.

... года было подписано дополнительное Соглашение №... к Договору №... от ... года. В Приложении №3 «График производства работ по устройству фундамента частного дома с гаражом» пункт ... к дополнительному Соглашению №... к Договору ... от ... года. ИП «ФИО4» взяла на себя обязательства по выполнению работ по устройству монолитных ленточных фундаментов гаража с консолью (установка опалубки, армирование, бетонирование) устройство закладных со сроком окончания работ ... года.

По дополнительному Соглашению №... от ... года пункта ... Приложения №... «График производства работ по устройству фундамента частного дома с гаражом» окончание работ просрочено на ... дней с ... года (окончание производства работ по Графику дополнительного соглашения №2) по ... года (фактически выполненных работ). Бетон был заказан и доставлен на стройку в соответствии с заявкой ИП «ФИО4» ... года. (Накладные на бетон прилагаю). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока окончания выполнения работ 3 этапа, пункт графика 19 дополнительного Соглашения №2 от 10 октября 2016 года составляет ... рублей ... копеек.

... года ответчик обратилась к истцу с просьбой перенести работы 3 этапа пункты ... указанные в Приложении № 3 Договора № ... и дополнительного Соглашения № ... от ... года к Договору №... от ... года на ... год., поясняя тем, что после обратной засыпки котлована фундамента грунт будет проседать, и по этой причине невозможно будет качественно произвести вышеуказанные работы. Я согласился с этими доводами. После этого Подрядчик подготовил Уведомление от моего лица о переносе сроков строительства вышеуказанных работ на ... год, которое я подписал. Далее подрядчик подготовил дополнительное Соглашение №... с изменением объёмов работ. Объёмы работ изменились в меньшую сторону, соответственно и график работ должен был измениться сторону уменьшения. На вышеуказанные работы в соответствии Графиком работ отводилось ... дней, также в Графике были учтены технологические перерывы и дни, отведенные для приемки выполненных работ и подписания Актов еще ... дней. А всего ... дней. Но, не смотря на это ИП «ФИО4» все равно нарушила сроки начала и окончания работ.

При выполнении ... этапа Договора ответчиком были нарушены сроки начала работ пунктов .... (Приложений 3 к Договору подряда №... от ... года и дополнительного Соглашения №... от ... года к Договору).

- пункт Графика ... «Устройство щебеночного основания 100 мм с утрамбовкой под плиту пола гаража», начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., составляет ... копеек.

- пункт Графика ... Устройство песчаного основания 100 мм с утрамбовкой под плиту пола гаража» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., составляет ... рублей ... копейки.

- пункт Графика ... «Укладка геотекстиля под плиту пола гаража» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., согласно расчета, составляет ... рублей ... копеек.

- пункт Графика ... «Устройство рулонной гидроизоляции в 1 слой под плиту пола гаража» начало работ просрочено на ... дней с ... (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., составляет ... рубль.

- пункт Графика ... «Укладка пенополистерола 100мм» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., составляет ... рублей ... копейки.

- пункт Графика ... «Устройство монолитной плиты пола гаража t=120 мм (армирование, бетонирование)» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления о переносе сроков). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ 3 этапа, пункт Графика 24, согласно расчета, составляет ... рублей ... копеек.

При выполнении 5 этапа Договора ИП «ФИО4» был нарушен сроки начала работ. (Приложения 3 к договору подряда № ... от ... года и дополнительного Соглашения №1).

- пункт Графика ... «Кирпичная кладка наружных цоколя гаража» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику Договора и дополнительного Соглашения №1) по ... года (написание уведомления об отказе производства работ). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения работ ... этапа, пункт Графика ..., составляет ... рублей.

При выполнении дополнительных работ дополнительного соглашения №... от .... к договору подряда №... от ... года ИП «ФИО4» был нарушены сроки начала и окончания работ. (Приложения 3 к договору дополнительного Соглашения №2 от .... к договору подряда №... от ... года).

-пункт Графика ... дополнительного Соглашения №... «Устройство стен пристроя h=1650 мм, t=300 мм (опалубочные работы, армирование, бетонирование без консолей под облицовку) окончание работ просрочено на ... дней с ... года (окончание производства работ по Графику дополнительного соглашения№2) по ... года (фактически выполненных работ). Бетон был заказан и доставлен на стройку в соответствии с заявкой ИП «ФИО4» ... года. (Накладные на бетон прилагаю). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока окончания выполнения дополнительных работ, пункт графика ... дополнительного Соглашения №2 от ... года, согласно расчета, составляет ... рублей ... копеек.

-пункт Графика ... дополнительного Соглашения №2 «Устройство закладных 3g в бетоне (готовые)» окончание работ просрочено на ... дней с ... года (окончание производства работ по Графику дополнительного соглашения№2) по ... года (фактически выполненных работ). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока окончания выполнения дополнительных работ, пункт графика ... дополнительного Соглашения №2 от ... года, согласно расчета, составляет ... рубля ... копеек.

-пункт Графика ... дополнительного Соглашения №... «Обмазка праймером боковых бетонных поверхностей стен и фундаментной плиты пристроя» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику дополнительного соглашения №2) по ... года (подписание дополнительного Соглашения №3 от ... года).

-пункт Графика ... дополнительного Соглашения №2 «Устройство рулонной гидроизоляции в 1слой боковых бетонных поверхностей стен и фундаментной плиты пристроя» начало работ просрочено на ... дней с ... года (начало производства работ по Графику дополнительного соглашения №2) по ... года (подписание дополнительного Соглашения №3 от ... года). Сумма неустойки (пени), за нарушение срока начала выполнения дополнительных работ, пунктов графика ... дополнительного Соглашения №... от ... года, составляет ... рублей.

Общая сумма неустойки (пени), за нарушение сроков начала и окончания работ при выполнении ИП «ФИО4» договора подряда №... от ... года и дополнительных Соглашений №... составляет ... (...) рублей ... копейки.

.... истцом была написана Претензия досудебного урегулирования спора о выплате неустойки (пени) за нарушение сроков начала и окончания работ по Договору подряда №... от ... года с дополнительными соглашениями №... добровольном порядке. В ответном письме от .... ИП «ФИО4» признала неустойку (пени), за нарушение сроков начала и окончания работ частично в сумме 10256 рублей 60 копеек, которую обязалась оплатить добровольно до .... на указанные мной реквизиты. До настоящего времени данная сумма не перечислена.

Неправомерными действиями ответчику истцу причинен моральный вред.

В судебном заседании истец исковые требования поддержал, ссылаясь на вышесказанное.

Представители ответчика исковые требования не признали и пояснили, что работы по строительству фундаменты выполнены в сроки, установленные договором подряда и дополнительными соглашениями.

Суд, выслушав стороны, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии с пунктом 3 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила о правах заказчика по договору бытового подряда.

В силу пункта 3 статьи 730 Гражданского кодекса Российской Федерации к отношениям по договору бытового подряда применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Согласно положениям статьи 27 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" исполнитель обязан осуществить выполнение работы в срок, установленный правилами выполнения отдельных видов работ или договором о выполнении работ. В договоре о выполнении работ может предусматриваться срок выполнения, если указанными правилами он не предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными правилами. Срок выполнения работы может определяться датой, к которой должно быть закончено выполнение работы или (и) датой (периодом), к которой исполнитель должен приступить к выполнению работы. По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

В судебном заседании установлено, что ... года между истцом ФИО1 и индивидуальным предпринимателем ФИО4 заключен договор подряда № ..., согласно которого подрядчик обязуется в установленный договором срок по заданию заказчика осуществить работы по устройству фундамента частного дома с гаражом согласно смете (Приложение 1), проекта, графику производства работ (приложение 3) на объекте, расположенном по адресу: ... (л.д....).

Общая стоимость работ по договору на момент заключения договора составляет ... рубль. (п.2.1 договора).

Согласно п.2.2, 3.2, 3.3 договора все изменения и уточнения в части объемов и видов работ оформляются дополнительным соглашением и подписываются сторонами. Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с графиком производства работ (приложение №3). Сроки выполнения работ могут быть изменены по согласованию сторон.

... года между истцом и ответчиком заключено дополнительное соглашение, согласно которому подрядчик обязуется в установленный дополнительным соглашением срок по заданию заказчика осуществить дополнительные работы по устройству фундамента частного дома с гаражом согласно смете (приложение 1), проекта (Приложение 2), графику производства работ. Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с графиком производства работ (приложение 3).

В силу п. 5 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

Факт нарушения ответчиком сроков начала и окончания этапов работы не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства.

Как усматривается из графика производства работ от ... года, являющегося приложением к договору подряда, срок окончания работ по п.7 графика «Устройство фундаментных плит дома (установка опалубки, армирование, бетонирование) ... года (л.д...). В этот же день составлен акт рабочей комиссии о приемке 1 этапа комплекса строительно-монтажных работ по устройству монолитного железобетонного фундамента частного дома л.д....). Согласно акта о приемке выполненных работ (л.д....), сдача объема работ по 1 этапу была произведена ... года, что соответствует графику производства работ (л.д....)

Обосновывая свои исковые требования, истец ФИО1 ссылается на нарушение ответчиком сроков начала и окончания работ, установленных в соответствии с договором подряда, соглашением № ... к договору подряда и приложенным к ним графиков.

Вместе с тем, из материалов дела усматривается, что ... г., а потом ... года между истцом и индивидуальным предпринимателем ФИО4 заключены дополнительные соглашения к договору ... от ... г.( л.д..., л.д....)

Согласно дополнительного соглашения 3 № от ... года (л.д....) стороны договорились об изменении объема работ этапа №3 и № 5, дополнительных работ по пристрою.

Пункт 1.1 договора подряда изложен в следующей редакции:

«Подрядчик обязуется в установленный дополнительным соглашением срок по заданию заказчика осуществить работы по устройству фундамента частного дома с гаражом, исключая работы по гидроизоляции гаража и пристроя и кирпичной кладке стен цоколя гаража согласно смете (приложение 1) проекта (приложение №2), графику производства работ (приложение 3).

Срок выполнения работ устанавливается в соответствии с графиком производства работ (приложение 3).

Как усматривается из данного графика (л.д....), срок выполнения второго этапа – ... года. Акт рабочей комиссии по приемке комплекса строительных работ по устройству монолитного железобетонного фундамента 2 этапа составлен ... года с замечаниями (л.д....). Акт о приемке выполненных работ составлен так же ответчиком ... года и ... года.

Согласно данного графика срок окончания работ по 3 этапу и дополнительным работам – ... года. ... года истцом подписан акт о приемке работ по 3 этапу с замечаниями (л.д....). Ответчиком акт о приемке выполненных работ составлен ... года (л.д....).

Дать пояснения о нарушении сроков начала и окончания работ в соответствии с дополнительным соглашением № 3 и графиком, являющимся приложением к договору, истец не смог, настаивая на нарушении сроков начала и окончания работ, установленных договором и дополнительным соглашением № 1.

В судебном заседании истец пояснил о том, что он не согласен был с графиками работ, являющимися приложением к дополнительным соглашениям № ... и № .... В связи с этим он отказался подписывать данные графики и о своем несогласии направил в адрес ответчика претензии.

Суд не может согласиться с данными доводами истца в силу того, что в силу ст.421 ГК РФ граждане свободны в заключении договора. Истец ФИО1 добровольно подписал дополнительное соглашение № 3 (л.д....) на указанных в нем условиях, тогда как одним из условий данного соглашения является выполнение работ в соответствии с Графиком производства работ, который прилагается к данному дополнительному соглашению. Выражая свое несогласие, истец, тем не менее, против заключения дополнительного соглашения № 3 не возражал и подписывать его не отказался.

При таких обстоятельствах суд не находит оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1

На основании изложенного, руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

ФИО1 в удовлетворении иска к ИП ФИО4 о взыскании неустойки в размере ... рублей, компенсации морального вреда в размере ... рублей отказать.

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд через Луховицкий районный суд Московской области в течение месяца.

Судья