дело 2-1694/2024

УИД №RS0№-69

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

11 апреля 2024 года г. Омск

Центральный районный суд города Омска в составе председательствующего судьи Шевцовой Н.А., при секретаре судебного заседания ФИО3, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ФИО2 о защите прав потребителя, 

установил:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ФИО2 защите прав потребителей, указав в обоснование заявленных требований, что между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (исполнитель) ДД.ММ.ГГГГ был заключен договор на оказание дизайнерских услуг №. Согласно предмету договора, исполнитель обязуется оказать услуги по дизайну помещения заказчика, расположенного по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 52 кв.м. Пунктом 2.1 договора определено, что перечень работ согласовывается сторонами в приложении № к договору «Состав дизайн-проекта». В соответствии с приложением № «Состав дизайн-проекта» исполнитель принял на себя обязательство осуществить следующие работы в помещении заказчика: 1. план помещения с замерами до перепланировки; 2. план помещения с замерами после перепланировки; 3. план перепланировки с мебелью и электрооборудованием; 4. план электромонтажных работ (установка электротехнических изделий, размещение светильников, распределение по выключателям); 5. план напольных покрытий; 6. план потолков; 7. экспликация; 8. подбор отделочных материалов, мебели, светового оборудования и сантехники, 9. 3D-визуализация. Пунктом 2.3 договора установлено, что общая стоимость работ составляет 218 400 руб. Указанная сумма оплачена заказчиком в полном объеме, что подтверждается распиской о получении денежных средств к договору № от ДД.ММ.ГГГГ, подписанной исполнителем. В настоящее время исполнителем работы не произведены, сумма предоплаты истцу не возвращена. В преамбуле и реквизитах договора указано, что ответчик является плательщиком налога на профессиональный доход (свидетельство № от ДД.ММ.ГГГГ). Общая стоимость работ включительно 218 400 руб., срок их выполнения до ДД.ММ.ГГГГ. Расчет неустойки (пени) с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ: 218 400/100 *3 *115 = 753 480 руб. Однако, с учетом положения Закона о защите прав потребителей, размер неустойки (пени) не может быть более суммы стоимости выполнения работ по договору, которая равна 218 400 руб. На основании изложенного, ФИО1 просила взыскать с ФИО2 сумму оплаты по договору на оказание дизайнерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 218 400 руб., неустойку (пени) за нарушение сроков выполнения работ по договору на оказание дизайнерских услуг от ДД.ММ.ГГГГ № в размере 218 400 руб., штраф в размере пятидесяти процентов от суммы удовлетворенных судом исковых требований.

Истец ФИО1 в судебном заседании участия не принимала, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие. 

Ответчик ФИО2 в судебном заседании участия не принимал, надлежащим образом извещен о дате и времени судебного заседания.

В соответствии со ст. 233 Гражданского процессуального кодекса РФ (далее – ГПК РФ), в отсутствие возражений стороны истца, дело рассмотрено в отсутствие ответчика в порядке заочного производства.

Исследовав материалы гражданского дела, оценив представленные доказательства в их совокупности с позиции относимости, допустимости и достаточности, суд приходит к следующему.

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (пункт 1 статьи 420 Гражданского кодекса РФ).

Согласно пунктам 1, 4 статьи 421 Гражданского кодекса РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (статья 422 Гражданского кодекса РФ). 

В соответствии со статьей 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор считается заключённым, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора.

Договор заключается посредством направления оферты (предложения заключить договор) одной из сторон и её акцепта (принятия предложения) другой стороной.

Согласно статье 433 Гражданского кодекса РФ договор признается заключенным в момент получения лицом, направившим оферту, ее акцепта.

На основании пунктов 1, 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте.

Таким образом, письменная форма договора будет считаться соблюденной, если письменная оферта о заключении договора принята другой стороной в порядке, определенном пунктом 3 статьи 438 Гражданского кодекса РФ, путем совершения действий, предусмотренных для нее в оферте.

В соответствии со ст.ст. 779, 780 Гражданского кодекса РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично

Согласно положениям ст. 781 Гражданского кодекса РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг

В силу ст. 782 Гражданского кодекса РФ заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику убытков.

Согласно ст. 783 Гражданского кодекса РФ общие положения о подряде (статьи 702 - 729) и положения о бытовом подряде (статьи 730 - 739) применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит статьям 779 - 782 настоящего Кодекса, а также особенностям предмета договора возмездного оказания услуг.

Согласно положениям ст. 702, 703 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные настоящим параграфом, применяются, если иное не установлено правилами настоящего Кодекса об этих видах договоров. Договор подряда заключается на изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не предусмотрено договором, подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания заказчика.

Согласно ст. 708 Гражданского кодекса РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором. Указанные в пункте 2 статьи 405 настоящего Кодекса последствия просрочки исполнения наступают при нарушении конечного срока выполнения работы, а также иных установленных договором подряда сроков.

В договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения. При отсутствии в договоре таких указаний цена определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса. Цена в договоре подряда включает компенсацию издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. Цена работы может быть определена путем составления сметы. В случае, когда работа выполняется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком, смета приобретает силу и становится частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком (ч.1-3 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Как предусмотрено ст.711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно. Подрядчик вправе требовать выплаты ему аванса либо задатка только в случаях и в размере, указанных в законе или договоре подряда.

Согласно ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации, заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Если подрядчик не приступает своевременно к исполнению договора подряда или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от договора подряда либо поручить исправление работ другому лицу за счет подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

В соответствии со ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается.

В судебном заседании установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (заказчик) и ФИО2 (исполнитель), был заключен договор на оказание дизайнерских услуг №, по условиям которого исполнитель обязан оказать услуги по дизайну помещения заказчика, расположенного по адресу: 

<

адрес>, общей площадью 52 кв.м., согласно приложению № «Состав дизайн -проекта», а заказчик обязан принять и оплатить выполненные исполнителем работы в сроки и на условиях, предусмотренных договором. 

Согласно п. 2.1 конкретный перечень работ по данному договору согласовывается сторонами в «Приложении №. Состав дизайн-проекта», которое является неотъемлемой частью данного договора, подписывается сторонами и в ходе работы исполнитель ориентируется на данные, указанные в нем. Сроки оказания услуг определены «Приложением №» настоящего договора (п. 2.2 договора).

Началом работ считается день внесения предоплаты в соответствии с п. 2.4 договора. Исполнитель оставляет за собой право досрочного оказания услуг. Но также, сроки оказания услуг по настоящему договору зависят от процесса согласования необходимой информации с заказчиком и также могут быть увеличены в случае увеличения объемов работ. Общая стоимость работ составляет 218 400 руб. (п. 2.3 договора). 

Разделом 3 Договора определены права и обязанности сторон. Согласно п. 3.3.1. договора, на заказчика возложена обязанность до начала оказания услуг передать всю необходимую информацию для работы исполнителю (необходимые планы помещения). Случае если в ходе исполнения окажется, что предоставленная информация заказчиком не позволяет исполнителю выполнить работу, заказчик обязуется предоставить исполнителю информацию, пригодную для использования. Срок окончания услуг, оказываемых исполнителем по настоящему договору продлевается на срок, соответствующий просрочке исполнения заказчиком своих обязательств по предоставлению информации для надлежащего выполнения.

Согласно п. 3.2 Договора, исполнитель вправе расторгнуть договор, если заказчик не обеспечит его необходимой информацией для работы в соответствии с п. 3.3.1 договора, а также если не произведет оплату согласно п. 2.4 договора. 

Заказчик вправе расторгнуть договор, компенсировав исполнителю произведенные затраты и оплатив весь объем выполненных работ (п. 3.4 Договора).

Согласно приложению № к договору в состав дизайн-проекта входят: план помещения с замерами до перепланировки, план помещения с замерами после перепланировки, план перепланировки с мебелью и электрооборудованием, план электромонтажных работ (установка электротехнических изделий, размещение светильников, распределение по выключателям), план напольных покрытий, план потолков, экспликация, подбор отделочных материалов, мебели, светового оборудования и сантехники, 3D-визуализация.

В соответствии с представленной распиской к договору от ДД.ММ.ГГГГ оплата услуг произведена ФИО1 в полном объеме.

Указанным приложением установлен срок исполнения работ - до ДД.ММ.ГГГГ включительно, вместе с тем, работы ответчиком не выполнены до настоящего времени, доказательств обратного стороной ответчика суду не представлено.

Учитывая изложенные обстоятельства, поскольку ответчиком обязательства по договору на оказание дизайнерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ в срок, установленный договором, не исполнены, суд полагает исковые требования ФИО1 о взыскании с ответчика денежных средств в размере 218 400 руб., внесенных ФИО1 в счет оплаты услуг по договору, обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Сведений и доказательств надлежащего исполнения договора ответчиком в материалы дела не представлено, при этом в определении о принятии иска к производству суда и подготовке дела к судебному разбирательству, стороне ответчика разъяснялась обязанность предоставления доказательств надлежащего исполнения договора, заключенного с истцом, а также доказательств фактического несения расходов по исполнению договора. Таких доказательств суду представлено не было.

В соответствии со ст. 329 ГК РФ неустойка является одним из способов обеспечения обязательства.

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения.

Как следует из ст. 28 Закона РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги). Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре о выполнении работы (оказании услуги). В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, установленные пунктом 1 настоящей статьи. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи. Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.

Согласно п. 6 ст. 13 указанного закона при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в размере 218 400 руб., при этом, согласно расчету с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ сумма нестойки составляет 753 480 руб. из расчета 3% в день за каждый день просрочки.

Вместе с тем, согласно п. 4 ст. 23 Гражданского кодекса РФ, гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с нарушением требований пункта 1 настоящей статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. Суд может применить к таким сделкам правила настоящего Кодекса об обязательствах, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности

Согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», исходя из смысла пункта 4 статьи 23 ГК РФ гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без образования юридического лица в нарушение требований, установленных пунктом первым данной статьи, не вправе ссылаться в отношении заключенных им при этом сделок на то, что он не является предпринимателем. К таким сделкам суд применяет законодательство о защите прав потребителей.

Согласно п.п. 6,7 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход», физические лица при применении специального налогового режима вправе вести виды деятельности, доходы от которых облагаются налогом на профессиональный доход, без государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей, за исключением видов деятельности, ведение которых требует обязательной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с федеральными законами, регулирующими ведение соответствующих видов деятельности.

Профессиональный доход - доход физических лиц от деятельности, при ведении которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, а также доход от использования имущества

Согласно ч.ч. 1,2 ст. 6 названного Закона, объектом налогообложения признаются доходы от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав). 

Из представленного договора, заключенного сторонами следует, что ответчик зарегистрирован в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход, в приведенной связи суд полагает надлежащим применить к спорным правоотношениям сторон положения Закона о защите прав потребителей.

Разрешая спор в части требований о взыскании неустойки, суд принимает во внимание тот факт, что в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Закона о защите прав потребителей требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления соответствующего требования. В силу пункта 3 статьи 31 Закона о защите прав потребителей за нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 названного Закона.

Согласно пункту 5 статьи 28 Закона о защите прав потребителей в случае нарушения установленных сроков, исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

В связи с изложенным ответчика в пользу истца подлежит взысканию неустойка в размере 218 400 руб. в пределах стоимости выполнения работ по договору, оплаченной истцом. 

Согласно п.6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Соответственно, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф за отказ от удовлетворения требований истца, как потребителя, в добровольном порядке в размере 218 400 руб. ((218 400 руб. + 218 400 руб.)/2).

В соответствии с положениями ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, в местный бюджет пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

С учетом изложенного с ответчика подлежит взысканию государственная пошлина в доход бюджета 

<

адрес> в размере 9 752 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 194-199, 233-237 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить в полном объеме.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ 

<

адрес>) в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ 

<

адрес>) денежные средства в размере 218 400 руб., оплаченные по договору на оказание дизайнерских услуг № от ДД.ММ.ГГГГ, неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 218 400 руб., штраф за отказ от удовлетворения требований истца, как потребителя, в добровольном порядке в размере 218 400 руб.

Взыскать с ФИО2 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, паспорт гражданина РФ 

<

адрес>) в доход бюджета 

<

адрес> государственную пошлину в размере 9 752 руб.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд г. Омска в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Омский областной суд через Центральный районный суд г. Омска в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Мотивированное заочное решение составлено 15.04.2024.

Судья Н.А. Шевцова