дело 2-592/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

24 апреля 2020 года г. Тверь 

Калининский районный суд Тверской области в составе:

председательствующего судьи Полестеровой О.А.,

при секретаре Кузнецовой В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс» о расторжении договора строительного подряда, взыскании денежных средств,

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратилась с иском в суд к ООО «Строй-Ресурс» о расторжении договора строительного подряда и взыскании денежных средств. 

В обоснование заявленных требований указано, что 09 декабря 2019 года между истцом и ответчиком был заключен договор строительного подряда, в соответствии с условиями которого, ответчик обязался в установленный договором срок осуществить на строительном участке по адресу: 

<

адрес> постройку дома.

Согласно условиям договора стоимость работ составляет сумму 5800000 рублей.

В соответствии с условиями данного договора (п.2.4.) Заказчик оплатил аванс в размере 2000000 рублей, что подтверждается платежными документами.

Согласно п. 5.1. Договора ответчик обязан был приступить к выполнению работ в течение 2-х дней с момента получения аванса, т.е. 14 декабря 2019 года. Однако в установленный договором срок строительство не начато.

В соответствии с положениями ст. 28 Закона РФ от 07 декабря 1992 года «О защите прав потребителей» если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок, поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов, потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги), отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

В своей претензии истец отказался от исполнения договора, и потребовал возврата денежных средств. Однако в ответе на претензию полученную истцом, ответчик не согласился с расторжением договора и возвратом денежных средств.

На основании изложенного истец просит расторгнуть договор строительного подряда от 09 декабря 2019 года и взыскать с ООО «Строй-Ресурс» в свою пользу денежную сумму в размере 2000000 рублей.

Истец ФИО1, надлежащим образом извещенная о времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явилась, до судебного заседания от нее поступило заявление о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Ответчик ООО «Строй-Ресурс», надлежащим образом извещенный о времени и месте рассмотрения дела, своего представителя в судебное заседание не направил, до судебного заседания от ответчика поступило заявления о признании исковых требования и рассмотрении дела без участия представителя ответчика. 

Исследовав материалы дела, представленные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу п. 1 ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).

Судом установлено, что 09 декабря 2019 года между истцом ФИО1 и ответчиком ООО «Строй-Ресурс» заключен договор строительного подряда по условиям которого ответчик обязуется в установленный договором срок осуществить на строительном участке по адресу: 

<

адрес> следующие строительные работы: по Приложению №1, а истец обязался принять результат и уплатить установленную договором цену.

Согласно п. 2. Договора оплата по настоящему договору осуществляется истцом поэтапно в следующем порядке:

- предоплата составляет 2000000 рублей оплачивается в течении семи дней с момента заключения договора любым способом, не противоречащим действующему законодательству,

- следующий платеж после выполнения 1-ого этапа работ приложения №1 и составляет 960000 рублей;

- последующий платеж по окончании работ и сдаче заказчику не позднее 5-ти дней.

Пунктом 2.5 Договора определено, что срок исполнения работ по данному договору со стороны подрядчика составляет 90 рабочих дней с момента начала работ и представления всех необходимых платежей.

В соответствии с п. 5. Договора подрядчик обязуется приступить к выполнению работ в течение 2-х дней с момента получения аванса.

09 декабря 2019 года ФИО1 уплатила аванс в размере 2000000 рублей по договору строительного подряда от 09 декабря 2019 года, что подтверждается распиской в получении денежных средств ООО «Строй-Ресурс».

Однако как следует из искового заявления ФИО1 и не отрицается ответчиком, строительные работы по Договору строительного подряда от 09 декабря 2019 года начаты не были.

10 февраля 2020 года истец направила в адрес ответчика претензию о расторжении Договора строительного подряда от 09 декабря 2019 года и возврате уплаченных по договору денежных средств.

В ответ на претензию ООО «Строй-Ресурс» направило письмо истцу, в котором ответчик не отрицал нарушения условий Договора строительного подряда, при этом ответчик ссылался на то, что не смог приступить к своевременному выполнению строительных работ в связи с финансовыми трудностями, просил предоставить отсрочку для выполнения Договора. 

Таким образом, судом установлено, что по договору подряда от 09 декабря 2019 года ответчиком работы в срок, установленный договором, не начаты, что ответчиком не оспаривается, следовательно суд приходит выводу о праве истца на основании п. 1 ст. 28 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" отказаться от исполнения договора подряда, потребовать возврата уплаченных по нему денежных средств.

Исходя из изложенного с ответчика в пользу истца подлежат взысканию денежные средства, уплаченные по договору подряда в качестве аванса в размере 2000000 рублей.

Согласно ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований.

Согласно ч. 1 ст. 88 ГПК РФ судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела.

В силу ст. 94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, в частности относятся, другие признанные необходимыми расходы. 

Принимая во внимание, что истцом при подаче иска была уплачена госпошлина в размере 21400 рублей, что подтверждается чеком-ордером от 27 февраля 2020 года. С ответчика подлежит взысканию указанная сумма. 

Руководствуясь ст. 194 – 199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

исковые требования ФИО1 к Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс»» удовлетворить.

Расторгнуть договор строительного подряда от 09 декабря 2019 года заключенного между Обществом с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс» и ФИО1.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строй-Ресурс» в пользу ФИО1 внесенный аванс по договору в размере 2000000 рублей, расходы по оплате госпошлины в размере 21400 рублей, всего – 2021400 рублей.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Тверской областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Калининский районный суд Тверской области.

Судья О.А. Полестерова

Мотивированное решение составлено 27 апреля 2020 года.