24RS0№-62

2-2819(2024)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

20 августа 2024 года Ачинский городской суд Красноярского края

в составе: 

председательствующего судьи Панченко Н.В., 

с участием истца ФИО1,

представителя истца ФИО2, 

при секретаре Истоминой А.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, 

У С Т А Н О В И Л:

ФИО1 обратился в суд с иском к Публичному акционерному обществу «Россети Сибирь» (далее ПАО «Россети Сибирь») об обязании осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, мотивируя свои требования тем, что по договору №20.1900.916.23, заключенному им с ПАО «Россети Сибирь», общество приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств принадлежащего ему объекта жилого дома, расположенного по адресу Республика Хакасия, Ширинский район, территория муниципального образования Соленоозерный сельсовет, восточнее села Соленоозерное на расстоянии 20,4 км, участок 1/3/2, с кадастровым номером №. Пунктом 21 договора предусмотрено, что договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору. 19.04.2023 г. платежным поручением им произведена оплата по договору. В технических условиях определена точка присоединения к электрическим сетям его объекта, срок действия технических условий определен в 2 года. Пунктом 5 договора определен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 6 мес. Он надлежащим образом исполнил свои обязательства по договору, оплатил ПАО «Россети Сибирь» стоимость работ по технологическому присоединению, однако в установленный договором срок ПАО «Россети Сибирь» присоединение энергопринимающих устройств его объекта не произвело, срок исполнения истек, что является нарушением требований Федерального закона «Об электроэнергетике», а также его прав как потребителя. В ответ на претензию ответчик указал на отсутствие финансирования для выполнения технологического присоединения к электрическим сетям его объекта, в связи с чем, истец просит обязать ПАО «Россети Сибирь» осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств указанного объекта с заявленными характеристиками согласно Техническим условиям (л.д.3-6). 

В судебном заседании истец ФИО1 и его представитель ФИО2, действующая по ходатайству (л.д.37), исковые требования поддержали по аналогичным основаниям.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь», надлежащим образом извещенный о рассмотрении дела, о дате и месте судебного заседания судебным извещением, в суд не явился, в отзыве представитель ФИО3, действующий по доверенности от 27.02.2024 г., указал, что между ФИО1 и обществом заключен договор от 20.04.2023 г. об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения указанного объекта. Денежные средства по договору поступили на расчетный счет. В соответствии с п. 10.2 технических условий сетевая организация должна выполнить монтаж комплекса коммерческого учета электрической энергии, строительство ЛЭП-10 кВ, установить новый ТП-10,04 кВ, строительство ЛЭП-04 кВ. На данные мероприятия затраты общества составят 1 476,29 тыс. руб., затраты заявителя – 47 880 руб. Строительство объектов элетроэнергетики не выполнено по объективным причинам из-за большого количества договоров технологического присоединения, тяжелого финансового положения филиала Общества, отсутствие обеспечения инвестиционной программы всего объема договоров на территории Республики Хакасия, нарушения сроков поставки ТМЦ и оборудования. В настоящее время исполнение обязательств по договору осложняется ростом цен на товары и нарушением поставок после ужесточения санкционного давления на РФ, в связи с данными обстоятельствами у общества отсутствовали необходимые для исполнения договора материалы, в том числе приборы учета, опоры. Ориентировочный срок поставки ТМЦ составляет 90 кал. дн., оборудования – 120 кал. дн., с учетом строительства объектов электроэнергетики (воздушных линий электропередач, трансформаторной подстанции) для выполнения договора обществу необходимо не менее 128 кал. дн., поэтому в случае удовлетворения требований истца просит установить срок для исполнения решения суда 4 мес. после вступления решения суда в законную силу (л.д.53-56, 84). 

Выслушав истца, его представителя, исследовав материалы дела, суд считает, исковые требования ФИО1 подлежащими удовлетворению по следующим основаниям:

В соответствии со ст.ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

На основании ст. 26 Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. 

Порядок технологического присоединения, утверждаемый Правительством Российской Федерации, устанавливает, в том числе, 

правила выбора сетевой организации, которой принадлежат объекты электросетевого хозяйства с необходимым классом напряжения на соответствующей территории, к которой следует обращаться заинтересованным в технологическом присоединении лицам и которая не вправе отказать обратившемуся к ней лицу в услуге по технологическому присоединению и заключении соответствующего договора; 

процедуру технологического присоединения (в том числе перечень мероприятий по технологическому присоединению, предельные сроки их выполнения) и ее особенности в случаях присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов микрогенерации (в том числе типовую форму договора об осуществлении технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства сетевых организаций), а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам; 

правила заключения и исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения, в том числе существенные условия такого договора; 

состав технических условий для технологического присоединения энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики; 

ответственность сетевых организаций за несоблюдение сроков осуществления технологического присоединения.

Как установлено по делу, ФИО1 является собственником земельного участка, с кадастровым номером 19:11:100706:790, расположенного по адресу 

<

адрес>, территория муниципального образования Соленоозерный сельсовет, восточнее села Соленоозерное на расстоянии 20,4 км, участок 1/3/2, согласно выписке из ЕГРН (л.д.22-25). На земельном участке расположен объект малоэтажной жилой застройки (индивидуальный жилой дом). 

21 апреля 2023 г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен типовой договор №20.1900.916.23 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 договора). 

По условиям договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств ФИО1 принадлежащего ему объекта жилого дома, расположенного по адресу 

<

адрес>, территория муниципального образования Соленоозерный сельсовет, восточнее села Соленоозерное на расстоянии 20,4 км, участок 1/3/2, с кадастровым номером №, в том числе, по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом характеристик: максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, с которыми осуществляется технологическое присоединение 0,40 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. 

Технические условия являются неотъемлемой частью договора, со сроком действия 2 года со дня заключения договора (л.д.11-13)..

Пунктом 5 договора предусмотрен срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению – 4 мес. со дня заключения договора. 

Размер платы за технологическое присоединение определен в п. 10 договора в соответствии с приказами Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 28.10.2022 г., от 25.11.2022 г. и составил 47 880 руб. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п. 12 договора).

Платежным поручением от 19.04.2023 г. произведена ФИО1 оплата по договору (л.лд.14-17). 

Однако в установленные договором сроки в течение 4 мес. со дня заключения договора сетевая организация свои обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта жилого дома по указанному адресу, принадлежащего ФИО1, не выполнила. 

07.03.2024 г. ФИО1 обратился к ПАО «Россети Сибирь» с претензией, потребовал исполнения обязательств по договору, осуществления технологического присоединения к электрическим сетям для электроснабжения объекта, приложив документ об оплате по договору (л.д.18-20), в ответе на которую исполнитель указал, что с временным ограничением финансирования, вызванным дефицитом платы за технологическое присоединение, мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств со стороны ПАО «Россети Сибирь» не были осуществлены своевременно. Строительно-монтажные работы, предусмотренные условиями заключенного договора, будут осуществлены незамедлительно после поступления необходимых материалов и комплектующих на склад филиала в объеме затрат (л.д.21). 

При таких обстоятельствах, при рассмотрении дела установлено и не отрицалось стороной ответчика, что в установленные договором и Правилами сроки обязательства ПАО «Россети Сибирь» исполнены не были, технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта ФИО1 не осуществлено, чем нарушаются его права как заказчика и потребителя, поэтому обоснованно истцом требуется в судебном порядке возложение на общество обязанности по совершению определенных договором действий и исполнению обязательств.

Кроме этого, в порядке ст. 206 ГПК РФ, суд полагает возможным определить срок для исполнения решения суда, предложенный ПАО «Россети Сибирь», 4 месяца со дня вступления решения суда в законную силу, против которого не возражала сторона истца.

Согласно ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований, поэтому с ПАО «Россети Сибирь» подлежит взысканию в доход местного бюджета госпошлина в сумме 300 руб.

Таким образом, исходя из совокупности установленных по делу обстоятельств и требований закона, суд считает необходимым исковые требования ФИО1 удовлетворить, обязать ПАО «Россети Сибирь» в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта, принадлежащего ФИО1 

Руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Обязать Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» в течение четырех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу осуществить технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом /Садовый/ Дачный дом), расположенного по адресу 

<

адрес>, территория муниципального образования Соленоозерный сельсовет, восточнее села Соленоозерное на расстоянии 20,4 км, участок 1/3/2, с кадастровым номером №, принадлежащего ФИО1, во исполнение договора №20.1900.916.23.

Взыскать с Публичного акционерного общества «Россети Сибирь» в доход местного бюджета муниципального образования г. Ачинска государственную пошлину в сумме 300 (триста) рублей. 

Решение может быть обжаловано в Красноярский краевой суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы через Ачинский городской суд.

Судья Н.В. Панченко