. 

.

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 января 2024 года город Новокуйбышевск

Новокуйбышевский городской суд Самарской области в составе:

председательствующего судьи Бегишевой Н.В., 

при секретаре Сергеевой В.С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-410/2024 по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Самараэлектросеть» о признании условия договора недействительным, возложении обязанности по техническому присоединению, взыскании судебной неустойки,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к ответчику ООО «Самараэлектросеть» о признании условия договора недействительным, возложении обязанности по техническому присоединению, взыскании судебной неустойки, просит признать недействительным условие Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

№>, заключенного между ООО «Самараэлектросеть» как сетевой организацией и ФИО1, как заявителем (заключен со дня оплаты счета на оплату технологического присоединения по договору 02 августа 2023 г.), содержащееся в пункте 13 Технических условий 

<

№>лк-ТУ, являющихся неотъемлемой частью Договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяца со дня заключения договора; обязать ООО «Самараэлектросеть» произвести мероприятия по технологическому присоединению по данному договору в течение 10 (десяти) дней со дня вступления решения суда в законную силу; взыскать с ООО «Самараэлектросеть» в его пользу по истечении указанного срока судебную неустойку из расчета 5000 (пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения. В обоснование заявленных требований истец указал, что в соответствии с условиями Типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

<

№>, заключенного между ООО «Самараэлектросеть» как сетевой организацией и ФИО1, как заявителем, а также Техническими условиями 

<

№>, являющимися неотъемлемой частью данного Договора (п. 4 Договора), ООО «Самараэлектросеть» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств строящегося жилого дома, расположенного по адресу: 

<

Адрес>. Пунктом 13 Технических условий срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению определен в 6 месяцев со дня заключения договора. При этом Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 Договора). Плата за технологическое присоединение была внесена 02.08.2023 г., что является датой заключения договора. Порядок и особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям определяются Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861. Необходимые условия истцом соблюдены, в связи с чем, срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 30 рабочих дней, а указанный в Технических условиях срок в 6 месяцев нарушает Правила и предусматривающий их принятие Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

В судебном заседании истец ФИО1 заявленные требования поддержал в полном объеме, просил суд их удовлетворить, по основаниям, указанным в иске.

Представитель ответчика ООО «Самараэлектросеть» - ФИО2 возражал против удовлетворения исковых требований, по основаниям, изложенным в письменных возражениях. 

Изучив основания, заявленных требований, возражений, выслушав явившихся лиц, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 539 ГК РФ, по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Согласно положениям ст. 544 ГК РФ, оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

ООО «Самараэлектросеть» является территориальной сетевой организацией, оказывает услуги по передаче и распределению электрической энергии (мощности), а также услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям на территории Самарской области.

Заключение, исполнение договора по технологическому присоединению к электрическим сетям регулируется Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861.

Правила определяют общие принципы и порядок обеспечения недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, а также оказания этих услуг.

Согласно п. 7.1 Правил 7(1) в отношении заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5), 13(8) и 14 настоящих Правил, положения разделов I, II и IX настоящих Правил применяются, если разделом X настоящих Правил не установлено иное.

Договор между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, заключается с использованием личного кабинета заявителя (п. 103 Правил).

Действие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, не ставится в зависимость от факта составления договора, подписанного сторонами в письменной форме.

Наличие договора между сетевой организацией и заявителем, указанным в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, подтверждается документом об оплате (полностью или в установленных настоящими Правилами случаях частично) заявителем сетевой организации выставленного ею и размещенного в личном кабинете заявителя счета на оплату технологического присоединения по договору, предусмотренному пунктом 105 настоящих Правил. Документ об оплате должен содержать наименование и платежные реквизиты сетевой организации, а также реквизиты счета на оплату технологического присоединения.

В счет на оплату технологического присоединения по договору включается плата за технологическое присоединение в полном объеме.

Как установлено в ходе судебного разбирательства по настоящему делу, истец является собственником земельного участка, кадастровый номер 

<

№>, почтовый адрес ориентира: 

<

Адрес>.

На указанном участке истцом осуществлено строительство жилого дома. С целью подключения объекта к линии электроснабжения, истец в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, через личный кабинет обратился в ООО «Самараэлектросеть» с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, расположенных по адресу: кадастровый номер 

<

№>, почтовый адрес ориентира: 

<

Адрес>.В соответствии с п. 105 указанных выше Правил, истцу через личный кабинет были направлены условия типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, технические условия 

<

№> от 28.07.2023, счет на оплату 

<

№> от 01.08.2023.

Факт оплаты истцом подтверждается платежным поручением 

<

№> от 02.08.2023, то есть договор, согласно правилам, считается заключенным - 02.08.2023 года.

При этом правила не предусматривают безусловного подключения потребителей в течение 30 дней.

Согласно пп. б п.16 Правил срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности).

Пунктом 10 технических условий к договору 

<

№> от 02.08.2023 определены мероприятия сетевой организации, предусмотренным абз.6 п.п. б п. 16 правил.

Поскольку Пунктом 10 технических условий к договору 

<

№> от 02.08.2023 предусмотрены мероприятия, отменяющие одновременное соблюдение условий, предусмотренных пп. б п.16 Правил, условие о непревышении срока в 30 рабочих дней не применимо.

Согласно п. 13 технических условий к договору 

<

№> от 02.08.2023 срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора, договор заключен – 02.08.2023.

Сетевой организацией при поступлении заявки на присоединение было определено, что для осуществления присоединения заказчика сетевой организации необходимо выполнить мероприятия, отраженные в п.10 технических условий к договору 

<

№>, а именно выполнение реконструкции объектов электросетевого хозяйства, в таком случае срок для осуществления мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев, со дня заключения договора.

Согласно п.16 Правил договор должен содержать следующие существенные условия:

а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства сторон по их выполнению;

б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать:

30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности); при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт;в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

С учетом изложенного выше, принимая во внимание, что срок для исполнения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям от 02.08.2023 между ФИО1 к ООО «Самараэлектросеть», согласно технических условий (приложение 1 к договору) - 6 месяцев, с момента заключения договора, на день рассмотрения дела - не истек, истекает только 02.02.2024 года, суд приходит к выводу об отсутствии правовых оснований для удовлетворения исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Требования ФИО1 к ООО «Самараэлектросеть» о признании условия договора недействительным, возложении обязанности по техническому присоединению, взыскании судебной неустойки - оставить без удовлетворения.

На решением может быть подана апелляционная жалоба в Самарский областной суд через Новокуйбышевский городской суд Самарской области в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

В окончательной форме решение принято 23.01.2024 года.

Судья /подпись/ Н.В.Бегишева

.