Дело № 2-317/2021

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

п. Любытино Новгородской области 12 марта 2021 года

Боровичский районный суд Новгородской области в составе: председательствующего судьи Арсеньевой Е.И.,

при секретаре Елисеевой С.В.,

с участием представителя истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород" к ФИО2 ФИО5 о понуждении к исполнению обязанности по договору в натуре,

установил:

Акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" обратилось в суд с исковым заявлением к ФИО2 ФИО5 о понуждении к исполнению обязанности по договору в натуре. В обоснование исковых требований указано, что 14 октября 2016 года стороны заключили договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № №. Предметом договора являются отношения сторон, согласно которым исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, принадлежащего ФИО2 ФИО5 - здания магазина по адресу: 

<

адрес> Стороны обязались в установленный договором срок выполнить комплекс мероприятий, необходимых для фактического присоединения объекта капитального строительства ФИО2 ФИО5 к сети газораспределения исполнителя. 

14.04.2018 г. и 12.03.2020 г. стороны договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения заключили дополнительные соглашения, согласно которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения установлен до 14.10.2019 г. и до 30.04.2020 г.

В соответствии с условиями договора акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" выполнило свои обязательства, а именно осуществило мероприятия, необходимые для фактического присоединения объекта капитального строительства к сети газораспределения, а ФИО2 ФИО5 свои обязательства не исполнил, а именно не подготовил объект газопотребления к приёму газа, не выполнил строительно-монтажные работы по монтажу сети внутреннего газоснабжения и по установке газоиспользующего оборудования, не предоставил исполнительную документацию в производственно-технический отдел истца. ФИО2 ФИО5 27.03.2020 года направлена претензия, которая оставлена без удовлетворения. 

В дальнейшем ФИО2 ФИО5 09 апреля 2020 года с АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» заключил договор подряда № №, по указанному договору подрядчик по заданию заказчика на основании проектно-сметной документации обязан выполнить строительно-монтажные работы, создать в пределах земельного участка заказчика по адресу: 

<

адрес> сеть газопотребления и сдать результат работ заказчику. В нарушение условий указанного договора подряда ФИО2 ФИО5 не предоставил подрядчику проектно-сметную документацию, не произвел предоплату по договору. В результате существенно нарушил условия договора. Подрядчик 07.09.2020 г. обратился в суд с иском о расторжении договора. Решением Боровичского районного суда Новгородской области от 19.10.2020 г. требования АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» удовлетворены, договор подряд расторгнут, решение вступило в законную силу 24.11.2020 г.

В настоящее время ФИО2 ФИО5 не исполнены обязательства по договору № № от 14.10.2016 г., что подтверждено Актом проведения визуального осмотра объекта газопотребления от 28.12.2020 г.

ФИО2 ФИО5 отказываясь от исполнения встречных обязательств по договору, лишает акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" возможности осуществить весь процесс подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к газораспределительной сети в целях обеспечения технической возможности газоснабжения, а также лишает возможности компенсировать фактические затраты за счет средств бюджета, что повлечет убытки для юридического лица. Изложенные обстоятельства, по мнению акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород", позволяют просить суд понудить ФИО2 ФИО5 к исполнению обязанности по договору в натуре.

Представитель истца акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород" ФИО1 исковые требования поддержала по основаниям, изложенным в исковом заявлении.

Ответчик ФИО2 ФИО5 о месте и времени судебного заседания дважды извещался по последнему известному месту жительства, указанному в исковом заявлении. Судебные извещения вернулись с отметкой «Неудачная попытка вручения», что, согласно разъяснениям в пунктах 67 и 68 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 года N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации", расценивается судом как надлежащее извещение.

Суд, в соответствии с ч.ч. 4, 5 ст. 167 ГПК РФ, п. 1 ст. 165.1 ГК РФ находит возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся сторон.

Выслушав представителя истца, исследовав материалы гражданского дела, суд, приходит к следующим выводам.

Одним из способов защиты гражданского права, согласно ст. 12 ГК РФ, является присуждение к исполнению обязанности в натуре, что означает понуждение должника выполнить действия, которые он должен совершить в силу имеющегося гражданско - правового обязательства.

Согласно ст. 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами (ст. 310 ГК РФ).

Порядок подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства определен Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314.

Согласно разделу VI "О заключении договоров о подключении" Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2013 года N 1314, подключение объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении (п. 59); по договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению) (п. 60); договор о подключении является публичным и заключается в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации, с соблюдением особенностей, определенных настоящими Правилами (п. 62); для заключения договора о подключении заявитель направляет исполнителю заявку о подключении (технологическом присоединении) в 2 экземплярах письмом с описью вложения или иным доступным способом (п. 64); к числу существенных условий договора о подключении отнесены, в том числе перечень мероприятий по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий, срок осуществления мероприятий по подключению; размер платы за технологическое присоединение, определяемый в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере газоснабжения; порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение; положение об ответственности сторон за несоблюдение сроков исполнения обязательств, установленных договором о подключении и настоящими Правилами; технические условия; обязанность исполнителя выполнить условия договора о подключении при необходимости осуществления строительства сетей газораспределения на земельном участке, находящемся в собственности третьих лиц, при условии оформления исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации права пользования таким земельным участком для целей строительства сетей газораспределения.

14.10.2016 г. акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" (исполнитель) и ФИО2 ФИО5 (заказчик) заключили договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № №, исполнитель принял на себя обязательства по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства, а именно здания магазина, к сети газораспределения, принадлежащего исполнителю на праве собственности или ином законном основании, с учетом максимальной нагрузки (часовым расходом газа) газоиспользующего оборудования, а заявитель принял на себя обязательства по обеспечению готовности объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению) нежилого здания, в соответствии с условиями настоящего договора, а также оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № от 14.10.2016 г. регулирует весь процесс подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства, принадлежащего ФИО2 ФИО5 к газораспределительной сети акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород", и реализуется в целях обеспечения технической возможности газоснабжения первой. Срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства и пуску газа составляет 1 год 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

Обязанности заказчика установлены в п. 3.4 договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № и предусматривают, в том числе обязанности выполнить установленные в договоре условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на принадлежащем заявителю земельном участке; представить исполнителю экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений; обеспечить исполнителю доступ к объектам капитального строительства для проверки выполнения технических условий и готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению и пуску газа в согласованные с исполнителем сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения.

Договор о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № может быть расторгнут или изменен по соглашению сторон, оформленному в письменной форме, а также по требованию одной из сторон по снованиям, предусмотренным ГК РФ и настоящим договором. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

14 апреля 2018 года и 12 марта 2020 года акционерное общество "Газпром газораспределение Великий Новгород" (исполнитель) и ФИО2 ФИО5 (заказчик) заключили дополнительные соглашения № № и № № соответственно, согласно которым срок выполнения мероприятий по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа установлен до 14.10.2019 г. и до 30.04.2020 г.

Размер понесенных акционерным обществом "Газпром газораспределение Великий Новгород" затрат при выполнении мероприятий по технологическому присоединению по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № согласно расчету составляет 57 297,90 руб.

Письмо акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород" на имя ответчика, содержащее просьбу уведомить об исполнении принятых обязательств, оставлена им без ответа.

09 апреля 2020 года ФИО2 ФИО5 и АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» заключили договор подряда № №, по указанному договору подрядчик по заданию заказчика на основании проектно-сметной документации обязан выполнить строительно-монтажные работы, создать в пределах земельного участка заказчика по адресу: 

<

адрес> сеть газопотребления и сдать результат работ заказчику. В нарушение условий указанного договора подряда ФИО2 ФИО5 не предоставил подрядчику проектно-сметную документацию, не произвел предоплату по договору. Решением Боровичского районного суда Новгородской области от 19.10.2020 г. исковые требования АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» к ФИО2 ФИО5 о расторжении договора подряда удовлетворены, решение вступило в законную силу 24.11.2020 г.

Судом установлено и не оспаривалось ответчиком ФИО2 ФИО5 что обязательства по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения в части, являющейся предметом искового заявления, надлежащим образом в срок не исполнены.

Изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод об обоснованности заявленных исковых требований о понуждении ФИО2 ФИО5 к исполнению обязанности по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения № № в натуре.

Согласно ст. 206 ГПК РФ в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

В п. 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года N 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств" установлено, что, удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть исполнено (ч. 2 ст. 206 ГПК РФ, ч. 2 ст. 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

Учитывая обстоятельства гражданского дела, принимая во внимание объем мероприятий, которые необходимо произвести ответчику ФИО2 ФИО5 в целях исполнения обязательств по договору о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства к сети газораспределения, суд полагает, что срок для выполнения исковых требований необходимо определить как три месяца со дня вступления решения суда в законную силу, поскольку такой срок будет являться разумным и реальным для исполнения, при этом суд отмечает, что ответчик не лишен права исходя из имущественного положения или других обстоятельств просить об отсрочке или рассрочке исполнения решения суда, изменении способа и порядок его исполнения.

В соответствии со ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Руководствуясь ст. ст. 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород" к ФИО2 ФИО5 о понуждении к исполнению обязанности по договору в натуре удовлетворить.

Обязать ФИО2 ФИО5 в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу исполнить принятые обязательства по договору № № от 14 октября 2016 года о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства по адресу 

<

адрес> к сети газораспределения, а именно:

выполнить условия подготовки сети газопотребления и газоиспользующего оборудования к подключению, включая комплекс проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газопотребления на земельном участке по адресу: 

<

адрес>

представить исполнителю АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» экземпляр раздела утвержденной в установленном порядке проектной документации, который включает в себя сведения об инженерном оборудовании, о сетях газопотребления, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений;

в согласованные с исполнителем АО «Газпром газораспределение Великий Новггород» сроки, но не позднее 14 дней до дня подключения обеспечить исполнителю доступ к объекту капитального строительства для проверки выполнения технических условий.

Взыскать с ФИО2 ФИО5 в пользу акционерного общества "Газпром газораспределение Великий Новгород" расходы по оплате государственной пошлины в размере 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Новгородского областного суда через Боровичский районный суд в течение месяца со дня вынесения решения.

Судья Е.И. Арсеньева