Дело № 2- 378/2021

19 марта 2021 года

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Кировский городской суд Ленинградской области

в составе председательствующего судьи АндрееваИ.А.,

при секретаре ВитовичД.Ю.,

с участием:

представителя истца ПАО «Россети Ленэнерго» по доверенности от 19 ноября 2019 года В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ПАО «Россети Ленэнерго» к ФИО1 о возложении обязанности,

УСТАНОВИЛ:

ПАО «Россети Ленэнерго» обратилось в суд с иском к Ч.А.АБ., просит суд обязать ФИО1 в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу исполнить обязательство по п.8 Договора № от 12.02.2019 и Технические условия (приложение № 1 к Договору), а именно: - подготовить для присоединения энергопринимающее устойство (электроустановку) заявителя; - электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3726. Подготовить провод и соединительные зажимы для присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям в точке присоединения. Монтаж электропроводки выполнить согласно ПУЭ; взыскать с ФИО1 неустойку за несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с 13.06.2019 по 29.05.2020 в сумме 9680 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 6400 руб.

В обоснование исковых требований указано, что в соответствии с заключенным между истцом и ответчиком договором № от 12.02.2019 г. (далее - Договор) ПАО «Ленэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязался осуществлять плату за технологическое присоединение в порядке и размере, предусмотренных Договором. (Заявка Заявителем подавалась в электронном виде через личный кабинет клиента. Со стороны ПАО «Ленэнерго» Договор подписан электронной цифровой подписью, а должником Договор подписан способом подтверждения заключения договора в личном кабинете клиента). 

Со стороны ПАО «Ленэнерго» все мероприятия по технологическому присоединению выполнены в полном объеме, о чем сообщалось заявителю в уведомлении от 15.02.2019 года №, от 14.06.2019 года №. Заявитель не отказывался в одностороннем порядке от исполнения Договора и от услуги технологического присоединения своего энергопринимающего устройства к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго». Ответчиком мероприятия по технологическому присоединению до настоящего времени не выполнены. ПАО «Ленэнерго» неоднократно направляло в адрес должника уведомления и претензии с требованием выполнить мероприятия по технологическому присоединению и оплатить неустойку по Договору. По состоянию на 29.05.2020 года ответа на претензию не поступило, выставленная неустойка не оплачена.

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержал по основаниям, изложенным в иске.

Ответчик в судебное заседание не явился.

На основании ч. ч. 1, 4 ст. 113 ГПК РФ лица, участвующие в деле извещаются или вызываются в суд заказным письмом с уведомлением о вручении, судебной повесткой с уведомлением о вручении, телефонограммой или телеграммой, либо с использованием иных средств доставки, обеспечивающей фиксирование судебного извещения или вызова и его вручение адресату.

Судебное извещение, адресованное лицу, участвующему в деле, направляется по адресу, указанному лицом, участвующим в деле, или его представителем.

Судебные извещения о времени и месте рассмотрения дела направлялись ответчику в соответствии с требованиями ст. 113 ГПК РФ заказными письмами с уведомлением по адресу, указанному истцом в исковом заявлении по месту регистрации, которые возвратились в суд по истечении срока хранения.

Согласно пункту 1 статьи 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю. Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

В силу разъяснений, данных в пункте 68 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 года № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» статья 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации подлежит применению также к сообщениям суда.

В связи с изложенным, суд на основании ч. 3 ст. 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившихся лиц и в порядке заочного судопроизводства.

Суд, определив рассматривать дело в порядке заочного судопроизводства, исследовав материалы дела, приходит к следующему.

В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» по договору об осуществлении технологического присоединения сетевая организация принимает на себя обязательства по реализации мероприятий, необходимых для осуществления такого технологического присоединения, в том числе мероприятий по разработке и в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, согласованию с системным оператором технических условий, обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства, включая их проектирование, строительство, реконструкцию, к присоединению энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики).

Согласно абзацу 5 части 1 статьи 21 названного закона порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических и физических лиц к электрическим сетям устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством об электроэнергетике. Во исполнение положений вышеназванной статьи постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила № 861).

Пункт 18 Правил № 861 предусматривает, что мероприятия по технологическому присоединению включают в себя выполнение технических условий и сетевой организацией и заявителем, включая проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий

В силу пункта 85 Правил № 861 для проведения проверки выполнения технических условий заявитель представляет в сетевую организацию уведомление об их выполнении с приложением копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оно подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о сертификации; копии разделов проектной документации, предусматривающих технические рещения, обеспечивающих выполнение технических условий; документы, содержащие информацию о проведении пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений объекта электроэнергетики.

Материалами дела подтверждается, что между ПАО «Ленэнерго» и Ч.А.АВ. заключен договор № от 12.02.2019 г. (далее - Договор), по которому ПАО «Ленэнерго» приняло на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств Заявителя, а Заявитель обязался осуществлять плату за технологическое присоединение в порядке и размере, предусмотренных Договором (л.д.8-11 договор, л.д.12-14 техусловия).

Заявка Заявителем подавалась в электронном виде через личный кабинет клиента. Со стороны ПАО «Ленэнерго» Договор подписан электронной цифровой подписью, а должником Договор подписан способом подтверждения заключения договора в личном кабинете клиента.

Согласно п. 8 Договора, Заявитель обязался: надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий; принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией; после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных актов от сетевой организации; надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения (л.д.9).

В соответствии с п. 11 Технических условий, являющихся неотъемлемой частью Договора, Заявитель обязан: 11.1. Подготовить для присоединения энергопринимающее устройство (электроустановку) Заявителя. 11.2 Электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3726. Подготовить провод и соединительные зажимы для присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям в точке присоединения. Монтаж электропроводки выполнить согласно ПУЭ (л.д.12-14).

В соответствии с и. 6 Договора, срок фактического присоединения к сетям с выдачей акта технологического присоединения составляет 15 дней с момента проверки сетевой организацией выполнения заявителем технических условий со своей стороны. Из условий договора объективно следует, что срок исполнения обязательств сетевой организации находится в прямой зависимости от исполнения заявителем мероприятий по технологическому присоединению со своей стороны и исчисляется со дня истечения 15 рабочих дней, предоставленных сетевой организации в соответствии с п. 6 договора на совершение дальнейших, предусмотренных договором действий. В соответствии с п.5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 4 месяца со дня заключения Договора, то есть до 12.06.2019 года.

В порядке ст.56 ГПК РФ ответчик не представил доказательств в опровержение доводов истца о том, что ни в установленный договором срок, ни на момент рассмотрения дела судом ответчиком не исполнены обязательства по договору в части выполнения мероприятий по технологическому присоединению.

Со стороны ПАО «Ленэнерго» все мероприятия по технологическому присоединению выполнены в полном объеме, о чем сообщалось заявителю в уведомлении от 15.02.2019 года №, от 14.06.2019 года № (л.д.16 – уведомление, л.д.17 – почтовое уведомление о вручении).

Согласно п.10.1 Технических условий, являющихся приложением к договору ПАО «Ленэнерго» должно разработать организационно-технические мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям. Таким образом, выполнение каких-либо строительно-монтажных работ (строительство ЛЭП, установка трансформаторной подстанции и т.п.) для подключения объектов заявителя в данном случае не требуется, поскольку ЛЭП находится в непосредственной близости от земельного участка заявителя, (номер опоры линии электропередач указан в п.11.2 Технических условий) (л.д.12-14).

Сетевая организация по настоящему Договору должна провести осмотр энергопринимающего устройство заявителя и выдать Акт об осуществлении технологического присоединения. Энергопринимающее устройство для осмотра заявитель не предъявлял, сетевую организацию о выполнении технических условий не уведомлял, чем нарушил п.8 Договора.

В материалы дела стороной ответчика не представлено доказательств того, что заявитель отказывался в одностороннем порядке от исполнения Договора и от услуги технологического присоединения своего энергопринимающего устройства к электрическим сетям ПАО «Ленэнерго». 

С учетом изложенных обстоятельств, принимая во внимание, что ответчик не исполнил возложенные на него указанным договором обязательства, суд находит обоснованным и подлежащими удовлетворению исковые требования обязать ответчика в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу исполнить обязательство по п.8 Договора № от 12.02.2019 и Технические условия (приложение № 1 к Договору), а именно: - подготовить для присоединения энергопринимающее устойство (электроустановку) заявителя; - электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3726. Подготовить провод и соединительные зажимы для присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям в точке присоединения. Монтаж электропроводки выполнить согласно ПУЭ.

Подпунктом «в» пункта 16 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее - Правила) и пунктом 17 Договора предусмотрена обязанность одной из сторон Договора при нарушении ею сроков осуществления мероприятий по технологическому присоединению в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки

Пунктом 18 Договора установлено, что за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации (л.д.10-11). 

Просрочка выполнения мероприятий по технологическому присоединению за период с 13.06.2019 г. по 29.05.2020 г. составляет 352 дня. Расчет неустойки: 352 (кол-во дней просрочки с учетом годового ограничения) * 0,05* 550 руб. (общий размер платы за ТП) = 9 680,00 руб. (л.д.5).

Вместе с тем, с поскольку подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд уменьшает неустойку до 4000 руб.

В порядке ч.1 ст.98 ГПК РФ к взысканию с ответчика в пользу истца расходы по уплате государственной пошлины в сумме 6400 руб. (л.д.7).

Руководствуясь ст.ст. 194-198, 235 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Обязать ФИО1 в течение одного месяца с даты вступления настоящего решения в законную силу исполнить обязательство по п.8 Договора № от 12.02.2019 и Технические условия (приложение № 1 к Договору), а именно: - подготовить для присоединения энергопринимающее устойство (электроустановку) заявителя; - электроснабжение электроустановок заявителя предусмотреть от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ Л-1 от ТП-3726. Подготовить провод и соединительные зажимы для присоединения объекта Заявителя к электрическим сетям в точке присоединения. Монтаж электропроводки выполнить согласно ПУЭ.

Взыскать с ФИО1 неустойку за несвоевременное исполнение мероприятий по технологическому присоединению за период с 13.06.2019 по 29.05.2020 в сумме 4000 руб., расходы по уплате госпошлины в сумме 6400 руб. Отказать в удовлетворении остальной части исковых требований.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано также в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий

ФИО2