Дело №2-2530/2025

УИД 05RS0012-01-2025-002750-59

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

 

Именем Российской Федерации

09 октября 2025 года г.Дербент

Дербентский городской суд Республики Дагестан в составе председательствующего судьи Мирзаев Р.М-Х., при секретаре судебного заседания Гаджимурадовой Г.Х., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» об обязании исполнить заключенный договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения, по адресу: 

<

адрес изъят>, в рамках догазификации в срок до 01.08.2024, взыскании морального вреда в размере 100000 руб., 

установил:

ФИО1 обратился в суд с иском к ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» об обязании исполнить заключенный договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения, по адресу: 

<

адрес изъят>, в рамках догазификации в срок до 01.08.2024, взыскании морального вреда в размере 100000 руб.

В обоснование иска указал, что 29.02.2024 он заключил с ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в лице начальника эксплуатационной газовой службы Дербентского района ФИО2 исполнителем услуги, ООО "Газпром газификация» единым оператором газификации в интересах которого действует ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в лице начальника межрайонного управления «Самурское» ФИО3 - с другой стороны, заключен договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения по адресу: РД, 

<

адрес изъят> в рамках догазификации для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с протяженностью газовой трубы - 270 м.

Срок выполнения мероприятий по договору №06-33/24-501 от 29.02.2024 по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составлял 180 дней. Дата окончания проведения работ 27.08.2024. По истечении 180 дней подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования не было исполнено.

За весь период установленного срока выполнения работ ООО «Газпром газораспределение Дагестан» ни разу не подавало информацию о ходе выполнения мероприятий либо о невозможности исполнения обязательств по каким-либо причинам. Согласно п.4 раздела «Обязанности и права сторон» ООО «Газпром газораспределение Дагестан» не осуществило строительство (реконструкцию) сети газораспределения в установленный договором срок. Также не был предоставлен акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). 

Согласно п. 9 Правил подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.09.2021 №1547 заключенный договор является публичным и заключается в порядке, установленном ГК РФ, с учетом особенностей, определенных настоящими правилами.

Сторонами договор подписан и передан в ООО «Газпром газораспределение Дагестан» 29.02.2024. Согласно п. 33 договор считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора. В соответствии с п. 1 вышеуказанного договора, ООО «Газпром газораспределение Дагестан» приняло на себя обязательство осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта, капитального строительства без взимания платы к сети газораспределения с учетом обеспечения установленной максимальной нагрузки (часового расхода газа). Также, в соответствии с данным пунктом, он принял на себя обязательства по подготовке сети и газоиспользующего оборудования. Принятые им обязательства исполнены в полном объеме, а именно произведена подготовка оборудования к подключению. Согласно п. 3 заключенного договора общий срок подключения технологического присоединения) объекта капитального строительства составлял 180 дней с момента подписания настоящего договора (до 27.08.2024). Дополнительные соглашения к договору, в части продления срока исполнения мероприятий по технологическому присоединению, срока исполнения мероприятий, необходимых для технологического присоединения (подключения) к сетям газораспределения домовладения по адресу: РД, 

<

адрес изъят> - не заключены. Для исполнения досудебного порядка мною направлено претензионное письмо в адрес ООО «Газпром газораспределение Дагестан» в лице начальника ЭГС Дербентского района ФИО2 Полученный ответ информируют об уклонении ими от исполнения ранее заключенного договорного документа в отсутствие законных оснований. Таким образом, ООО «Газпром газораспределение Дагестан» является субъектом естественных монополий по виду деятельности услуг по транспортировке природного газа по трубопроводам, своим бездействием не исполняет условия договора без объективных причин.

После получения ответа на его претензионное письмо он многократно связывался с представителями ООО «Трансгазстрой» с просьбой ускорить подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования и объекта капитального строительства к сети газораспределения домовладения по адресу: РД, 

<

адрес изъят> в рамках догазификации, на что они каждый раз обещали начать работы, но по сей день ничего не сделано и нет информации когда начнутся работы по газификации. Ответчик не выполнил условия договора, отказался от его исполнения и в результате неправомерных действий и длительного бездействия он понес моральный вред, так как отказ от исполнения договора носит явно прямой умысел неисполнения договора, что в свою очередь отрицательно повлияло на его нервную систему, он начал по ночам плохо спать, просыпаться и долго не мог уснуть, постоянно вынужден пить успокоительные таблетки для поддержания своего здоровья. И все это из-за неправомерных виновных действий и бездействий ответчика. Он являюсь пенсионером, имеет сыновей военнослужащих, участников СВО и ветеранов боевых действий. В случае отсутствия подключения газоиспользующего оборудования

газораспределительной сети будут отсутствовать надлежащие условия проживания в холодное время года.

По изложенным основаниям просит обязать ООО «Газпром газораспределение Дагестан» исполнить заключенный договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения, по адресу: 

<

адрес изъят>, в рамках догазификации в срок до 01.08.2024, и взыскать моральный вред в размере 100000 руб.

Истец ФИО1 извещенный надлежащим образом о месте и времени проведения судебного разбирательства в назначенное время в суд не явился

Ответчики ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» извещенные о дне и времени рассмотрения дела, в суд своих представителей не направили, о причинах неявки суду не сообщили, возражений на исковое заявление не представили.

Третье лицо ООО «Трансгазстрой» извещенное надлежащим образом о дате и месте проведения судебного разбирательства в назначенное время в суд своего представителя не направило.

В соответствии с ч.1 ст.233 ГПК РФ суд определил рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Исследовав материалы дела, суд находит исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

В силу ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

В соответствии с ч.1 ст.702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно ч.1 ст.708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки).

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено договором, подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы. 

Порядок подключения объектов к сети газораспределения установлен Правилами подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 (далее - Правила, Правила N 1547, Правила подключения к сетям газораспределения).

Согласно пункту 5 Правил N1547 подключение газоиспользующего оборудования или объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется на основании договора о подключении. 

Договор о подключении заключается между заявителем, исполнителем и единым оператором газификации или региональным оператором газификации (пункт 6 Правил N1547.

В силу пункта 71 Правил N1547 мероприятия по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сети газораспределения, предусматриваемые договором о подключении, включают в себя: а) разработку проектной документации согласно обязательствам сторон договора о подключении, за исключением случая, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной; б) выполнение заявителем и исполнителем технических условий; в) мониторинг исполнителем выполнения заявителем технических условий (за исключением случая, если заявка о подключении содержит просьбу заявителя к исполнителю осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка); г) подписание исполнителем и заявителем акта о готовности; д) осуществление исполнителем фактического присоединения и составление акта о подключении (технологическом присоединении). 

Согласно подпункта «в» пункта 72 Правил N1547 исполнитель обязан осуществить действия по подключению (технологическому присоединению) не позднее установленного договором о подключении дня подключения (технологического присоединения) (но не ранее подписания акта о готовности, указанного в подпункте "г" пункта 71 настоящих Правил).

Судом установлено и следует из материалов дела 29.02.2024 между ответчиком ООО Газпром газораспределение Дагестан» в лице начальника эксплуатационной газовой службы Дербентского района ФИО2 и истцом ФИО1, заключен договор №0633/24-501 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения в рамках догазификации.

Исполнителем подготовлены технологические условия на подключение от 29.02.2024. 

В силу п.1 Договора №0633/24-501 исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) к сети газоиспользующего оборудования, принадлежащего заявителю, намеревающегося использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних нужд, не связанных с предпринимательской деятельностью, расположенного по адресу: РД, 

<

адрес изъят>, земельный участок 

<

номер изъят>, а единый оператор газификации обеспечит подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения.

Срок выполнения мероприятий по договору №06-33/24-501 от 29.02.2024 по подключению (технологическому присоединению) объекта капитального строительства к сети газораспределения и пуску газа составлял 180 дней (пункт 3 Договора №0633/24-501). Таким образом, дата окончания проведения работ 27.08.2024. 

Из пояснений истца следует, что по истечении установленного в договоре срока подключение (технологическое присоединение) газоиспользующего оборудования не было исполнено. В нарушение пункта 4 раздела Договора №0633/24-501, ООО «Газпром газораспределение Дагестан» не осуществило строительство (реконструкцию) сети газораспределения в установленный договором срок. Также не был предоставлен акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению). 

Из материалов дела следует, что истцом в адрес начальника эксплуатационной газовой службы Дербентского района направлено претензионное письмо №1 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования, в ответ на которое ООО «Газпром газораспределение Дагестана» филиал «Самурский» 08.10.2024 сообщило, что подрядная организация выполняет проектно-изыскательские работы, после завершения и согласования будут начаты строительно-монтажные работы, а именно строительство сети газораспределения до границ участка истца.

Таким образом, ответчиком обязательства по договору №06-33/24-501 от 29.02.2024 в установленный срок не исполнены, в связи с чем, суд приходит к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения исковых требований ФИО1 об обязании ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» исполнить заключенный договор о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения, по адресу: 

<

адрес изъят>, кадастровый номер земельного участка 

<

номер изъят>

Рассматривая требования истца в части взыскания с ответчиков компенсации морального вреда в сумме 100000 руб., суд приходит к следующему.

Согласно пункту 45 Постановления Пленума Верховного Ссуда РФ N 17 от 28 июня 2012 года "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя.

В силу ст. 15 Закона РФ от 07.02.1992 г. N 7300-1 "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Согласно абз. 1 ст. 151 ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. 

По смыслу приведенных положений действующего законодательства, при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя, в том числе в сфере отношений, связанных с привлечением денежных средств для долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости и возникновением у участников долевого строительства права собственности на объекты долевого строительства и права общей долевой собственности на общее имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости. 

В силу абз. 2 ст. 151 ГК РФ при определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины нарушителя и иные, заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред. 

На основании пункта 2 статьи 1099 Гражданского кодекса РФ моральный вред, причиненный действиями (бездействием), нарушающими имущественные права гражданина, подлежит компенсации в случаях, предусмотренных законом.

Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и справедливости. Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 

Принимая во внимание, что судом установлено нарушение ответчиками условий при исполнении договора №06-33/24-501 от 29.02.2024, а также то, что факт причинения истцу морального вреда ненадлежащим исполнением ответчиком своих обязательств по договору не нуждается в доказывании, и считается установленным поскольку нарушены прав потребителя, суд приходит к выводу о необходимости взыскания в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 1 000 рублей. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.194-199, 233-235 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования ФИО1 к ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» удовлетворить частично.

Обязать ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» исполнить заключенный договор №06-33/24-501 от 29.02.2024 о подключении (технологическом присоединении) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сети газораспределения домовладения, по адресу: 

<

адрес изъят>, кадастровый номер земельного участка 

<

номер изъят> в рамках догазификации в установленный договором срок.

Взыскать с ООО «Газпром газораспределение Дагестан, ООО «Газпром газификация» в лице межрайонного управления «Самурское» солидарно в пользу ФИО1 компенсацию морального вреда в размере 1000 (одна тысяча) рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований ФИО1, отказать.

На решение ответчик вправе подать в Дербентский городской суд Республики Дагестан заявление об его отмене в течение семи дней со дня вручения им копии этого решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Р.М-Х.Мирзаев