УИД: 28RS0017-01-2021-001514-50

Дело № 2а-819/2021

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

24 июня 2021 г. г. Свободный

Свободненский городской суд Амурской области 

в составе председательствующего судьи Осокиной О.Ю.,

при секретаре судебного заседания Савельевой Л.Ю., 

с участием представителя административного истца ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» к Межрайонному отделу судебных приставов по г. Свободному и Свободненскому району УФССП по Амурской области 

об освобождении от взыскания исполнительского сбора по постановлению ведущего судебного пристава-исполнителя МОСП Отдела судебных приставов по г. Свободный и Свободненскому району УФССП России по Амурской области ФИО2 от -- по исполнительному производству ---ИП от -- в размере -- 

установил:

ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» обратилось в Свободненский городской суд Амурской области с административным иском к МОСП по городу Свободный и Свободненскому району УФССП России по Амурской области об освобождении от взыскания исполнительского сбора по исполнительному производству ---ИП от --.

Определением суда к участию в деле привлечены: в качестве административных соответчиков - Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области; в качестве заинтересованных лиц – 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ, ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».

В иске в обоснование заявленных требований представитель истца ФИО4 указала, что решением Свободненского городского суда от -- удовлетворены исковые требования прокурора космодрома «Восточный». На ФКУ «Дирекция космодрома Восточный» возложена обязанность во взаимодействии с Государственной корпорацией «Роскосмос» исполнить в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу в рамках полномочий функции заказчика-застройщика по завершению строительства объекта незавершенного строительства Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С, в том числе определить по объекту конкретные объемы и виды работ, которые необходимо выполнить ФГУП «ЦЭНКИ» или иному Генподрядчику для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию заключив договор подряда и решить вопрос об освидетельствовании (строительно-технической экспертизе) объемов работ не сданных, но выполненных ранее ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» по объекту комплекса Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С.

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам от -- принят отказ и.о. прокурора космодрома «Восточный» от иска, в части возложения на ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» обязанности исполнить предписания 119 отдела ГАСН МО РФ по объекту «Стартовый комплекс РН «Союз 2» площадка 1С в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также нормативными техническими требованиями в области строительства: п.п. 4.14 Предписания -- от --, п. 13 Предписания -- от --, п.п. 5, 99, 10, 12 Предписания -- от --, п. 3 Предписания --//1 от --, п.З Предписания -- от --, п.п. 7, 8 Предписания 118/1 от --, п. 6 Предписания -- от --, п.5 Предписания 513/1 от --, п. 4 Предписания -- от --, п. 5 Предписания -- от --, п. 14 Предписания -- от --, п. 13 Предписания -- от --. Решение Свободненского городского суда от -- отменено, производство по делу в указанной части прекращено.

Решение Свободненского городского суда изложено в следующей редакции: «На ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» возложена обязанность в рамках полномочий заказчика-застройщика по завершению строительства объекта незавершенного строительства по объекту «Стартовый комплекс РН «Союз 2» площадка 1С, в срок до 3-- определить конкретные виды и объемы работ, которые необходимо выполнить ФГУП «ЦЭНКИ» или иному Генеральному подрядчику для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом -- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». Срок исполнения решения суда: 31.12.2020». В остальной части решение Свободненского городского суда оставлено без изменения.

На основании вышеуказанного судебного акта выдан исполнительный лист ФС -- от --, судебным приставом исполнителем МОСП по г.Свободному и Свободненскому району УФССП России по Амурской области возбуждено исполнительное производство ---ИП от --.

Постановлением ведущего судебного пристава-исполнителя от -- с ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» взыскан исполнительский сбор в размере -- рублей.

Вместе с тем, ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» полагает взыскание исполнительского сбора незаконным, необоснованным и нарушающим права должника, поскольку в соответствии с ч. 1. ст. 112 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 30.07.2001 г. N 13-П вынесение постановления о взыскании исполнительского сбора допускается только в том случае, если решение суда не исполнено полностью либо в части.

ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» принимались все меры для исполнения решения Свободненского городского суда от --.

Между Госкорпорацией «Роскосмос», ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» и АО «ЦЭНКИ» заключен договор от -- -- на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Стартовый комплекс РН «Союз 2» площадка 1С». В соответствии с п. 2.1 договора (в редакции дополнительного соглашения от -- -- к договору от -- --), генподрядчик обязуется выполнить строительно-монтажные работы на объекте в соответствии с расчетом -- «Выдача технических решений для устранения замечаний 119 отдела ГАСН МО РФ и технического надзора». Согласно п. 16.2 Договора, настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

В соответствии с графиком завершения оформления документации о соответствии законченных строительством объектов Стартового комплекса, Технического комплекса и Водозаборных сооружений первой очереди космодрома «Восточный» и ввод их в эксплуатацию в соответствии с поручением Президента РФ от -- --, утвержденным генеральным директором Госкорпорации «Роскосмос» --, срок устранения замечаний ГАСН по вышеуказанным объектам - --.

В настоящее время фактически устранены следующие замечания, изложенные в предписаниях 119 отдела ГАСН МО РФ, по исполнительному листу ФС -- от -- от -- ИП ---ИП от --: 

п. 1,7 предписания -- (исх. от -- --, исх. от -- --);

п.1,6,8 предписания -- (исх. от -- --, исх. от -- --)

Таким образом, фактическое устранение замечаний, а также заключение дополнительных соглашений к договору от -- --, содержащих расчет цены работ, в том числе по устранению замечаний 119 отдела ГАСН МО РФ, свидетельствует о добросовестности административного истца в части исполнения требований по решению Свободненского городского суда по делу --.

Кроме того, прошу суд принять во внимание, что в силу п. 2.3.1 Устава Дирекции утверждённого распоряжением Государственной корпорации «Роскосмос» -- ---рсп, основной деятельностью дирекции является выполнение функций государственного заказчика и застройщика в процессе реализации подпрограммы «Создание обеспечивающей инфраструктуры космодрома «Восточный» федеральной целевой программы «Развитие российских космодромов на 2006-2015 годы», утвержденной постановлением ФИО9 от -- -- (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства РФ от -- --, от -- --, от -- --) и подпрограммы «Развитие космодрома «Восточный» на период 2017-2025 годов» федеральной целевой программы «Развитие космодромов на период 2017-2025 годов в обеспечение космической деятельности РФ», утвержденной постановлением Правительства РФ от -- --, осуществления контроля за ходом выполнения подпрограмм, эффективностью расходования выделенных на их реализацию средств, исполнения функций застройщика (заказчика), связанных с организацией строительства объектов космодрома «Восточный», а также иных функций, предусмотренных механизмом реализации подпрограмм».

Дирекция создана в форме казенного учреждения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от -- ---р, финансовое обеспечение выполнения функций Дирекции осуществляется за счет средств федерального бюджета на основе бюджетной сметы (пункты 1.1 и 1.2 Устава).

Согласно ст. 6 Бюджетного Кодекса РФ - казенное учреждение -государственное (муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы.

Положениями п. 1, 2 ст. 161 БК РФ установлено, что казенное учреждение находится в ведении органа государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Взаимодействие казенного учреждения при осуществлении им бюджетных полномочий получателя бюджетных средств с главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, в ведении которого оно находится, осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом. Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации и на основании бюджетной сметы.

В настоящий момент выделенных и доведенных до Дирекции лимитов бюджетных средств для осуществления оплаты исполнительского сбора в размере -- рублей по постановлению от -- по исполнительному производству -- от -- отсутствуют.

Просит суд освободить ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» от взыскания исполнительского сбора по исполнительному производству ---ИП от -- в размере --

Представитель административного истца - ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» ФИО3 в судебном заседании настаивала на заявленных требованиях, просила их удовлетворить в полном объеме, при этом пояснила, что по вступлении решения Свободненского городского суда в законную силу, судом по делу было выдано три исполнительных листа, по которым возбуждено три исполнительных производства и принято три постановления о взыскании исполнительского сбора. Выдачу трёх исполнительных листов, включая, исполнительный лист, на основании которого возбуждено исполнительное производство ---ИП, полагала ошибочным.

Административные ответчики - судебный пристав-исполнитель МОСП по г. Свободный и Свободненскому району Амурской области ФИО2, Управление Федеральной службы судебных приставов по --, заинтересованные лица - 119 отдел государственного архитектурно-строительного надзора Министерства обороны РФ, ФГУП "Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры», извещенные о дате, времени и месте рассмотрения дела, в судебное заседание не явились, не ходатайствовали о рассмотрении дела в их отсутствие. Своей позиции по иску не представили.

Представитель заинтересованного лица – Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» ФИО5 в судебное заседание не явился, просил рассмотреть настоящее дело в отсутствие представителя заинтересованного лица. В представленных письменных объяснениях указал, что административное исковое заявление подлежит удовлетворению, поскольку должником предпринимались достаточные меры по исполнению требований. 

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

В соответствии со ст. 14 КАС РФ, административное судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст. 62 КАС РФ, лица, участвующие в деле, обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются как на основания своих требований или возражений.

Судом установлено, что решением Свободненского городского суда от -- удовлетворен иск прокурора космодрома «Восточный» к Федеральному казенному учреждению «Дирекция космодрома «Восточный».

На ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» во взаимодействии с Государственной корпорацией «Роскосмос» возложена обязанность исполнить в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу в рамках полномочий функции заказчика-застройщика по завершению строительства объекта незавершенного строительства Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С, в том числе определить по объекту конкретные объемы и виды работ, которые необходимо выполнить ФГУП «ЦЭНКИ» или иному Генподрядчику для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию заключив договор подряда и решить вопрос об освидетельствовании (строительно-технической экспертизе) объемов работ не сданных, но выполненных ранее ФГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» по объекту Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С.

На ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» в течении трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу возложена обязанность устранить выявленные нарушения требований градостроительного законодательства, изложенные в предписаниях 119 отдела ГАСН МО РФ по объекту Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С. в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также нормативными техническими требованиями в области строительства (СНиП, СП, РД, ГОСТ) проведя и представив в 119 отдел ГАСН МО РФ следующие результаты мероприятий и информацию: 

п. 17 Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) – выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы;

п. 6 Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) – выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы;

п.3 Предписание -- от 09.12.2013(Стартовое сооружение по ГП-1) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) – устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

п.п. 1,6,8 Предписание -- от -- Стартовое сооружение по ГП-1) - выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; 

п. I Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) – устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. I, III, IV Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями; 

Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) – устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

п.п. 1,2,3,8 Предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, представить акты об устранении замечаний строительного контроля заказчика строительства (25 замечаний в 11 предписаниях, в том числе имеющих критический и значительный характер), привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями и выполнить работы в соответствии с проектом;

предписание -- от -- (Стартовое сооружение по ГП-1) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями;

п. 1 Предписание -- от -- (Командный пункт по ГП-3) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. I, II Предписание -- от -- (Командный пункт по ГП-3) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

предписание -- от -- (Командный пункт по ГП-3) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 1,4,8,22,23 Предписание -- от -- (Технологический блок кислорода и азота ГП-4) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

предписание -- от -- (Технологический блок кислорода и азота ГП-4)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

предписание -- от --Технологический блок кислорода и азота ГП-4) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. I,72,73,74,75,76,ХII Предписание -- от -- (Сливной перрон кислорода и азота по ГП-4А; Навес над сливным перроном по ГП-4А/1; Проходной тоннель кислорода и азота по ГП-4Б; Площадка испарителей по ГП-4В; Ограждение из металлической сетки по ГП-4В/1; Калитка в ограждении по ГП-4В/2; Площадка для дренажного резервуара азота по ГП-4Г; Газоналивная станция СЗЖК и СЗЖА по ГП-4Д; Дренажная площадка кислорода по ГП-4Е; Дренажная площадка азота по ГП-4Ж) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы;

п.п. 1,3 Предписание -- от -- (Сливной перрон кислорода и азота по ГП-4А; Навес над сливным перроном по ГП-4А/1; Проходной тоннель кислорода и азота по ГП-4Б; Площадка испарителей по ГП-4В; Ограждение из металлической сетки по ГП-4В/1; Калитка в ограждении по ГП-4В/2; Площадка для дренажного резервуара азота по ГП-4Г; Газоналивная станция СЗЖК и СЗЖА по ГП-4Д; Дренажная площадка кислорода по ГП-4Е; Дренажная площадка азота по ГП-4Ж) - устранить ранее выявленные нарушения по разделам I, II 

<

...> 14-17, 19-22, 26-29, 32-37, 40-47, 51-56, 58-59, 61-64, 68-76, XII, XIII акта -- от -- соответствии с требованиями технических регламентов, выполнить работы в соответствии с проектом 

предписание -- от 29.09.2016(Сливной перрон кислорода и азота по ГП-4А; Навес над сливным перроном по ГП-4А/1; Проходной тоннель кислорода и азота по ГП-4Б; Площадка испарителей по ГП-4В; Ограждение из металлической сетки по ГП-4В/1; Калитка в ограждении по ГП-4В/2; Площадка для дренажного резервуара азота по ГП-4Г; Газоналивная станция СЗЖК и СЗЖА по ГП-4Д; Дренажная площадка кислорода по ГП-4Е; Дренажная площадка азота по ГП-4Ж) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

предписание -- от 02.10.2017(Сливной перрон кислорода и азота по ГП-4А; Навес над сливным перроном по ГП-4А/1; Проходной тоннель кислорода и азота по ГП-4Б; Площадка испарителей по ГП-4В; Ограждение из металлической сетки по ГП-4В/1; Калитка в ограждении по ГП-4В/2; Площадка для дренажного резервуара азота по ГП-4Г; Газоналивная станция СЗЖК и СЗЖА по ГП-4Д; Дренажная площадка кислорода по ГП-4Е; Дренажная площадка азота по ГП-4Ж) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 1,2,4,5,6,8,9,13,14 Предписание -- от -- (Технологический блок керосина и нафтила по ГП-5)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, представить исполнительную документацию в по разделу АС - сертификаты пожарной безопасности на материалы примеряемые в помещениях с заданным классом пожарной безопасности по разделу ЭМ; по разделу ЭС; по разделу АК; по разделу ВК; по разделу ОВ; по разделу ПБ; по разделу СС; по разделу УУТ; представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте; выполнить заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями; выполнить монтаж молниезащитных устройств и принять в эксплуатацию; выполнить соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм сваркой внахлестку; выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы.

предписание -- от -- (Технологический блок керосина и нафтила по ГП-5) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п.1,2,4,5,6,8,9,13,14 Предписание -- от -- (Технологический блок керосина и нафтила по ГП-5) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документация (при отсутствии документации провести обследование), представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте, выполнить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, представить документацию по приемке в эксплуатацию молниезащитных устройств, ввести в эксплуатацию противопожарный водопровод и сигнализацию. 

п.п. II,III,3,IV,V,VI,VII,39,40,41,43,VIII Предписание -- от -- (Сливной перрон керосина по ГП-5А; Навес над сливным перроном горючего по ГП-5А/1; Эстакада горючего (керосина и нафтила) по ГП-5А/2; Вышка пожарная по ГП-5А/3-4; Сливной перон азота по ГП-5В; Навес над сливным перроном по ГП-5В/1; Непроходной канал слива азота по ГП-5В/2; Дренажная площадка азота по ГП-5В/3; Дренажная площадка СОГ по ГП-5Г; Непроходной канал дренажной площадки СОГ по ГП-5Г/1; Ограждение дренажной площадки по ГП-5Г/2: Калитка в ограждении по ГП-5Г/3; Эстакада по ГП-5Г/4) - выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию, привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями. 

предписание -- от -- (Сливной перрон керосина по ГП-5А; Навес над сливным перроном горючего по ГП-5А/1; Эстакада горючего (керосина и нафтила) по ГП-5А/2; Вышка пожарная по ГП-5А/3-4; Сливной перон азота по ГП-5В; Навес над сливным перроном по ГП-5В/1; Непроходной канал слива азота по ГП-5В/2; Дренажная площадка азота по ГП-5В/3; Дренажная площадка СОГ по ГП-5Г; Непроходной канал дренажной площадки СОГ по ГП-5Г/1; Ограждение дренажной площадки по ГП-5Г/2: Калитка в ограждении по ГП-5Г/3; Эстакада по ГП-5Г/4) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

предписание -- от -- (Сливной перрон керосина по ГП-5А; Навес над сливным перроном горючего по ГП-5А/1; Эстакада горючего (керосина и нафтила) по ГП-5А/2; Вышка пожарная по ГП-5А/3-4; Сливной перон азота по ГП-5В; Навес над сливным перроном по ГП-5В/1; Непроходной канал слива азота по ГП-5В/2; Дренажная площадка азота по ГП-5В/3; Дренажная площадка СОГ по ГП-5Г; Непроходной канал дренажной площадки СОГ по ГП-5Г/1; Ограждение дренажной площадки по ГП-5Г/2: Калитка в ограждении по ГП-5Г/3; Эстакада по ГП-5Г/4) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от 15.04.2016г.); 

п.п. 2,3,4,5,6,8,9,11,13,19 Предписание -- от -- (Технологический блок сжатых газов по ГП-6) - выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представит акты освидетельствования скрытых работ и исполнительную схему по устройству наружного и внутреннего заземляющего контура; представить исполнительную документацию по подъемным сооружениям, предоставить исполнительную документацию (акт смонтированного ПС, протоколы замера сопротивления изоляции проводов и системы заземления, результаты наладочных работ, документы подтверждающие учет и регистрацию ПС и ОПО), привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями, ввести в действие внешний и внутренний противопожарный водопровод и сигнализацию;

предписание -- от -- (Технологический блок сжатых газов по ГП-6) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Технологический блок сжатых газов по ГП-6) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

Предписание -- от -- (Технологический блок сжатых газов по ГП-6) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от --);

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14 Предписание -- от -- (Насосная станция технологического пожаротушения ГП-7) – устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте; выполнить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями, выполнить соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм сваркой внахлестку; выполнить герметизацию замковых соединений на всех сопрягаемых трехслойных стеновых панелях; выполнить герметизацию фасонных угловых элементах; установить фасонный элемент марки Фэ2 на отметке 0,600 (в соответствии с требованиями рабочей документации 860/1С-7-СП1 листы 14, 21).; представить документацию, подтверждающую исполнение ранее выданных органом строительного надзора предписаний от -- -- и от -- --.

Предписание -- от -- (Насосная станция технологического пожаротушения ГП-7) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п. 1 Предписание -- от -- (Укрытие для обслуживающего персонала ГП-8) - выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы;

Предписание -- от -- (Укрытие для обслуживающего персонала ГП-8)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Укрытие для обслуживающего персонала ГП-8)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 1,2,6,7,8 Предписание -- от -- (Сливной бассейн ВПВ по ГП-9) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование);

Предписание -- от -- (Сливной бассейн ВПВ по ГП-9)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Сливной бассейн ВПВ по ГП-9)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п. 14 Предписание -- от -- (Холодильный центр по ГП-10) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом; ввести в действие водопровод; в соответствии с проектом установить наружные пожарные лестницы здания сразу же после монтажа несущих конструкций.

Предписание -- от -- (Холодильный центр по ГП-10) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п. 20 Предписание -- от -- (Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями по ГП-12) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом; ввести в действие внешний противопожарный водопровод до начала отделочных работ, и сигнализацию сигнализацию до начала пусконаладочных работ.

Предписание -- от -- (Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями по ГП-12) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями по ГП-12) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Насосная станция оборотного водоснабжения с резервуарами и градирнями по ГП-12) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от --); 

п.п. 1,2,7,8 Предписание -- от -- (Телевизионная вышка СТН по ГП-13) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование)

Предписание -- от -- (Телевизионная вышка СТН по ГП-13) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

п. 6 Предписание -- от -- (Административно-служебное здание по ГП-14) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной и рабочей документации; 

Предписание -- от -- (Административно-служебное здание по ГП-14)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,9,10,1,12,13,14,15 Предписание -- от -- (Административно-служебное здание по ГП-14) – устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте фундамента сооружения; выполнить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями (в соответствии с требованиями рабочей документации 860/1С-14-АС1 изм.4 лист 1 п. 9, статьи 137 Федерального закона от -- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от -- --); представить документацию по принятию в эксплуатацию молниезащитных устройств сооружения (в соответствии с требованиями СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утверждена приказом Минэнерго РФ от -- --); выполнить соединение контура заземления здания по оси Г с магистралями заземления двух коммуникационных тоннелей 28/1, 28/2 (в соответствии с требованиями рабочей документации 860/1С-Т1-Т18-ЭМ1 лист 3); выполнить соединение стальных труб диаметром условного прохода до 25 мм сваркой внахлестку (в соответствии с требованиями СП 73 13330-2012 «Внутренние санитарно-технические конструкции зданий». Актуализированная редакция СНиП --.85 п.4.6.); ввести в действие противопожарный водопровод до начала отделочных работ и, сигнализацию до начала пусконаладочных работ.

Предписание -- от -- (Административно-служебное здание по ГП-14)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; 

п.п. 11,12,14 Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить результаты освидетельствования установки гидроизоляционных шпонок рабочая документация 860/1С-15-КЖ1 изм.1 лист1 (в соответствии с требованиями п. 3.6 технического регламента ТР 186-07). 

Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 1,3,5,6,7,8 Предписание -- от 26.05.2014(Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) – устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, установить внутренние и внешние гидроизоляционные шпонки АКВАСТОП ДО-320/50-6/30 деформационного шва проходных тоннелей по оси А и В (рабочая документация 860/1С-15-КЖ1 лист 4), представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценка класса бетона по прочности в промежуточном и проектном возрасте.

п. 1 Предписание -- от 25.07.2014(Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. I, II Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями;

Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 11,12,14,1.3.5.6.7.8.II Предписание -- от -- (Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

п.п. 1,2,3,5,6,9,10 Предписание -- от -- (КПП по ГП-16) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями; представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в промежуточном и проектном возрасте; представить документы, подтверждающие исполнение постановлений начальника 119 отдела государственного архитектурно-строительного надзора по делам об административных правонарушениях от -- -- и от -- --.

Предписание -- от -- (КПП по ГП-16)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от --).

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 Предписание -- от -- (Центральный распределительный пункт ГП-17) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте; выполнить заделку негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемости, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград инженерными и технологическими коммуникациями (в соответствии с требованиями проектной документации 860/1С-КР2-ПЗ п.п. 2.10.3, 2.12, рабочей документации 860/1С-17-ОВ изм.2 лист 2 п.5, статьи 137 Федерального закона от -- № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 22 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от -- --); ввести в действие противопожарный водопровод до начала отделочных работ, и сигнализацию до начала пусконаладочных работ; в месте сопряжения коммуникационного канала 28/1 с сооружением установить гидроизоляционную шпонку (в соответствии с требованиями рабочей документации 860/1С-17-СП1, листы 5, 22); представить документацию, подтверждающую исполнение, ранее выданных органом строительного надзора, предписания от -- -- не представлена (нарушены требования п.10, 11в РД 11-08-2008).

Предписание -- от -- (Центральный распределительный пункт ГП-17) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации.

п.15 Предписание -- от -- (Хранилище ЗиП по ГП-18) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; в проектную и рабочую документацию внести изменения в порядке определенном ФИО10 21 1101 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями. 

Предписание -- от -- (Хранилище ЗиП по ГП-18- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от --) ч. 6 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ; 

п.п. 1,3,4,6,7,8,9,11 Предписание -- от -- (Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами питьевой воды и резервуарами запаса воды на противопожарные нужды по ГП-25: ограждение металлическое по ГП-25.1; ворота в металлическом ограждении по ГП-25.2.)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями. 

Предписание -- от -- (Насосная станция хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения с резервуарами питьевой воды и резервуарами запаса воды на противопожарные нужды по ГП-25: ограждение металлическое по ГП-25.1; ворота в металлическом ограждении по ГП-25.2.)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

п.п. 1,2,5,6 Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26А) - выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы;

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26А) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

п.п. 2,5,6 Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26А) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте;

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26А) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

п.п. 1,2,5,6 Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26Б) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте (в соответствии с требованиями СП 63. 13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» п.11.5.3, ГОСТ 18105-2010 «Международный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»). 

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26Б) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26Б) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

п.п. 1,2,5,6 Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26В) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте (в соответствии с требованиями СП 63. 13330.2012 «Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003» п.11.5.3, ГОСТ 18105-2010 «Международный стандарт. Бетоны. Правила контроля и оценки прочности»). 

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26В) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

Предписание -- от 20.03.2018(Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26В) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации,

п.п. 1,4 Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26Г) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить исполнительную документацию; 

Предписание -- от -- (Резервуары для дождевых стоков вод 2х300 м3 по ГП-26Г) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п. 1,2,4,5,6 Предписание -- от -- (Резервуар-накопитель для сбора дождевых сточных вод V=2х500 куб. м по ГП-26/1; Канализационная насосная станция по ГП-26/2; Ограждение из металлической сетки по ГП-26/3; Ворота в металлическом ограждении по ГП-26/4.)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте 

Предписание -- от 07.04.2017(Резервуар-накопитель для сбора дождевых сточных вод V=2х500 куб. м по ГП-26/1; Канализационная насосная станция по ГП-26/2; Ограждение из металлической сетки по ГП-26/3; Ворота в металлическом ограждении по ГП-26/4.) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п. п. 2,3,8 Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить протоколы, подтверждающие контроль и оценку класса бетона по прочности в промежуточном и проектном возрасте; выполнить предусмотренное ТР 186-07 сварочное стыковое соединение установленных ПХВ-П гидравлических шпонок ДО 320/50-6/30 и ДВ 320/50. 

Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п. п.1,2 Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы

Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации

Предписание -- от 10.02.2016(Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п.1,2,3,4,5,7,9, Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы, представить исполнительную документацию (при отсутствии документации провести обследование); выполнить заземление; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями; представить акты об устранении замечания застройщика (3 предписания), привлекаемых застройщиком для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве.

Предписание -- от -- (Проходные кабельные и трубные тоннели (кабели, кабель СУ, слаботочка, сжатые газы, вода, тепло) - 22 шт. по ГП-28.1-ГП-28.22)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации (предписание -- от --) 

п.19 Предписание -- от -- (Хранилище ТАУ по ГП-30) -устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; ввести в действие противопожарный водопровод до начала отделочных работ, и сигнализацию до начала пусконаладочных работ. 

Предписание -- от -- (Хранилище ТАУ по ГП-30) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

Предписание -- от -- (Хранилище ТАУ по ГП-30) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

Предписание -- от -- (Хранилище ТАУ по ГП-30) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п. 1,14,18,19,21 Предписание -- от -- (Котельная по ГП-40) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; привести проектную документацию в соответствие с фактически выполненными техническими решениями; ввести в действие внешний противопожарный водопровод до начала отделочных работ, и сигнализация до начала пусконаладочных работ.

Предписание -- от -- (Котельная по ГП-40) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

Предписание -- от -- (Котельная по ГП-40) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п. 3,10,11,12,13,14 Предписание -- от -- (Котельная по ГП-40) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; выполнить проектную гидроизоляцию технологических трубопроводов склада дизельного топлива (в соответствии с требованиями п. 4 РД 860/1С-40Б-40Г-ТХ лист 1); представить документацию по вводу в эксплуатацию молниезащиты зоны котельной; выполнить подключение охранно-пожарной сигнализации и автоматики на пульт диспетчера в сооружениях ГП1, ГП14 и ГП3 (в соответствии с требованиями п.20 ПД 860/1С-ПБ4-ПЗ, разделов 5.2 и 8 РД 520.12-ПЗ); ввести сети диспетчеризации на ЦДП в сооружениях 3 и 14 (РД 860/1С-40Г-40Д-АК лист 2); ввести в эксплуатацию объекты жизнеобеспечения: электроснабжения (кабельные сети, ЦТП), водоснабжения (хозяйственно-питьевой, противопожарный водопроводы, водозаборные сооружения, насосные), водоотведения (канализация бытовая самотечная и напорная, дождевая самотечная и напорная, комплекс очистных сооружений). 

Предписание -- от -- (Котельная по ГП-40) - устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п. 1,3,4,5,6,8 Предписание -- от -- (Внутриплощадочные железнодорожные пути) устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; ввести в действие внешний противопожарный водопровод и сигнализацию.

Предписание -- от -- (Внутриплощадочные железнодорожные пути)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

Предписание -- от -- (Внутриплощадочные железнодорожные пути)- устранить ранее выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации 

п.п. 1,2,3,4,5,6 Предписание -- от -- (Телевизионная вышка СТН по ГП-13)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить исполнительную документацию по устройству антикоррозионной защиты стальных конструкций и болтовых соединений (журналы антикоррозионной защиты, акты на скрытые работы, акты приемки защитного покрытия, протоколы замеров толщины антикоррозионного покрытия), представить исполнительные схемы по телевизионной вышке СТН (по ГП13) и протоколы испытаний контура заземления (СП 70.13330.2012, п. 3.2.3).

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Предписание -- от -- (Дивертор Н=150м - 2 шт. по ГП-19А,19Б) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить исполнительную документацию по устройству антикоррозионной защиты стальных конструкций и болтовых соединений (журналы антикоррозионной защиты, акты на скрытые работы, акты приемки защитного покрытия, протоколы замеров толщины антикоррозионного покрытия), представить исполнительные схемы по телевизионной вышке СТН (по ГП13) и протоколы испытаний контура заземления (СП 70.13330.2012, п. 3.2.3).

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Предписание -- от -- (Молниеотводы Н=50м - 4 шт. по ГП-20А-Г, Н=44 м - 5 шт. по ГП-20Д-К) – устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; По 5 молниеотводам h=44м (по ГП 20Д-К) представить исполнительные схемы и протоколы испытаний контура заземления (СП 70.13330.2012, п. 3.2.3); По молниеотводу h=44м (по ГП 20Е) представить заключение лабораторного контроля прочности бетона в возрасте 28 суток по устройству бетонной подготовки фундаментов (ГОСТ 18105-2010, п. 4.2); По молниеотводу h=44м (по ГП 20Ж, 20И) представить заключение лабораторного контроля прочности бетона в возрасте 28 суток по устройству бетонных фундаментов (ГОСТ 18105-2010, п. 4.2); По 5 молниеотводам h=44м (по ГП 20Д-К) представить документы подтверждающие качество затяжки постоянных болтов в расчетных соединениях секций между собой и соединении секции с фундаментом (СП 70.13330.2012, п. 4.5.9). По 4 молниеотводам h=50м (по ГП 20А-20Г) представить исполнительную документацию по устройству антикоррозионной защиты стальных конструкций и болтовых соединений (журналы антикоррозионной защиты, акты на скрытые работы, акты приемки защитного покрытия, протоколы замеров толщины антикоррозионного покрытия) (СП 72.13330.2011, п.п. 10.1.4, 10.2, 10.4, 10.5, приложение 3). По 4 молниеотводам h=50м (по ГП 20А-20Г) представить документы подтверждающие качество затяжки постоянных болтов в расчетных соединениях секций между собой и в соединении секции с фундаментом (СП 70.13330.2012, п. 4.5.9).

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 Предписание -- от -- (Молниеотводы Н=18м по ГП - 23, 23.1, 23.2)- устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; По 3 молниеотводам h=18м (по ГП 23, 23/1, 23/2) представить исполнительные схемы и протоколы испытаний контура заземления (СП 70.13330.2012, п. 3.2.3). По 3 молниеотводам h=18м (по ГП 23, 23/1, 23/2) представить заключение лабораторного контроля прочности бетона в возрасте 28 суток по устройству бетонных подготовок фундаментов ( ГОСТ 18105-2010, п. 4.2). По молниеотводу h=18м (по ГП 23/2) представить заключение лабораторного контроля прочности бетона в возрасте 28 суток по устройству бетонного фундамента (ГОСТ 18105-2010, п. 4.2). На 3 молниеотводах h=18м (по ГП 23, 23/1, 23/2) под головки болтов установить шайбы (СП 70.13330.2012, п. 4.5.4). По 3 молниеотводам h=18м (по ГП 23, 23/1, 23/2) представить документы подтверждающие качество затяжки постоянных болтов в расчетных соединениях секций между собой и соединении секции с фундаментом (СП 70.13330.2012, п. 4.5.9). По 3 молниеотводам h=18м (по ГП 23, 23/1, 23/2) представить исполнительную документацию по устройству антикоррозионной защиты стальных конструкций и болтовых соединений (журналы антикоррозионной защиты, акты на скрытые работы, акты приемки защитного покрытия, протоколы замеров толщины антикоррозионного покрытия) (СП 72.13330.2011, п.п. 10.1.4, 10.2, 10.4, 10.5, приложение 3).

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Предписание -- от -- (Трансформаторная подстанция - 3 шт. по ГП-24А-В) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; По 5 трансформаторным подстанциям (24А, 24Б, 24В, 24Г, 24Д) представить исполнительные схемы и протоколы испытаний контура заземления (СП 70.13330.2012, п. 3.2.3). 

п.п. 1,2,3,4,5,6,78,9,10 Предписание -- от -- (Канализационные насосная станция по ГП26Д-Р 10шт Канализационные насосная станция по ГП26Е) - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить протоколы, подтверждающие проведение контроля и оценки класса бетона по прочности в проектном возрасте;

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 Предписание -- от -- – устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; 

п.п. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Предписание -- от -- - устранить выявленные нарушения в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации, выполнить работы в соответствии с проектом, либо обратиться к разработчику проекта для внесения изменений в проектную документацию и повторное прохождение государственной экспертизы; представить документы, подтверждающие выполнение предписаний органа государственного надзора при строительстве объекта капитального строительства «Космодром «Восточный» Площадка --. Объект 860/1С. Стартовый комплекс Союз-2: Стартовое сооружение по ГП-1 (-- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --), Командный пункт по ГП-3 (-- от --; -- от --; -- от --; -- от --), Технологический блок кислорода и азота ГП-4 (-- от --; -- от --; --щ/1 от --), Сливной перрон кислорода и азота по ГП-4А; Навес над сливным перроном по ГП-4А/1; Проходной тоннель кислорода и азота по ГП-4Б; Площадка испарителей по ГП-4В; Ограждение из металлической сетки по ГП-4В/1; Калитка в ограждении по ГП-4В/2; Площадка для дренажного резервуара азота по ГП-4Г; Газоналивная станция СЗЖК и СЗЖА по ГП-4Д; Дренажная площадка кислорода по ГП-4Е; Дренажная площадка азота по ГП-4Ж (-- от --; -- от --; -- от --; -- от --.Технологический блок керосина и нафтила по ГП-5 (-- от --; -- от --; -- от --), Укрытие для обслуживающего персонала ГП-8 (-- от --; -- от --; -- от --), Сливной бассейн ВПВ по ГП-9 (-- от --; -- от --; -- от --), Холодильный центр по ГП-10 (-- от --; -- от --), Насосная станция оборотного водоснабжения по ГП-12: резервуары воды по ГП-12А,12Б -2 шт. ( -- от --; -- от --; -- от --; -- от --), Телевизионная вышка СТН по ГП-13 (-- от --; -- от --; -- от --), Административно-служебное здание по ГП-14 (-- от --; -- от --; -- от --; -- от --), Караульное помещение с гаражом на 1 автомашину по ГП-15 (-- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --; -- от --).

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от -- принят отказ и.о. прокурора космодрома «Восточный» от исковых требований во взаимодействии с Государственной корпорацией «Роскосмос». Возложена обязанность исполнить в течении трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу решить вопрос об освидетельствовании (строительно-технической экспертизе) объемов работ не сданных, но выполненных ранее ГУП «Дальспецстрой при Спецстрое России» по объекту Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С; возложении обязанности на ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» в течении трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу устранить выявленные нарушения требований градостроительного законодательства, изложенные в предписаниях 119 отдела ГАСН МО РФ по объекту Стартовый комплекс РН «Союз2» площадка 1С. в соответствии с проектной и рабочей документацией, а также нормативными техническими требованиями в области строительства (СНиП, СП, РД, ГОСТ): п.п. 4.14 Предписания -- от --; п. 13 Предписания -- от --; п.п. 5, 9, 10, 12 Предписания -- от --; п. 3 Предписания --//1 от --; п. 3 Предписания -- от --; п.п. 7, 8 Предписания 118/1 от --; п. 6 Предписания -- от --; п.5 Предписания 513/1 от --; п. 4 Предписания -- от --; п. 5 Предписания -- от --; п. 14 Предписания -- от --; п. 13 Предписания -- от --. Решение Свободненского городского суда от -- в указанной части отменено, производство по делу в указанной части прекращено.

Решение Свободненского городского суда изложено в следующей редакции: «На ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» возложена обязанность в рамках полномочий заказчика-застройщика по завершению строительства объекта незавершенного строительства по объекту «Стартовый комплекс РН «Союз 2» площадка 1С, в срок до 3-- определить конкретные виды и объемы работ, которые необходимо выполнить ФГУП «ЦЭНКИ» или иному Генеральному подрядчику для завершения работ и ввода объекта в эксплуатацию в соответствии с Федеральным законом -- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд». В третьем абзаце резолютивной части решения, указан срок исполнения решения суда: 31.12.2020». В остальной части решение Свободненского городского суда от -- оставлено без изменения, а апелляционные жалобы представителя Госкорпорации «Роскосмос» - ФИО5, представителя ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» - ФИО6 - без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от -- исправлены описки, допущенные в апелляционном определении судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от --. В мотивировочной и резолютивной части апелляционного определения в части указания даты и номеров предписаний правильно указать: «п.п. 5, 9, 10, 12 Предписания -- от 24.11.2016» вместо «п.п. 5, 9, 10, 12 Предписания -- от 24.11.2016»; «п. 14 Предписания -- от 25.11.2016» вместо «п. 14 Предписания -- от 25.11.2015»; «п.п. 5, 9, 10, 12 Предписания -- от 24.11.2016» вместо «п.п. 5, 9, 10, 12 Предписания -- от 24.11.2016»; «п. 14 Предписания -- от 25.11.2016» вместо «п. 14 Предписания -- от 25.11.2015». 

Определением судебной коллегии по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции от -- решение Свободненского городского суда амурской области от --, измененное апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от -- и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Амурского областного суда от -- оставлено без изменения, кассационные жалобы Госкорпорации «Роскосмос», ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» - без удовлетворения.

-- на основании решения суда выданы исполнительные листы серии ФС №--, --

-- на основании исполнительного листа серии ФС --, выданного по решению Свободненского городского суда, судебным приставом исполнителем МОСП по г. Свободному и Свободненскому району в отношении должника ФКУ «Дирекция Космодрома «Восточный» возбуждено исполнительное производство ---ИП. 

Должнику предложено в 5-дневный срок со дня получения постановления добровольно исполнить требования, указанные в исполнительном документе. При наличии чрезвычайных, объективно непредотвратимых обстоятельств и других непредотвратимых обстоятельств и других непредвиденных непреодолимых препятствий, находящихся вне контроля должника, могущих сделать невозможным добровольное исполнение исполнительного документа, должнику было предложено в срок, установленный для добровольного исполнения, надлежащим образом уведомить об этом судебного пристава-исполнителя. Кроме того, должник был предупрежден о том, что в случае неисполнения исполнительного документа без уважительных причин в срок, предоставленный для добровольного исполнения, с него будет взыскан исполнительский сбор в размере 50 000 рублей.

Установлено, что в 5-дневный срок решение суда исполнено не было.

-- судебным приставом-исполнителем МОСП п. г. Свободному и Свободненскому району УФСССП России по -- --

Статьей 112 Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" определено, что исполнительский сбор является денежным взысканием, налагаемым на должника в случае неисполнения им исполнительного документа в срок, установленный для добровольного исполнения исполнительного документа, а также в случае неисполнения им исполнительного документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении исполнительного производства. Исполнительский сбор зачисляется в федеральный бюджет (часть 1).

Исполнительский сбор устанавливается судебным приставом-исполнителем по истечении срока, указанного в части 1 названной статьи, если должник не представил судебному приставу-исполнителю доказательств того, что исполнение было невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (часть 2).

Исполнительский сбор устанавливается в размере семи процентов от подлежащей взысканию суммы или стоимости взыскиваемого имущества, но не менее одной тысячи рублей с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя и десяти тысяч рублей с должника-организации. В случае неисполнения исполнительного документа неимущественного характера исполнительский сбор с должника-гражданина или должника - индивидуального предпринимателя устанавливается в размере пяти тысяч рублей, с должника-организации - пятидесяти тысяч рублей (часть 3).

Суд вправе с учетом степени вины должника в неисполнении в срок исполнительного документа, имущественного положения должника, иных существенных обстоятельств отсрочить или рассрочить взыскание исполнительского сбора, а также уменьшить его размер, но не более чем на одну четверть от размера, установленного в соответствии с частью 3 поименованной статьи. При отсутствии установленных Гражданским кодексом Российской Федерации оснований ответственности за нарушение обязательства суд вправе освободить должника от взыскания исполнительского сбора (часть 7).

Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 30 июля 2001 г. N 13-П, исполнительский сбор представляет собой санкцию штрафного характера, то есть возложение на должника обязанности произвести определенную дополнительную выплату в качестве меры его публично-правовой ответственности, возникающей в связи с совершенным им правонарушением в процессе исполнительного производства. Из этого следует, что в качестве штрафной санкции исполнительский сбор должен отвечать вытекающим из Конституции Российской Федерации требованиям, предъявляемым к такого рода мерам юридической ответственности, одним из принципов которой является наличие вины как элемента субъективной стороны правонарушения (статьи 49, 50, 52 - 54, 55 Конституции Российской Федерации).

В соответствии с ч. 1 ст. 429 ГПК РФ по каждому решению суда выдается один исполнительный лист. Однако если решение принято в пользу нескольких истцов или против нескольких ответчиков, а также если исполнение должно быть произведено в различных местах, суд по просьбе взыскателя должен выдать несколько исполнительных листов с точным указанием места исполнения или той части решения, которая по данному листу подлежит исполнению. Письмом председателя Свободненского городского суда от -- исполнительные листы ФС №--, --, выданные по решению Свободненского городского суда от -- по гражданскому делу --, отозваны из МОСП по г. Свободному и Свободненскому району в связи с ошибкой, допущенной при их выдаче.

-- судебным приставом-исполнителем МОСП п. г. Свободному и Свободненскому району УФСССП России по Амурской области ФИО7 вынесено постановление СПИ об окончании ИП ---ИП, которым постановлено отменить все назначенные меры принудительного исполнения, а также установленные для должника ограничения.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд приходит к выводу о том, что имеют место объективные причины неисполнения Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» решения суда, при этом установлено отсутствие виновного противоправного бездействия должника – Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» в неисполнении решения суда в установленный судебным приставом-исполнителем срок, в связи с чем, заявленные административным истцом требования подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд

решил:

административный иск Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» к МОСП по городу Свободный и Свободненскому району УФССП России по Амурской области, судебному приставу-исполнителю МОСП по г. Свободный и Свободненскому району УФССП России по Амурской области ФИО2 об освобождении от взыскания исполнительского сбора удовлетворить. 

Освободить Федерального казенного учреждения «Дирекция космодрома «Восточный» от уплаты исполнительского сбора в сумме -- установленного -- судебным приставом-исполнителем МОСП по г. Свободному и Свободненскому району Управления ФССП по Амурской области по исполнительному производству ---ИП от --.

Решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в Амурский областной суд через Свободненский городской суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме. 

В окончательной форме решение принято 25 июня 2021 г.

Судья Свободненского

городского суда Амурской области О.Ю. Осокина