2-697/2026

УИД 22RS0013-01-2025-0070616-72

Мотивированное 

решение

 изготовлено 30.01.2026

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

16 января 2026 года г. Бийск, Алтайский край

Бийский городской суд Алтайского края в составе:

председательствующего судьи Константиновой Ю.А.,

при секретаре Сафронове А.С.,

с участием представителя истца ФИО1 – ФИО7

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к ООО «ЭКО ДОМ» о взыскании уплаченных по договору подряда денежных средств, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа, судебных расходов,

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью «ЭКО ДОМ» (далее – ООО «ЭКО ДОМ»), в котором просил взыскать с ответчика в пользу истца 825 000,00 руб., из которых: уплаченные по договору подряда 250 000,00 руб., неустойку в размере 250 000,00 руб., компенсацию морального вреда в размере 50 000,00 руб., штраф в размере 275 000,00 руб., а так же судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 10 000,00 руб.

В обоснование заявленных требований истец указал, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «ЭКО ДОМ» в лице директора ФИО3 (подрядчик) и ФИО1 (заказчик) заключен договор подряда №

В соответствии с п.1.1 договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить строительные работы по устройству укрепления габионными конструкциями береговой линии по адресу:: 

<

адрес> «Б», а так же иные возможные работы, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для выполнения условий настоящего договора, и сдать результат работ заказчику в сроки, предусмотренные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнение работ, принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

В соответствии с пунктами 2.1-2.3 договора, срок выполнения работ 1 месяц со дня начала выполнения работ. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 10 дней с даты оплаты заказчиком подрядчику аванса. Датой окончания работ по договору является дата подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ. В соответствии с пунктом договора 3.4.1 заказчик оплачивает подрядчику авансовый платеж, в размере 250 000,00 руб. не позднее 1 календарного дня с момента подписания настоящего договора сторонами. В соответствии с квитанцией к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в кассу ООО «ЭКО ДОМ» было внесено наличными денежные средства в сумме 250 000,00 руб. в качестве авансового платежа по указанному выше договору. В установленный договором срок ДД.ММ.ГГГГ подрядчик не приступил к выполнению работ в соответствии с условиями договора на участке заказчика. ДД.ММ.ГГГГ подрядчик путем переписки в мессенджере «WhatsApp» направил заказчику проект соглашения о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ на неприемлемых условиях для заказчика, ДД.ММ.ГГГГ заказчик направил в адрес подрядчика претензию в соответствии с Законом РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», с предложением вернуть в течении 10 дней уплаченные в качестве аванса деньги, и выплатить предусмотренные неустойку (пени) и штраф в добровольном порядке. Ответа на претензию от подрядчика не последовало. В связи с чем подрядчик вынужден обратиться с исковым заявлением в суд за защитой нарушенных прав.

С учетом положений Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О защите прав потребителей» в пользу истца с ответчика подлежит взысканию неустойка за просрочку выполнения работ и при просрочке удовлетворения требований потребителя при выполнении работ в размере 250 000,00 руб. за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (79 дней), (250 000,00 руб. * 79 дней * 3% = 592 500,00 руб.) поскольку согласно договора подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 10 дней с даты оплаты подрядчику аванса. Срок начала выполнения работ истек ДД.ММ.ГГГГ. С учетом того, что сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, то сумма неустойки подлежащей взысканию определяется в 250 000,00 руб.

Указывая на нарушение своих прав как потребителя, истец просит взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 50 000 руб., штраф в размере 275 000,00 руб. (250 000,00 руб.+ 250 000,00 руб.+ 50 000 руб. / 2).

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о месте и времени судебного разбирательства извещен надлежащим образом.

Представитель истца ФИО4, действующий на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования поддержали в полном объеме, просил удовлетворить заявленные требования.

Представитель третьего лица Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в г. Бийске Алтайского края ФИО5, действующая на основании доверенности, предоставила в судебное заседание отзыв на исковое заявление, в котором с требованиями истца согласилась, в отзыве так же заявила о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Представитель ответчика ООО «ЭКО ДОМ» в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещены в установленном законом порядке, доказательств уважительности неявки в судебное заседание не представил, не просил об отложении слушания дела, в связи с чем, с учетом правовых последствий, предусмотренных п. 1 ст. 165.1 ГК РФ, на основании ч. 3 ст. 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие неявившихся лиц.

Отношения, одной из сторон которых выступает гражданин, использующий, приобретающий, заказывающий либо имеющий намерение приобрести или заказать товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних, бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, а другой - организация либо индивидуальный предприниматель (изготовитель, исполнитель, продавец, импортер), осуществляющие продажу товаров, выполнение работ, оказание услуг, являются отношениями, регулируемыми Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст.702 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. К отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд) положения, предусмотренные данным параграфом, применяются, если иное не установлено правилами указанного Кодекса об этих видах договоров.

Согласно ст.740 ГК РФ по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену. В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору соответственно применяются правила параграфа 2 настоящей главы о правах заказчика по договору бытового подряда.

По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором (статья 426). К отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным настоящим Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними (ст. 730 ГК РФ).

Согласно ст. 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.

Подрядчик, который привлек к исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений пункта 1 настоящей статьи или договора, несет перед заказчиком ответственность за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении договора.

В силу пунктов 1, 2 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. Указанные в договоре подряда начальный, конечный и промежуточные сроки выполнения работы могут быть изменены в случаях и в порядке, предусмотренных договором.

Таким образом, из буквального толкования данной нормы следует, что по договору подряда, прежде всего, имеет значение достижение подрядчиком определенного результата, который передается заказчику. Предметом договора подряда является изготовление индивидуально-определенного изделия (вещи), а условия договора подряда направлены на определение взаимоотношений сторон в процессе выполнения обусловленных работ. Соответственно, существенными для договора подряда являются условия о содержании и объеме работ (предмете) и сроках их выполнения.

В силу п. 1 статьи 721 ГК РФ качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранить их предусмотрено в договоре подряда.

Пунктом 3 статьи 723 ГК РФ установлено, что, если отступления в работе от условий договора подряда или иные недостатки результата работы в установленный заказчиком разумный срок не были устранены, либо являются существенными и неустранимыми заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

Пунктом 3 статьи 730 ГК РФ предусмотрено, что к отношениям по договору бытового подряда, не урегулированным указанным Кодексом, применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, принятые в соответствии с ними.

Ст. 739 ГК РФ предусмотрено, что в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по договору бытового подряда заказчик может воспользоваться правами, предоставленными покупателю в соответствии со статьями 503 - 505 указанного Кодекса.

В силу статьи 4 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей" исполнитель обязан выполнить работу, качество которой соответствует договору. Право выбора способа восстановления права при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) предоставлено потребителю в соответствии со ст. 27 указанного закона.

Судом установлены следующие фактические обстоятельства.

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ООО «ЭКО ДОМ» заключен договор подряда №.

Согласно п.1.1 договора, подрядчик обязуется по заданию заказчика выполнить строительные работы по устройству укрепления габионными конструкциями береговой линии по адресу:: 

<

адрес> «Б», а так же иные возможные работы, определенно не упомянутые в договоре, но необходимые для выполнения условий настоящего договора, и сдать результат работ заказчику в сроки, предусмотренные настоящим договором, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнение работ, принять результат работ и оплатить их в соответствии с условиями договора.

Работы, подлежащие выполнению подрядчиком (перечень работ, объем и стоимость) определены сторонами ведомостью объемов работ и отражены в приложении № 1 к договору.

Работы, подлежащие выполнению подрядчиком: устройство основания под габионы и георешетку из ПГС; устройство габионов 1 х 1 х 2/0,5 х 1 х 1 с заполнением габионным камнем фр 80 х 150; устройство георешетки с заполнением щебнем фракции 40 х 70; устройство геотекстиля; услуги эвакуатора.

В соответствии с пунктами 2.1-2.3 договора, срок выполнения работ 1 месяц со дня начала выполнения работ. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 10 дней с даты оплаты заказчиком подрядчику аванса. Датой окончания работ по договору является дата подписания сторонами итогового акта приемки выполненных работ. В соответствии с пунктом договора 3.4.1 заказчик оплачивает подрядчику авансовый платеж, в размере 250 000,00 руб. не позднее 1 календарного дня с момента подписания настоящего договора сторонами.

ДД.ММ.ГГГГ согласно квитанции к приходному кассовому ордеру № от ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 в счет аванса по договору подряда № денежные средства в сумме 250 000,00 руб.

ДД.ММ.ГГГГ заказчик направил в адрес подрядчика претензию в соответствии с Законом РФ № 2300-1 «О защите прав потребителей», с предложением вернуть в течении 10 дней уплаченные в качестве аванса деньги, и выплатить предусмотренные неустойку (пени) и штраф в добровольном порядке.

Судом установлено, что согласно условиям договора подряда подрядчик обязан приступить к выполнению работ в течение 10 дней с даты оплаты заказчиком подрядчику аванса, предусмотренного пунктом 3.4.1 договора.

Учитывая оплату ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ аванса в сумме 250 000,00 руб., условие договора о сроке выполнения работ – 1 месяц с даты начала работ, строительные работы должны были быть окончены в срок не позднее ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик направил в адрес истца проект соглашения о расторжении договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

ДД.ММ.ГГГГ ФИО1 направил в адрес ООО «ЭКО ДОМ» претензию с указанием на нарушение сроков выполнения работ, а так же требованием о возврате оплаченного аванса в течении 10 дней.

В соответствии с ч.1 ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Согласно ст.717 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором подряда, заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе заказчика от исполнения договора. Заказчик также обязан возместить подрядчику убытки, причиненные прекращением договора подряда, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.

Договором подряда от 20.08.2025 предусмотрено право заказчика отказаться от исполнения договора и потребовать от подрядчика возмещения убытков, если подрядчик своевременно не приступил к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание в установленный договором срок становится явно невозможным. (п.6.2.2.).

Право на отказ от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), в случае если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, предусмотрено также ст.28 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей».

Разрешая требование истца о взыскании с ответчика оплаченной предоплаты в сумме 250 000,00 суд полагает его обоснованным, поскольку указанная сумма является убытками истца, учитывая то, что для завершения работ, истцу необходимо будет потратить указанную сумму. При этом в случае выполнения подрядных работ в согласованные сроки, истец не понес бы указанные расходы, учитывая твердую цену договора

Таким образом, суд приходит к выводу о том, что заказчик ФИО1 имел право на односторонний отказ от исполнения договора подряда. Вследствие чего, требования истца в части взыскания суммы оплаченной предоплаты в сумме 250 000,00 подлежат удовлетворению.

Разрешая требование о взыскании с ответчика в пользу истца неустойки за период с 01.09.2025 по 18.11.2025 в сумме 250 000,00 руб., суд исходит из следующего.

За нарушение сроков удовлетворения отдельных требований потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 «О защите прав потребителей».

В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.

Согласно пункту 5 статьи 28 закона «О защите прав потребителей», в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ).

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.

(в ред. Федерального закона от 17.12.1999 N 212-ФЗ).

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы (оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги).

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было.

С учетом правовой позиции, изложенной в п. 34 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2012 года № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», размер подлежащей взысканию неустойки (пени) в случаях, указанных в ст. 23, п. 5 ст. 28, ст.ст. 30 и 31 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также в случаях, предусмотренных иными законами или договором, определяется судом исходя из цены товара (выполнения работы, оказания услуги), существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, исполнителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) на день вынесения решения.

В договоре подряда от 20.08.2025 согласован общий срок выполнения работ по договору – 1 месяц с даты начала работ, данный срок ответчиком был нарушен, в связи с чем, истец вправе производить расчет неустойки от стоимости работ в размере 250 000,00 руб.

В связи с этим размер неустойки за период с 01.09.2025 по 18.11.2025, подлежащей взысканию с ответчика в пользу истца составляет 250 000,00 руб. (250 000,00 руб. х 79 дней. х 3% = 592 500,00 руб.).

В силу ст. 15 Закона о защите прав потребителей моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

В соответствии с разъяснениями, содержащимися в п. 45 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28.06.2012 года №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей», при решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя. Размер компенсации морального вреда определяется судом независимо от размера возмещения имущественного вреда, в связи с чем, размер денежной компенсации, взыскиваемой в возмещение морального вреда, не может быть поставлен в зависимость от стоимости товара (работы, услуги) или суммы подлежащей взысканию неустойки.

Исходя из вышеуказанных норм, компенсация морального вреда, причиненного потребителю, производится в случае нарушения как его неимущественных, так и имущественных прав, когда закон допускает компенсацию такого вреда.

Учитывая, что факт нарушения прав истца как потребителя нашел подтверждение в ходе рассмотрения дела, суд приходит к выводу о взыскании с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.

С учетом характера и объема причиненных истцу нравственных страданий, отсутствия сведений об индивидуальных особенностях, влияющих на степень указанных страданий, руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд полагает, что заявленный истцом размер компенсации морального вреда в 50 000 руб. является завышенным, в связи с чем подлежит снижению до 10 000 руб.

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей», при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Размер штрафа составит 255 000,00 руб. (250 000,00 руб. + 250 000,00 руб. + 10 000,00 руб.) х 50%).

В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по исковым заявлениям имущественного характера при цене иска от 300 001 руб. до 500 000 руб. госпошлина составляет 10 000 руб. плюс 2,5% суммы, превышающей 300 000 руб.

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации по исковым заявлениям имущественного характера, не подлежащего оценке, искового заявления неимущественного характера госпошлина для физических лиц составляет 3000 руб.

Таким образом, в силу требований ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации с ответчика в доход бюджета подлежит взысканию государственная пошлина в размере 18 000 руб. (15 000 руб. + 3 000 руб.)

Истцом при подаче иска оплачена государственная пошлина в размере 10 000,00 руб.

Оплата государственной пошлины истцом на сумму 10 000,00 руб. подтверждается чеком по операции от 18.11.2025.

С учетом удовлетворенных требований имущественного характера, суд на основании ч. 1 ст. 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации правомерно взыскал с ответчика в пользу истца расходы по оплате государственной пошлины, понесенные при подаче искового заявления в суд в размере 10 000,00 руб.

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить частично.

Взыскать с ООО «ЭКО ДОМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (ДД.ММ.ГГГГ года рождения, ИНН №, паспорт № выдан ДД.ММ.ГГГГ) денежные средства, уплаченные по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, в размере 250000 руб., неустойку за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 250000 руб., компенсацию морального вреда в размере 10000 руб., штраф в размере 255000 руб., судебные расходы в размере 10000 руб.

Взыскать с ООО «ЭКО ДОМ» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход муниципального образования город Бийск государственную пошлину в размере 18000 руб. (15000 руб. + 3000 руб.)

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.

Решение может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Бийский городской суд Алтайского края в течение месяца со дня принятия решения судом в окончательной форме.

Судья Константинова Ю.А.