УИД: 04RS0007-01-2024-007867-17 

Дело № 2-289/2024

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 января 2025 г. г. Улан-Удэ

Железнодорожный районный суд г. Улан-Удэ в составе судьи Калмыковой С.С., при секретаре Пиноеве С.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Советского района г.Улан-Удэ в интересах ФИО1, ФИО2, С.С.Ж., С.М.Ж., С.М.Ж. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда, 

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Советского района г.Улан-Удэ обратился в суд с иском к ПАО «Россети Сибирь» в котором просит обязать в ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 29.04.2024г. в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение к электросетям энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: 

<

адрес>, взыскать в пользу ФИО1 неустойку в размере 1169,77 руб., неустойку за период с 27.11.2024г. по день фактического исполнения обязательств, но не более 14 120,84 руб., компенсацию морального вреда в размере 15 000 руб. 

Исковые требования мотивированы тем, что 29.04.2024 между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ..., ФИО1 выполнил обязательства, предусмотренные договором, ПАО «Россести Сибирь» в шестимесячный срок работы, предусмотренные договором, не выполнил до настоящего времени.

В судебном заседании помощник прокурора района по доверенности ФИО3 исковые требования поддержала в полном объеме.

ФИО1 на судебное заседание не явился, о дате и времени рассмотрения дела извещен надлежащим образом.

ФИО4, одновременно являющаяся законным представителем несовершеннолетним С.С.Ж., С.М.Ж., С.М.Ж., исковые требования поддержала в полном объеме. 

Представитель ПАО «Россети Сибирь» на судебное заседание не явился, в адрес суда поступил письменный отзыв, в котором ответчик с иском не согласен. 

Изучив письменные доказательства, имеющиеся в материалах дела, выслушав истца, изучив отзыв ответчика, суд приходит к следующему. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности.

Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями (п. 1 ст. 309 ГК РФ).

Защита гражданских прав осуществляется способами, перечисленными в ГК РФ, а также иными способами, предусмотренными законом.

В силу абзаца восьмого статьи 12 ГК РФ одним из способов защиты является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Как установлено в ходе судебного разбирательства, между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 был заключен договор ... (далее по тексту-договор) об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства с учетом конкретных технических характеристик; заявитель обязалась оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

Согласно п.5 договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора. 

Оплата за технологическое присоединение ФИО1 произведена 30.04.2024г. в сумме 16 711,05 руб., установленной ответчиком в п.10 договора.

Как установлено судом и не оспаривается стороной ответчика, до настоящего времени договор об осуществлении технологического присоединения ПАО «Россети Сибирь» не исполнен. 

При таких обстоятельствах исковые требования о понуждении ПАО «Россети Сибирь» к исполнению договора об осуществлении технологического присоединения признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению. 

В соответствии с частью 2 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определенные действия, в случае, если указанные действия могут быть совершены только ответчиком, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Истец просит обязать исполнить условия договора в течение 1 месяца со дня вынесения настоящего решения.

Суд находит, что месячный срок для исполнения решения суда является разумным, что обеспечивает соблюдение баланса интересов сторон. 

Согласно п.17 договора сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, обязана оплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% от общего размера платы за каждый день просрочки.

Согласно расчетам истца, сумма неустойки за период с 30.10.2024-26.11.2024 составила 1 169,77 руб. из расчета: 28 дней*16711,05*0,25%. 

Ответчик расчет неустойки не оспорил, контррасчета не представил. Суд находит расчет, представленный истцом верным, принимает его во внимание, взысканию с ответчика в пользу ФИО1 подлежит сумма неустойки в размере 1169,77 руб. за период с 30.10.2024-26.11.2024, с начислением неустойки с 27.11.2024г. по день фактического исполнения обязательств, но не более 14 120,84 руб.

Суд считает, что на возникшие правоотношения распространяются положения Закона РФ "О защите прав потребителей", поскольку жилой дом используется истцом для личных и семейных нужд, в связи с чем требования истца о компенсации морального вреда суд находит обоснованными. 

Согласно ст. 15 Закона РФ "О защите прав потребителей" моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

Учитывая вину ответчика в неисполнении условий договора, а также учитывая требования разумности и справедливости, суд приходит к выводу о наличии оснований для взыскания с ПАО "Россети Сибирь" компенсации морального вреда в размере 3 000 руб.

В порядке ст.ст. 98 ГПК суд присуждает ко взысканию с ответчика в пользу истца оплаченную государственную пошлину в размере 3000 руб.

Руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

РЕШИЛ:

Исковые требования прокурора Советского района г.Улан-Удэ в интересах ФИО1, ФИО2, С.С.Ж., С.М.Ж., С.М.Ж. к ПАО «Россети Сибирь» об обязании осуществить технологическое присоединение к электрическим сетям, взыскании неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить частично. 

Обязать ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) исполнить в течение месяца с момента вступления настоящего решения в законную силу договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям ... от 30.04.2024г., осуществив технологическое присоединение к электросетям энергопринимающих устройств, находящихся по адресу: 

<

адрес>,

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) пользу ФИО1 неустойку в размере 1169,77 руб., рассчитанную за период с 30.10.2024-26.11.2024г., компенсацию морального вреда в размере 3000 руб.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) пользу ФИО1 неустойку с 27.11.2024г. по день фактического исполнения обязательств, но не более 14 120,84 руб.

В удовлетворении требований о взыскании полной суммы компенсации морального вреда отказать. 

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ИНН 

<

***>) в бюджет МО г.Улан-Удэ госпошлину в размере 3000 руб. 

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики Бурятия через Железнодорожный районный суд г.Улан-Удэ в течение месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме. 

Решение суда в окончательной форме изготовлено 23.01.2025г.

Судья С.С. Калмыкова