Дело ...

УИД 16RS0...-38

ЗАОЧНОЕ 

РЕШЕНИЕ

именем Российской Федерации

18 июня 2025 года ... РТ 

Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Карамова И.Д., 

при секретаре судебного заседания ФИО4, 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО2 к ФИО3 о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда,

установил:

ФИО2 обратился в суд с иском к ФИО3 о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда, в обосновании указав, что между истцом и ответчиком ... был заключен Договор подряда на изготовление и установку лестницы в помещении, расположенном по адресу: .... Согласно условиям договора, Ответчик обязался выполнить комплекс работ связанных с обеспечением услуг по изготовлению и монтажу лестницы в срок не позднее 3-х (трех) месяцев, за общую стоимость 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Оплата должна была производиться поэтапно, согласно графику, при подписании промежуточных актов выполненных работ: оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки первого марша; оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки второго марша; оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки третьего марша; Окончательная (оставшаяся) сумма оплаты производится после окончания всех работ и подписания Акта приемки работ. Во исполнение условий Договора на карту ФИО1 (на основании письменного заявления денежные средства переводить на карту своей дочери) перечислены денежные средства в размере 300000 рублей, что подтверждается чеками Сбербанка РФ от ..., 120000 рублей от 19.09.2023г. года. В нарушение условий договора Ответчик не выполнил работы в оговоренные сроки и к ... завершил только 45 % объема работ. Также качество выполненных работ не соответствует техническому заданию. Несмотря на неоднократные обращения истца с просьбой устранить недостатки и завершить работы, ответчик уклонился от выполнения своих обязательств. Претензия, направленная ответчику ..., осталась без ответа. На основании изложенного истец просит расторгнуть договор подряда на изготовление и установку лестницы от ..., заключенный между ФИО2. и ФИО3 Взыскать с Ответчика в пользу Истца сумму аванса в размере 420 000 рублей. Взыскать с Ответчика неустойку за нарушение сроков выполнения работ в размере 283 800 рублей. Взыскать с Ответчика компенсацию морального вреда в размере 10 000 рублей. Взыскать с Ответчика судебные расходы, включая госпошлину в размере 19 276 рублей.

Истец в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Ответчик в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Суд считает возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства в отсутствие ответчика.

Выслушав в судебном заседании стороны, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно статье 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему.

В соответствии со статьей 421 Гражданского кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица свободны в заключении договора и его условия определяются ими по своему усмотрению, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами. 

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора (пункт 1 статьи 432 ГК РФ). 

Пунктом 1 статьи 702 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

Если иное не предусмотрено договором подряда, работа выполняется иждивением подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (пункт 1 статьи 704 ГК РФ). 

В силу пункта 1 статьи 706 Гражданского кодекса Российской Федерации, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). 

Согласно пункту 1 статьи 708 ГК РФ в договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки). 

Основанием для возникновения обязательства по оплате выполненных подрядчиком работ является сдача их результата заказчику (статьи 711, 746 ГК РФ). Сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами (пункт 4 статьи 753 ГК РФ). 

Статьей 720 ГК РФ установлено, что заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них в случаях, если в акте либо в ином документе, удостоверяющем приемку, были оговорены эти недостатки либо возможность последующего предъявления требований об их устранении. 

В соответствии со статьями 309 и 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Из материалов дела следует, что ... между истцом (заказчик) и ответчиком (исполнитель) был заключён договор, в соответствии с которым исполнитель выполняет по заданию истца следующую услугу: изготовление и монтаж лестницы в доме по адресу: .... Договор заключен на срок три – четыре месяца. Стоимость оказанных услуг составляет 600000 рублей. Услуги оплачиваются поэтапно: оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки первого марша; оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки второго марша; оплата: авансовый платеж 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей выплачивается подрядчику после сдачи по Акту приемки третьего марша; Окончательная (оставшаяся) сумма оплаты производится после окончания всех работ и подписания Акта приемки работ (л.д.9).

В случае невыполнения сроков договора сторона, не выполнившая свои обязательства настоящего договора, несет материальную ответственность в размере 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки от общей суммы договора (пункт 5.2 договора).

Во исполнение условий Договора на карту ФИО1 (на основании письменного заявления ответчика денежные средства переведены на карту его дочери) перечислены денежные средства в размере 300000 рублей, что подтверждается чеками Сбербанка РФ от ..., 120 000 рублей от 19.09.2023г. года.

В нарушение условий договора Ответчик не выполнил работы в оговоренные сроки и к ... завершил только 45 % объема работ. Также качество выполненных работ не соответствует техническому заданию. Несмотря на неоднократные обращения истца с просьбой устранить недостатки и завершить работы, ответчик уклонился от выполнения своих обязательств. Претензия, направленная ответчику ..., осталась без ответа.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения в суд с настоящим иском.

В соответствии со статьями 702, 720, 740, 743, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации результат работ, ради достижения которого стороны вступают в подрядные отношения, определяется заданием заказчика, договором подряда и технической документацией, а его достижение подтверждается актами сдачи-приемки выполненных работ, подписанными сторонами без замечаний по объему и качеству выполненных работ.

В силу пункта 1 статьи 406 Гражданского кодекса Российской Федерации кредитор считается просрочившим, если он не совершил действий, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором, либо вытекающих из обычаев делового оборота или из существа обязательства, до совершения которых должник не мог исполнить своего обязательства.

В силу части 1 статьи 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу о том, что требования ФИО2 о взыскании с ФИО3 о взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда. 

С ответчика также подлежит взысканию в порядке части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации возврат уплаченной государственной пошлины в пользу истца в размере 19276 рублей 00 копеек.

Руководствуясь статьями 194-199, 233-235 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

исковые требования ФИО2 к ФИО3 о расторжении договора подряда, взыскании суммы аванса, неустойки, компенсации морального вреда удовлетворить. 

Расторгнуть договор подряда на изготовление и установку лестницы заключенного между ФИО2 и ФИО3 ....

Взыскать с ФИО3 (паспорт ...) в пользу ФИО2 (паспорт ...) аванса в сумме 420000 рублей 00 копеек, неустойку в размере за 473 дня просрочки в сумме 283800 рублей, компенсацию морального вреда в размере 10000 рублей, уплаченную государственную пошлину в размере 19276 рублей 00 копеек.

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого решения.

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении заявления об отмене этого решения суда.

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Судья «подпись» Карамов И.Д.