Дело № 2-3132/2021

УИД 21RS0025-01-2021-003067-89

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

22 июля 2021 г. г.Чебоксары

Московский районный суд города Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Ивановой Т.В.,

при секретаре судебного заседания Воронове М.В.,

с участием представителя истца ФИО1, представителя ответчика ООО «СЗ «СК «Центр» - ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО3 к Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр» о защите прав потребителей,

У с т а н о в и л :

Истица ФИО3 обратилась в суд с иском к ответчику ООО «СЗ «СК «Центр» о защите прав потребителей, мотивируя свое заявление тем, что ДД.ММ.ГГГГ. между сторонами был заключен договор участия в долевом строительстве №, объектом которого является 2-комнатная квартира под условным номером 

<

адрес> Плановый срок окончания строительства и ввод дома в эксплуатацию – до ДД.ММ.ГГГГг. Однако ответчиком допущена просрочка исполнения обязательства по передаче квартиры. Акт приема-передачи квартиры между сторонами подписан только ДД.ММ.ГГГГ.

Размер неустойка за нарушение срока передачи квартиры за период со ДД.ММ.ГГГГ. (за 239 дн.) составляет 216.763,68 руб.

Истец направил ответчику требование о выплате неустойки. Ответчиком требование истца было удовлетворено частично в размере 53.000 руб.

Таким образом, неустойка за нарушение срока передачи квартиры составляет 163.763,68 руб. (216.763,68-53.000).

Просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 163.763,68 руб., компенсацию морального вреда в размере в размере 5.000 руб., штраф на основании ст.13 Закона о защите прав потребителей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15.000 руб.

В последующем, представитель истца уточнил исковые требования от ДД.ММ.ГГГГ. и просил взыскать с ответчика, с учетом частичного удовлетворения требований, неустойку за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 72.088,75 руб., компенсацию морального вреда в размере в размере 4.000 руб., штраф на основании ст.13 Закона о защите прав потребителей, расходы на оплату услуг представителя в размере 15.000 руб. (л.д.62-63)

На судебное заседание истец ФИО3 не явилась, будучи извещенной о времени и месте рассмотрения дела, реализовала свое право участия в процессе через представителя.

В судебном заседании представитель истца ФИО1, действующий по доверенности, исковые требования с учетом уточнения поддержал, по доводам, изложенным в заявлении, просил иск удовлетворить. 

Представитель ответчика ООО «СК «СЗ «Центр» - ФИО2 в судебном заседании исковые требования в заявленном размере не признала, по основаниям, изложенным в письменном отзыве, указав, что Застройщик дважды извещал о продлении срока строительства объекта и предлагал истице подписать дополнительное соглашение о переносе срока, которое не было подписано сторонами. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию получено ДД.ММ.ГГГГ. Акт приема-передачи квартиры подписан сторонами ДД.ММ.ГГГГ. Неустойка за нарушение срока передачи квартиры должна быть рассчитана с ДД.ММ.ГГГГ. Нарушение срока строительства дома были вызваны объективными причинами. ДД.ММ.ГГГГ. истица направила ответчику требование о выплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры. Ответчиком платежным поручением от ДД.ММ.ГГГГ. оплачена неустойка в размере 52.000 руб., компенсация морального вреда в размере 1.000 руб., всего 53.00 руб. Просит применить ст.333 ГК РФ, снизить размер неустойки до 52.000 руб., моральный вред до 1.000 руб., отказав во взыскании остальной части, посчитав решение в данной части исполненным. Отказать во взыскании штрафа. Также просила уменьшить размер расходов на оплату услуг представителя. 

Выслушав пояснения представителей сторон, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст.309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

На основании ст.310 ГК РФ односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

Согласно ст.421 ГК РФ стороны свободны в заключении договора и в формировании всех его условий.

В соответствии с ч.1 ст.13 ФЗ «О защите прав потребителей» за нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.

Судом установлено, что ДД.ММ.ГГГГ между ООО «СЗ «СК «Центр» (Застройщик) и ФИО3 (Участник долевого строительства) был заключен договор № участия в долевом строительстве, по условиям которого Застройщик обязался своими силами и/или с привлечением других лиц построить многоквартирный жилой дом (

<

адрес>, и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома передать истцу объект долевого строительства, определенный договором. Объектом долевого строительства является 2-комнатная квартира под условным номером №, расположенная в 1 подъезде, на 2 этаже, блок секции 4.

Договор зарегистрирован в Управлении Росреестра по ЧР.

Согласно п.3.1 договора, цена объекта долевого строительства составляет 2.473.530 руб.

Согласно п.2.3 договора, планируемый срок окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – ДД.ММ.ГГГГг. Застройщик обязуется передать квартиру Дольщику в течении 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Обязательства Застройщика считаются исполненными с момента подписания сторонами передаточного акта приема-передачи квартиры. (п.4.6)

Истцом обязательства по оплате исполнены в полном объеме.

ДД.ММ.ГГГГ был утвержден Приказ о соответствии построенного объекта капительного строительства требованиям проектной документации.

ДД.ММ.ГГГГ администрация города Чебоксары выдала ООО «СЗ «СК «Центр» Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – многоквартирный жилой дом 

<

адрес>

ДД.ММ.ГГГГ ответчик направил истцу уведомление о вводе дома в эксплуатацию и необходимости подписания передаточного акта в срок с ДД.ММ.ГГГГ., которое получил представитель истца по доверенности ФИО4 ДД.ММ.ГГГГ

ДД.ММ.ГГГГ между сторонами был подписан акт приема-передачи 

<

адрес> в 

<

адрес>. Общая стоимость объекта составила 2.473.530 руб., расчет произведен в полном объеме.

Федеральным законом от 30.12.2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ) допускается возможность изменения договора в части продления срока передачи объекта долевого строительства в случае невозможности завершения строительства в предусмотренный договором срок. 

Ответчик неоднократно направлял в адрес истца уведомления о необходимости подписания дополнительного соглашения о переносе срока строительства объекта (ДД.ММ.ГГГГ.), которые оставлены истцом без удовлетворения.

Таким образом, дополнительное соглашение о переносе срока передачи объекта долевого строительства между сторонами не было подписано.

В соответствии со ст.8 Закона №214-ФЗ, передача объекта долевого строительства застройщиком и принятие его участником долевого строительства осуществляются по подписываемым сторонами передаточному акту или иному документу о передаче.

Передача объекта долевого строительства осуществляется не ранее чем после получения в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости.

После получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости застройщик обязан передать объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока.

Участник долевого строительства, получивший сообщение застройщика о завершении строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости в соответствии с договором и о готовности объекта долевого строительства к передаче, обязан приступить к его принятию в предусмотренный договором срок или, если такой срок не установлен, в течение семи рабочих дней со дня получения указанного сообщения.

При таких обстоятельствах, ответчиком обязательства по договору участия в долевом строительстве в части срока передачи квартиры истцу, нарушены.

От уплаты неустойки за нарушение указанного срока Застройщика не освобождает вина подрядчиков, субподрядчика, не исполнивших или не надлежаще исполнивших свои обязательства. Решения ответчиком вопросов технологического характера также не исключает правомерности требования истцов о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства.

При этом в ст.401 ГК РФ указано, что лицо, не исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. К таким обстоятельствам не относится, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнителя товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

В соответствии со ст.56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

К правоотношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином – участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей.

Согласно ч.2 ст.6 Закона № 214-ФЗ, в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

ДД.ММ.ГГГГ истица направила ответчику претензию о выплате неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период со ДД.ММ.ГГГГ в размере 216.763,68 руб., компенсации морального вреда.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик направил ответ на претензию, в котором указал, что расчет неустойки необходимо производить с ДД.ММ.ГГГГ., с учетом п.2.3 ДДУ и Постановления Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГг. №. С учетом баланса интересов обеих сторон, считают разумной к выплате неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 52.000 руб., компенсацию морального вреда в размере 1.000 руб., всего 53.000 руб.

ДД.ММ.ГГГГ ответчик платежным поручением № перечислил истцу неустойку за просрочку передачи квартиры и моральный вред всего в размере 53.000 руб.

Согласно п.2.3 договора, срок окончания строительства и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию определен ДД.ММ.ГГГГг., Застройщик обязуется передать квартиру Дольщику в течении 3 месяцев с момента получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

Таким образом, срок передачи истцу объекта долевого строительства определен до -ДД.ММ.ГГГГг. 

В соответствии со ст.193 ГК РФ, если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Последним днём срока для передачи квартиры, на основании п.2.3 договора, является ДД.ММ.ГГГГ. (воскресенье). По правилам ст.193 ГК РФ, ближайшим рабочим днём, является ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, первым днём просрочки, соответственно, является ДД.ММ.ГГГГ. (ст.191 ГК РФ).

Таким образом, ответчиком срок передачи квартиры истцу нарушен с ДД.ММ.ГГГГ.

При этом, согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020г. № 423 «Об установлении особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве», в связи с пандемией коронавируса неустойка (пени), иные финансовые санкции, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» за период со дня вступления в силу настоящего постановления (ДД.ММ.ГГГГг.) до ДД.ММ.ГГГГг., не начисляются.

С учетом уточнения требования, представитель истца просит взыскать неустойку за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ. (за 122 дн.) в размере 124.088,75 руб.

Проверив расчет сторон, суд производит свой расчет неустойки за нарушение срока передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ. (за 122 дн.), с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ 6,5% годовых, действовавшей на день, когда обязательство должно было быть исполнено (на ДД.ММ.ГГГГ.):

(2.473.530 руб. х 6,5%/300 х 122 дн.) х 2 = 130.767.29 руб.

При этом, суд рассматривает по заявленным истцом требованиям, таким образом, неустойка с учетом выплаченной суммы составит 72.088,75 руб.:

124.088,75 руб. – 52.000 руб. = 72.088,75 руб.

При этом, представителем ответчика было заявлено о применении ст.333 ГК РФ и уменьшении суммы неустойки до выплаченной неустойки в размере 52.000 руб., отказав во взыскании в остальной части.

В соответствии со ст.333 ГК РФ, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

В силу ст.ст.330, 331 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частичности в случае просрочки исполнения. Соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства.

Применительно к требованиям ст.333 ГК РФ, суд учитывает период просрочки, характер нарушенного обязательства, соразмерность нарушенного обязательства и размер установленной законом неустойки. Также при определении размера неустойки суд учитывает действия ответчика по вводу объекта в эксплуатацию, а также то, что поведение ответчика не являлось явно недобросовестным, что усматривается из отзыва. Застройщик предпринимал все зависящие от него меры для строительства объекта и ввода его в эксплуатацию. Кроме того, истцом не представлено суду доказательства несения ею каких-либо существенных негативных последствий нарушения ответчиком срока передачи квартиры, кроме самого срока, в течение которого не исполнено обязательство. При этом, из материалов дела следует, что истица зарегистрирована и проживает в 

<

адрес>, о чем свидетельствует копия паспорта. При этом, заявленный истцом размер неустойки за нарушение срока передачи квартиры признает чрезмерным, поскольку во много раз превышает ставку рефинансирования ЦБ РФ. При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым уменьшить размер неустойки за нарушение срока передачи квартиры до 52.000 руб.

При этом, неустойка в размере 52.000 руб. была в добровольном порядке перечислена ответчиком истцу ДД.ММ.ГГГГ., т.е. до подачи иска в суд (28.05.2021г. по почте).

При таких обстоятельствах, суд с учетом всех фактических обстоятельств приходит к выводу о том, что уплата ФИО3 неустойки в размере 52.000 руб. адекватна нарушенному интересу истца и соразмерна ему, и полагает судебное решение в части взыскания неустойки за период с ДД.ММ.ГГГГ. в размере 52.000 руб. считать исполненным.

Закон «О защите прав потребителей» не содержит каких-либо изъятий из общих правил начисления и взыскания неустойки.

Согласно п.1 ст.330 и ст.333 ГК РФ неустойкой признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки исполнения. А если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку.

Таким образом, гражданское законодательство предусматривает неустойку в качестве способа обеспечения исполнения обязательств и меры имущественной ответственности за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а право снижения неустойки предоставлено суду в целях устранения явной несоразмерности последствиям нарушения обязательств. Определяя размер неустойки, суд исходит из общих принципов гражданского законодательства о добросовестности и разумности применения прав, принадлежащих участникам гражданских правоотношений, а также разумного баланса между мерой ответственности, применяемой к нарушителю, и размером действительного ущерба, причиненного в результате конкретного правоотношения.

Кроме того, суд учитывает и правовую позицию Конституционного Суда Российской Федерации, выраженной в п.2 Определения № 263-О от 21.12.2000 г., согласно которой положения п.1 ст.333 ГК РФ содержат обязанность суда установить баланс между применяемой к нарушителю мерой ответственности и оценкой действительного, а не предполагаемого, размера ущерба. Предоставленная суду возможность снижать размер неустойки в случае ее чрезмерности по сравнению с последствиями нарушения обязательств является одним из правовых способов, предусмотренных в законе, которые направлены против злоупотребления правом свободного определения размера неустойки, т.е. по существу, - на реализацию требования ст.17 (ч.3) Конституции Российской Федерации, согласно которой осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц.

Истцом заявлено требование о компенсации морального вреда в размере 4.000 руб., с учетом перечисления ответчиком истцу в счет компенсации морального вреда 1.000 руб. (5.000-1.000).

Согласно ст.15 Закона «О защите прав потребителей» потребитель вправе требовать также компенсацию морального вреда за любое нарушение его прав. Размер компенсации морального вреда определяется судом. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потребителем убытков.

При решении судом вопроса о компенсации потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является установленный факт нарушения прав потребителя (п.45 Постановления Пленума ВС РФ № от ДД.ММ.ГГГГ).

Судом установлено, что ответчиком нарушены права потребителя – истца в части срока передачи квартиры (ДД.ММ.ГГГГ.).

Поскольку никаких доказательств, подтверждающих отсутствие вины в этом нарушении ответчик не представил, а в силу п.2 ст.401 ГК РФ, ч.1 ст.56 ГПК РФ, эти обстоятельства должен был доказать застройщик, то ответчик обязан компенсировать истцам моральный вред.

При этом, как уже указывалось выше, ответчик в добровольном порядке также перечислил истцу по платежному поручению от ДД.ММ.ГГГГ. и компенсацию морального вреда в размере 1.000 руб.

На основании изложенного, учитывая характер перенесенных истцом моральных переживаний, степени вины ответчика, а также руководствуясь принципами разумности и справедливости, суд определяет размер компенсации морального вреда в размере 5.000 руб. С учетом того, что ответчик перечислил истице в счет компенсации морального вреда 1.000 руб., то с ответчика в пользу истца подлежит взысканию компенсация морального вреда в размере 4.000 руб. Перечисленную в добровольном порядке сумму компенсации морального вреда в размере 1.000 руб., суд не может признать разумной и справедливой.

Согласно п.6 ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с исполнителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя. Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

Согласно п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей", при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду (пункт 6 статьи 13 Закона).

При этом необходимым условием взыскания спорного штрафа является уклонение обязанной стороны от добровольного исполнения соответствующего досудебного требования потребителя.

Между тем из материалов дела следует, что требования истца о выплате неустойки и частично компенсации морального вреда были удовлетворены ответчиком добровольно до предъявления иска в суд.

Таким образом, с ответчика в пользу истца подлежит взысканию штраф в размере 2.000 руб. (4.000:50%).

При этом, исключительных оснований для применения положений ст.333 ГК РФ и уменьшения размера штрафа, суд не усматривает.

Кроме того, истица просит взыскать с ответчика расходы на оплату услуг представителя в размере 15.000 руб. 

ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 (Исполнитель) и ФИО3 (Заказчик) был заключен договор об оказании юридических услуг №. Вознаграждение по договору составляет 15.000 руб., о чем представлена расписка от ДД.ММ.ГГГГ.

На основании ст.48 ГПК РФ, граждане вправе вести свои дела в суде лично или через представителей. Личное участие в деле гражданина не лишает его права иметь по этому делу представителя.

Согласно ст.94 ГПК РФ к издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся, в том числе, расходы на оплату услуг представителя.

В силу ч.1 ст.98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы.

Согласно п.1 ст.100 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, по ее письменному ходатайству суд присуждает с другой стороны расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах.

В соответствии с ч.1 ст.48 Конституции Российской Федерации, каждому гарантировано право на получение квалифицированной юридической помощи.

Разумность предела судебных издержек на возмещение расходов по оплате услуг представителя, требование о которой прямо закреплено в ст.100 ГПК РФ, является оценочной категорией и применяется по усмотрению суда в совокупности с собранными по делу доказательствами. 

При рассмотрении требования о взыскании расходов на представителя, суд руководствуется ст.100 ГПК РФ и позицией Конституционного Суда РФ, отраженной в Определении № 382-О от 17 июля 2007 г., согласно которой обязанность суда взыскивать расходы на оплату услуг представителя в разумных пределах является одним из предусмотренных законом способов, направленных против неосновательного завышения размера оплаты труда. 

Согласно п. 12, 13 Постановления Пленума Верховного суда РФ от 21.01.2016г. № 1 «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются судом с другого лица, участвующего в деле, в разумных пределах (ч.1 ст.100 ГПК РФ, ст.112 КАС РФ, ч.2 ст.110 АПК РФ). Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных представителем услуг, время, необходимое на подготовку им процессуальных документов, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства.

С учетом сложности и продолжительности дела, цены иска, степени участия в нем представителя (направление претензии, подготовка иска, уточненного иска), при этом, судебное заседание было отложено в связи с уточнением представителем истца заявленных требований. При этом, на основании претензии от ДД.ММ.ГГГГ. требования истца были удовлетворены частично ответчиком до подачи иска в суд. Суд также учитывает, что по данной категории дел не требуется большого сбора доказательств, имеется большая судебная практика, а также обеспечивая необходимый баланс процессуальных прав и обязанностей сторон, учитывая ходатайство представителя ответчика об уменьшении размера расходов на оплату услуг представителя, принимая во внимание требование о разумности и справедливости, суд полагает, что с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы на оплату услуг представителя в размере 5.000 руб.

В соответствии со ст.196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям.

В соответствии со ст.103 ГПК РФ государственная пошлина, от которой истец освобожден, взыскивается с ответчика пропорционально удовлетворенной части исковых требований.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр» в пользу ФИО3 неустойку за просрочку передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 52.000 руб., компенсацию морального вреда в размере 4.000 руб., штраф в размере 2.000 руб., а также расходы по оплате услуг представителя в размере 5.000 руб.

Решение суда в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр» в пользу ФИО3 неустойки за просрочку передачи квартиры за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере 52.000 руб. считать исполненным.

ФИО3 в удовлетворении остальной части заявленных требований, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр» в доход местного бюджета госпошлину в размере 300 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке через Московский районный суд г.Чебоксары ЧР в Верховный суд Чувашской Республики в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Председательствующий судья Т.В.Иванова

Мотивированное решение составлено 27 июля 2021 г.