77RS0018-02-2025-003783-30

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

29 октября 2025 года Никулинский районный суд г. Москвы

в составе судьи Самороковской Н.В.

при секретаре Артёмовой М.А.,  

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-5747/25 по иску ФИО1 к ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго») о признании условия договора недействительным, обязании произвести мероприятия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда,

УСТАНОВИЛ:

Истец обратился в суд с иском к ответчику, в котором просит суд признать недействительным условие договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42608917, заключенного между ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго») как сетевой организацией и истцом, как заявителем, содержащееся в пункте 5 указанного договора, согласно которому срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (четыре) месяца со дня заключения договора; обязать ПАО «Россети Центр» (Филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго») произвести мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств: малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, 

<

...>, уч. с кад. №69:10:0180801:41, в соответствии с договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42608917 в срок 10 дней со дня вступления решения в законную силу, но не ранее 10.04.2025 года; взыскать с ПАО «Россети Центр» в пользу ФИО1 по истечении 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу судебную неустойку из расчета 1 000 руб. за каждый день неисполнения решения суда в части исполнения обязательств по технологическому присоединению по день фактического исполнения; компенсацию морального вреда в размере – 10 000 руб.

Исковые требования мотивируя тем, что истцу на праве общей долевой собственности принадлежит ½ доля земельного участка, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 69:10:0180801:41, расположенный по адресу Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Юрьевское.

Между сторонами заключен публичный договор оферты об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42608917, путем направления договора в электронной форме, не требующей подписания договора.

В соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №42608917 заключенного между сторонами, ПАО «Россети Центр» приняло на себя обязательство по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств: малоэтажной Жилой застройки, расположенной по адресу: Тверская область, Калининский район, Каблуковское с/п, 

<

...>, уч. с кад. №69:10:0180801:41.

Пунктом 5 Договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяца со дня заключения договора.

При этом Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору (п. 21 Договора).

Плата за технологическое присоединение, определенная в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 года №861, истцом была внесена 27.02.2025 года, что является датой заключения договора.

В связи с чем, истцом выполнены условия для технологического присоединения к электрическим сетям. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом. 

Представитель ответчика ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго» в судебное заседание не явился, извещен судом надлежащим образом, представил в материалы дела возражения на иск. 

Суд счел возможным рассматривать дело в отсутствие лиц, извещенных судом надлежащим образом, в порядке ст. 167 ГПК РФ. 

Суд, огласив исковое заявление, исследовав письменные материалы дела, приходит к следующему выводу. 

Как установлено в судебном заседании, истцу на праве общей долевой собственности принадлежит ½ доля земельного участка, площадью 1500 кв.м., с кадастровым номером 69:10:0180801:41, расположенный по адресу Тверская область, муниципальный округ Калининский, деревня Юрьевское.

28.02.2025 года ПАО «Россети Центр» в лице филиала «Тверьэнерго» заключило договор №42608917 с техническими условиями (являющимися неотъемлемым приложением к договору №42608917 от 28.02.2025 г.) об осуществлении технологического присоединения необходимого для электроснабжения малоэтажной жилой застройки, расположенной по адресу: Тверская область, Калининский р-н, Каблуковское с/п, 

<

...>, на земельном участке кадастровый № 69:10:0180801:41.

Технологическое присоединение к электрическим сетям заявителя осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и заявителем.

Указанный договор является публичным.

Согласно п. 5 Договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 (шесть) месяцев со дня заключения настоящего договора.

20 марта 2025 года в адрес истца было направлено дополнительное соглашение к договору об осуществлении технологического присоединения, согласно которого срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 30 рабочих дней со дня заключения договора.

Договор №42608917 от 28.02.2025 года был поставлен на исполнение в РЭС, с мероприятиями, изложенными в п.12 Технических условий к договору. В настоящее время данный договор исполняется силами РЭС. Срок для выполнения сетевой организацией мероприятий по техническому присоединению определен до 10.04.2025 года. 

Как следует из п. 10.4 технических условий на присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке заявителя предусмотрено осуществление мероприятий по реконструкции ВЛ 0,4 кВ.

Согласно п. п. "б" п. 16 Правил подпунктом б) пункта 16 Правил технологического присоединения предусмотрено, что срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 30 рабочих дней - для заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, при одновременном соблюдении следующих условий: технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя осуществляется к электрическим сетям классом напряжения 0,4 кВ и ниже; расстояние от существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 15 метров; отсутствует необходимость урегулирования отношений с лицами, являющимися собственниками или иными законными владельцами земельных участков, расположенных полностью или частично между ближайшим объектом электрической сети, имеющим указанный в заявке класс напряжения и используемым сетевой организацией для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, и земельным участком заявителя; от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств, а также по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности); при несоблюдении любого из условий, предусмотренных абзацами вторым - шестым настоящего подпункта, в случае осуществления технологического присоединения к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих электрических сетей до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 4 месяца - для заявителей (в том числе указанных в пунктах 13(3), 13(5) и 13(6) настоящих Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 670 кВт; в случаях, не предусмотренных абзацами вторым - десятым настоящего подпункта: 15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до существующих электрических сетей составляет не более 300 метров; 6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(3), 13(5), 14 и 34 настоящих Правил, если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от существующих электрических сетей до границ участка заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности.

Поскольку техническими условиями, а именно п. 10.4 предусмотрена реконструкция ВЛ-0,4 кВ в части монтажа ответвительной арматуры ж/б опоры №14 ВЛ-0,4 кВ с реконструкцией ВЛ – 0,4 кВ фид. №1 КТП 10/0,4 кВ – 160 кВА №356 «Юрьевское», истец относится к категории заявителя, указанного в п. 14 Правил, следовательно, срок подключения верно определен в 6 мес.

Поскольку на момент обращения истца с иском срок технологического присоединения энергопринимающих устройств истца на земельном участке не истек, права истца не нарушены, оснований для удовлетворения исковых требований не имеется в полном объеме.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 56, 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 (ХХХХХ г.р., ИНН: ХХХХХ) к ПАО «Россети Центр» (филиал ПАО «Россети Центр» - «Тверьэнерго»( (ИНН: 

<

***>) о признании условия договора недействительным, обязании произвести мероприятия, взыскании неустойки, компенсации морального вреда – оставить без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы в Никулинский районный суд г. Москвы.

Судья: Самороковская Н.В.

Решение суда изготовлено в окончательной форме 16 января 2026 г. 

Судья: Самороковская Н.В.