№ 2-2339/2019

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 декабря 2019 года г. Ульяновск

Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в составе:

председательствующего судьи Зобовой Л.В., 

с участием представителя истца – ФИО1, 

представителей ответчика - ФИО2, ФИО3,

ответчика – ФИО4,

при секретаре Сергеевой Н.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда гражданское дело № 2-2339/2019 по иску общества с ограниченной ответственностью «Аксион» к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительный Сервис», ФИО4 о взыскании пени по договору подряда,

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью «Аксион» (далее – ООО «Аксион») обратилось в Железнодорожный районный суд г. Ульяновска с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительный Сервис» (далее – ООО «ДСС»), ФИО4 о взыскании пени по договору подряда. Исковые требования мотивированы тем, что 11 сентября 2018 года между ООО «ПСК Твой Дом» (генеральный подрядчик) и ООО «ДСС» (подрядчик) заключен договор подряда №. В соответствии с условиями данного договора ООО «ДСС» обязалось выполнить работы, предусмотренные договором подряда № от 11 сентября 2018 года, в установленные этим договором сроки. Основная часть работ подрядчиком выполнена. Сами работы полностью оплачены генеральным подрядчиком, за исключением суммы гарантийного удержания. Гарантийное удержание составляет 10 % от суммы (цены) договора (п. 1.7 договора подряда) и подлежит оплате генеральным подрядчиком подрядчику после выполнения подрядчиком ряда условий, определенных договором (п. 4.1.4 и др. договора подряда). К числу таких условий относятся: выполнение работ в полном объеме (п. 4.1.4.1 договора подряда); передача подрядчиком генеральному подрядчику документов, перечисленных в п. 1.33 статьи 1 договора подряда (п. 4.1.4.2 договора подряда) и др. Согласно пункту 2.6.3 результатом выполнения работ по договору подряда является, в том числе, передача генеральному подрядчику исполнительной документации в соответствии с «Регламентом оформления и предъявления исполнительной документации при производстве и сдаче строительно-монтажных работ», являющимся Приложением № к договору подряда. В пункте 1.33 договора подряда дано понятие исполнительной документации, к которой, помимо прочих документов, отнесены журнал производства работ и прочие журналы, ведущиеся при выполнении работ в соответствии с условиями договора, а также требованиями действующих строительных норм и правил, а также другая документация, предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации. Согласно пункту 5.2 договора подряда работы выполняются в сроки, определенные Графиком производства работ и финансирования (Приложение № к договору); при этом обязанность подрядчика передавать генеральному подрядчику комплект исполнительной документации в отношении завершенных видов работ по каждому этапу предусмотрена абзацем 1 пункта 4.1.2 договора подряда. В соответствии с Регламентом оформления и предъявления исполнительной документации при производстве и сдаче строительно-монтажных работ (Приложение № к договору) лицо, осуществляющее строительство, одновременно с предоставлением Актов выполненных работ 1 (формы КС-2) должно передать генеральному подрядчику полный комплект исполнительной документации, подписанный всеми ответственными сторонами, в 2-х экземплярах, оформленный в строгом соответствии с требованиями настоящего Регламента (п. 41). Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием акта приема-передачи в 2-х экземплярах, по одному техническому заказчику и лицу, осуществляющему строительство (подрядчику) согласно Приложению № (п. 46). В силу п. 7.17 договора подрядчик обязан предоставить генеральному подрядчику исполнительную документацию на выполненные работы, согласованную с ответственными представителями генерального подрядчика, в количестве 2-х экземпляров + 1 экземпляр на электронном носителе. Начало работ - 12.09.2018, окончание работ - 10.11.2018, срок передаче полного пакета исполнительной документации по договору - 12.11.2018 (пункты 5.1, 5.2). ООО «ДСС» не выполнило условия договора о передачи исполнительской документации. Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 09 августа 2019 года на ООО «ДСС» возложена обязанность передать ООО «ПСК Твой Дом» исполнительскую документацию по договору подряда № от 11.09.2018, а именно: журнал учета выполненных работ, журнал производства работ. Кроме того, работы по договору подряда были выполнены с нарушением сроков, о чем неоднократно сообщалось ООО «ДСС», в том числе, в претензии исх. № от 05.03.2019. Таким образом, часть работ по договору подряда ООО «ДСС» до настоящего времени не выполнена, а часть - выполнена с нарушением сроков. В соответствии с п. 21.11 договора подряда в случае нарушения подрядчиком и/или привлеченными субподрядчиками общего срока выполнения работ по договору, установленного графиком производства работ и финансирования, генеральный подрядчик вправе применить санкции в виде безотзывного штрафа, а именно: требовать от подрядчика уплаты пени (или произвести удержание в предстоящем платеже) в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента от суммы договора за каждый день просрочки общего срока выполнения работ, но не более 10 % (десять процентов) от договорной цены. В соответствии с абз. 3 и 4 п. 5.2 договора подряда окончание работ по договору подряда в полном объеме (передача полного пакета исполнительной документации по объекту) - 10 ноября 2018 года при условии своевременного исполнения генеральным подрядчиком обязательств по договору подряда. Срок передачи полного пакета исполнительной документации по договору подряда – 12 ноября 2018 года при условии своевременного исполнения генеральным подрядчиком обязательств по договору. Следовательно, по состоянию на дату предъявления настоящего иска количество дней просрочки составляет 313 дней. Договорная цена равна 28 537 060 руб. 80 коп. (п. 3.1 договора подряда). Следовательно, размер пени составляет 8 932 100 руб. 03 коп. Поскольку сумма пени ограничена договором подряда и не может превышать 10% от цены договора подряда, размер имущественной ответственности ООО «ДСС» равен 2 853 706 руб. 08 коп. 

Между ООО «ПСК Твой Дом» и ИП ФИО4 заключены: договор возмездного оказания правовых услуг от 01 апреля 2019 года, дополнительное соглашение № от 10 апреля 2019 года к договору возмездного оказания правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ, а также договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. В соответствии с пунктом 1.1 договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Цедент уступает Цессионарию право требования к должнику – ООО «ДСС», основанное на договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное право требования представляет собой принадлежащее ООО «ПСК Твой Дом» право требовать с ООО «ДСС» уплаты сумм пеней, штрафов, предусмотренных, в частности, пунктом 21.11 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за нарушение сроков выполнения работ по данному договору подряда. Размер уступаемого требования ограничен условиями договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет: 2 853 706 руб. 08 коп. - 10% от цены договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ».

ДД.ММ.ГГГГ между гражданином Российской Федерации ФИО4 и ООО «Аксион» заключен договор возмездной уступки права требования. В силу п. 1.1 данного договора цедент уступает цессионарию требование к ООО «ДСС», основанное на договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное право требования представляет собой принадлежащее Цеденту право требовать с ООО «ДСС» уплаты сумм пеней, штрафов, предусмотренных, в частности, пунктом 21.11 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за нарушение сроков выполнения работ по данному договору подряда. Размер уступаемого требования ограничен условиями договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет: 2 853 706 руб. 08 коп. - 10% от цены договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное право требования передано Цеденту ООО «ПСК Твой Дом» на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. Таким образом, право требовать от ООО «ДСС» уплаты денежной суммы (суммы пени) в размере 2 853 706 руб. 08 коп. в настоящее время принадлежит ООО «Аксион». В соответствии с договором возмездной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ (п. 2.1) «Цедент передает Цессионарию право требования, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, в счет оплаты задолженности Цедента перед Цессионарием, после чего эта задолженность подлежит уменьшению на сумму 110 000 руб.». В силу п. 3.5 договора возмездной уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ Цедент отвечает перед Цессионарием за исполнение обязательств должником, ООО «ДСС», только в пределах суммы 110 000 руб. в солидарном порядке. Указанная ограниченная ответственность Цедента возникает в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после поучения от Цессионария соответствующей претензии должник откажется перечислять или не перечислит Цессионарию каких-либо денежных средств или их размер будет составлять менее 110 000 руб. ООО «Аксион» направило первому ответчику претензию ДД.ММ.ГГГГ, однако ООО «ДСС» отказалось погашать имеющуюся задолженность. Таким образом, гражданин Российской Федерации ФИО4 за неисполнение ООО «ДСС» своих обязательств несет перед ООО «Аксион» имущественную ответственность в солидарном порядке в пределах 110 000 руб. Ссылаясь на условия вышеперечисленных договоров, ООО «Аксион» просит суд:

- взыскать с ООО «ДСС» в пользу ООО «Аксион» сумму пени в размере 2 743 706 руб. 08 коп.;

- взыскать с ООО «ДСС» и ФИО4 в солидарном порядке в пользу ООО «Аксион» сумму пени в размере 110 000 руб.

В судебном заседании представитель истца ООО «Аксион» - ФИО1 на удовлетворении исковых требований настаивал, привел доводы аналогичные указанным в иске.

Представитель ответчика ООО «ДСС» - ФИО2 исковые требования не признала в полном объеме, указав на несоблюдение истцом досудебного порядка урегулирования спора, указав на то, что все работы по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «ДСС» выполнены в установленные договором сроки, о чем свидетельствует подписание актов выполненных работ формы КС-2. Истцом не верно трактуются положения п. 21.11 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Представитель ответчика ООО «ДСС» - ФИО3 исковые требования не признал в полном объеме, привел доводы аналогичные указанным представителем ответчика ООО «ДСС» - ФИО2

Ответчик ФИО4 исковые требования признал частично в размере 110 000 руб., дав пояснения аналогичные указанным в исковом заявлении.

Представитель третьего лицо ООО «ПСК Твой Дом» в судебное заседание не явился, извещен надлежащим образом.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании ст. 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее - ГПК РФ) правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений.

В силу ст. 57 ГПК РФ доказательства представляются сторонами и другими лицами, участвующими в деле.

Действующее законодательство презюмирует разумность и добросовестность действий участников гражданского оборота. 

В силу положений ч. 1 ст. 46 Конституции РФ, ст. 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также нормы ч. 1 ст. 3 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, заинтересованным лицам предоставлено право обратиться в суд за защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законных интересов в порядке, установленном законодательством о гражданском судопроизводстве.

Из содержания ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации следует, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Условиями сделки может быть предусмотрено исполнение ее сторонами возникающих из нее обязательств при наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его сторон путем применения информационных технологий, определенных условиями сделки. 

Положениями ст. 421 Гражданского кодекса Российской Федерации предусмотрено, что граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами.

Договор считается заключенным, если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (ст. 432 ГК РФ).

Из материалов дела следует, что 11 сентября 2018 года между ООО «ПСК Твой Дом» (генеральный подрядчик) и ООО «ДСС» (подрядчик) заключен договор подряда №. 

В соответствии с п. 2.3 договора подряда подрядчик обязуется выполнить работу своими силами и/или с привлечением третьих лиц, с применением собственных материалов, механизмов и оборудования. При этом подрядчик несет полную ответственность за действия третьих лиц.

Из содержания п. 2.6 договора следует, что результатом выполнения работ, составляющих предмет настоящего договора, является:

- 2.6.1 выполненные подрядчиком работы в полном объеме и надлежащим качеством и в соответствии с условиями договора, принятые генеральным подрядчиком согласно договору, при условии устранения в полном объеме выявленных недостатков;

- 2.6.2 подписание генеральным подрядчиком/заказчиком-застройщиком акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- 2.6.3 передача Генеральному подрядчику:

- исполнительной документации в соответствии с «Регламентом оформления и предъявления исполнительной документации при производстве и сдаче строительно-монтажных работ», являющимся приложением № к настоящему договору;

- проекта производства работ (далее - ППР);

- комплекта рабочих чертежей со штампом Заказчика «В производство работ» и отметки производителя о выполнении работ в соответствии с проектом на каждом листе проекта.

В силу п. 2.7 договора подряда стороны осуществляют права, исполняют обязанности и несут ответственность в соответствии с положениями настоящего договора, Гражданского Кодекса Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами РФ.

В соответствии с п. 3.1 договора подряда договорная цена, подлежащая оплате подрядчику по настоящему договору, является твердой, определяется в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение № к настоящему договору) и составляет 28 537 060 руб. 80 коп., в т.ч. НДС 18% - 4 353 110 руб. 97 коп.

В силу п. 5.1 договора подряда начало работ - 12 сентября 2018 года, при условии своевременного исполнения генеральным подрядчиком обязательств по передаче строительной площадке под благоустройство и исходно-разрешительной документации, необходимой для выполнения работ по настоящему договору.

В соответствии с п. 5.2 договора подряда работы, предусмотренные настоящим договором (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода) выполняются в сроки, определенные графиком производства работ и финансирования (приложение № к настоящему договору). Передача результата работ и обеспечение строительной готовности в соответствии с техническим заданием. Окончание работ по договору в полном объеме (передача полного пакета исполнительной документации по объекту) – 10 ноября 2018 года, при условии своевременного исполнения генеральным подрядчиком обязательств по договору. Срок передачи полного пакета исполнительной документации по договору – 12 ноября 2018 года, при условии своевременного исполнения генеральным подрядчиком обязательств по договору.

Согласно п. 5.3 договора подряда датой завершения работ по договору в целом считается дата подписания акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), и предоставления иных документов, перечисленных в пункте 2.7. настоящего договора.

В соответствии с п. 21.11 договора подряда в случае нарушения подрядчиком и/или привлеченными субподрядчиками общего срока выполнения работ по договору, установленного графиком производства работ и финансирования (Приложение № к настоящему Договору), Генеральный подрядчик вправе применить санкции в виде безотзывного штрафа, а именно:

- требовать от подрядчика уплаты пени (или произвести удержание в предстоящем платеже) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы договора за каждый день просрочки общего срока выполнения работ, но не более 10% (десять процентов) от договорной цены.

Санкции в виде безотзывного штрафа по п. 21.11 удерживаются генеральным подрядчиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением подрядчика не менее, чем за 3 (три) календарных дня до момента осуществления окончательного платежа. Подрядчик соглашается на условия, оговоренные в настоящем пункте и подтверждает возможность удержания штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ по настоящему договору из суммы окончательного платежа.

Между ООО «ПСК Твой Дом» и ИП ФИО4 заключены: 

- договор возмездного оказания правовых услуг от 01 апреля 2019 года;

- дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ о внесении изменений в дополнительное соглашение № от ДД.ММ.ГГГГ к договору возмездного оказания правовых услуг от ДД.ММ.ГГГГ;

- договор уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с пунктом 1.1 договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ цедент уступает цессионарию право требования к должнику – ООО «ДСС», основанное на договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное право требования представляет собой принадлежащее ООО «ПСК Твой Дом» право требовать с ООО «ДСС» уплаты сумм пеней, штрафов, предусмотренных, в частности, пунктом 21.11 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за нарушение сроков выполнения работ по данному договору подряда. Размер уступаемого требования ограничен условиями договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет: 2 853 706 руб. 08 коп. - 10% от цены договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

Решением Арбитражного суда Ульяновской области от 07 августа 2019 года по делу № № на ООО «ДСС» возложена обязанность передать ООО «ПСК Твой Дом» исполнительскую документацию по договору подряда № от 11 сентября 2018 года, а именно: журнал учета выполненных работ, журнал производства работ. Кроме того, с ООО «ДСС» в пользу ООО «ПСК Твой Дом» взыскана неустойка в размере 1 000 руб. за каждый подлежащий передаче документ за каждый день просрочки исполнения судебного акта со дня его вступления в законную силу, но не более 1 000 000 руб.

При рассмотрении указанного спора в Арбитражном суде Ульяновской области интересы ООО «ПСК Твой Дом» представлял ФИО4

20 сентября 2019 года между гражданином Российской Федерации ФИО4 и ООО «Аксион» заключен договор возмездной уступки права требования. 

В силу п. 1.1 данного договора цедент уступает цессионарию требование к ООО «ДСС», основанное на договоре подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Указанное право требования представляет собой принадлежащее цеденту право требовать с ООО «ДСС» уплаты сумм пеней, штрафов, предусмотренных, в частности, пунктом 21.11 договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ, за нарушение сроков выполнения работ по данному договору подряда. Размер уступаемого требования ограничен условиями договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ и составляет: 2 853 706 руб. 08 коп. - 10% от цены договора подряда № от ДД.ММ.ГГГГ. Данное право требования передано цеденту ООО «ПСК Твой Дом» на основании договора уступки права требования от ДД.ММ.ГГГГ». Таким образом, право требовать от ООО «ДСС» уплаты денежной суммы (суммы пени) в размере 2 853 706 руб. 08 коп. в настоящее время принадлежит ООО «Аксион». 

В соответствии с 2.1 договора возмездной уступки права требования от 20 сентября 2019 года цедент передает цессионарию право требования, указанное в пункте 1.1 настоящего договора, в счет оплаты задолженности цедента перед цессионарием, после чего эта задолженность подлежит уменьшению на сумму 110 000 руб.

В силу п. 3.5 договора возмездной уступки права требования от 20 сентября 2019 года цедент отвечает перед цессионарием за исполнение обязательств должником, ООО «ДСС», только в пределах суммы 110 000 руб. в солидарном порядке. Указанная ограниченная ответственность цедента возникает в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней после поучения от цессионария соответствующей претензии должник откажется перечислять или не перечислит цессионарию каких-либо денежных средств или их размер будет составлять менее 110 000 руб. 

ООО «Аксион» направило первому ответчику претензию 24 сентября 2019 года, однако ООО «ДСС» отказалось погашать имеющуюся задолженность.

Обращаясь в суд с исковыми требованиями о взыскании пени, установленные п. 21.11 договора подряда № от 11 сентября 2018 года, заключенного между ООО «ПСК Твой Дом» и ООО «ДСС», ООО «Аксион» ссылается на решение Арбитражного суда Ульяновской области от 07 августа 2019 года по делу № №

В соответствии со ст. 431 Гражданского кодекса Российской Федерации при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон.

В соответствии с п. 21.11 договора подряда № от 11 сентября 2018 года, заключенного между ООО «ПСК Твой Дом» и ООО «ДСС» в случае нарушения подрядчиком и/или привлеченными субподрядчиками общего срока выполнения работ по договору, установленного графиком производства работ и финансирования (Приложение № к настоящему Договору), Генеральный подрядчик вправе применить санкции в виде безотзывного штрафа, а именно:

- требовать от подрядчика уплаты пени (или произвести удержание в предстоящем платеже) в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от суммы договора за каждый день просрочки общего срока выполнения работ, но не более 10% (десять процентов) от договорной цены.

Санкции в виде безотзывного штрафа по п. 21.11 удерживаются генеральным подрядчиком в одностороннем порядке с предварительным уведомлением подрядчика не менее, чем за 3 (три) календарных дня до момента осуществления окончательного платежа. Подрядчик соглашается на условия, оговоренные в настоящем пункте и подтверждает возможность удержания штрафных санкций за нарушение срока выполнения работ по настоящему договору из суммы окончательного платежа.

Таким образом, из буквального толкования п. 21.11 договора подряда № от 11 сентября 2018 года, заключенного между ООО «ПСК Твой Дом» и ООО «ДСС», следует, что указанная штрафная санкция предусмотрена за нарушение подрядчиком и/или привлеченными субподрядчиками общего срока выполнения работ по договору, установленного графиком производства работ и финансирования.

Таким образом, действия п. 21.11 договора подряда № от 11 сентября 2018 года не могут быть применены к отношениям, связанным с передачей исполнительской документации по договору подряда № от ДД.ММ.ГГГГ.

При таких обстоятельствах, оснований для удовлетворения исковых требований ООО «Аксион» о: 

- взыскании с ООО «ДСС» в пользу ООО «Аксион» суммы пени в размере 2 743 706 руб. 08 коп.;

- взыскании с ООО «ДСС» и ФИО4 в солидарном порядке в пользу ООО «Аксион» суммы пени в размере 110 000 руб., не имеется.

Поскольку при подаче иска ООО «Аксион» была предоставлена отсрочка по оплате государственной пошлины, то на основании ст. 98 ГПК РФ, с ООО «Аксион» в доход муниципального образования «город Ульяновск» подлежит взысканию государственная пошлина в размере 22 469 руб.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 194-199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

в удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью «Аксион» к обществу с ограниченной ответственностью «Дорожно-Строительный Сервис», ФИО4 о взыскании пени по договору подряда отказать в полном объеме.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аксион» в доход муниципального образования «город Ульяновск» государственную пошлину в размере 22 469 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ульяновский областной суд через Железнодорожный районный суд г. Ульяновска в течение месяца со дня принятия его в окончательной форме.

Судья Л.В. Зобова