РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

06.11.2019 г. Октябрьский районный суд г. Самары в составе:

председательствующего судьи Митиной Е.А.,

при секретаре судебного заседания Маркитановой М.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3488/19 по исковому заявлению ФИО1 к АО «ССК» о защите прав потребителей в связи с нарушением срока осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, с участием третьего лица - ООО «САМЭЛ»,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к АО «ССК», в котором просил обязать ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 29.05.2018г. в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу, осуществив технологическое присоединение энергопринимающих устройств, обеспечив электроснабжение земельного участка, расположенного по адресу: адрес; взыскать с ответчика неустойку за нарушение срока исполнения обязательств по договору в размере 4757 руб. 50 коп.; взыскать с ответчика денежную сумму в размере 5000 руб. в счет компенсации морального вреда; взыскать с ответчика расходы по оплате гос.пошлины в размере 300 рублей. 

В обоснование заявленных требований сослался на то, что он является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес. Между ним и АО «ССК» на основании заявки №... от 18.05.2018г. заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 29.05.2018г., приложением к которому являются технические условия. В соответствии с пунктом 1 указанного договора сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы по присоединению. Согласно пункту 5 договора срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора. В силу пункта 6 договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях. Пунктом 8 договора технологического присоединения предусмотрены обязанности потребителя по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению, указанных в технических условиях. В соответствии с п. 10 договора технологического присоединения, размер платы составляет 550 рублей, указанная сумма им оплачена дата О выполнении мероприятий, предусмотренных договором и техническими условиями, он уведомил ответчика. Он неоднократно обращался к ответчику с претензиями о нарушении срока выполнения работ, им был получен ответ о необходимости согласовать проектную документацию с 14-тью организациями, в связи с чем, процесс занимает длительный период. Таким образом, ответчик не выполнил в установленный Правилами, п.5 договора технологического присоединения срок работы по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к электрическим сетям. 

В судебном заседании истец -ФИО1 исковые требования поддержал, просил суд их удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика -АО «ССК» ФИО4, действующая на основании доверенности, в судебном заседании исковые требования признала частично: в части взыскания неустойки, в остальной части просила в удовлетворении исковых требований отказать, поддержала возражения, изложенные в отзыве на иск. 

Представитель третьего лица – ООО «СамЭЛ» ФИО5 в судебном заседании поддержал позицию представителя ответчика. 

Суд, выслушав пояснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и представленные суду доказательства, приходит к следующему.

Установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес 

Из материалов дела следует, что дата в АО «ССК» поступила заявка от ФИО2 на технологическое присоединение жилого дома по адресу: адрес 

дата в адрес ФИО2 на указанную заявку была направлена оферта договора №..., технические условия и счет на оплату. 

Согласно п.1 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 29.05.2018г., приложением к которому являются технические условия, сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение. 

Согласно пункту 5 вышеуказанного договора, срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения настоящего договора.

В силу пункта 6 договора технологического присоединения, сетевая организация обязуется надлежащим образом исполнить обязательства по договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию по технологическому присоединению до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

В соответствии с п. 10 договора технологического присоединения, размер платы за технологическое присоединение составляет 550 рублей.

Судом установлено и не оспаривалось ответчиком, что указанная сумма была истцом оплачена 01.08.2018 г., что подтверждается чеком по операции «Сбербанк онлайн». 

Как следует из пояснений представителя АО «ССК», на момент разрешения спора технологическое присоединение проходит документальное оформление, работы по технологическому присоединению будут выполнены в кратчайшие сроки.

В соответствии с п. 1 ст. 26 ФЗ N 35-ФЗ от 26.03.2003 года "Об электроэнергетике" технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Постановлением Правительства РФ N 861 от 27.12.2004 года утверждены Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (далее - Правила технологического присоединения), которые определяют порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации, определяют существенные условия договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям, порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения.

Согласно абз. 2 пункта 3 Правил технологического присоединения, независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя, сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

В соответствии с пунктом 6 Правил технологического присоединения, технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом в сроки, установленные настоящими Правилами. 

В силу пункта 16.3 Правил технологического присоединения, обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому присоединению в случае заключения договора распределяются следующим образом: заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя.

Установлено, что в предусмотренный договором срок мероприятия по технологическому присоединению ответчиком не были выполнены. 

Доводы ответчика о необходимости получения подрядчиком ООО «СамЭЛ» согласования прохождения трассы электроснабжения у Минлесхоза Самарской области, что повлекло увеличение сроков выполнения работ по спорному договору, не могут служить основанием для освобождения ответчика от возложенных на него обязательств, поскольку при заключении договора ответчик должен был предвидеть объем подлежащих выполнению работ.

В силу ст. 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно п. 1 ст. 310 ГК РФ, односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Одним из способов защиты гражданских прав в силу ст. 12 ГК РФ является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

На основании вышеизложенного, суд приходит к выводу об удовлетворении требований истца об обязании ответчика исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №149/6 от 29.05.2018г. путем осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: адрес в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу. 

В соответствии с п.17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №149/6 от 29.05.2018г. сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за технологическое присоединение по договору, за каждый день просрочки.

Согласно положениям п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что ненадлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельствах.

Истец просит взыскать неустойку за 173 дня просрочки в размере 4757 рублей 50 копеек за период с дата по дата 

Поскольку исполнение договора началось сторонами с 02.08.2018г. (с момента передачи истцом подписанного экземпляра договора ответчику), суд приходит к выводу о взыскании с ответчика неустойки за период с дата по дата в размере 4 702,5 рублей. 

Кроме того, истцом заявлено требование о взыскании компенсации морального вреда в размере 5 000 рублей. 

В соответствии со ст. 151 ГК РФ если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда.

Статьей 15 Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения исполнителем прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от размера возмещения имущественного вреда.

Поскольку ответчик не обеспечил своевременное технологическое присоединение энергопринимающих устройств на земельном участке истца, что повлекло нарушение прав истца как потребителя, то требования истца о компенсации морального вреда обоснованы и подлежат удовлетворению в разумных пределах в размере 2 000 рублей.

В соответствии с положениями ч.1 ст. 98 ГПК РФ с ответчика в пользу истца подлежат взысканию расходы по уплате государственной пошлины в размере 300 рублей.

На основании ч.1 ст. 103 ГПК РФ, с ответчика в доход местного бюджета подлежит взысканию госпошлина в размере 700 рублей. 

Руководствуясь ст.ст.194-199 ГПК РФ, 

РЕШИЛ:

исковые требования ФИО1 к АО «ССК» удовлетворить частично.

Обязать АО «ССК» исполнить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям №... от 29.05.2018г. путем осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения жилого дома по адресу: адрес в течение 10 дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с АО «ССК» в пользу ФИО1 неустойку за нарушение срока осуществления технологического присоединения за период с дата по дата в размере 4 702 рубля 50 копеек, компенсацию морального вреда в размере 2 000 рублей.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с АО «ССК» в пользу ФИО1 расходы по оплате госпошлины в размере 300 рублей. 

Взыскать с АО «ССК» в доход местного бюджета госпошлину в размере 700 рублей. 

Решение суда может быть обжаловано в Самарский областной суд через Октябрьский районный суд в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме. 

В окончательной форме решение суда изготовлено 13.11.2019 г.

Судья /подпись/ Е.А. Митина

Копия верна.

Судья: Секретарь: