Дело № 2-125/2025

УИД:17RS0017-01-2023-009687-88

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

5 марта 2025 года г. Кызыл

Кызылский городской суд Республики Тыва в составе председательствующего судьи Сватиковой Л.Т., при секретаре Сарыглар А.Ш., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора 

<

адрес> к Обществу с ограниченной ответственностью «

<

адрес>» о возложении обязанности устранения нарушений строительных норм,

с участием помощника прокурора 

<

адрес> ФИО6, представителя ответчика ФИО22., представителя третьего лица ООО «Водоканал-Сервис» ФИО23., представителя третьего лица Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва ФИО2 ФИО24 представителя третьего лица Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики ФИО2-ФИО29» 

<

адрес> Республики Тыва ФИО4, 

установил:

заместитель прокурора 

<

адрес> ФИО5 (далее - истец, прокурор) обратился в суд с иском (с учетом уточнений) к ответчику о возложении обязанности устранения нарушений строительных норм, указывая на то, что на территории 

<

адрес> в 2021 году завершено строительство и введено в эксплуатацию муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики ФИО2-Доржуевича (далее - МБОУ СОШ № 

<

адрес>). Выполнение работ по завершению строительства школы осуществлялось ООО «Бенконс» в рамках государственного контракта, заключенного ДД.ММ.ГГГГ с ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» на сумму 72 808 916 рублей (далее - Контракт).

Для выполнения работ ООО «СибТехЭнерго» ДД.ММ.ГГГГ разработана проектная документация «Образовательная школа на 825 мест в районе Левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва» (Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень технических мероприятий, содержание технологических решений», подраздел 3 «Система водоотведения») - далее проектная документация.

В соответствии с актом о приемке от ДД.ММ.ГГГГ заказчиком работы приняты в полном объеме без замечаний на сумму 64 691 573 рублей.

Из актов приемки выполненных работ следует, что ООО «Бенконс» в августе 2021 года выполнены работы в том числе по наружному водоснабжению и водоотведению, заказчиком данные работы приняты и оплачены.

В соответствии с требованиями ст. 94 Закона № 44-ФЗ, п. ДД.ММ.ГГГГ Контракта подрядчик обязан осуществить в присутствии уполномоченных представителей государственного заказчика комплекс работ по испытаниям и измерениям инженерных систем, их индивидуальной и комплексной наладке, пусконаладочные работы и в соответствии с действующими нормативными документами сдать их государственному заказчику и надзорным органам с оформлением актов рабочей комиссии о приемке инженерных систем. Приемка результатов работ по Контракту может осуществляться государственным заказчиком только при положительном результате проведенных испытаний и соответствия работ проектной документации и техническому заданию.

Поскольку построенные ООО «Бенконс» инженерно-технические сети подключены к сетям водоотведения городского округа, акты освидетельствования требовалось составлять с участием ООО «Водоканал- Сервис».

В нарушение вышеизложенных норм Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и условий контракта документы, подтверждающие проведение комплекса работ по испытаниям и измерениям инженерных систем, их приемку и соответствие проектной документации и техническому заданию отсутствуют.

С момента введения школы в эксплуатацию возникают проблемы, связанные с неисправностью канализационной системы МБОУ СОШ № 

<

адрес> в виде протечки между 1 и 2 остановками района Левобережных дачных обществ.

При этом ООО «Водоканал-Сервис» ДД.ММ.ГГГГ по результатам рассмотрения исполнительной документации по наружным сетям водоотведения школы в ООО «Бенконс» направлено письмо о несоответствии выполненных работ по установке канализационных сетей требованиям строительных норм и проектной документации (письмо ООО «Водоканал-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ №).

Прокуратурой 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ в присутствии представителей Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, ООО «Водоканал-Сервис», ГКУ РТ «Госстройзаказ», ООО «Бенконс», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №» проведена проверка с выходом на место, в ходе которой ООО «Водоканал-Сервис» вновь указано на неустранение подрядчиком ряда нарушений.

В нарушение проектной документации:

- отсутствуют аварийные источники электроснабжения КНС №, 2 и 3;

- отсутствует люк колодца перед КНС №;

- напорный канализационный коллектор от КНС № до камеры гашения не обследован. Существует вероятность его промерзания;

- электрооборудование КНС № и КНС № находится в нерабочем состоянии;

- КНС № не заводского исполнения, т.к. выполнена из пластикового колодца;

- КНС №, КНС № и КНС № имеют отклонения от проектных отметок. Необходимо выполнить геодезические изыскания.

- КНС № имеет отклонения от вертикальной оси.

В целях устранения нарушений прокуратурой 

<

адрес> ДД.ММ.ГГГГ директору ООО «Бенконс» вносилось представление об устранении нарушений.

Вопреки вышеуказанным требованиям закона ООО «Бенконс» до настоящего времени нарушения не устранены.

Просит возложить на ответчика обязанность в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований федерального законодательства путем:

1. Установки аварийных источников электроснабжения в КНС №, 2, 3.

2. Установки люка колодца перед КНС №.

3. Проведения обследования напорного канализационного коллектора от КНС № до камеры гашения.

4. Приведения электрооборудования КНС № и КНС № в рабочее состояние.

5. Замены колодца КНС № в соответствии с проектной документацией.

6. Устранения отклонений КНС № №, 2 и 3 от проектных отметок, отклонения КНС № от вертикальной оси.

7. Приведения в соответствие строительным нормам и проектной документации:

трубопровода O 160 мм (К15-К13) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К13-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К15-К13) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К12-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К14-К16) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К6-К7) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К4-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (ОТБ-5-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К1-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К11-К2) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода O160 мм (К2-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до0.015.

трубопровода O250 мм (К22-К23) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015.

трубопроводаO250 мм (К23-К24) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015.

трубопровода O250 мм (К24-К25) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015. Устранения в колодце К25 грунтовой воды Н (высотой) = 28 см.

трубопровода O250 мм (К26-К27) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга.

трубопровод O250 мм (К27-К29) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга.

установки колодца в углу поворота трубопровода O250 мм (К29-КО1).

трубопровода O300 мм (К34-К35) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015.

трубопровода O300 мм (К36-К37) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015.

трубопровода O300 мм (К38-К39) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015.

трубопровода O300 мм (К40-К41) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015.

трубопровода O300 мм (К41-К42) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга.

трубопровода O300 мм (К42-КО2) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга, а также установки колодца в углу поворота трубопровода.

установки колодца в углу поворота трубопровода O 300 мм (КГ2-К44).

трубопровода O300 мм (КГЗ-К48) смонтирован с уклоном 0.001, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015).

трубопровода O300 мм (К48-Ксущ.) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015.

отражения в плане и профиле исполнительной документации трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К2-КЗ).

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (КЗ-К4) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К4-К5) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015.

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К5-К6) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга.

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К6-К18) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга.

8. Демонтажа не предусмотренного проектной документацией трубопровода К1, идущего в колодец К5.

9. Демонтажа защитного слоя над трубопроводом из песчано-гравийной смеси.

10. Деталировки камер гашения напора.

11. Деталировки камер отключения.

12. Деталировки камеры переключения.

13. Утепления пенополиуретановой скорлупой канализационной сети, проложенную в зоне промерзания грунта.

14. Составления акта на скрытые работы, акта на гидравлическое испытание напорных и безнапорных трубопроводов с участием представителя ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал- Сервис»).

15. Оформления документации о проведении пусконаладочных работ по канализационно-насосным станциям.

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> ФИО6 исковые требования полностью поддержал. 

Представитель ответчика ФИО25., действующий на основании доверенности, с иском не согласился, пояснив, что работы были приняты заказчиком без замечаний; представлено письменное возражение. 

Представители третьих лиц: ООО «Водоканал-Сервис» - ФИО26 Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва -ФИО2 ФИО27., Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики ФИО2-ФИО28» 

<

адрес> Республики Тыва - ФИО4 просили иск прокурора удовлетворить. 

Представители третьих лиц Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,ООО «Сибэнергосервис», МБДОУ № «Салгал» в судебное заседание не явились, о месте и времени извещены. 

Выслушав участников процесса, изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно ст. 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену (пункт 1); Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором (пункт 2); В случаях, когда по договору строительного подряда выполняются работы для удовлетворения бытовых или других личных потребностей гражданина (заказчика), к такому договору применяются правила § 2 гл. 37 о правах заказчика по договору бытового подряда (п.3). 

Согласно пункту 1 статьи 754 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик несет ответственность перед заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта строительства, в том числе таких, как производственная мощность предприятия.

В силу пункта 1 статьи 721 Гражданского кодекса Российской Федерации качество выполненной подрядчиком работы должно соответствовать условиям договора подряда, а при отсутствии или неполноте условий договора требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, результат выполненной работы должен в момент передачи заказчику обладать свойствами, указанными в договоре или определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного договором использования, а если такое использование договором не предусмотрено, для обычного использования результата работы такого рода.

В соответствии со ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации подрядчик, если иное не предусмотрено договором строительного подряда, гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации объекта в соответствии с договором строительного подряда на протяжении гарантийного срока. Установленный законом гарантийный срок может быть увеличен соглашением сторон (п.1); Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим заказчиком или привлеченными им третьими лицами (п.2); Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает подрядчик (п.3); При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков, указанных в пункте 1 статьи 754 настоящего Кодекса, заказчик должен заявить о них подрядчику в разумный срок по их обнаружении (п.4).

Согласно ст. 756 Гражданского кодекса Российской Федерации при предъявлении требований, связанных с ненадлежащим качеством результата работ, применяются правила, предусмотренные пунктами 1 - 5 статьи 724 настоящего Кодекса. При этом предельный срок обнаружения недостатков, в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 724 настоящего Кодекса, составляет пять лет.

В соответствии со статьей 722 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае, когда законом, иным правовым актом, договором подряда или обычаями делового оборота предусмотрен для результата работы гарантийный срок, результат работы должен в течение всего гарантийного срока соответствовать условиям договора о качестве (пункт 1 статьи 721). Гарантия качества результата работы, если иное не предусмотрено договором подряда, распространяется на все, составляющее результат работы.

Согласно п. 1 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации в случаях, когда работа выполнена подрядчиком с отступлениями от договора подряда, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для предусмотренного в договоре использования либо при отсутствии в договоре соответствующего условия непригодности для обычного использования, заказчик вправе, если иное не установлено законом или договором, по своему выбору потребовать от подрядчика: безвозмездного устранения недостатков в разумный срок; соразмерного уменьшения установленной за работу цены; возмещения своих расходов на устранение недостатков, когда право заказчика устранять их предусмотрено в договоре подряда (ст. 397).

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен (п.2 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации). 

Как следует из материалов дела, между Государственным казенным учреждением Республики Тыва «Госстройзаказ» (заказчиком) и Обществом с ограниченной ответственностью «Бенконс» (подрядчиком) был заключен государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № «Завершение строительства «Общеобразовательной школы на 825 мест в районе левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва», в соответствии с которым государственный заказчик поручил, а подрядчик обязался выполнить работы по завершению строительства «Общеобразовательной школы на 825 мест в районе левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва» и передать результат работ государственному заказчику, а государственный заказчик обязуется принять результат работ, выполненных подрядчиком в полном объеме и в сроки, установленные контрактом, и оплатить обусловленную контрактом цену. Срок выполнения работ: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта. Цена контракта – 72 808 916 руб.

Дополнительным соглашением № к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № стороны пришли к соглашению уменьшить сумму контракта на 8 117 343 руб., без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; цена контракта составила 64 691 573 руб. 

В соответствии с Уставом Общества с ограниченной ответственностью «Бенконс», утв. решением единственного участника от ДД.ММ.ГГГГ №, предметом деятельности Общества является, в числе прочего, строительство жилых и нежилых зданий (п.5.1). 

Актом от 28.12.2021 сдачи-приемки к государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № «Завершение строительства «Общеобразовательной школы на 825 мест в районе левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва» заказчик в лице Врио директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» ФИО2 ФИО30. и подрядчик в лице генерального директора ООО «Бенконс» ФИО7 удостоверили, что работы по объекту «Завершение строительства «Общеобразовательной школы на 825 мест в районе левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва» по государственному контракту от ДД.ММ.ГГГГ № выполнены в полном объеме и в соответствии с требованиями государственного контракта, взаимных претензий у сторон не имеется. 

Соглашением сторон от ДД.ММ.ГГГГ государственный контракт от ДД.ММ.ГГГГ № «Завершение строительства «Общеобразовательной школы на 825 мест в районе левобережных дач по 

<

адрес> Республики Тыва» от 28.12.2021 был расторгнут. Пунктом 2 указано, что фактически выполненные работы по контракту приняты заказчиком на основании актов выполненных работ форм КС-3 №, обязательства по контракту сторонами выполнены на 64 691 573 руб.; стороны не имеют друг к другу претензий, связанных с отношениями сторон по контракту. 

ДД.ММ.ГГГГ Мэрией 

<

адрес> выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию - общеобразовательной школы на 825 мест в 

<

адрес>, расположенной по адресу: 

<

адрес>.

Распоряжением Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва от ДД.ММ.ГГГГ постановлено принять в государственную собственность Республики Тыва законченный строительством объект – нежилое здание общеобразовательной школы на 825 мест в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

Актом приема-передачи от ДД.ММ.ГГГГ Государственной казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ» передало, а Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва приняло в собственность Республики Тыва нежилое здание общеобразовательной школы на 825 мест в 

<

адрес>, расположенное по адресу: 

<

адрес>.

На основании постановления Мэрии 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № «О принятии имущества в муниципальную собственность городского округа «

<

адрес> Республики Тыва» и передаче его на праве оперативного управления в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № имени первого министра просвещения Тувинской Народной Республики ФИО2ФИО31» 

<

адрес> Республики Тыва», по договору о закреплении муниципального имущества от ДД.ММ.ГГГГ № и акту приема-передачи на праве оперативного управления от ДД.ММ.ГГГГ указанное нежилое помещение передано на праве оперативного управления в МБОУ СОШ № 

<

адрес>.

В письме-обращении к прокурору 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ заместитель мэра 

<

адрес> по социальной политике ФИО8 указывает, что с начала введения в эксплуатацию здания МБОУ СОШ № 

<

адрес>, расположенного по адресу: 

<

адрес>, по настоящий момент имеются значительные проблемы с наружными сетями водоотведения, возникшими в силу ряда грубейших нарушений строительных норм при укладке канализационной сети образовательного учреждения, допущенными ООО «Бенконс», выполнявшего работы по строительству здания. В связи со сложившейся ситуацией письменно информированы директор ООО «Бенконс» ФИО9, начальник Департамента по образованию мэрии 

<

адрес> ФИО10, директор ГКУ «Госстройзаказ» ФИО32., первый заместитель мэра 

<

адрес> ФИО11, заместитель мэра 

<

адрес> по строительству ФИО12, министр образования Республики Тыва ФИО13, министр строительства Республики Тыва ФИО33

Как следует из материалов дела, письмом от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Водоканал-Сервис» информирует ООО «Бенконс» о том, что, рассмотрев представленную в электронном виде исполнительную документацию по наружным сетям водоотведения объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач (привязка проекта повторного применения) по 

<

адрес> Республики Тыва», расположенного по адресу; 

<

адрес>, ул.ФИО17 (ЛДО), констатирует, что канализационная сеть проложена с грубейшими нарушениями всех строительных норм и эксплуатаций не подлежит. Требует устранить все нижеперечисленные замечания:

I. Система водоотведения:

1. Канализационные выпуски от школы приняты O 160 мм, в нарушение проектной документации (O 110мм). Кроме того, все канализационные выпуски школы смонтированы с уклоном менее 0.02, в нарушение строительных правил (далее СП).

2. Трубопровод O 160 мм (К15 - К13) смонтирован с уклоном 0.001, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

3. Трубопровод O 160 мм (К13 - К14) смонтирован без уклона (0.000), в нарушение СП (допустимый уклон от 0/008 до 0.015).

4. Трубопровод O 160 мм |К15 - 1-С 13) смонтирован с уклоном 0,001, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008-до 0.015).

5. Трубопровод O 160 мм (К12 - К14) смонтирован с уклоном 0.028, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

6. Трубопровод O160 мм (К 14 - К16) смонтирован с уклоном 0.026, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0,015).

7. Трубопровод O160 мм (К6 - К7) смонтирован без уклона (0,000), в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

8. Трубопровод O160мм (К4-КЗ) смонтирован с уклоном 0.004, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

9. Трубопровод O 160 мм (ОТБ-5 - К11) смонтирован с уклоном 0.006, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

10. Трубопровод O 160мм (K1 - К11) смонтирован с уклоном 0.023. в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

11. Трубопровод O 160 мм (К11 - К2) смонтирован с уклоном 0.027, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

12. Трубопровод O 160мм (К2 - КЗ) смонтирован с уклоном 0.031, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

13. Трубопровод O 250мм (К22 - К23) смонтирован с контруклоном +0.002, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.004 до 0.015).

14. Трубопровод O 250 мм (К23 - К24) смонтирован с уклоном 0.001. в нарушение СП (допустимый уклон от 0.004 до 0.015).

15. Трубопровод O 250мм (К24 - К25) смонтировал с уклоном 0,016, в нарушение CП (допустимый уклон от 0,004 до 0.015). В колодце К25 присутствует грунтовая вода Н= 28см. 

16. Трубопровод O 250 мм (К26 - К27) смонтирован с контруклоном +0.003, в нарушение СП (допустимый уклон от 0,004 до 0.015), Расстояние между колодцами 58.2м, в нарушение СП (максимальное расстояние 50м)

17. Трубопровод O 250мм (К27- К29) смонтирован без уклона (0,000), в нарушение СП (допустимый уклон от 0.004 до 0.015). Расстояние между колодцами 9.1.05м. в нарушение СП (максимальное расстояние 50м).

18. Трубопровод O 250мм (К29 - KOI) смонтирован без колодца на углу поворота, в

нарушение СП (повороты трубопровода следует предусматривать в колодцах). Расстояние между колодцами 70.96м, в нарушение СП (максимальное расстояние 50 м).

19. Трубопровод O 300 мм (К34 - К35) смонтировав с уклоном 0.002, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015).

20. Трубопровод O 300 мм (КЗ6-КЗ7) смонтирован с уклоном 0.002, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.01.5).

21. Трубопровод O 300 мм (К38 - К39) смонтирован с контруклоном +0.002, в нарушение СП (допустимый, уклон от 0.003 до 0.015).

22. Трубопровод O 300 мм (К40 - К41) смонтирован с уклоном 0.002, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015).

23. Трубопровод O 300мм (К41 - К42) смонтирован без уклона (0.000), в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015). Расстояние между колодцами 60.32м - в нарушение СП (максимальное расстояние 50м).

24. Трубопровод O 300мм (К42 - К02) смонтирован с контруклоном +0.002, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015). Расстояние между колодцами 65.82 м, в нарушение СП (максимальное расстояние 50м). Отсутствует колодец на углу поворота трубопровода, в нарушение СП (повороты трубопровода следует предусматривать в колодцах).

25. Трубопровод O 300 мм (КГ2 К44), расстояние между колодцами 53.02м, в нарушение СП (максимальное расстояние 50м).

26. Трубопровод O 300 мм (КГЗ - К48) смонтирован с уклоном 0.001, в. нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015).

27. Трубопровод O 300 мм (К48 - Ксущ.) смонтирован с уклоном 0.001, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.003 до 0.015). Кроме того, Ксущ. по факту проектируемый колодец (Кпроект.).

28. Трубопровод Детского сада O 160 мм (К2 - КЗ) не отражен на плане и профиле исполнительной Документации.

29. Трубопровод. Детского сада O 160 мм (КЗ К4) смонтирован с уклоном 0.0О7, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015).

30. Трубопровод Детского сада O 160 мм (К4 - К5) смонтирован с уклоном 0.024, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015) 

31. Трубопровод Детского сада O 160 мм (К5 - Кб) смонтирован с уклоном 0.002 в

нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0.015), расстояние между колодцами 75,46 м, в нарушение СП (максимальное расстояние 35м).

32. Трубопровод Детского сада O 160 мм (К6 - К18) смонтирован с уклоном 0.001, в нарушение СП (допустимый уклон от 0.008 до 0,015). Расстояние между колодцами 60м. в нарушение СП (максимальное расстояние 35м).

33. В колодец К5 с северо-восточной стороны входит трубопровод, К1 не предусмотренный проектной документацией. 

34. Устройство защитного слоя над трубопроводом из песчано-гравийной смеси не

допускается (СП 40-102-2000). 

35. На профиле не показан уровень грунтовых вод. 

36. Отсутствует деталировка камер гашения напора.

37. Отсутствует деталировка камер отключения.

38. Отсутствует деталировка камеры переключения.

39. Выполнить утепление пенополиуртановой скорлупой канализационную сеть, проложенную в зоне промерзания грунта. 

40. Отсутствует акт на скрытые работы, акты па гидравлическое испытание напорных и безнапорных трубопроводов.

41. Отсутствует документация о проведении пусконаладочных работ по канализационно-насосным станциям.

В письме от ДД.ММ.ГГГГ ООО «Водоканал-Сервис» информирует прокурора 

<

адрес> о том, что по результатам внешнего осмотра, проведенного ДД.ММ.ГГГГ дополнительно к замечаниям, изложенным в письме от ДД.ММ.ГГГГ добавился еще ряд дефектов. 

Уведомлением о результатах рассмотрения представления прокурора директор обособленного подразделения ООО «Бенконс» в 

<

адрес> сообщает, что основной причиной неисправности системы канализации являлось отсутствие должной эксплуатации и технического обслуживания смонтированного оборудования, что привело к выходу оборудования из строя. Работы по устройству внеплощадочной канализации выполнялись в 2020-2021 годах, после получения замечаний от ООО «Водоканал-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ были оперативно приняты меры к их устранению, что позволило системе канализации работать в штатном режиме. После выхода из строя канализации с декабря 2022 по июнь 2023 года ООО «Бенконс» за собственные средства был организован вывоз канализационных стоков ассенизаторскими машинами и восстановлена работоспособность оборудования системы канализации. За ненадлежащее выполнение своих должностных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечен главный инженер обособленного подразделения ООО «Бенконс» в 

<

адрес> ФИО14 (приложен приказ от ДД.ММ.ГГГГ №). 

Согласно п.ДД.ММ.ГГГГ государственного контракта от ДД.ММ.ГГГГ № подрядчик обязан осуществить в присутствии уполномоченных представителей государственного заказчика комплекс работ по испытаниям и измерениям оборудования инженерных систем, их индивидуальной и комплексной наладке, пусконаладочные работы и в соответствии с действующими нормативными документами сдать их государственному заказчику и надзорным органам с оформлением актов рабочей комиссии о приемке инженерных систем. Приемка результатов работ по контракту может осуществляться государственным заказчиком только при положительном результате проведенных испытаний и соответствия работ проектной документации и техническому заданию. 

Государственным контрактом предусмотрено, что подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с требованиями, указанными в Контракте. Гарантии качества распространяются на все выполненные подрядчиком работы, в том числе на оборудование, конструкции и изделия (п.9.1); подрядчик гарантирует соответствие используемых материалов, оборудования, конструкций и изделий при выполнении работ условиям контракта и законодательству Российской Федерации (п.9.2); подрядчик гарантирует устранение за свой счет в срок, указанный государственным заказчиком, все выявленные несоответствия использованных при выполнении работ по контракту оборудования, материалов, конструкций и изделий или их соответствующую замену (п.9.3); в течение гарантийного срока подрядчик за свой счет осуществляет проведение доработок и устранение несоответствий, выявленных в работах, а также в конструкциях, материалах и оборудовании, после приемки государственным заказчиком выполненных работ по контракту; гарантийный срок составляет 2,5 года с момента передачи результатов работ и продлевается на период устранения несоответствий (п.9.9).

Приказом Ростехнадзора от ДД.ММ.ГГГГ № были утверждены Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения (РД-11-02-2006), которые действовали на момент исполнения вышеуказанного государственного контракта и на момент подписания актов освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения составляются по результатам осмотра с участием представителя организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

Из представленных ответчиком актов освидетельствования скрытых работ видно, что участия в осмотре представитель ООО «Водоканал-Сервис» не принимал, хотя именно данная организация осуществляет эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения по водоснабжению и водоотведению, что сторонами не оспаривалось. 

Актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ, составленным помощником прокурора 

<

адрес> ФИО15, с участием представителей СГЖИ по 

<

адрес>, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Бенконс», МБОУ СОШ № 

<

адрес>, ООО «Водоканал-Сервис», зафиксировано, что замечания, указанные в письме ООО «Водоканал-Сервис» от ДД.ММ.ГГГГ, на исполнительную документацию, подрядчиком не устранены. 

В связи с имеющимся спором сторон судом дважды назначалась по настоящему делу строительно-техническая экспертиза экспертам, указанным ответчиком. В обоих случаях эксперты сообщили о невозможности проведения экспертизы. 

Таким образом, ответчиком не доказано, что им устранены все поименованные недостатки, а в силу ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Довод стороны ответчика о том, что государственным заказчиком этапы работ и завершенный строительством объект были приняты без замечаний, нельзя признать состоятельным, так как замечания ООО «Водоканал-Сервис» были выданы еще на исполнительную документацию, которую составлял сам подрядчик, а на осмотр и составление актов освидетельствования представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения по водоснабжению и водоотведению, не привлекался. При этом замечания и недостатки не были устранены подрядчиком, что им самим подтверждено вышеуказанной информацией прокурору и решением о привлечении главного инженера к дисциплинарной ответственности. 

При таких обстоятельствах иск прокурора подлежит удовлетворению, следует обязать Общество с ограниченной ответственностью «Бенконс» в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства путем:

1. Установки аварийных источников электроснабжения в КНС №, 2, 3;

2. Установки люка колодца перед КНС №;

3. Проведения обследования напорного канализационного коллектора от КНС № до камеры гашения;

4. Приведения электрооборудования КНС № и КНС № в рабочее состояние;

5. Замены колодца КНС № в соответствии с проектной документацией;

6. Устранения отклонений КНС № №, 2 и 3 от проектных отметок, отклонения КНС № от вертикальной оси;

7. Приведения в соответствие строительным нормам и проектной документации:

трубопровода O 160 мм (К15-К13) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К13-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К12-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К14-К16) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К6-К7) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К4-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (ОТБ-5-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К1-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К11-К2) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К2-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O250 мм (К22-К23) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015

трубопровода O250 мм (К23-К24) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015

трубопровода O250 мм (К24-К25) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, устранения в колодце К25 грунтовой воды Н (высотой) = 28 см

трубопровода O250 мм (К26-К27) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

трубопровода O250 мм (К27-К29) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

установки колодца в углу поворота трубопровода O250 мм (К29-КО1)

трубопровода O300 мм (К34-К35) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К36-К37) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К38-К39) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К40-К41) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К41-К42) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

трубопровода O300 мм (К42-КО2) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга, а также установки колодца в углу поворота трубопровода

установки колодца в углу поворота трубопровода O 300 мм (КГ2-К44)

трубопровода O300 мм (КГЗ-К48) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К48-Ксущ.) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

отражения в плане и профиле исполнительной документации трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К2-КЗ)

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (КЗ-К4) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К4-К5) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К5-К6) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К6-К18) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга; 

8. Демонтажа не предусмотренного проектной документацией трубопровода К1, идущего в колодец К5;

9. Демонтажа защитного слоя над трубопроводом из песчано-гравийной смеси;

10. Деталировки камер гашения напора;

11. Деталировки камер отключения;

12. Деталировки камеры переключения;

13. Утепления пенополиуретановой скорлупой канализационной сети, проложенной в зоне промерзания грунта;

14. Составления акта на скрытые работы, акта на гидравлическое испытание напорных и безнапорных трубопроводов, с участием представителя ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал-Сервис»);

15. Оформления документации о проведении пусконаладочных работ по канализационно-насосным станциям.

Поскольку прокурор в силу закона освобожден от уплаты государственной пошлины, то с ответчика на основании ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, ст. 333.19 Налогового кодекса Российской Федерации подлежит взысканию государственная пошлина в размере 300 рублей в бюджет муниципального образования городского округа «

<

адрес> Республики Тыва». 

р е ш и л :

иск заместителя прокурора 

<

адрес> к Обществу с ограниченной ответственностью «Бенконс» о возложении обязанности устранения нарушений строительных норм удовлетворить.

Обязать Общество с ограниченной ответственностью «Бенконс» (ИНН №) в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу устранить нарушения требований законодательства путем:

1. Установки аварийных источников электроснабжения в КНС №, 2, 3;

2. Установки люка колодца перед КНС №;

3. Проведения обследования напорного канализационного коллектора от КНС № до камеры гашения;

4. Приведения электрооборудования КНС № и КНС № в рабочее состояние;

5. Замены колодца КНС № в соответствии с проектной документацией;

6. Устранения отклонений КНС № №, 2 и 3 от проектных отметок, отклонения КНС № от вертикальной оси;

7. Приведения в соответствие строительным нормам и проектной документации:

трубопровода O 160 мм (К15-К13) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К13-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К12-К14) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К14-К16) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К6-К7) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К4-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (ОТБ-5-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К1-К11) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К11-К2) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O160 мм (К2-КЗ) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода O250 мм (К22-К23) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015

трубопровода O250 мм (К23-К24) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015

трубопровода O250 мм (К24-К25) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, устранения в колодце К25 грунтовой воды Н (высотой) = 28 см

трубопровода O250 мм (К26-К27) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

трубопровода O250 мм (К27-К29) с допустимым уклоном от 0.004 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

установки колодца в углу поворота трубопровода O250 мм (К29-КО1)

трубопровода O300 мм (К34-К35) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К36-К37) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К38-К39) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К40-К41) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К41-К42) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга

трубопровода O300 мм (К42-КО2) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015, установки колодцев на расстоянии до 50 м друг от друга, а также установки колодца в углу поворота трубопровода

установки колодца в углу поворота трубопровода O 300 мм (КГ2-К44)

трубопровода O300 мм (КГЗ-К48) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

трубопровода O300 мм (К48-Ксущ.) с допустимым уклоном от 0.003 до 0.015

отражения в плане и профиле исполнительной документации трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К2-КЗ)

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (КЗ-К4) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К4-К5) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К5-К6) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга

трубопровода Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № «Салгал» комбинированного вида 

<

адрес> Республики Тыва O 160 мм (К6-К18) с допустимым уклоном от 0.008 до 0.015, а также установки колодцев на расстоянии 35 м друг от друга; 

8. Демонтажа не предусмотренного проектной документацией трубопровода К1, идущего в колодец К5;

9. Демонтажа защитного слоя над трубопроводом из песчано-гравийной смеси;

10. Деталировки камер гашения напора;

11. Деталировки камер отключения;

12. Деталировки камеры переключения;

13. Утепления пенополиуретановой скорлупой канализационной сети, проложенной в зоне промерзания грунта;

14. Составления акта на скрытые работы, акта на гидравлическое испытание напорных и безнапорных трубопроводов, с участием представителя ресурсоснабжающей организации (ООО «Водоканал-Сервис»);

15. Оформления документации о проведении пусконаладочных работ по канализационно-насосным станциям.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Бенконс» (ИНН 

<

***>) государственную пошлину в размере 300 рублей в бюджет муниципального образования городского округа «

<

адрес> Республики Тыва». 

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Тыва через Кызылский городской суд в течение месяца со дня изготовления мотивированного решения. 

Мотивированное решение изготовлено 17 марта 2025 года. 

Судья Л.Т. Сватикова