УИД № 42RS0040-01-2025-001807-91

Номер производства по делу № 2-1178/2025

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации 

г. Кемерово 26 ноября 2025 года

Кемеровский районный суд Кемеровской области в составе председательствующего судьи Тупицы А.А.,

с участием помощника судьи Бойко С.В.,

при секретаре Климакиной Д.К., 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО «ГазСервисКузбасс» к ФИО1 о взыскании неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ, взыскании неустойки по договору на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме

У С Т А Н О В И Л:

ООО «ГазСервисКузбасс» обратилось в суд с иском к ФИО1 о взыскании неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ, взыскании неустойки по договору на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме; требования мотивировало тем, что между ООО «ГазСервисКузбасс» и ФИО1 был заключен договор от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на выполнение строительно-монтажных работ, согласно п. 1.1 которого ООО «ГазСервисКузбасс» приняло на себя обязательства по выполнению работ по разработке технической документации газоснабжения жилого дома, расположенного по 

<

адрес>, а также обязалось выполнить работы по строительству газопровода в границах земельного участка к жилому зданию и внутридомового газового оборудования. 

Со стороны ООО «ГазСервисКузбасс» обязательства по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 выполнены в полном объеме.

Также между ООО «ГазСервисКузбасс» и ФИО1 было заключено дополнительное соглашение от 10.01.2023 № 1 к договору на выполнение строительно-монтажных работ от 10.01.2023 №3-С/У/2023, в соответствии с п. 1 которого стоимость работ, выполняемых по основному договору, составила 209 560 рублей.

Общая стоимость работ, выполняемых по договору, с учетом скидки в размере 9 560 рублей, составила 200 000 рублей.

Согласно п. 2.3.1, п. 2.3.2 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 предварительная оплата в размере 150 000 рублей оплачивается в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора. 

Окончательный расчет по договору от 10.01.2023 №3-С/У/2023 в размере 50 000 рублей производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта выполненных работ

Работы выполнены в полном объеме, однако от приемки работ ФИО1 уклонилась.

ООО «ГазСервисКузбасс» 08.04.2025 направило ФИО1 акт приема-сдачи выполненных работ, просило подписать указанный акт и направить один экземпляр в адрес ООО «ГазСервисКузбасс». 

От получения почтовой корреспонденции ФИО1 уклонилась.

На 20.03.2025 ФИО1 в рамках договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на выполнение строительно-монтажных работ внесла предварительный платеж в размере 105 315 рублей.

Окончательный расчет по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 94 685 ФИО1 произведен 29.08.2025. 

После выполнения строительно-монтажных работ с целью пуска газа в домовладение, между ООО «ГазСервисКузбасс» и ответчиком заключен договор от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме.

Согласно п. 1.1 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 ООО «ГазСервисКузбасс» приняло на себя обязательство оказать услугу собственными и привлеченными силами - выезд специалиста для проверки вентиляционных каналов и дымовых каналов по 

<

адрес>

Со стороны ООО «ГазСервисКузбасс» обязательства по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 выполнены в полном объеме.

Согласно разделу 3 «Цена договора и порядок расчетов» договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 стоимость оказываемых услуг составляет 3 000 рублей. 

Услуги по договору оплачиваются в течении трех дней с момента подписания данного договора, 100 % предоплаты.

Претензий относительно качества и своевременности оказанных услуг от ФИО1 не поступало. 

Учитывая, что работы выполнены в полном объеме, 08.04.2025 ООО «ГазСервисКузбасс» в адрес ФИО1 направлен акт приема-сдачи выполненных работ, от получения корреспонденции она уклонилась. 

Расчет по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей до настоящего времени ФИО1 не произведен. 

В соответствии с п. 4.4 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в случае нарушения сроков оплаты выполненной работы исполнитель вправе потребовать взыскания с заказчика неустойки в размере 0,01 % суммы задолженности за каждый день просрочки.

08.04.2025 ООО «ГазСервисКузбасс» направило ФИО1 претензию с требованием уплатить сумму задолженности и пени за просрочку оплаты по вышеуказанным договорам, однако ФИО1 данную претензию добровольно не удовлетворила, от получения писем уклонилась. 

29.08.2025 ФИО1 оплатила задолженность по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 94 685 рублей, а также задолженность по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей.

ООО «ГазСервисКузбасс» с учетом уточненных исковых требований просит взыскать с ФИО1 неустойку за период 08.04.2025 – 29.08.2025 в размере 40 903 рубля 92 копейки по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на выполнение строительно-монтажных работ и неустойку в размере 43 рубля 20 копеек по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме. 

В суд от ФИО1 поступил отзыв на иск (л.д. 41-43), согласно которому требования являются необоснованными по следующим основаниям. 

Действительно, 10.01.2023 между ФИО1 и ООО «ГазСервисКузбасс» был заключен договор № 3-С/У/2023 по разработке технической документации газоснабжения жилого дома, расположенного по 

<

адрес>, а также истец обязался выполнить работы по строительству газового оборудования. 

Также 10.01.2023 между ними было заключено дополнительное соглашение № 1 на выполнение строительно-монтажных работ к договору от 10.01.2023 № 3- С/У/2023.

Стоимость услуг по указанному договору составила 200 000 рублей, с предварительной оплатой в размере 150 000 рублей.

10.01.2023 в рамках договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 произведена оплата предварительного платежа в размере 150 000 рублей.

После выполнения строительно-монтажных работ и с целью пуска газа в домовладение, 10.01.2023 между ними был заключен договор от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме. 

Цена указанной услуги составила 3 000 рублей.

Истец работы выполнил в полном объеме, однако до настоящего времени никаких актов приемки-сдачи выполненных работ не направил и не вручил; никаких телефонных звонков в адрес ответчика не поступало, хотя у истца имеется контактный телефон (указанный в документах и в заявке) и адрес жилого дома, в котором были оказаны услуги по заключенным договорам.

В адрес ФИО1 никакой корреспонденции, счетов, актов выполненных работ, УПД, претензий, досудебных претензий, заказных писем не поступало.

Почтовое отделение в 

<

адрес> имеется и работает в установленном порядке. 

Почтовыми услугами ответчик пользуется, никаких проблем до указанного времени с почтовым отделением не возникало. 

В очередной раз, при посещении почтового отделения 28.08.2025, ФИО1 стало известно о поступлении искового заявления ООО «ГазСервисКузбасс» с требованием взыскания суммы недоплат и неустойки по заключенным договорам. 

С учетом требований искового заявления, ФИО1 добровольно произвела оплату по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 50 000 рублей, и по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей. 

Кроме этого, ФИО1 взята справка в ООО «ГазСервисКузбасс» об отсутствии задолженности по заключенным договорам.

Кроме того, сумма взыскания не соответствует сумме долга по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023, поскольку ФИО1 произвела предварительную оплату 10.01.2023 в размере 150 000 рублей.

С связи с этим расчет пени неверен, поскольку в исковом заявлении сумма основного долга составляет 94 685 рублей. 

Также неясен период начисления и основания для начисления, соразмерность штрафа - сумме основного долга, поскольку по мнению ФИО1 оставшаяся по договору сумма долга составила 50 000 рублей, которую она должна была оплатить после подписания передаточных актов-приемки указанных работ в течении 3 (трех) дней.

Неустойка, начисленная за период просрочки до вынесения решения суда, и неустойка за период с момента вынесения решения до его фактического исполнения, являются различными санкциями за разные периоды нарушения обязательства. 

Также ФИО1 считает, что истец необоснованно произвел начисление пени и затянул время для подачи иска с целью увеличения размера неустойки, а потому просит снизить размер неустойки. 

В целом, ФИО1 просит отказать ООО «ГазСервисКузбасс» в удовлетворении заявленных исковых требований. 

В суд от ФИО1 поступил дополнительный отзыв на иск, согласно которому требования являются необоснованными по следующим основаниям. 

С учетом аргументов, указанных ООО «ГазСервисКузбасс» в исковом заявлении, ответчик добровольно произвел оплату по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 50 000 рублей и по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей, получил справку от ООО «ГазСервисКузбасс» об отсутствии задолженности и подписал УПД по просьбе истца задним числом, не задумываясь об умысле истца.

Со своей стороны ответчик добровольно исполнил все обязательства до момента проведения предварительного судебного заседания, однако сторона истца исковые требования не изменены, при этом никаких документов, указанных в исковом заявлении, второй стороне не представлено, проверить правильность начисления заявленных требований, неустоек не представилось возможным ввиду их отсутствия. 

С учетом сведений, указанных в исковом заявлении, ответчику неясны указания истца в иске и уточнении к нему об оплате ответчиком 20.03.2025 (а не 10.01.2023) 105 315 рублей (а не 150 000 рублей, как указано в квитанции от 10.01.2023, выданной истцом), выражения истца об уклонения от получения корреспонденции, подписания актов выполненных работ и счетов (УПД), претензий (при этом в суд не представлены документы, подтверждающие их направление в адрес ответчика).

При этом, из материалов дела усматривается, что истец направил претензию 07.04.2025 исх. № 15/25 с актом приема-сдачи выполненных работ от 10.01.2025 и счетом на оплату от 25.03.2025 № 62, в которой он просит подписать указанные документы и направить один экземпляр в адрес истца, при этом разъясняет ответчику, что он должен в течении 5 дней произвести оплату остаточной суммы, а в случае неоплаты он вынужден обратиться за защитой своих прав в судебном порядке.

Указанный факт противоречит доводам истца о том, что ответчик уклоняется от подписания указанных документов с даты заключения договора и до момента подачи иска, и подтверждает доводы ответчика о том, что он не мог знать, видеть и подписать указанные документы (акт приема-передачи и счет на оплату) по причине того, что указанные документы были изготовлены только в апреле 2025 года, о чем ответчик узнал из материалов дела, соответственно, подписал их в момент погашения задолженности по договорам после подачи искового заявления.

Соответственно, документ представленный истцом в судебное заседание 27.10.2025, не мог быть подписанным ответчиком в январе 2025 года, а был подписан ответчиком позднее.

Все вышеуказанное говорит о том, что истец только в апреле 2025 года подготовил закрывающие документы по заключенным договорам (т.е. по истечении 2,5 лет), соответственно, приобщенное доказательство истца: акты приема-передачи от 10.01.2025 по договорам не могут быть рассмотрены как доказательство вины и умысла ответчика, в связи с чем не имеют юридической силы, так как являются недопустимым доказательством и не могут использоваться для установления обстоятельств по делу.

ФИО1 в судебное заседание не явилась, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, об отложении рассмотрения дела не ходатайствовала, в соответствии со ст. 117, 167 ГПК РФ дело может быть рассмотрено в её отсутствие. 

Заслушав объяснения представителя ООО «ГазСервисКузбасс» ФИО2, действующей на основании доверенности от 01.04.2025 (срок до 31.12.2025) (л.д. 40), представителя ФИО1 ФИО3, действующего на основании доверенности от 10.09.2025, удостоверенной по месту работы ФИО1 в ООО «Торговый Дом «Кузнецкий Альянс» (срок по 31.12.2025) (л.д. 47), исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 12 ГК РФ, ст. 56 ГПК РФ каждое лицо имеет право на защиту своих гражданских прав способами, предусмотренными законом, правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как основание своих требований и возражений.

В соответствии со ст. 1, ст. 8 ГК РФ выбор способа защиты права избирается истцом, при этом он должен соответствовать характеру допущенного нарушения и удовлетворение заявленных требований должно привести к восстановлению нарушенного права или защите законного интереса.

В силу положений ст. 56 ГПК РФ, содержание которой следует рассматривать в контексте ч. 3 ст. 123 Конституции РФ и ст. 12 ГПК РФ, закрепляющих принцип состязательности гражданского судопроизводства и принцип равноправия сторон, каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Согласно ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательства возникают из договоров и других сделок, вследствие причинения вреда, вследствие неосновательного обогащения, а также из иных оснований, указанных в настоящем Кодексе. При установлении, исполнении обязательства и после его прекращения стороны обязаны действовать добросовестно, учитывая права и законные интересы друг друга, взаимно оказывая необходимое содействие для достижения цели обязательства, а также предоставляя друг другу необходимую информацию. 

Согласно п. 1 ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Согласно п. 1, п. 2, п. 4 ст. 421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, законом или добровольно принятым обязательством. Стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами. К договору, не предусмотренному законом или иными правовыми актами, при отсутствии признаков, указанных в п. 3 настоящей статьи, правила об отдельных видах договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами, не применяются, что не исключает возможности применения правил об аналогии закона (п. 1 ст. 6) к отдельным отношениям сторон по договору. Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422).

Согласно п. 1, п. 2 ст. 424 ГК РФ исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами и (или) органами местного самоуправления. Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотренных договором, законом либо в установленном законом порядке. 

Судом установлено, что между ООО «ГазСервисКузбасс» и ФИО1 заключен договор на выполнение строительно-монтажных работ от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 (л.д. 5-7), согласно которому исполнитель (ООО «ГазСервисКузбасс») принимает на себя обязательство по выполнению работ по разработке технической документации газоснабжения жилого дома, расположенного на земельном участке по 

<

адрес>, её согласованию газораспределительной организацией, а также исполнитель по заданию заказчика (ФИО1) обязуется в согласованный сторонами срок и в строгом соответствии с требованиями строительных норм и правил выполнить работы по строительству газопровода в границах земельного участка к жилому зданию и внутридомового газового оборудования (с учетом монтажа газораспределительного пункта шкафного, приборов учета и безопасности), расположенному по вышеуказанному адресу. 

Материалы, используемые при выполнении работ, приобретаются исполнителем. Стоимость материалов учтена в стоимости договора. 

Заказчик обязуется выполненные работы принять и оплатить.

Газоиспользующее оборудование не входит в стоимость работ по настоящему договору (п. 1.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Работы по настоящему договору выполняются на основании технических условий на технологическое присоединение к газораспределительной сети, разработанной и согласованной исполнителем (п. 1.2 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Стоимость работ, выполняемых исполнителем, по настоящему договору определяется сметой (приложение № 1), подписанной сторонами, и составляет 209 560 рублей. 

Стоимость работ является твердой и неизменной на весь срок выполнения работ (п. 2.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023).

Отчётный период 120 рабочих дней, в течение которого выполняются строительно-монтажные работы (п. 2.2 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023).

Предварительная оплата, в размере 167 648 рублей оплачивается в течение 3 (трех) дней с момента подписания настоящего договора (п. 2.2.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023).

Окончательный расчет по договору в размере 41 912 рублей производится в течение 3 (трех) дней с момента подписания акта выполненных работ.

Оплата работ и услуг производится любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ (п. 2.3 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023).

По окончании работы ООО «ГазСервисКузбасс» обязуется передать заказчику всю необходимую исполнительно-техническую документацию (п. 3.1.3 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Заказчик обязуется произвести оплату работ исполнителя (п. 3.2.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Срок выполнения работ составляет 120 рабочих дней со дня получения исполнителем письменного уведомления заказчика о производстве оплаты в соответствии с п. 2.2.1 и выполнении мероприятий, указанных в п. 3.2.2 – п. 3.2.5 (п. 4.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Приемка выполненных работ (этапа работ) осуществляется заказчиком с привлечением представителя исполнителя. По результатам приемки подписывается акт приема-сдачи выполненных работ (п. 5.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

В случае отказа от подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, заказчик обязан направить исполнителю мотивированный отказ о принятии работ. В случае не предъявления заказчиком замечаний в течение 10 дней со дня уведомления исполнителем об окончании работ, работы считаются принятыми по односторонне оформленному исполнителем акту (п. 5.1 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023). 

Между ООО «ГазСервисКузбасс» и ФИО1 также заключено дополнительное соглашение от 10.01.2023 (л.д. 7) к договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023, согласно которому стоимость работ, выполняемых исполнителем, определяется сметой (приложение № 1), подписанной сторонами, и составляет 209 560 рублей. Общая стоимость работ, выполняемых исполнителем по настоящему договору, с учетом скидки в размере 9 560 рублей, составляет 200 000 рублей. Стоимость работ является твердой и неизменной на весь срок выполнения работ.

Предварительная оплата в размере 150 000 рублей оплачивается в течение 3 дней с момента подписания настоящего договора.

Окончательный расчет по договору в размере 50 000 рублей производится в течение 3 дней с момента подписания акта выполненных работ. 

Оплата работ и услуг производится любым способом, не противоречащим действующему законодательству РФ».

Условия настоящего дополнительного соглашения действуют с момента подписания до окончания действия договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023.

ФИО1 предварительную оплату в размере 150 000 рублей по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 внесла 10.01.2023 (л.д. 44). 

Согласно универсальному передаточному документу (УПД – это первичный учётный документ, который объединяет в себе функции счёта-фактуры и первичного учётного документа (накладной, акта выполненных работ/услуг; он упрощает документооборот, заменяя сразу несколько бумаг одним; УПД может использоваться как для налогового учёта, так и для подтверждения факта передачи товаров или оказания услуг), подписанному ФИО1 10.01.2025 (л.д. 34), своей подписью она подтвердила выполнение ООО «ГазСервисКузбасс» работ в рамках договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на сумму 200 000 рублей. 

ООО «ГазСервисКузбасс» 08.04.2025 (л.д. 13) направило в адрес ФИО1 претензию (л.д. 12), в которой указало, что на 20.03.2025 ФИО1 оплатила предварительный платеж в размере 105 315 рублей, и потребовало произвести окончательный расчет по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 94 685 рублей в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.

ФИО1 услуги ООО «ГазСервисКузбасс» по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в размере 50 000 рублей доплатила 29.08.2025 (л.д. 45). 

Судом также установлено, что между ООО «ГазСервисКузбасс» и ФИО1 заключен договор на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 (л.д. 14), согласно которому исполнитель (ООО «ГазСервисКузбасс») принимает на себя обязательство по заданию заказчика оказать услугу собственными и привлеченными силами - выезд специалиста для проверки вентиляционных каналов и дымовых каналов по адресу: по 

<

адрес>, а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п. 1.1 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023). 

Начало оказания услуг - с даты оплаты данного договора (п. 1.2 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023). 

Заказчик обязуется оплатить услуги исполнителя в соответствии с разделом 3 настоящего договора (п. 2.2.2 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023).

Стоимость оказываемых услуг составляет 3 000 рублей (п. 3.1 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023).

Услуги оплачиваются в течении трех дней с момента подписания данного договора, 100 % предоплаты (п. 3.2 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023). 

В случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 3.2 настоящего договора, исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 % от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки (п. 4.4 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023).

Согласно универсальному передаточному документу, подписанному ФИО1 10.01.2025 (л.д. 35, 36), своей подписью она подтвердила выполнение ООО «ГазСервисКузбасс» работ в рамках договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на сумму 3 000 рублей. 

ООО «ГазСервисКузбасс» 08.04.2025 (л.д. 18) направило в адрес ФИО1 претензию (л.д. 17), в которой указало, что на 20.03.2025 ФИО1 не оплатила денежные средства в размере 3 000 рублей, и потребовало произвести окончательный расчет по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей в течение 5 рабочих дней со дня получения претензии.

ФИО1 услуги ООО «ГазСервисКузбасс» по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в размере 3 000 рублей оплатила 29.08.2025 (л.д. 35). 

В соответствии со ст. 309, п. 1 ст. 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или иными правовыми актами.

Как следует из представленных по делу доказательств, ФИО1 приняла выполненные ООО «ГазСервисКузбасс» работы не позднее 10.01.2025, что подтвердила своей подписью. 

Доводы представителя ФИО1 ФИО3 о том, что акты выполненных работ были подписаны по просьбе ООО «ГазСервисКузбасс» «задним числом», то есть от 10.01.2025, а по факту 29.08.2025 (в день внесения оставшейся задолженности по договорам), суд считает несостоятельными, поскольку ФИО1 не оспаривается, что фактически ООО «ГазСервисКузбасс» условия договоров от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 и от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в полном объеме выполнило еще в 2023 году, и она беспрепятственно пользовалась услугами по газоснабжению. 

Кроме того, в силу п. 5.1, п. 5.2 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 приемка выполненных работ (этапа работ) осуществляется заказчиком с привлечением представителя исполнителя; по результатам приемки подписывается акт приема-сдачи выполненных работ (п. 5.1).

В случае отказа от подписания акта приёма-сдачи выполненных работ, заказчик обязан направить исполнителю мотивированный отказ о принятии работ. В случае не предъявления заказчиком замечаний в течение 10 дней со дня уведомления исполнителем об окончании работ, работы считаются принятыми по односторонне оформленному исполнителем акту (п. 5.2). 

Исходя из условий данных пунктов договора, именно заказчик должен инициировать приемку выполненных работ. 

Ответчик полное выполнение условий договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в 2023 году не оспаривает, газом пользуется, тем не менее свою обязанность по своевременной плате данного договора не исполнил. 

Исходя из условий договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 заказчик в принципе должен был оплатить договор в полном размере в течение 3 дней со дня его подписания (п. 3.2 договора). 

Согласно п. 1 ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

Согласно ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность соглашения о неустойке.

Согласно п. 7.3 договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 в случае нарушения сроков оплаты выполненной работы исполнитель вправе потребовать взыскания с заказчика неустойки в размере 0,3 % суммы задолженности за каждый день просрочки.

Согласно п. 4.4 договора от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 в случае нарушения срока оплаты услуг, установленного п. 3.2 настоящего договора, исполнитель вправе потребовать от заказчика уплаты неустойки в размере 0,01 % от не оплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

Так как ФИО1 акт выполненных работ подписала 10.01.2005, а остаток задолженности по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 внесла 29.08.2025, а полную задолженность по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 оплатила также 29.08.2025, то истец имеет право на взыскание неустойки в связи с просрочкой оплаты по этим договорам. 

Согласно п. 3 ст. 196 ГПК РФ суд принимает решение по заявленным истцом требованиям. Однако суд может выйти за пределы заявленных требований в случаях, предусмотренных федеральным законом.

ООО «ГазСервисКузбасс» заявлено требование о взыскании неустойки, начиная с 08.04.2025. 

Указанная дата не противоречит условиям заключенных между сторонами договоров. 

В рамках договора от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 ООО «ГазСервисКузбасс» исчислена неустойка на сумму 94 685 рублей, и данное обстоятельство истец связывает с тем, что 44 685 рублей было удержано из оплаченных ФИО1 10.01.2023 денежных средств в размере 150 000 рублей в счет проставки газового оборудования по третьему договору, который предусматривал 100 %-ую оплату, однако, по вине работников бухгалтерии эти денежные средства были неправильно разнесены. 

Суд не может согласится с данными доводами истца, поскольку в квитанции к приходному кассовому ордеру от 10.01.2023 указано, что денежные средства в размере 150 000 рублей вносятся по конкретному договору - от 10.01.2023 № 3-С/У/2023. 

При этом истец не лишен права требования штрафных санкций к ответчику по договору поставки оборудования в случае нарушения по нему срока оплаты. 

В этой связи неустойка за период с 08.04.2025 – 29.08.2025 составит:

- 21 600 рублей (50 000 рублей * 0,3 % 144 дня ) по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на выполнение строительно-монтажных работ; 

- 43 рубля 20 копеек (3 000 рублей * 0,01 % 144 дня ) по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме, подлежит взысканию с ответчика в пользу истца. 

Согласно п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. 

Учитывая установленные по делу обстоятельства, а также предмет договоров, цену договоров и общий размер неустойки, подлежащей взысканию, длительность нарушения прав истца суд оснований для уменьшения неустойки не находит. 

В соответствии со ст. 94, 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 96 настоящего Кодекса. В случае, если иск удовлетворен частично, указанные в настоящей статье судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу отказано, в связи с чем с ответчика в пользу истца подлежат взысканию государственная пошлина пропорционально удовлетворенным исковым требованиям в размере 2 114 рублей 26 копеек. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ООО «ГазСервисКузбасс» (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>) к ФИО1 (

<

данные изъяты>) о взыскании неустойки по договору на выполнение строительно-монтажных работ, взыскании неустойки по договору на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме удовлетворить частично. 

Взыскать в пользу ООО «ГазСервисКузбасс» с ФИО1:

- 21 600 рублей неустойку по договору от 10.01.2023 № 3-С/У/2023 на выполнение строительно-монтажных работ за период 08.04.2025 – 29.08.2025; 

- 43 рубля 20 копеек неустойку по договору от 10.01.2023 № 1-В/У/2023 на осмотр вентиляционного канала и дымового канала в индивидуальном жилом доме за период 08.04.2025 – 29.08.2025; 

- 2 114 рублей 26 копеек расходы по уплате государственной пошлины; 

а всего 23 757 рублей 46 копеек. 

Решение может быть обжаловано сторонами и другими лицами, участвующими в деле, в апелляционном порядке в Кемеровском областном суде в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме, путем подачи апелляционной жалобы через Кемеровский районный суд. 

Председательствующий

Справка: в окончательной форме решение изготовлено 05.12.2025.

Судья А.А. Тупица