УИД 24RS0032-01-2025-002928-27

Дело № 2-2553/25

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

21 августа 2025г. г. Красноярск

Ленинский районный суд г. Красноярска в составе:

председательствующего судьи Дорохиной Т.А., 

при секретаре Буравченко В.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей,

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратился в суд с исковым заявлением к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей.

Требования мотивированы тем, что между истцом и сетевой организацией ПАО «Россети Сибирь» в отношении объекта заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024 г. Срок исполнения обязательства по договору составляет 6 месяцев со дня его заключения то есть до 04.12.2024 г. Обязательства по внесению платы за технологическое присоединение исполнены истцом в полном объеме. Однако по состоянию на 15.05.2025 г. технологическое присоединение к сетям произведено не было, просрочка составила 162 дня. В п. 17 договора указана неустойка в размере 0,25 % за каждый день просрочки, что противоречит п. 9 ч. 2 ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей», ущемляет права потребителя по сравнению с законодательством. На основании ст. 28 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1, в случае нарушения сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель обязан уплатить неустойку в размере 3 % от цены работ за каждый день просрочки. Стоимость работ по договору составила 66 844 руб. 05 коп., соответственно согласно расчета неустойка будет равна 324 862 руб., штраф составляет 50% и равен 162 431 руб. 06.05.2025 г. направлена досудебная претензия в адрес ответчика, которая не была удовлетворена. 

На основании изложенного истец просит суд взыскать с ПАО «Россети Сибирь» неустойку в размере 324 862 руб., штраф в размере 162 431 руб., судебные расходы. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, о времени и месте судебного заседания извещена надлежащим образом, ранее в судебном заседании поддерживал исковые требования в полном объеме, просил их удовлетворить по основаниям изложенным в иске, просил рассмотреть дело в его отсутствии.

Представитель ответчика ПАО «Россети Сибирь» в судебное заседание не явился, о дате, времени и месте рассмотрении дела извещался своевременно и надлежащим образом, о причинах неявки суд не уведомил. В письменном отзыве не оспаривая факта заключения с ФИО1 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г., просил отказать в удовлетворении заявленных требований в полном объеме по основаниям, что на ответчика согласно технических условий к договору возложены обязанности по осуществлению организационных мероприятий в виде подготовки ТУ, обеспечение возможности действиями заявителя осуществить фактическое ТП, а также мероприятия капитального характера. В рамках исполнения договора ПАО «Россети Сибирь» разработаны указанные ТУ, проводятся изыскание способов и средств исполнения договора, влекущих наименьшие финансовые и временные затраты. Учитывая значительную стоимость затрат по договору, задержка выполнения мероприятий вызвана недостатком финансирования, существенным удорожанием материалов. ПАО «Россети Сибирь» осуществляет все необходимые возможные действия по исполнению договора и не имеет цели как-либо нарушить права и законные интересы истца. Указывает, что отсутствуют виновные действия ответчика в связи с чем взыскание штрафной неустойки за нарушение сроков исполнения обязательства по договору в размере 324 862 руб. неправомерно. Вместе с тем, просит суд в случае удовлетворения требования истца снизить размер неустойки, штрафа применив ст. 333 ГК РФ. 

Третье лицо не заявляющее самостоятельных исковых требований ФИО4 в судебное заседание не явилась, о дате и времени рассмотрения дела извещена своевременно и надлежащим образом, представила возражения на исковые требования, согласно которых ДД.ММ.ГГГГ между ФИО1 и ПАО «Россети Сибирь» заключен договор об осуществлении технического обслуживания объекта расположенного по адресу Красноярский край, р-н Емельяновский, ОСОТ «Отдых», р-н Тубдиспансера, поле 11А, уч. 38, кадастровый номер земельного участка №, приложением к которому, являются технические условия № 8000617196. Размер платы составляет 71 734 руб. 21 коп., указанная сумма оплачена 25.07.2024 г. Соответственно срок исполнения обязательств по договору составлял до 13.10.2024 г. На основании договора купли-продажи от 25.04.2025 г. земельный участок перешел в собственность ФИО2 которому присвоен новый адрес на основании постановления администрации Солонцовского сельсовета № 647 от 26.06.2025 г. 15.05.2025 г. между ФИО1 и ФИО2 заключен договор уступки прав (требования) по договору об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям, соответственно к ней перешли все права по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г. Следовательно у ФИО1 отсутствуют правовые основания для обращения в суд по договору об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям. Просит суд отказать в исковых требованиях в полном объеме. 

Дело рассмотрено в отсутствие неявившихся лиц в порядке ст. 167 ГПК РФ.

Исследовав письменные материалы дела, суд находит заявленные исковые требования подлежащими частичному удовлетворению по следующим основаниям.

Так, согласно ст. ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации, обязательства должны исполняться надлежащим образом. Не допускается отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке.

Согласно ст. 3.2 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» затраты на проведение мероприятий по технологическому присоединению, в том числе расходы сетевой организации на обеспечение коммерческого учета электрической энергии (мощности), строительство и (или) реконструкцию необходимых для технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства, включаются в расходы сетевой организации, учитываемые при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии и (или) платы за технологическое присоединение. При этом не допускается включение расходов сетевой организации, учтенных при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, в состав платы за технологическое присоединение и расходов, учтенных при установлении платы за технологическое присоединение, в состав тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

Согласно ч. 1 ст. 26 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, в том числе объектов микрогенерации, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и носит однократный характер. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.

Под однократностью понимается разовое осуществление процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, а также построенных линий электропередачи, в объеме максимальной мощности таких энергопринимающих устройств, указанной в документах, подтверждающих технологическое присоединение, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Согласно п. 3 ст. 401 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и не предотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

Согласно п. 1 ст. 539 ГК РФ по договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии.

Правительство Российской Федерации постановлением от 27 декабря 2004 г. №861 утвердило Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

При осуществлении первичного технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителя все технические параметры такого присоединения закрепляются за присоединенными энергопринимающими устройствами и фиксируются в документах о технологическом присоединении, в частности в акте об осуществлении технологического присоединения. Такими техническими параметрами являются: максимальная мощность энергопринимающих устройств, категория надежности, количество точек присоединения, уровень напряжения, на котором присоединены энергопринимающие устройства.

Исходя из положений п. 3 Правил №861 следует, что сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения настоящих Правил и наличия технической возможности технологического присоединения.

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве собственности или на ином, предусмотренном законом основании, а также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.

Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в сроки, установленные названными Правилами; заключение договора является обязательным для сетевой организации; при необоснованном отказе или уклонении сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных таким необоснованным отказом или уклонением (пункт 6 данных Правил).

Согласно п. 8(5) Правил №861 в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, относящихся к имуществу общего пользования, расположенному в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, осуществляющим ведение садоводства или огородничества на земельных участках, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, или иным правообладателям объектов недвижимости, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, заявка на технологическое присоединение подается в сетевую организацию в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в зависимости от мощности присоединяемых устройств.

Согласно п. 14 Правил №861, заявителями являются - физические лица в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику.

При этом действующее правовое регулирование устанавливает, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям представляет собой комплекс мероприятий и осуществляется на основании возмездного договора, заключаемого сетевой организацией с обратившимся к ней лицом (заявителем). По условиям этого договора сетевая организация обязана реализовать мероприятия, необходимые для осуществления такого технологического присоединения (в том числе разработать технические условия), а заявитель обязан помимо прочего внести плату за технологическое присоединение (пункт 4 статьи 23.1, пункт 2 статьи 23.2, пункт 1 статьи 26 Закона об электроэнергетике, подпункт "е" пункта 16, пункты 16(2), 16(4), 17, 18 Правил технологического присоединения).

Согласно п.п. «е» п.16 Правил порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое присоединение (в случаях, предусмотренных пунктом 17(1) настоящих Правил, договором предусматривается определяемый по соглашению сторон график поэтапного внесения платы, который должен обеспечивать предварительное финансирование экономически обоснованных затрат сетевой организации на реализацию мероприятий по технологическому присоединению на каждом из этапов осуществления таких мероприятий).

В соответствии с п. 16.1 Правил №861 заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению.

Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке:

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней с даты заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения;

в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(2) Правил)

Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение (за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) осуществляется в следующем порядке:

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора;

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения договора;

г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. (п.16(4) Правил).

Пунктом 17 Правил №861 определяется плата в случае технологического присоединения объектов. 

Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя:

а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями;

б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями;

в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной;

г) выполнение заявителем и сетевой организацией технических условий, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) под действие устройств сетевой, противоаварийной и режимной автоматики, а также выполнение заявителем и сетевой организацией требований по созданию (модернизации) комплексов и устройств релейной защиты и автоматики в порядке, предусмотренном Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2018 г. N 937 "Об утверждении Правил технологического функционирования электроэнергетических систем и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (далее - Правила технологического функционирования электроэнергетических систем) (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации) таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

д) проверку выполнения заявителем (за исключением заявителей, указанных в пунктах 12(1), 13(2) - 13(5) и 14 настоящих Правил, кроме случаев, если технологическое присоединение энергопринимающих устройств таких заявителей осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) и сетевой организацией технических условий в соответствии с разделом IX настоящих Правил;

д(1)) выполнение мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, сетевой организации и иных лиц, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования, комплексов и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и технологического управления в работу в составе электроэнергетической системы в соответствии с Правилами технологического функционирования электроэнергетических систем;

д(2)) выполнение мероприятий по обеспечению возможности вывода из эксплуатации объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя, присоединенного к электрическим сетям этой сетевой организации, в случае технологического присоединения вновь сооружаемого (реконструируемого) объекта по производству электрической энергии (мощности) заявителя к электрическим сетям той же сетевой организации в целях замещения им такого объекта по производству электрической энергии (мощности). (п.18 Правил №861)

В соответствии со ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300 «О защите прав потребителей» исполнитель обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), качество которого соответствует договору. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару (работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий этим требованиям. 

Как следует из материалов дела и установлено судом, 04.06.2024 г. между ФИО1 (заявитель)и ПАО «Россети Сибирь» (сетевая организация) заключен договор № 20.2400.5712.24 об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям. 

Согласно предмета договора, сетевая организация приняла на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства для электроснабжения объекта «Малоэтажная жилая застройка (Индивидуальный жилой дом/Садовый/Дачный дом)», расположенного ( который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, ОСОТ «Отдых», р-н Тубдиспансера, поле 11А, уч. №, кадастровый №. 

Согласно технических условий № 8000607710 максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств 15 кВт, категория надежности третья, класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 0,4 кВ, максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств отсутствует. 

Точка присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям. Технические условия являются неотъемлемой частью договора, действуют 2 года со дня заключения договора; срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет 6 месяцев со дня заключения договора (п. 4, 5, 6 договора).

На основании п.6 договора ответчик обязался не позднее 3 рабочих дней со дня проведения осмотра осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить в электронной форме и разместить в личном кабинете заявителя акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении технологического присоединения.

Согласно п. 10 договора, размер платы за технологическое присоединение составляет 66 844 руб. 05 коп. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации (п.12 договора). 

25.07.2024 г. между ПАО «Россети Сибирь» и ФИО1 заключен договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.8247.24, предметом договора является: сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению временного технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя «ВРУ малоэтажной жилой застройки» расположенной по адресу 

<

адрес>, ОСОТ «Отдых», р-н Тубдиспансера, поле 11А, уч. №, кадастровый №. 

Согласно п. 2 договора следует, что техническое присоединение энергопринимающих устройств заявителя, указанных в п.1 договора, осуществляется временно до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленный договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024гю 

В материалы дела представлен акт об осуществлении технологического присоединения № 12000751901 от 22.11.2024 г. согласно которому, сетевая организация оказала заказчику услугу по техническому присоединению объектов электроэнергетики заявителя в соответствии с мероприятиями по (Приложению № 1 к договору об осуществлении технологического присоединения от 25.07.2024 г. № 20.2400.8247.24).

Вопреки доводам третьего лица ФИО4, факт заключения сторонами договора об осуществлении временного технологического присоединения № 20.2400.8247.24 от 25.07.2024 г. (после заключения спорного договора № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024) не может свидетельствовать об исполнении сетевой организацией обязательств, принятых по договору № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024.

Так, в соответствии с Правилами, утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861, временным технологическим присоединением является технологическое присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств. Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического присоединения с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе (раздел 7). 

В силу пункта 54 Правил электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, осуществляется до наступления срока технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. 

25.04.2025 г. между истцом ФИО1 и ФИО4 заключен договор купли-продажи земельного участка расположенного ( который будет располагаться) по адресу: 

<

адрес>, ОСОТ «Отдых», р-н Тубдиспансера, поле 11А, уч. №, кадастровый №. 

Согласно выписки из ЕГРН от 07.07.2025 г. правообладателем земельного участка с кадастровым номером № с 07.05.2025 г. является ФИО4

На основании постановления администрации Солонцовского сельсовета № 647 от 26.06.2025 г. земельному участку с кадастровым номером 24:11:0290401:790 присвоен следующий адрес: Красноярский край, муниципальный район Емельяновский, сельское поселение Солонцовский сельсовет, 

<

адрес>, садовое товарищество 

<

адрес>

15.05.2025 г. истец ФИО1 (цедент) и ФИО4 (Цессионарий) заключили договор уступки права (требования) по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024 г. Из п. 1 договора, следует что цедент уступает, а цессионарий принимает права и обязанности цедента по договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024 г. заключенному с ПАО «Россети Сибирь». 

Обращаясь в суд с иском о защите прав потребителя, ФИО1 ссылается на неисполнение сетевой организацией обязанностей, возложенных на нее договором об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г. 

Обязательства по внесению платы за технологическое присоединение в размере 66 844 руб. 05 коп. исполнены истцом в полном объеме 04.06.2024г., что подтверждается чеком по операции АО «Почта Банк».

Исходя из условий договора на технологическое присоединение от 04.06.2024г. срок исполнения обязательств ответчиком установлен 6 месяцев, т.е. до 04.12.2024г.

Между тем, ответчиком мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств к земельному участку ФИО1 к электрическим сетям в установленный срок не выполнены, присоединение энергопринимающих устройств истца к электрическим сетям не произведено до настоящего времени, доказательств обратного вопреки требованиям статьи 56 ГПК РФ не представлено. Доказательства наличия обстоятельств, препятствующих исполнению своих обязательств в установленный договором срок, в материалах дела отсутствуют.

При таких обстоятельствах, принимая во внимание факт неисполнения ответчиком в установленный срок договорных обязательств, суд приходит к выводу о необходимости удовлетворения требований ФИО1 

При этом, доводы представителя ответчика ПАО «Россети-Сибирь» о наличии уважительных причин невозможности осуществления технологического присоединения в установленный договором срок, необходимости несения значительных финансовых затрат, судом отклоняется, поскольку ответчик при заключении договора по технологическому присоединению сам установил срок исполнения договора, при этом должен был учитывать все технические особенности присоединения конкретного объекта к сетям, а так же планировать финансирование своей хозяйственной деятельности.

При заключении типового договора ответчик не ставил истца в известность об обстоятельствах, которые могут являться препятствием к исполнению (либо сделать вообще невозможным исполнение) взятых по договору обязательств.

Кроме того, допустимых и достоверных доказательств, свидетельствующих об уважительности причин неисполнения договора в установленный срок, ответчик суду также не представил.

Разрешая требования истца о взыскании с ответчика неустойки в размере 3% от цены работ за каждый день просрочки ссылаясь на ст. 28 Закона РФ «О защите прав потребителей» за просрочку исполнения обязательств по договору № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г. за период с 04.12.2024г. по 15.05.2025г. (дата уступки) 162 дня, суд исходит из следующего.

В силу п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 

Из разъяснений, содержащихся в п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 марта 2016 года № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", следует, что если размер неустойки установлен законом, то в силу пункта 2 статьи 332 ГК РФ он не может быть по заранее заключенному соглашению сторон уменьшен, но может быть увеличен, если такое увеличение законом не запрещено. 

Пунктом 5 статьи 28 Закона РФ от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей" предусмотрено, что в случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени). 

Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям устанавливаются Правительством Российской Федерации (ст. 39.1 Закона РФ от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей"). 

Согласно п. 17 договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г., нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25% указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

При таких обстоятельствах, поскольку возможность взыскания неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению предусмотрена специальной нормой, то оснований для расчета неустойки исходя из положений Закона РФ "О защите прав потребителей" у суда не имеется. 

Установив факт нарушения ПАО «Россети Сибирь» условий заключенного с истцом договора об осуществлении технологического присоединения № 20.2400.5712.24 от 04.06.2024г., суд находит обоснованным требование истца о взыскании с ответчика неустойки за нарушение срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению.

При этом расчет истца, суд находит не верным, поскольку обязательства по договору должны быть исполнены в срок до 04.12.2024 г, соответственно неустойка за неисполнение обязательства по договору подлежит исчислению с 05.12.2024г., кроме того согласно договора уступки прав (требований) по договору об осуществлении технического присоединения к электрическим сетям № 20.2400.5712.24 от 15.05.2025 г. права и обязанности ФИО1 по договору перешли ФИО4, соответственно неустойка за неисполнение обязательства по договору подлежит исчислению с 05.12.2024г. по 14.05.2025 г. 

Из порядка расчета неустойки, предусмотренного п. 17 заключенного сторонами договора об осуществлении технологического присоединения, следует, что за период с 05.12.2024г. по 14.05.2025г. (160 дней) размер неустойки составит 26 737 руб. 62 коп. (66 844 руб. 05 коп. х 0,25% х 160 дней).

Представитель ПАО "Россети Сибирь" просит применить положения ст. 333 ГК РФ и снизить размер подлежащей взысканию неустойки. 

Представителем ответчика заявлено ходатайство о применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера штрафа. Разрешая данное ходатайство, суд учитывает следующее. 

В соответствии с п. 1 ст. 333 ГК РФ если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить неустойку. Если обязательство нарушено лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность, суд вправе уменьшить неустойку при условии заявления должника о таком уменьшении.

Из материалов дела следует, что в период с момента получения претензии ответчиком, а также с момента нахождения дела в производстве суда и до момента принятия решения судом ответчиком не было предпринято мер к урегулированию спора.

Указанный размер неустойки (26 737 руб. 62 коп.) применительно к обстоятельствам настоящего дела (степень недобросовестности, длительность нарушения, размер неустойки не превышает цену услуги, то есть является соразмерным последствиям), не может быть оценен судом в качестве явно несоразмерного последствиям нарушения.

Таким образом, установленный судом размер неустойки является разумным, отвечает требованиям соразмерности последствиям нарушения обязательства, в связи с чем, вопреки доводам представителя ответчика, суд не усматривает оснований для снижения неустойки на основании ст. 333 ГК РФ и полагает необходимым взыскать с ответчика в пользу истца неустойку в размере 26 737 руб. 62 коп.

В соответствии со ст.13 Закона РФ «О защите прав потребителей», а также согласно п.46 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятидесяти процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя, независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Учитывая изложенное, суд взыскивает с ответчика штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителя в размере 50% от присужденной судом в пользу истца денежной суммы в размере 13 368 руб. 81 коп. (26 737 руб. 62 коп. х 50%).

Истцы по искам о защите прав потребителей освобождены от уплаты государственной пошлины, в связи с чем, в соответствии с подп. 3 п. 1, абз.2 п.1 ст. 333.39 Налогового кодекса РФ с ПАО «Россети Сибирь» на основании ч. 1 ст. 103 ГПК РФ подлежит взысканию государственная пошлина в размере 4000 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 к ПАО «Россети Сибирь» о защите прав потребителей – удовлетворить частично.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в пользу ФИО1 (паспорт № неустойку в размере 26 737 руб. 62 коп., штраф за нарушение прав потребителя в размере 13 368 руб. 81 коп.

Взыскать с ПАО «Россети Сибирь» (ОГРН 

<

***>) в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 4 000 рублей.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по гражданским делам Красноярского краевого суда в течение месяца через Ленинский районный суд г. Красноярска, со дня изготовления решения суда в окончательной форме.

Председательствующий: Т.А. Дорохина 

Мотивированное решение изготовлено 26.08.2025г.