Дело № 2-944/2023

УИД 59RS0042-01-2023-001466-66

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 декабря 2023 года город Чернушка 

Чернушинский районный суд Пермского края в составе

председательствующего судьи Дьяковой Н.В.,

при секретаре судебного заседания Латиповой А.А.,

с участием представителя истца ФИО1- ФИО2, действующей по доверенности, 

представителя ответчика ООО «Регион» ФИО3, действующей по доверенности,

представителя ответчика администрации Чернушинского городского округа ФИО4, действующей по доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», обществу с ограниченной ответственностью «Регион», Администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанностей, 

УСТАНОВИЛ:

ФИО1 обратилась в суд с иском к некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», обществу с ограниченной ответственностью «Регион», Администрации Чернушинского городского округа о возложении обязанностей.

Исковые требования с учетом уточнений мотивированы тем, что истец является собственником жилого помещения 

<

№> в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...>. На основании протокола внеочередного общего собрания собственников помещения 

<

№> от 16.11.2023 года истец избран председателем совета многоквартирного дома. Собственники многоквартирного дома формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора. Деятельность по управлению многоквартирным домом осуществляет ООО "Регион". Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и работ по капитальному ремонт общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта утверждена постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года № 288п. Указанной региональной программой предусмотрено выполнение в многоквартирном доме по адресу: 

<

...> в период с 2018 по 2020 годы работ по комплексному обследованию технического состояния многоквартирного дома, капитального ремонта кровли; в период 2021-2023 годов проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме: ремонту внутренних инженерных систем электроснабжения, капитального ремонта подвала. 24.01.2019 года по заказу НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" ООО "Пермэнерго-Аудит" был подготовлен технический отчет обследования технического состояния строительных конструкций и инженерных сетей многоквартирного дома расположенного по адресу: 

<

...>. В соответствии с п.п. 3.1, 3.7 техническое состояние цоколя, инженерных сетей электроснабжения оценивается как неудовлетворительное. Приказами Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 15.06.2020 года № СЭД-24-03-23-ПР-7 от 15.06.2023 года № 24-04-01-04-195 утвержден краткосрочный план реализации региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в 2021-2023 годы. В краткосрочный план на 2021-2023 годы был включен многоквартирный дом по адресу: 

<

...> капитальный ремонт системы электроснабжения в срок до 31.12.2023 года. Предложений от НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" о проведении капитального ремонта в адрес собственников не поступало. В связи с тем, что работы по ремонту системы электроснабжения дома и подвала являются объемными и не были начаты по сегодняшний день, советом многоквартирного дома было направлено письмо в адрес НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" о предоставлении информации по какой причине капитальный ремонт системы электроснабжения еще не начат. 07.09.2023 года в адрес истца поступил ответ, согласно которого у Фонда отсутствуют основания для проведения капитального ремонта дома. Жителями многоквартирного дома решение о переносе срока капитального ремонта на более поздний период не принималось, собрания по данному поводу не проводились. Решением Чернушинского районного суда Пермского края от 04.07.2023 года исковые требования прокурора Чернушинского района Пермского края удовлетворены. НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» возложена обязанность по капитальному ремонту крыши многоквартирного дома №36, расположенного в 

<

...>. Истец просит суд возложить на ответчика НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка путем привлечения для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключения с подрядными организациями от своего имени договоров, предусматривающих установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ; осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка подрядными организациями и соответствия таких услуг и работ требованиям проектной документации; обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме. Возложить обязанность на ООО «Регион» обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае». Возложить обязанность на администрацию Чернушинского городского округа обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Истец ФИО1 в судебном заседании участия не принимала, ходатайствовала о рассмотрении дела в ее отсутствие, указала, что требования поддерживает в полном объеме.

Представитель истца ФИО5 в судебном заседании доводы искового заявления поддержала, просила исковые требования удовлетворить в полном объеме.

Представитель ответчика администрации Чернушинского городского округа Кислицына Т.И. в судебном заседании не возражала против удовлетворения исковых требований.

Представитель ответчика ООО "Регион" ФИО3 в судебном заседании с исковыми требованиями согласилась в полном объеме.

Представитель ответчика некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в судебном заседании участия не принимал, извещен надлежащим образом, заявлений и ходатайств не представил. Ранее направил ответ на запрос, в котором указал, что по многоквартирному дому № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка производилось техническое обследование на основании договора от 03.09.2018 года. По результатам исполнения договора был подготовлен технический отчет№ 491. Фонд принимает меры по организации проведения работ по капитальному ремонту крыши, подвала и внутридомовой инженерной системы электроснабжения. 

Представитель третьего лица Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края в судебном заседании участия не принимал, извещен надлежащим образом, представил письменные возражения, в которых просил в удовлетворении заявленных требований отказать. Указал, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права.

Суд, заслушав представителя истца, представителя ответчика Администрации Чернушинского городского округа, представителя ответчика ООО "Регион", исследовав письменные доказательства, приходит к следующему выводу.

В соответствии с ч. 6.1 ст. 2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее - ЖК РФ) органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе: организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

На основании ч. 10.1 ст. 12 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в том числе методическое обеспечение установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Согласно ч. 8.3 ст. 13 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в области жилищных отношений относится, в то числе определение порядка установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В силу ч. 1 ст. 166 ЖК РФ перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, включает в себя: ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; ремонт, замену, модернизацию лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; ремонт фасада; ремонт фундамента многоквартирного дома.

На основании ч. 1 ст. 168 ЖК РФ региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах определяются предельные сроки проведения собственниками помещений в таких домах и (или) региональным оператором капитального ремонта многоквартирных домов. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в целях планирования и организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, планирования предоставления государственной поддержки, муниципальной поддержки на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, местных бюджетов (далее - государственная поддержка, муниципальная поддержка капитального ремонта), контроля своевременности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений в таких домах, региональным оператором.

Согласно ч. 6 ст. 168 ЖК РФ внесение в региональную программу капитального ремонта при ее актуализации изменений, предусматривающих перенос установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период, сокращение перечня планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется при наличии соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

В соответствии с ч. 6 ст. 178 ЖК РФ субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах.

В силу ч. 1 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор обеспечивает проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, и финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе в случае недостаточности средств фонда капитального ремонта, за счет средств, полученных за счет платежей собственников помещений в других многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, за счет субсидий, полученных из бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета, за счет иных не запрещенных законом средств.

Обязанности регионального оператора в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме предусмотрены ч. 2 ст. 182 ЖК РФ. 

В силу п. 5 ч. 2 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан, в том числе осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, в том числе обеспечить создание соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта и (или) краткосрочных планов их реализации, и (или) органов местного самоуправления, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме. 

Согласно ч. 6 ст. 182 ЖК РФ региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

На основании ч. 2 ст. 188 ЖК РФ субъект Российской Федерации несет субсидиарную ответственность за исполнение региональным оператором обязательств перед собственниками помещений в многоквартирных домах, указанными в части 1 настоящей статьи.

Согласно ч. 2 ст. 190 ЖК РФ основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

В соответствии с положениями ст. 21 Закона Пермского края от 11.03.2014 года № 304-ПК «О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края» (далее по тексту - Закон от 11.03.2014 года № 304-ПК) региональным оператором на территории Пермского края является некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Согласно положениям ст. 22 Закона от 11.03.2014 года № 304-ПК предметом деятельности регионального оператора является обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют фонд капитального ремонта на счете (счетах) регионального оператора, в объеме и в сроки, которые предусмотрены региональной программой капитального ремонта, в том числе финансирование капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

Основными целями деятельности регионального оператора являются организация и своевременное проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края.

Функциями регионального оператора являются, в том числе осуществление функций технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; контроль за целевым использованием средств фонда капитального ремонта, приостановление финансирования в случае выявления нецелевого использования средств фонда капитального ремонта.

Согласно положениям ст. 24 Закона от 11.03.2014 года № 304-ПК региональный оператор в целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме обязан контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации.

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы.

Судом установлено:

Собственником жилого помещения 

<

№> по адресу: 

<

...> является истец ФИО1, что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (л.д. 97-99 том № 1).

В соответствии с техническим паспортом жилой дом № 36 по ул. Юбилейная, г. Чернушка, является домом 1985 года постройки, число этажей 9, имеет 108 квартир (л.д.160-173 том № 1).

31.03.2015 года проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...> в форме заочного голосования председатель совета МКД уполномочен быть представителем интересов собственников МКД бессрочно по всем вопросам во всех органах, в том числе во всех судах со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу. Председателем совета многоквартирного дома избрана 

<

ФИО>7 (л.д. 14-15 том № 1).

Собственники помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

<

...>, в лице председателя совета дома 

<

ФИО>7, действующей по поручению общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленного протоколом от 31.03.2015 

<

№> и ООО "Регион" 01.04.2015 года заключили договор управления многоквартирным домом (л.д. 16-22 том № 1).

В соответствии с п. 3.1.1 договора управления многоквартирным домом, управляющая организация обеспечивает предоставление услуг и выполнение работ по надлежащему содержанию и ремонту, капитальному ремонту общего имущества собственников в многоквартирном доме в зависимости от состояния общего имущества. 

16.11.2023 года проведено общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: 

<

...> в форме очного голосования председатель совета МКД уполномочен быть представителем интересов собственников МКД бессрочно по всем вопросам во всех органах, в том числе во всех судах со всеми правами, какие предоставлены законом заявителю, истцу, ответчику, третьему лицу. Председателем совета многоквартирного дома избрана ФИО1 (л.д. 23-26 том № 1).

Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п утверждена региональная Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального ремонта, год ввода в эксплуатацию 1985, по адресу: 

<

...>.

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 15.06.2020 года №СЭД-24-03-23-ПР-7 утвержден краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2021-2023 годы. 

Согласно постановления Правительства Пермского края № 388-п от 26.05.2023 года внесены изменения в приложение 1 к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы. Плановый период ремонта системы электроснабжения многоквартирного дома и подвала по адресу: 

<

...>, 2021-2023 годы (л.д. 33-35 том № 1).

Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края от 15.06.2023 года № 24-04-01-04-195 внесены изменения в региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах расположенных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы. Плановая дата завершения работ 31.12.2023 года (л.д. 39-41том № 1). 

Согласно постановления Администрации Чернушинского городского округа от 29.04.2020 года № 681-261-01-04 принято решение о проведении капитального ремонта общества имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чернушинского городского округа, собственниками помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п, в соответствии с перечнем многоквартирных домов, расположенных на территории Чернушинского городского округа, подлежащих капитальному ремонту общего имущества. В перечне значится дом № 36 по ул. Юбилейная, г. Чернушка.

Согласно техническому отчету ООО "Промэнерго-Аудит" № 491, 2019 год, по результатам визуального технического обследования строительных конструкций здания, расположенного по адресу: 

<

...> года постройки техническое состояние инженерных сетей электроснабжения отмостки, цоколя, лестниц, крылец оценивается как неудовлетворительное, физический износ здания составляет 26 % (л.д.42-89 том №1).

Из акта приемки выполненных работ по оценке технического состояния многоквартирного дома по адресу: 

<

...> от 14.05.2019 года работы по оценке технического состояния многоквартирного дома выполнены и приняты (л.д. 62об-63 том № 3).

Совет дома № 36 по ул. Юбилейная, г. Чернушка направил в адрес НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" письмо с просьбой предоставить информацию по какой причине работы по капитальному ремонту системы электроснабжения и подвала не начаты (л.д. 27 том № 1).

07.09.2023 года НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» (далее Фонд) в адрес 

<

ФИО>8 направил информацию, из которой следует, что решение о проведении капитального ремонта систем электроснабжения и ремонт подвальных помещений в адрес регионального оператора не поступало, в связи с чем, основания для поведения мероприятий по капитальному ремонту в данном многоквартирном доме у Фонда отсутствуют (л.д. 28 том № 1).

Решение о проведении капитального ремонта общества имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чернушинского городского округа, собственниками помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", принято Постановлением Администрации Чернушинского городского округа от 29.04.2020 года № 681-261-01-04,в соответствии с региональной программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края на 2014-2044 годы, утвержденной Постановлением Правительства Пермского края от 24.04.2014 года №288-п. Решение о проведении капитального ремонта принято органом местного самоуправления.

Согласно ответа НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» от 05.12.2023 года по запросу суда по многоквартирному дому по адресу: 

<

...> Фонд вел переписку начиная с 2020 года. Техническое обследование многоквартирного дома проводилось на основании договора от 03.09.2018 года № КО-000090/218/ЭА, заключенного между Фондом и подрядной организацией - ООО "Промэнерго-Аудит". По результатам исполнения договора был подготовлен технический отчет № 491. Фонд принимает меры по организации проведения работ по капитальному ремонту крыши, подвала и внутридомовой инженерной системы электроснабжения. 

До настоящего времени НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» свои обязательства по проведению работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

...> не выполнил, что подтверждается представленными в материалы дела документами.

Решение о проведении капитального ремонта в адрес регионального оператора поступало, что подтверждается постановлением № 681-261-01-04 от 29.04.2020 года Администрации Чернушинского городского округа "О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чернушинского городского округа, собственники помещений которых формируют фонд капитального ремонта на счете НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае", размещенным на официальном сайте администрации Чернушинского городского округа, а также карточкой о регистрации документа от 29.05.2020 года входящий СЭД-02-04-вх-279. 

Установленные сроки проведения работ не переносились, доказательств обратного суду не представлено.

Из письменных пояснений ФИО1 от 22.11.2023 года следует, что общее собрание собственников многоквартирного дома по адресу: 

<

...> по вопросам переноса срока капитального ремонта на более поздний период; об утверждении перечня услуг или работ по капитальному ремонту; предельно допустимой стоимости услуг или работ по капительному ремонту общего имущества в многоквартирном доме; выбора лица, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты - не проводилось, решения не принимались. Решение о проведении капитального ремонта системы электроснабжения и подвала дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка было принято органом местного самоуправления. Повторных комплексных обследований в многоквартирном доме со стороны НО "Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае" и подрядными организациями от их имени не проводилось (л.д. 105 том № 1).

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о нарушении прав и законных интересов жителей многоквартирного дома и о наличии угрозы жизни и здоровью неопределенного круга лиц. 

Сроки, установленные Программой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края для проведения работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома по адресу: 

<

...> нарушены, работы по ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, ремонту подвальных помещений дома должны были быть проведены в период времени 2021 -2023 год. 

Электронные аукционы на выполнение работ и по подбору подрядной организации для разработки проектно-сметной документации по капитальному ремонту общего имущества не объявлены, документы для их проведения не готовы. Ответчиком не представлено доказательств наличия соответствующего решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о переносе установленного срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме на более поздний период. При этом согласно письму ФИО1 от 22.11.2023 года, повторных комплексных обследований технического состояния МКД, проведенных региональным оператором не проводилось, общим собранием собственников МКД, расположенного по адресу: ул. Юбилейная, д. 36 г. Чернушка не было принято решение о переносе сроков по капитальному ремонту системы электроснабжения и подвала на более поздний срок. 

Принятие Закона Пермского края от 06.09.2023 года № 222-ПК "О внесении изменений в Закон Пермского края "О системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края", согласно которому использование средств, полученных региональным оператором от собственников помещений в одних многоквартирных домах, допускается на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, при условии, если многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования, не влечет оснований для отказа в удовлетворении исковых требований истца. Данные изменения вступили в законную силу 18.09.2023 года. 

Многоквартирный дом № 36, расположенный в г. Чернушка на ул. Юбилейная в региональный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах включен в 2020 году. 

Вступление в силу с 01.01.2024 года новой Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пермского края, принятой на 2024-2074 годы, не влечет отказ в удовлетворении заявленных требований истцом, поскольку указанная программа является продолжением реализации мероприятий по проведению капитального ремонта, установленных Региональной программой на 2014-2044 годы, действующей на дату разрешения спора.

Обязанность по обеспечению проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме действующим законодательством возложена на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

При указанных обстоятельствах, суд приходит к выводу об обоснованности заявленных истцом ФИО1 исковых требований и наличии оснований для возложения на НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обязанности обеспечить проведение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36, расположенного в г. Чернушка на ул. Юбилейная, путем привлечения для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключения с подрядными организациями от своего имени договоров, предусматривающих установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ; обязанности осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ подрядными организациями и соответствия таких услуг и работ требованиям проектной документации, обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

Разрешая вопрос о длительности срока, который необходимо предоставить ответчику НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» для выполнения возложенной на него обязанности, учитывая сложность и объем работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома, суд считает необходимым и достаточным предоставить ответчику срок продолжительностью шесть месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. 

В целях обеспечения оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме региональный оператор обязан, в частности, привлечь для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту подрядные организации и заключить с ними от своего имени соответствующие договоры; контролировать качество и сроки оказания услуг и (или) выполнения работ подрядными организациями и соответствие таких услуг и (или) работ требованиям проектной документации; осуществить приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ (пункты 3, 4, 5 части 2 статьи 182 Жилищного кодекса РФ).

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение региональным оператором перед собственниками своих обязательств, предусмотренных законом, установлена частью 5 статьи 178 и частью 1 статьи 188 Жилищного кодекса РФ.

Частью 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ установлена ответственность регионального оператора за действия привлеченного им для осуществления капитального ремонта подрядчика. В соответствии с положениями данной нормы региональный оператор перед собственниками помещений в многоквартирном доме, формирующими фонд капитального ремонта на счете регионального оператора, несет ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

Ненадлежащее состояние общего имущества в многоквартирном доме (внутридомовой инженерной системы электроснабжения, подвальных помещений) приводит к нарушению жилищных прав собственников квартир в многоквартирном доме и неопределенного круга лиц, проживающих в многоквартирном доме и создает препятствия управляющей организации в осуществлении обязательств по договору на оказание услуг и или выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме. 

Судом установлено, что НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» меры по обеспечению капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения, подвальных помещений дома № 36 по ул. Юбилейная, г. Чернушка своевременно не принимает, работы по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений дома не выполняются.

Доводы представителя третьего лица о том, что требование о соблюдении законодательства не является способом защиты, обеспечивающим восстановление нарушенного права, так как соблюдение закона является обязанностью всех граждан и организаций Российской Федерации, суд находит не состоятельными. 

В силу абз. 8 ст. 12 ГК РФ одним из способов защиты нарушенных гражданских прав является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Заявленные требования ФИО1 направлены на понуждение ответчика в судебном порядке исполнить возложенные на него законом обязанности по проведению капитального ремонта внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36, расположенного по ул. Юбилейная в г. Чернушка, по выполнению в установленные сроки необходимых действий и по восстановлению прав граждан – жителей вышеуказанного многоквартирного дома и граждан, посещающих указанный многоквартирный дом. 

ФИО1 избран предусмотренный законом способ защиты прав и интересов жителей многоквартирного дома и граждан, посещающих указанный многоквартирный дом. Непринятие данных мер нарушает права граждан на проживание в жилом помещении, соответствующем нормативным требованиям, на благоприятные безопасные условия жизни. 

В соответствии с п. 6.1 ст. 2 ЖК РФ органы государственной власти и органы местного самоуправления в пределах своих полномочий обеспечивают условия для осуществления гражданами права на жилище, в том числе организуют обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет взносов собственников помещений в таких домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников финансирования.

Согласно ч. 2 ст. 190 ЖК РФ основанием для перечисления региональным оператором средств по договору на оказание услуг и (или) выполнение работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме является акт приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (за исключением случая, указанного в части 3 настоящей статьи). Такой акт приемки должен быть подписан, в том числе органом местного самоуправления и лицом, которое уполномочено действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме (в случае, если капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме проводится на основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме). Порядок и сроки подписания акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, а также порядок взаимодействия участников подписания такого акта, в том числе с комиссией, осуществляющей приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ, устанавливается нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Исполнителями программы являются: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края, НО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае», органы местного самоуправления муниципальных образований, собственники помещений в многоквартирных домах, управляющие организации и др. 

В рассматриваемом случае требование истца направлено на понуждение ответчика в судебном порядке исполнить возложенные на него законом обязанности по обеспечению участия в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома №36, расположенного в г. Чернушка на ул. Юбилейная в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Суд возлагает на администрацию Чернушинского городского округа и ООО "Регион" обеспечение приемки оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома №36, расположенного в г. Чернушка на ул. Юбилейная, в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Таким образом, исковые требования ФИО1 подлежат удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования ФИО1 удовлетворить.

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» в течение шести месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить проведение работ по капитальному ремонту внутридомовой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка путем привлечения для оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту подрядных организаций, заключения с подрядными организациями от своего имени договоров, предусматривающих установление гарантийного срока на оказанные услуги и выполненные работы продолжительностью не менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг или выполненных работ. 

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» осуществлять контроль качества и сроков оказания услуг и выполнения работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка подрядными организациями и соответствия таких услуг и работ требованиям проектной документации. 

Возложить обязанность на некоммерческую организацию «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае» обеспечить приемку оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка посредством создания соответствующих комиссий с участием представителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ответственных за реализацию региональных программ капитального ремонта краткосрочных планов их реализации, лиц, осуществляющих управление данным многоквартирным домом, и представителей собственников помещений в многоквартирном доме.

Возложить обязанность на ООО «Регион» обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Возложить обязанность на администрацию Чернушинского городского округа обеспечить участие в приемке оказанных услуг и выполненных работ по капитальному ремонту внутридомой инженерной системы электроснабжения, капитальному ремонту подвальных помещений многоквартирного дома № 36 по ул. Юбилейная г. Чернушка в составе комиссии, созданной некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Пермском крае».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пермский краевой суд через Чернушинский районный суд в течении одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме 25.12.2023 года.

Судья подпись Н.В. Дьякова 

Решение не вступило в законную силу

Подлинный документ подшит в деле № 2-944/2023

УИД 59RS0042-01-2023-001466-66

Дело находится в производстве 

Чернушинского районного суда Пермского края