Дело № 2-7018/2017

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

21 ноября 2017 года

Октябрьский районный суд г.Ижевска в составе: 

председательствующего судьи Кузнецовой Н.В., 

при секретаре Михайловой С.В,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» о защите прав потребителей,

У с т а н о в и л:

ФИО1 обратилась в суд с иском к ООО «Строительная компания «Развитие» о взыскании неустойки, компенсации морального вреда. Требования мотивированы следующим.

29 сентября 2015 года между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве № 

<

номер>. В соответствии с условиями договора ответчик принял на себя обязательство передать истцу объект долевого строительства не позднее 28 февраля 2017 года. Истцом обязательства по договору выполнены в полном объеме. Вместе с тем в нарушение условий договора ответчик в установленные договором сроки объект долевого участия истцу не передал. Объект долевого участия передан истцу по акту приема-передачи 15.08.2017. На основании изложенного просит взыскать с ответчика неустойку за нарушение сроков передачи объекта участнику долевого строительства за период с 01 марта 2017 по 15 августа 2017 в сумме 85680 руб., штраф за неудовлетворение требований потребителей в добровольном порядке.

В судебное заседание истец не явилась, будучи уведомленной о времени и месте его проведения надлежащим образом, о причинах неявки суду не сообщила Представитель истца ФИО2, действующий по доверенности, в судебном заседании на иске настаивал, просил его удовлетворить. Суду пояснил, что до обращения в суд к ответчику с требованиями о выплате неустойки была направлена претензия, ответ на неё получен, но требования истца не были удовлетворены. Просит взыскать все указанные в иске суммы.

Представитель ответчика ФИО3, действующая на основании доверенности, в судебном заседании иск не признала, суду пояснила, что истцу было предложено в добровольном порядке выплатить неустойку в сумме 25704 руб, но она не согласилась. Просит применить ст.333 ГК РФ как к неустойке, так и к штрафу.

Выслушав объяснения явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, суд приходит к нижеследующему.

29 сентября 2017 года между сторонами заключен договор участия в долевом строительстве № 

<

номер>. Договор зарегистрирован в установленном законом порядке.

Объектом долевого участия по договору определена однокомнатная квартира № 6 общей проектной площадью с учетом балкона 

<

данные изъяты> кв.м., без учета балкона – 

<

данные изъяты> кв.м., расположенная на 1 этаже в строящемся многоквартирном жилом доме № 

<

адрес>.

Стоимость квартиры определена сторонами в размере 850 000,00 рублей (пункт 3.3 договора).

Оплата за квартиру произведена истцом в полном объеме.

15 августа 2017 года на основании акта о передаче объекта долевого строительства квартира, являющаяся предметом договора долевого участия в строительстве жилого дома, передана ответчиком истцу. 

Изложенные обстоятельства подтверждены в суде исследованными доказательствами и сторонами по делу не оспариваются.

Определяя материальный закон, которым следует руководствоваться при рассмотрении настоящего дела, суд исходит из нижеследующего.

Исходя из пункта 2 статьи 27 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", его действие распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, разрешения на строительство которых получены после вступления в силу данного Федерального закона.

Поскольку иное не предусмотрено Федеральным законом, в случае, если разрешения на строительство многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости получены до вступления его в силу, то действие этого Федерального закона не распространяется на отношения, связанные с привлечением денежных средств граждан для долевого строительства указанных объектов недвижимости.

Указанный Федеральный закон вступил в силу со дня его официального опубликования. Текст Федерального закона опубликован в "Российской газете" от 20 июля 2006 г. N 156, в "Парламентской газете" от 27 июля 2006 г. N 122, в Собрании законодательства Российской Федерации от 24 июля 2006 г. N 30 ст. 3287.

Разрешение на строительство многоквартирного дома, где находится квартира истца, получено застройщиком в 2015 г., следовательно, положения вышеуказанного Федерального закона распространяются на возникшие между сторонами отношения.

В соответствии с пунктом 2.1.4 договора долевого участия ответчик принял на себя обязательство по сдаче дома в эксплуатацию не позднее 4 квартала 2016 года.

В силу пункта 2.1.5 договора ответчик должен передать квартиру дольщику не позднее двух месяцев со дня получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

На основании изложенного суд приходит к выводу о том, что квартира подлежала передаче истцам до 

<

дата> года. Вместе с тем ответчик обязательств по своевременной передаче квартиры не выполнил, в установленные договором сроки квартира истцу передана только 

<

дата>

Доказательств уклонения истца от приемки объекта долевого строительства, составления одностороннего акта передачи объекта долевого строительства ответчик суду не представил. 

Согласно части 2 статьи 6 ФЗ N 214-ФЗ в случае нарушения предусмотренного договором срока передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства застройщик уплачивает участнику долевого строительства неустойку (пени) в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день исполнения обязательства, от цены договора за каждый день просрочки. Если участником долевого строительства является гражданин, предусмотренная настоящей частью неустойка (пени) уплачивается застройщиком в двойном размере.

Таким образом, требования истца о взыскании неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого участия основаны на законе и подлежат частичному удовлетворению за период с 01 марта 2017 года по 15 августа 2017 года, то есть за 168 дней. 

При расчете размера неустойки истцом, верно применена ставка рефинансирования ЦБ РФ в размере 10 % годовых, установленная с 17 сентября 2016 года и на дату, когда обязательство по передаче объекта должно было быть выполнено.

Исходя из вышеизложенного, расчет неустойки будет выглядеть следующим образом: (850 000 руб.х10/300/100 х 168 дней ) х 2 = 95200 руб. 00 коп., но не более цены иска (ч.3 ст.196 ГПК РФ) – 85680 руб. При решении вопроса о размере неустойки, которая подлежит взысканию с ответчика, суд приходит к выводу о том, что подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, нарушает баланс имущественных интересов сторон. Доказательств наступления каких-либо тяжких последствий для истца в результате нарушения срока сдачи объекта суду не представлено. В связи с изложенным и в силу статьи 333 ГК РФ суд считает необходимым уменьшить, подлежащую взысканию с ответчика, неустойку до 35 000 рублей. Указанный размер, по мнению суда, достаточен для полного восстановления возможных нарушений прав истца за указанный в иске период.

Подлежат удовлетворению и требования истца о взыскании компенсации морального вреда.

В соответствии с частью 9 статьи 4 ФЗ N 214-ФЗ к отношениям, вытекающим из договора, заключенного гражданином – участником долевого строительства исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, применяется законодательство Российской Федерации о защите прав потребителей в части, не урегулированной настоящим Федеральным законом. 

Поскольку договор, заключенный между сторонами, был направлен на удовлетворение личной нужды гражданина, не связанной с осуществлением предпринимательской деятельности (обеспечение жильем граждан), отношения, возникшие между сторонами, регулируются, в том числе и законодательством о защите прав потребителей.

Как установлено в судебном заседании не передача объекта долевого участия истцу в установленные договором сроки, являются неправомерными, то есть права истца, как потребителя ответчиком были нарушены и в силу положений ст.15 Закона РФ «О защите прав потребителей» и ст.1099 ГК РФ подлежат восстановлению посредством взыскания с ответчика в пользу истца компенсации морального вреда.

В обоснование требований о компенсации морального вреда истцом представлены суду объяснения о нравственных переживания в связи с нарушением ответчиком обязательств по передаче квартиры. Данные объяснения истца принимаются судом в качестве относимого, допустимого и достоверного доказательства. Ответчиком доказательств в обоснование своих возражений на заявленные требования о компенсации морального вреда не представлено.

С учетом изложенного, при определении размера компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень нравственных страданий истца, его личность и характер нарушенных прав, для восстановления которых он вынужден был обратиться с иском в суд, длительность неисполнения ответчиком обязательств по договору долевого участия.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд полагает необходимым определить компенсацию морального вреда, подлежащую взысканию с ответчика в пользу истца в размере 5000 руб.

С учетом вышеизложенного требования истца подлежат частичному удовлетворению. 

Истец обратилась к ответчику с претензией о выплате неустойки 13.09.2017, претензия получена ответчиком, что было подтверждено представителем ответчика в судебном заседании, не удовлетворена ответчиком (даже частично, в неоспариваемой сумме).

Согласно п. 6 ст. 13 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей" при удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

Такое же разъяснение дается в п.46 Постановления Пленума Верховного Суде РФ от 28.06.2012 N 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам с защите прав, где указывается, что при удовлетворении судом требований потребителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом о защите прав потребителей, которые не были удовлетворены в добровольном порядке изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), суд взыскивает с ответчика в пользу потребителя штраф независимо от того, заявлялось ли такое требование суду.

Из смысла указанных п.46 и 47 постановления Пленума ВС РФ от 28.06.2012 г. № 17 следует, если после подачи иска его законные требования не были удовлетворены добровольно, суд взыскивает штраф, предусмотренный законом, в пользу потребителя. На основании изложенного, взысканию с ответчика подлежит штраф в сумме 20000 руб. Оснований для снижения размера штрафа в силу ст.333 ГК РФ суд не усматривает (разъяснения, содержащиеся в пункте 34 названного выше постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, о том, что применение статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации по делам о защите прав потребителей возможно в исключительных случаях и по заявлению ответчика с обязательным указанием мотивов, по которым суд полагает, что уменьшение размера неустойки является допустимым).

В силу части 1 статьи 103 ГПК РФ с ответчика в пользу местного бюджета подлежит взысканию государственная пошлина, от уплаты которой истец был освобожден в сумме пропорционально удовлетворенным требованиям – 1250 руб. 00 коп.+300 руб.(по требованию неимущественного характера)=1550 руб.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

Р е ш и л:

Иск ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» о защите прав потребителей удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» в пользу ФИО1 неустойку по договору участия в долевом строительстве за период с 01.03.2017 по 15.08.2017 в сумме 35 000 руб. 00 коп, компенсацию морального вреда в размере 5000 руб. 00 коп., штраф за не удовлетворение требований потребителя в добровольном порядке в сумме 20 000 руб. 00 коп. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Развитие» в доход бюджета г.Ижевска госпошлину в сумме 1550 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Верховный суд Удмуртской республики в течении месяца с момента его изготовления в окончательной форме через Октябрьский районный суд г.Ижевска.

Решение в окончательной форме вынесено в совещательной комнате.

Председательствующий судья Н.В. Кузнецова