УИД№77RS0004-02-2025-000692-54

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

 адрес 24 июня 2025 года

Гагаринский районный суд адрес в составе председательствующего судьи Голубковой А.А., при помощнике судьи фио, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-3658/25 по иску ФИО1 к адрес об обязании выполнить условия договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа,

УСТАНОВИЛ:

Истец ФИО1 обратился в суд с иском к адрес об обязании выполнить условия договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа, в котором просил обязать ответчика выполнить обязательства по договору № 03/9902-Д10065-22 о подключении (техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, взыскать с ответчика неустойку за период с 29.02.2024 года по фактическую дату выполнения обязательств, на 18.11.2024 года сумма к выплате составляет сумма, взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере сумма, штраф в размере 50% от присужденной судом суммы.

Свое обращение истец мотивировал тем, что 30.08.2022 года между ним и ответчиком был заключен договор о подключении техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого ответчик обязался осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения до границ земельного участка, расположенного по адресу: адрес, Наро – адрес, участок № 688, с кадастровым номером 50:26:0110302:376. В силу п. 3 договора срок исполнения по подключению и пуску марка автомобиля установлен 547 дней со дня заключения договора. Обязательства по оплате договора в сумме сумма истцом были выполнены в полном объеме. Свои обязательства ответчик должен был исполнить в срок до 29.02.2024 года, что им выполнено не было, в связи с чем истец обратился в суд с настоящим иском. 

Истец ФИО1 в судебное заседание не явился, обеспечил явку представителя, которая исковые требования поддержала.  

Представитель ответчика адрес по доверенности в судебное заседание явилась, возражала против удовлетворения исковых требований по доводам письменных возражений на иск.

Выслушав стороны, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу п. 1 ст. 88 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. 

В соответствии со ст. 309, 310 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства не допускается. 

В соответствии с п. п. 5, 6 ст. 3 Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" имущество общего пользования - расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд объекты капитального строительства и земельные участки общего назначения, использование которых может осуществляться исключительно для удовлетворения потребностей граждан, ведущих садоводство и огородничество (проход, проезд, снабжение тепловой и электрической энергией, водой, марка автомобиля, водоотведение, охрана, сбор твердых коммунальных отходов и иные потребности), а также движимые вещи, созданные (создаваемые) или приобретенные для деятельности садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; земельные участки общего назначения - земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования, предусмотренные утвержденной документацией по планировке территории и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) предназначенные для размещения другого имущества общего пользования.

Постановление Правительства МО от 20.12.2004 N 778/50 (ред. от 31.07.2024) "Об утверждении Программы Правительства адрес "Развитие газификации в адрес до 2031 года", утверждена программа Правительства адрес "Развитие газификации в адрес до 2031 года".

Проектирование системы газораспределения осуществляется в соответствии с градостроительной документацией и Генеральной схемой газоснабжения адрес на период до 2030 года. По объектам Программы осуществляется проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и (или) проведение экспертизы (проверки) сметной стоимости. 

Согласно пункта 5 Постановления Правительства МО от 20.12.2004 г., перечни мероприятий по газификации адрес, по социальной газификации населенных пунктов (без учета территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ) и социальной газификации котельных общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций и медицинских организаций, расположенных на территории адрес, без привлечения средств граждан и организаций, по строительству газопроводов-связок и ГРС в целях обеспечения возможности технологического присоединения объектов капитального строительства, по увеличению пропускной способности газораспределительной системы, по созданию условий для обеспечения развития газоснабжения земельных участков для реализации инвестиционных проектов на территории адрес, по созданию газопроводов-источников для объектов теплоэнергетики, использующих прочие виды топлива, в рамках решения проблем неэффективного теплоснабжения на территории адрес, по газификации населенных пунктов, строительство газопроводов-источников, к которым запланировано в рамках Программы развития газоснабжения и газификации адрес на период 2021-2025 годов, реализуемой за счет инвестиций ПАО "Газпром", по оформлению в установленном законодательством Российской Федерации порядке объектов системы газоснабжения, обладающих признаками бесхозяйной вещи приведены в приложении к Программе. 

Постановление Правительства МО от 31.07.2024 N 783-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства адрес от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства адрес "Развитие газификации адрес до 2030 года", утверждены изменения, в постановление Правительства адрес от 20.12.2004 N 778/50 "Об утверждении Программы Правительства адрес "Развитие газификации в адрес до 2030 года" изменено наименование слова "до 2030 года" заменить словами "до 2031 года". 

Порядок подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования, проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства, в том числе сети газораспределения к другим сетям газораспределения утвержден Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547.

Постановлением Правительства адрес от 23.01.2025 года № 45-ПП внесены изменения в программу социальной газификации. Срок окончания мероприятий запланирован на декабрь 2025 года (пункт 89840) Подобъектного плана – графика догазификации, являющегося приложением к Разделу 2 Приложения к Программе Правительства адрес «Развитие газификации в адрес до 2035 года».

Судом установлено, что ФИО1 является собственником земельного участка, расположенного по адресу: адрес, Наро – адрес, участок № 688, с кадастровым номером 50:26:0110302:376.

30.08.2022 года между истцом и ответчиком был заключен договор о подключении техническом присоединении) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения в рамках догазификации, по условиям которого ответчик обязался осуществить подключение (техническое присоединение) газоиспользующего оборудования к сети газораспределения до границ земельного участка, расположенного по адресу: адрес, Наро – адрес, участок № 688, с кадастровым номером 50:26:0110302:376. 

В силу п. 3 договора срок исполнения по подключению и пуску марка автомобиля установлен 547 дней со дня заключения договора.

До настоящего времени обязательства по договору ответчиком не исполнены, что им не оспаривалось в ходе рассмотрения дела.

Разрешая спор, оценив представленные и исследованные доказательства по делу, суд приходит к выводу, что требования истца об обязании ответчика исполнить обязательства по договору удовлетворению не подлежат, поскольку в настоящем случае правоотношения сторон по делу возникли в связи исполнением безвозмездного договора на проведение мероприятий по догазификации, предусмотренной программой Правительства адрес "Развитие газификации в адрес до 2031 года", утвержденной Постановлением Правительства адрес от 20.12.2004 N 778/50 (с последующими изменениями и дополнениями). От исполнения обязательств по договору ответчик не уклоняется, подтверждает их наличие и намерение исполнить свои обязательства в соответствии с требованиями, установленными программой социальной газификации, которые, в силу ст. 426 ГК РФ, являются обязательными для сторон. Ответчик является исполнителем программы социальной газификации, а государственным заказчиком которой является Министерство энергетики адрес, то на эти правоотношения действие Закона РФ "О защите прав потребителей" не распространяется.

В связи с изложенным, требования истца о взыскании компенсации морального вреда на основании Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей", а также взыскании неустойки, которая по своей правовой природе является мерой ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, направленной на восстановление нарушенного права, штрафа, не подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении исковых требований ФИО1 к адрес об обязании выполнить условия договора, взыскании неустойки, компенсации морального вреда и штрафа отказать.

Решение суда может быть обжаловано в Московский городской суд через Гагаринский районный суд адрес в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Решение составлено в окончательной форме 30.07.2025.

Судья А.А. Голубкова