Дело №2а-261/2021

68RS0001-01-2020-006037-87

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

02 марта 2021 года г. Тамбов

Октябрьский районный суд г. Тамбова в составе: председательствующего судьи Заболотниковой О. А.

при секретаре Малахове М. А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению прокурора Пичаевского района Тамбовской области о признании незаконным бездействия ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения ремонтных работ автомобильной дороги, о возложении обязанности на ТОГКУ «Тамбовавтодор» по проведению капитального ремонта дорожного полотна участка автодороги,

У С Т А Н О В И Л :

Прокурор Пичаевского г. Тамбова Тамбовской области обратился в суд с административным исковым заявлением о признании незаконным бездействие ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения ремонтных работ автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный № № в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200), о возложении обязанности на ТОГКУ «Тамбовавтодор» организовать ремонт участка дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный № № в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля» в срок до ДД.ММ.ГГГГ.

В обоснование требований административный истец указал, что прокуратурой Пичаевского района проведена проверка по обращению гражданина ФИО2 о ненадлежащем состоянии автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района.

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что при эксплуатации и содержании автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» в границах 

<

адрес> допускаются нарушения законодательства о безопасности дорожного движения.

Так, согласно акту выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), составленному 30.09.2020 ИДПС МО МВД России «Моршанский», проезжая часть автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» имеет многочисленные просадки, выбоины, разрушения, превышающие требования «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Согласно информации МО МВД России «Моршанский» от 15.10.2020 № 21120 средняя интенсивность движения по автомобильной дороге составляет 450 авт/сутки, при этом по данной автомобильной дороге проходит маршрут школьного автобуса МБОУ «Пичаевская СОШ».

В соответствии с дополнительной информацией МО МВД России «Моршанский» на автомобильной дороге установлены дорожные знаки: 1.16 «Неровная дорога», 3.24 «Ограничение максимальной скорости» и 6.2 «Рекомендуемая скорость». Также указано о невозможности безопасного движения с максимальной разрешенной скоростью для движения вне населенного пункта на данной автомобильной дороге.

Согласно информации МБОУ «Пичаевская СОШ» по автомобильной дороге «Моршанск-Пичаево» проходит маршрут школьного автобуса «Кутли - Байловка - 

<

адрес>». Состояние автомобильной дороги не позволяет соблюдать временные нормативы доставки детей в МБОУ «Пичаевская СОШ», а также приводит к износу эксплуатируемого автобуса.

Согласно информации ТОГБУЗ «Пичаевская ЦРБ» в текущем году для оказания медицинской помощи в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ» было направлено более 120 пациентов. При этом состояние автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» создает опасность для жизни здоровья пациентов при их транспортировке в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ». Так, во время транспортировки больных возникает необходимость проводить инфузионную терапию, реанимационные мероприятия, что при данном состоянии автомобильной дороги невозможно. Кроме того, ненадлежащее состояние дороги увеличивает время транспортировки пациентов, что также создает дополнительную угрозу для их жизни и здоровья.

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 5 октября 2009 г. N 1177 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Тамбовской области с присвоением идентификационных номеров» автодороге «Моршанск-Пичаево» присвоен идентификационный № №.

Частью 2 статьи 15 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установлено, что осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения обеспечивается уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Постановлением администрации Тамбовской области от 14.06.2011 N642 «О создании Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Тамбовавтодор» для реализации полномочий Тамбовской области в сфере организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) создано ТОГКУ «Тамбовавтодор».

В соответствии с п. 7 указанного постановления финансирование расходов на обеспечение функционирования Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Тамбовавтодор» осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

Устав ТОГКУ «Тамбовавтодор» утвержден приказом Управления транспорта и автомобильных дорог Тамбовской области от 16.07.2012 № 555 и размещен в открытом доступе на сайте ТОГКУ «Тамбовавтодор».

В соответствии с п. 2.1. Устава ТОГКУ «Тамбовавтодор» целью создания учреждения является обеспечение реализации полномочий Тамбовской области в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Пунктом 2.2. Устава ТОГКУ «Тамбовавтодор» предусмотрено, что для достижения цели, указанной в п. 2.1. настоящего устава, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

2.2.1. организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в том числе:

организация работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с утверждёнными программами, а также работ по контролю качества и своевременности их выполнения;

проведение технического обследования, испытания и паспортизации автомобильных дорог и сооружений на них, осуществление контроля за их техническим состоянием и подготовка предложений для планирования капитального ремонта, ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

В силу приказа Комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 15.07.2011 № 586 «О закреплении имущества, являющегося государственной собственностью Тамбовской области, за ТОГКУ «Тамбовавтодор» на праве оперативного управления» в перечень имущества, закрепленного за ТОГКУ «Тамбовавтодор», включена автомобильная дорога «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (п. 81).

На основании вышеизложенного комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Моршанск-Пичаево» относится к обязанности ТОГКУ «Тамбовавтодор».

Согласно акту о приеме-передаче объекта основных средств от 15.07.2011 № 225 автомобильная дорога «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района введена в эксплуатацию 01.01.1978 года.

При этом согласно информации ТОГКУ «Тамбовавтодор» на основании государственного контракта от 30.05.2017 № заключенного с ООО «Бондарская ДСПМК» осуществлен ремонт участка общей протяженностью 2 км 200 м., при запланированном ремонте с км 28+200 - км 38+200 (информация о контракте и документация размещена в открытом доступе на сайте «госзакупки» - ИКЗ №).

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.05.2018 № 1 к указанному государственному контракту срок выполнения работ был продлен до 1 августа 2020 года.

Несмотря на продление контракта ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключено дополнительное соглашение от 15.02.2019 № 2 согласно которому анализируемый контракт был расторгнут.

Согласно информации ТОГКУ «Тамбовавтодор» контакт был расторгнут на основании постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N 213 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», которым из перечня мероприятий был исключен ремонт автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» км 28+200 - км 38+200.

Таким образом, контракт был расторгнут до внесения соответствующих изменений в постановление администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 

<

адрес>» в отсутствие законных оснований для этого, в результате чего не был осуществлен ремонт автомобильной дороги. Каких либо - действий к понуждению подрядчика исполнить контракт надлежащим образом в период его действия ТОГКУ «Тамбовавтодор» не предпринималось, при этом авансирование работ не предусматривалось, и у подрядчика не имелось оснований к неисполнению контракта.

Бездействие ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения надлежащих ремонтных работ автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный № № в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) нарушает права неопределенного круга лиц на безопасное передвижение, в том числе права несовершеннолетних учащихся МБОУ «Пичаевская СОШ», и ставит под угрозу жизнь лиц, которым требуется срочная медицинская помощь в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

В ходе рассмотрения дела административный истец – прокурор Пичаевского района Тамбовской области Колдашов В. А. уточнил исковые требования, просил суд признать незаконным бездействие ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения ремонтных работ автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный № №) в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200), возложить обязанность на ТОГКУ «Тамбовавтодор» организовать капитальный ремонт участка дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный № №) в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) в срок до 01.09.2021, указав, что в материалы дела был приобщен акт обследования автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево», согласно выводам которого на данной дороге имеются деформации устранимые лишь путем проведения капитального ремонта.

В судебном заседании заместитель прокурора Пичаевского района Тамбовской области Шарлаимов М. А. уточненные административные исковые требования поддержал.

В судебном заседании представитель административного ответчика ТОГКУ «Тамбовавтодор» ФИО5 административные исковые требования, с учетом уточнений, не признал, указал, что согласно Федерального закона №263-ФЗ и 

<

адрес> №72-ФЗ от 03.11.2011г. проведение ремонтных работ без включения дороги в Государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства 

<

адрес>» невозможно по причине отсутствия собственных денежных средств у ТОГКУ «Тамбовавтодор». Финансирование деятельности учреждения осуществляет согласно п. 5.5.2 Устава – Управление транспорта и автомобильных дорог. ТОГКУ «Тамбовавтодор» не бездействовало, поскольку 21.10.2019г. был заключен контракт на содержание дороги, который действует до октября 2021г., также в Управление транспорта и автомобильных дорог направлялись заявки на выделение денежных средств на ремонт автодороги. Кроме того, срок проведения капитального ремонта, указанный в иске прокурором, является неисполнимым.

В судебном заседании представитель заинтересованного лица Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области ФИО6 административные исковые требования не признал, указав, что проведение ремонтных работ без включения дороги в Государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» невозможно по причине отсутствия собственных денежных средств у ТОГКУ «Тамбовавтодор». 

Заинтересованные лица – представители МОМВД России «Моршанский», ООО «Бондарская ДСПМК» надлежащим образом извещенные о дате и месте рассмотрения дела не прибыли, в представленном письменном заявлении просили рассмотреть дело без их участия, административные исковые требования поддержали. 

Выслушав мнение лиц, участвующих в деле, исследовав материалы дела в своей совокупности, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ст. 17 КАС РФ Верховный Суд Российской Федерации, суды общей юрисдикции рассматривают и разрешают административные дела, связанные с защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов организаций, а также другие административные дела, возникающие из административных или иных публичных правоотношений и связанные с осуществлением судебного контроля за законностью и обоснованностью осуществления государственных или иных публичных полномочий, за исключением дел, отнесенных федеральными законами к компетенции Конституционного Суда Российской Федерации, конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации и арбитражных судов.

В соответствии со ст. 218 КАС РФ гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной комиссии), должностного лица, государственного или муниципального служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо обязанности. 

Из материалов настоящего административного дела установлено и стороной административного ответчика не опровергнуто, что проезжая часть автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) имеет многочисленные просадки, выбоины, разрушения, превышающие требования «ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля».

Факт ненадлежащего состояния вышеуказанного участка автомобильной дороги подтвержден актом выявленных недостатков в эксплуатационном состоянии автомобильной дороги (улицы), составленным 30.09.2020 ИДПС МО МВД России «Моршанский», актом обследования автодороги от 16.11.2020г, представленными фотоматериалами. 

В соответствии со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации № 196-ФЗ от 10.12.1995 "О безопасности дорожного движения" ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов исполнительной власти.

Согласно п. 3.1.1 ГОСТ Р 50597-93 покрытие проезжей части не должно иметь просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств с разрешенной Правилами дорожного движения скоростью.

В силу п. 3.1.2 указанного ГОСТа предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным документам возлагается на лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог. 

В соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 5 октября 2009 г. N 1177 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения Тамбовской области с присвоением идентификационных номеров» автодороге «Моршанск-Пичаево» присвоен идентификационный № №

В силу приказа Комитета по управлению имуществом Тамбовской области от 15.07.2011 № 586 «О закреплении имущества, являющегося государственной собственностью Тамбовской области, за ТОГКУ «Тамбовавтодор» на праве оперативного управления» в перечень имущества, закрепленного за ТОГКУ «Тамбовавтодор», включена автомобильная дорога «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (п. 81).

Постановлением администрации Тамбовской области от 14 июня 2011 года № 642 "О создании Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Тамбовавтодор" для реализации полномочий Тамбовской области в сфере организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) создано ТОГКУ «Тамбовавтодор».

В соответствии с п. 7 указанного постановления финансирование расходов на обеспечение функционирования Тамбовского областного государственного казенного учреждения "Тамбовавтодор" осуществляется за счет средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год и плановый период.

В соответствии с п. 2.1. устава ТОГКУ «Тамбовавтодор» целью создания учреждения является обеспечение реализации полномочий Тамбовской области в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общегопользования регионального (межмуниципального) значения включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест).

Пунктом 2.2. устава ТОГКУ «Тамбовавтодор» предусмотрено, что для достижения цели, указанной в п. 2.1. настоящего устава, учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности: организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в том числе: организация работ по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог в соответствии с утверждёнными программами, а также работ по контролю качества и своевременности их выполнения; проведение технического обследования, испытания и паспортизации автомобильных дорог и сооружений на них, осуществление контроля за их техническим состоянием и подготовка предложений для планирования капитального ремонта, ремонта и реконструкции автомобильных дорог.

Пунктом п. 5.6 Устава определено, что при осуществлении права оперативного управления имуществом Учреждение обязано осуществлять капитальный и текущий ремонт имущества.

На основании вышеизложенного комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильной дороге «Моршанск-Пичаево» относится к обязанности ТОГКУ «Тамбовавтодор».

При этом согласно информации ТОГКУ «Тамбовавтодор» на основании государственного контракта от 30.05.2017 № заключенного с ООО «Бондарская ДСПМК» осуществлялся капитальный ремонт участка общей протяженностью 2 км 200 м., при запланированном ремонте с км 28+200 - км 38+200 (информация о контракте и документация размещена в открытом доступе на сайте «госзакупки» - ИКЗ №).

В соответствии с дополнительным соглашением от 08.05.2018 № 1 к указанному государственному контракту срок выполнения работ был продлен до 01 августа 2020 года.

15.02.2019г. ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключено дополнительное соглашение № 2, согласно которому вышеуказанный контракт был расторгнут.

Согласно информации ТОГКУ «Тамбовавтодор», контакт был расторгнут на основании постановления администрации Тамбовской области от 06.03.2019 N 213 «О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области», которым из перечня мероприятий был исключен ремонт автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» км 28+200 - км 38+200.

Вместе с тем, контракт был расторгнут до внесения соответствующих изменений в постановление администрации Тамбовской области от 20.06.2013 N 640 «Об утверждении государственной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» в отсутствие законных оснований для этого, в результате чего не был осуществлен ремонт автомобильной дороги. Каких-либо действий к понуждению подрядчика исполнить контракт надлежащим образом в период его действия ТОГКУ «Тамбовавтодор» не предпринималось, при этом авансирование работ не предусматривалось, и у подрядчика не имелось оснований к неисполнению контракта.

Бездействие ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения надлежащих ремонтных работ автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный номер 68 ОП М3 68Н-037) в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) нарушает права неопределенного круга лиц на безопасное передвижение, в том числе права несовершеннолетних учащихся МБОУ «Пичаевская СОШ», и ставит под угрозу жизнь лиц, которым требуется срочная медицинская помощь в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ».

21.10.2019г. ТОГКУ «Тамбовавтодор» заключен государственный контракт № с ООО «Бондарская ДСПМК» по выполнению работ по содержанию автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) в состоянии, обеспечивающем безопасность движения автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них.

Вместе с тем в материалы дела был приобщен акт обследования автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» от 16.11.2020г, согласно выводам которого на данной дороге имеются деформации, устранимые лишь путем проведения капитального ремонта. 

Также в материалы дела представлена проектная документация ООО «АВТОРОДИНЖИРИНГ» на капитальный ремонт автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (км 28+200 - км 38+200), выполненная по заказу ТОГКУ «Тамбовавтодор».

Таким образом, в соответствии с требованиями, установленными государственными стандартами, суд приходит к выводу, что имеющиеся на участке автодороги деформации устранимы лишь путем проведения капитального ремонта, в связи с чем уточненные административные исковые требования подлежат удовлетворению.

Из представленных представителем ответчика документов усматривается, что после поступления административного искового заявления в суд, 17 ноября 2020 года ТОГКУ «Тамбовавтодор» направлено ходатайство ответственному исполнителю госпрограммы главному распорядителю бюджетных средств ТОГКУ «Тамбовавтодор» Управлению автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области о включении в Государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2021 год заявку на проведение ремонта автодороги «Моршанск-Пичаево» в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200).

Как установлено при рассмотрении дела из пояснений представителя Управления автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области отказано ТОГКУ «Тамбовавтодор» во включении в Государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» заявки на проведение ремонта вышеуказанной автодороги по причине отсутствия необходимых денежных средств. 

Вместе с тем, отсутствие достаточного финансирования на проведение требуемых ремонтных работ, не включение заявки на проведение ремонта спорной автомобильной дороги в Государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» не освобождает административного ответчика от принятия необходимых мер по предотвращению нарушений требований дорожной безопасности и надлежащего исполнения уставных целей по организации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог. 

Что касается довода представителя ответчика о неисполнимости решения суда в срок до 01.09.2021г. ввиду отсутствия в бюджете города на 2021 год денежных средств, то действующее законодательство не ограничивает реализацию возложенных обязанностей финансовой возможностью. Отсутствие финансирования для проведения соответствующих работ не освобождает административного ответчика от обязанности соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения, задачами которого являются охрана жизни, здоровья и имущества граждан, их прав и законных интересов, а также защита интересов общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий.

Руководствуясь ст. ст. 175-180 КАС РФ, суд,

Р Е Ш И Л :

Уточненные административные исковые требования прокурора Пичаевского района Тамбовской области удовлетворить. 

Признать незаконным бездействие ТОГКУ «Тамбовавтодор», выразившееся в не организации проведения ремонтных работ автомобильной дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный номер 68 ОП М3 68Н-037) в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200).

Обязать ТОГКУ «Тамбовавтодор» организовать капитальный ремонт участка дороги «Моршанск-Пичаево» (идентификационный номер 68 ОП М3 68Н-037) в границах Пичаевского района (км 19+000 - км 38+200) в срок до 01.09.2021г.

Об исполнении решения уведомить суд в течение 1 месяца со дня исполнения.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по административным делам Тамбовского областного суда через Октябрьский районный суд г. Тамбова в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено 15 марта 2021 года

Судья Заболотникова О.А.